Дело № 2-1745/2023

Номер строки статотчета 2.171

УИД 02RS0003-01-2023-001627-68

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 сентября 2023 года село Майма 

Майминский районный суд Республики Алтай в составе судьи Бируля С.В., при секретаре ФИО, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску КИ к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении выполнить обязательства, взыскании морального вреда, неустойки,

установил:

КИ обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки в размере 1800 рублей, компенсацию морального вреда 50000 рублей, указывая, что 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между истцом и ответчиком заключен договор технологического присоединения, по которому ответчик обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель-оплатить расходы, до настоящего времени ответчик свои обязательства не выполнил. 

В судебном заседании истец и его представитель на иске настаивали, представитель ответчика в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о его времени и месте, о причинах неявки не сообщил, поэтому по правилам ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие. 

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Согласно п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

Из материалов дела следует, что между ПАО «Россети Сибирь» и КИ заключен договор 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.3201.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предметом которого является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого/дачного дома, который будет располагаться по адресу 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> Республики Алтай, Узнезинское сельское поселение, 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, к.н земельного участка 04:05:030402:919. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора ( Р1) 

В обязанности сетевой организации ( ПАО Россети Сибирь) входит надлежащее исполнение обязательств по договору по техприсоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; проведение осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, обеспечение установки и допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 дней со дня уведомления заявителя о выполнении им техусловий осуществить проверку выполнения техусловий заявителем, провести обследование присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее трех рабочих дней после проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя Акт о выполнении технических условий, уведомить об этом заявителя. В обязанности заявителя входит выполнение обязательств по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию. Размер платы за технологическое присоединение составляет 45000 рублей. ( Р.2). Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения к договору ( п.21). 

Оплата по договору истцом произведена 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, что следует из справки по операции Сбербанк онлайн. 

Согласно технических условий 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя –жилой дом в Узнезинском сельском поселении 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>. Сетевая организация обязуется запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ, запроектировать и построить ЛЭП 10кВ, выполнить монтаж комплекса коммерческого учета. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:0,4кВ.

До настоящего времени обязательства, предусмотренные договором, ответчик не выполнил, что не оспаривается им в отзыве на иск, поэтому на него следует возложить обязанность по исполнению договора о технологическом присоединения. 

Истец уведомил ответчика о выполнении с его стороны технических условий 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

В силу статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом объема работ, подлежащих выполнению ответчиком, суд находит разумным дать ему срок для выполнения действий по технологическому присоединению – три месяца со дня вступления решения в законную силу.

Согласно ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в частности, ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

В соответствии с п. 17 договора заключенного между сторонами договора о технологическом присоединении, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы-40505,84 рублей, за каждый день просрочки, за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4кВ и ниже. Таким образом, ограничение распространяется только на заявителей, но не на сетевую организацию.

Истец просит взыскания неустойки за период с 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> по 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Ответчик был обязан выполнить условия договора о техприсоединении до 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> ( 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> + 6 месяцев).

Расчет неустойки, произведенной истцом, суд находит верным и производит её взыскание в требуемом размере. 

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен для удовлетворения бытовых нужд ( строительство жилого дома) т.е. в личных целях, следовательно, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ "О защите прав потребителей".

Поскольку специальным законодательством - Федеральным законом "Об электроэнергетике" и Постановлением Правительства РФ N 861 вопросы компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя-гражданина не урегулированы, к спорным правоотношениям применимы положения ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание длительность нарушения прав истца как потребителя, необходимость разрешать договорные отношения в судебном порядке, с учетом степени вины нарушителя, требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 5000 рублей.

Истец освобожден от оплаты госпошлины при подаче иска в суд, исходя из предмета заявленных требований неимущественного характера, руководствуясь 1 ст. 103 ГПК РФ, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в доход местного бюджета МО « 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>» государственной пошлины. 

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.3201.22, заключенного между КИ и ПАО «Россети Сибирь», осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке в 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Узнезинское сельское поселение, 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, к.н земельного участка 04:05:030402:919, в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу КИ договорную неустойку за период с 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> по 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в размере 1800 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей, во взыскании компенсации морального вреда в сумме 45000 рублей отказать. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» госпошлину в доход бюджета МО «

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>» в размере 700 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Судья Бируля С.В.

Решение изготовлено 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>