... Дело ...

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

... Вахитовский районный суд ... в составе: председательствующего судьи Г.Ф. Аюповой, при секретаре ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 ФИО6 к ФИО10 ФИО5 о взыскании суммы, уплаченной по договору, неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с указанным иском к ФИО2, указав в обоснование требований, что ... между истцом и ответчиком был заключен договор подряда ....

Согласно пункта 1.1 договора, по настоящему договору подрядчик выполняет ремонт квартиры из материала заказчика в квартире жилого дома по ..., а заказчик оплачивает и принимает выполненные работы согласно техническому заданию, которое является неотъемлемой частью договора.

В рамках указанного договора согласно техническому заданию ответчик взял на себя обязательства произвести:

1. Демонтажные работы с выносом мусора из квартиры.

2. Штукатурка стен с дальнейшей шпатлёвкой и оклейкой обоев. 

3. Замена систем отопления на кухне, в зале и санузле. 

4. Замена системы водоснабжения холодной и горячей воды и канализации в санузле и кухни с установкой водяных счётчиков и частичной заменой стояка канализации.

5. Установка сантехники в санузлах и водонагревателя электрического. 

6. Замена электрической проводки по всей квартире, автоматов и электросчётчика с заменой вводного кабеля в квартиру. 

7. Выравнивание пола с помощью наливного пола по площади квартиры, с гидроизоляцией, утеплением и обустройством стяжки балкона и настила линолеума с плинтусами.

8. Монтаж натяжного потолка по всей площади квартиры.

9. Укладка керамической плитки в санузле.

10. Установка светильников, включателей и розеток в указанных заказчиком местах, согласно плана квартиры.

11. Установка межкомнатных дверей.

12. Монтаж потолка и отделка балкона.

В соответствии с пунктом 2 договора, стоимость работ согласовывается сторонами по предварительному соглашению сторон. Предварительная стоимость работ по настоящему договору составляет 170 000руб. согласно расчету. При подписании договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 25% от общей стоимости договора. Дальнейшая оплата производится по факту выполненных работ согласно техническому заданию в течение трех банковских дней после подписания актов приемки этапов работ.

В счет предоплаты истцом было оплачено ответчику ....

Согласно пункта 3 договора срок выполнения работ – начало работ: ..., окончание работ – ..., в случае своевременной поставки строительного материала заказчиком.

Несмотря на истечение установленного договором срока, ответчиком работы в полном объёме не выполнены, а выполненные работы осуществлены некачественно, выявлены недостатки. Более того, в настоящее время работы на объекте не производятся, подрядчик на объект не является, на телефонные звонки и иные сообщения не отвечает, выполненные работы не сдаёт, недостатки не устраняет.

Согласно акту осмотра от ... при осмотре квартиры выявлены недостатки в произведенных ответчиком работах:

- в помещении ... (зал): потолочные плинтусы не состыкованы, имеются перекосы, щели, стены не выровнены, имеется волнистость, кривизна свыше 2 мм, уровень наливного пола не соответствует уровню в других помещениях квартиры.

- в помещении ... (кухня): уровень наливного пола не соответствует уровню в других помещениях квартиры, вентиляционное отверстие не выровнено

- в помещении ... (ванная комната): некачественно обработаны швы, требуется их затирка, имеется протечка смесителя, водонагреватель с отклонением от вертикальной оси, В помещении ... (балкон): стены не выровнены, штукатурные работы не соответствуют требованиям по качеству.

Перечень работ, которые не выполнены ответчиком являются – выравнивание пола по всей квартире, монтаж плинтусов напольных, монтаж линолеума, устройство гидроизоляции на балконе, монтаж дверей, монтаж батарей отопления, окраска труб отопления, монтаж розеток, отделка дверного проема в коридоре.

Согласно отчету ..., составленному ООО «Азимут-НК» по инициативе истца, стоимость невыполненных работ составила 42 306руб., стоимость работ по устранению дефектов от некачественно выполненного ремонта - 57 811 руб., стоимость поврежденного материала 23 003 руб. 

... истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, которая оставлена без ответа.

В связи с указанным истец просит взыскать с ответчика ФИО2 убытки в связи с некачественным выполнением работ в сумме ...., неустойку в сумме ...., расходы по оплате услуг оценки в сумме 12 000руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 12 000руб., почтовые расходы в сумме 394,30руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме ....

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, должным образом извещался о времени и месте рассмотрения дела.

С учетом мнения представителя истцовой стороны дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу частей 1 и 2 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Судом установлено, что... между истцом и ответчиком был заключен договор подряда ....

Согласно пункту 1.1 договора, по настоящему договору подрядчик выполняет ремонт квартиры из материала заказчика в квартире, расположенной по адресу: .... Заказчик со своей стороны оплачивает и принимает выполненные работы согласно техническому заданию, которое является неотъемлемой частью договора.

В рамках указанного договора согласно техническому заданию ответчик взял на себя обязательства произвести:

13. Демонтажные работы с выносом мусора из квартиры.

14. Штукатурка стен с дальнейшей шпатлёвкой и оклейкой обоев. 

15. Замена систем отопления на кухне, в зале и санузле. 

16. Замена системы водоснабжения холодной и горячей воды и канализации в санузле и кухни с установкой водяных счётчиков и частичной заменой стояка канализации.

17. Установка сантехники в санузлах и водонагревателя электрического. 

18. Замена электрической проводки по всей квартире, автоматов и электросчётчика с заменой вводного кабеля в квартиру. 

19. Выравнивание пола с помощью наливного пола по площади квартиры, с гидроизоляцией, утеплением и обустройством стяжки балкона и настила линолеума с плинтусами.

20. Монтаж натяжного потолка по всей площади квартиры.

21. Укладка керамической плитки в санузле.

22. Установка светильников, включателей и розеток в указанных заказчиком местах, согласно плана квартиры.

23. Установка межкомнатных дверей.

24. Монтаж потолка и отделка балкона.

В соответствии с пунктом 2 договора, стоимость работ согласовывается сторонами по предварительному соглашению сторон. Предварительная стоимость работ по настоящему договору составляет 170 000руб. согласно расчету. При подписании договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 25% от общей стоимости договора. Дальнейшая оплата производится по факту выполненных работ согласно техническому заданию в течение трех банковских дней после подписания актов приемки этапов работ.

Во исполнение договора истец передал ответчику денежные средства, что подтверждены распиской, в сумме 170 000руб.

Согласно пункту 3 договора срок выполнения работ – начало работ: ..., окончание работ – ..., в случае своевременной поставки строительного материала заказчиком.

Согласно пояснениям истцовой стороны, работы ответчиком в установленный договором срока не выполнены в полном объеме, а выполненные работы осуществлены некачественно, выявлены недостатки. В настоящее время работы на объекте не производятся.

Согласно акту осмотра от ... при осмотре квартиры выявлены недостатки в произведенных ответчиком работах:

- в помещении ... (зал): потолочные плинтусы не состыкованы, имеются перекосы, щели, стены не выровнены, имеется волнистость, кривизна свыше 2 мм, уровень наливного пола не соответствует уровню в других помещениях квартиры.

- в помещении ... (кухня): уровень наливного пола не соответствует уровню в других помещениях квартиры, вентиляционное отверстие не выровнено

- в помещении ... (ванная комната): некачественно обработаны швы, требуется их затирка, имеется протечка смесителя, водонагреватель с отклонением от вертикальной оси, В помещении ... (балкон): стены не выровнены, штукатурные работы не соответствуют требованиям по качеству.

Перечень работ, которые не выполнены ответчиком являются – выравнивание пола по всей квартире, монтаж плинтусов напольных, монтаж линолеума, устройство гидроизоляции на балконе, монтаж дверей, монтаж батарей отопления, окраска труб отопления, монтаж розеток, отделка дверного проема в коридоре.

Согласно отчету ..., составленному ООО «Азимут-НК» по инициативе истца, стоимость невыполненных работ составила 42 306руб., стоимость работ по устранению дефектов от некачественно выполненного ремонта - 57 811 руб., стоимость поврежденного материала 23 003 руб. 

... истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, которая оставлена без ответа.

Суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

С учетом установленного, принимая во внимание то, что ответной стороной доказательств иному не представлено, суд полагает факт неисполнения обязательств ответной стороной в указанном истцом объеме установленным. 

При изложенном, с ФИО2 в пользу ФИО1 подлежит взысканию денежная сумма в виде убытков в сумме 80 814руб.

Согласно пункту 8.1 договора, подрядчик при нарушении срока оказания выполненных работ по вине подрядчика уплачивает заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1 договора, за каждый день просрочки выполненных работ

Соответственно, суд находит требования ФИО1 о взыскании с ответчика неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору за период с ... по ... обоснованными. С учетом установленного, суд полагает расчет истцовой стороны неустойки по истечении срока исполнения досудебной претензии допустимым, принятый период обоснованным. При изложенном, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка в размере 170 000руб.

Согласно пункту 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Руководствуясь указанной статьей, с учетом сложности рассматриваемого дела, степени участия и временных затрат со стороны представителя, суд считает возможным удовлетворить требования истца об оплате услуг представителя в сумме 7 000руб. 

В соответствие со статьей 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг оценки в сумме 1200руб., почтовые расходы в сумме 394,30руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 708руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО10 ФИО7 в пользу ФИО4 ФИО8 убытки в сумме ...., неустойку в сумме ...., расходы по оплате услуг оценки в сумме ...., расходы по оплате услуг представителя в сумме ..., почтовые расходы в сумме ...., расходы по оплате государственной пошлины в сумме .... 

ФИО4 ФИО9 в остальной части иска отказать. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

...

...

Судья Г.Ф. Аюпова