УИД № 65RS0006-01-2024-000375-69

Дело № 2-21/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

19 февраля 2025 года г. Курильск

Курильский районный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Якина С.А.,

при секретаре судебного заседания Наминовой А.В.,

с участием:

представителя истца помощника прокурора Курильского района Романовой А.С.,

представителя ответчика АО «Россети Мобильные ГТЭС» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Курильского района в интересах ФИО1 к АО «Россети Мобильные ГТЭС» о взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Курильского района, действуя в интересах инвалида 1 группы ФИО1, обратился в суд с иском, согласно которому просил взыскать с АО «Россети Мобильные ГТЭС» в пользу ФИО1, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, неустойку в размере 8306 рублей 25 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Курильского района Романова А.С. поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика ФИО2 исковые требования не признал.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте его проведения своевременно и надлежащим образом.

Заслушав объяснения представителей сторон, ознакомившись с письменными доказательствами, суд пришел к следующему.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

В соответствии с абз. 18 п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

На основании абз. 15 п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил (п. 3 Правил).

Подпунктом «в» п. 7 Правил предусмотрено, что процедура технологического присоединения включает выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

Из подп. «б» п. 16 Правил следует, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении условия о том, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ч. 1 ст. 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ).

Судом установлено, что ФИО1 с 11 января 1996 года является собственником жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № (право собственности зарегистрировано в Росреестре 18 декабря 2014 года), а с 3 августа 1995 года - земельного участка по тому же адресу с кадастровым номером № (право собственности зарегистрировано в Росреестре 5 апреля 2005 года).

24 ноября 2022 года АО «Мобильные ГТЭС» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключили договор № 8И/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,22 кВ жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом того, что класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, должен составлять 0,22 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (п. 2). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (п. 5). Размер платы за технологическое присоединение составляет 7500 рублей, в том числе НДС 20% - 1250 рублей (п. 10). Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12).

В тот же день ответчиком составлены технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 к договору).

1 июня 2023 года ФИО1 внес на счет ответчика частичную оплату по договору в сумме 1125 рублей. Поступление указанных денежных средств на счет ответчика подтверждается приходным кассовым ордером от 1 июня 2023 года № И00000000095.

1 сентября 2023 года ФИО1 обратился в АО «Россети Мобильные ГТЭС» с заявлением о корректировке технических условий 8И/22 от 22 ноября 2022 года, просив изменить уровень напряжения до 0,4 кВ питающей сети жилого дома.

7 сентября 2023 года стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору № 8И/22, по которому сетевая организация взяла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ жилого дома. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, должен составлять 0,4 кВ (п. 1). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения дополнительного соглашения (п. 2).

В тот же день ответчиком составлены изменения № 1 в технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 к дополнительному соглашению).

11 октября 2024 года сторонами подписаны акт № 8И/22 допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, акт № 8И/22 об осуществлении технологического присоединения, акт № 8И/22 о выполнении технический условий.

14 ноября 2024 года АО «Россети Мобильные ГТЭС» выставило ФИО1 счет на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям № 1-14-11-24 в сумме 6375 рублей, который оплачен ФИО6 15 ноября 2024 года.

Согласно преамбуле к Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Принимая во внимание, что возникшие между сторонами правоотношения вытекают из оказания услуг, ФИО1 выступает заказчиком услуги по технологическому присоединению, суд считает возможным применение к регулированию таких отношений положений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Как разъяснено в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, исходя из существа правоотношений сторон, именно на ответчика как исполнителя возлагается обязанность доказать факт надлежащего исполнения обязательства по договору, в том числе момент надлежащего исполнения обязательства.

Учитывая то, что ответчик взятые на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств исполнил лишь 11 октября 2024 года, то есть спустя 1 год 1 месяц со дня заключения дополнительного соглашения от 7 сентября 2023 года, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком условий договора в части срока его исполнения.

В силу ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Учитывая, что в ходе рассмотрения дела установлено нарушение прав истца как потребителя, что выразилось в нарушении ответчиком срока исполнения обязательств по договору, принимая во внимание данные о личности истца, обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

Федеральный законом «Об электроэнергетике» в ст. 26 установление порядка технологического присоединения, в том числе вопросы ответственности сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, отнесено к полномочиям Правительства Российской Федерации.

В соответствии с абз. 3 подп. «в» п. 16 вышеназванных Правил договор должен содержать следующие существенные условия, в частности положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения составляет 7500 рублей, таким образом, размер неустойки при нарушении сетевой организацией срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором в этом случае в соответствии с приведенным положением Правил составляет 18,75 руб. (7500*0,25%) за каждый день просрочки.

С учетом этого размер неустойки за период просрочки с 8 января 2024 года (день, следующий за днем истечения срока оказания услуг по дополнительному соглашению) по 10 октября 2024 года (день, предшествующий дню полного исполнения ответчиком обязательств по договору с учетом дополнительного соглашения) (276 дней) составляет 5175 рублей (276*18,75)

Согласно п. 6 ст. 13 Закона О защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из содержания приведенной нормы права следует, что в пользу истца с ответчика подлежит взысканию сумма штрафа в размере 7587 рублей 50 копеек (10 000 + 5175)/2).

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исходя из указанного, с ответчика подлежит взысканию в бюджет Курильского муниципального округа государственная пошлина в размере 4000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Курильского района удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Россети Мобильные ГТЭС» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт гражданина серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, код подразделения 652-006) компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойку в размере 5175 рублей, штраф в размере 7587 рублей 50 копеек.

Взыскать с АО «Россети Мобильные ГТЭС» (ИНН 

<

***>) в бюджет Курильского муниципального округа государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Курильский районный суд Сахалинской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий С.А. Якин

Мотивированное решение суда составлено 24 февраля 2025 года.