Гр.дело № 2-1253/18

публиковать

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 мая 2018 г. г. Ижевск Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего – судьи Владимировой А.А., 

при секретаре – Кассихиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ТИКТАК» о расторжении договора подряда, взыскании суммы, 

у с т а н о в и л:

В суд обратился ФИО1 с иском к ООО «ТИКТАК» о расторжении договора подряда, взыскании суммы. В обоснование требований указал, что между ФИО1 (заказчик) и ООО «ТИКТАК» (подрядчик) 

<

дата> заключен договор подряда №, в соответствии с п.1.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и на основании согласованной сметной документации, в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в сметной документации (далее - работы), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с п.3.1.2 договора, подрядчик обязан приступить к выполнению работ по договору не позднее 5 (пяти) дней, с момента выполнения заказчиком своих обязательств по перечислению предоплаты, указанной в п.5.2. Срок выполнения всего объема работ с 

<

дата> по 

<

дата>.

Указанный в п.3.1.2 договора срок может быть увеличен в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком любых своих обязательств по договору (в том числе: обязательств по оплате работ, обязательств по предоставлению материалов, обязательств по приемке работ, и т.д.), и при согласовании сторонами дополнительного объема/перечня работ, выполняемого в рамках договора, а также при независящих от подрядчика, погодных условиях, при которых невозможно производить работы, требующие определенных температурно-влажностных условий.

Впоследствии, 

<

дата>, между заказчиком и поставщиком было заключено дополнительное соглашение№ к договору № от 

<

дата> (далее - Соглашение).

П.1 соглашения предусмотрено, что стороны согласны перенести срок строительства на весенний период года, и начать строительство с 

<

дата>. Либо в более ранний срок при благоприятных погодных условиях.

Согласно п.2 Соглашения подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кровли с фронтонами на зимний период, так же выполнить работы по заливке полов в бане при благоприятных погодных условиях (отсутствии устойчивых морозов). Так же закрыть полое пространство между первым венцом и фундаментом. Срок начала работ перенесен на 

<

дата>. Срок выполнения работ 

<

дата>.

В соответствии с п. 3 Соглашения Подрядчик обязуется выполнить монтаж бытовой комнаты на участке Заказчика до 

<

дата>.

Заказчик в срок выполнил свои обязательства по оплате работы, выполняемой по Договору подряда.

Вместе с тем, работы по договору № от 

<

дата> и дополнительному соглашению нему подрядчик в срок не исполнил.

Просит расторгнуть договор подряда № от 

<

дата>, заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 718 000 руб. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Представил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы и обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. Суду пояснил, что работы по договору, а именно строительству бани не выполнены, ответчик не приступил к выполнению работ, денежные средства истцу не возвращены. 

Представитель ООО «ТИКТАК» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. 

Дело, в соответствии с ч.4, ст.167 ГПК РФ, рассмотрено в отсутствие истца, ответчика надлежащим образом уведомленных о дате и времени судебного разбирательства.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, установил.

В судебном заседании установлено, что между ФИО1 (заказчик) и ООО «ТИКТАК» (исполнитель) заключен договор № от 

<

дата>., в соответствии с п.1.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и на основании согласованной сметной документации, в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в сметной документации (далее - работы), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с п.3.1.2 договора, подрядчик обязан приступить к выполнению работ по договору не позднее 5 (пяти) дней, с момента выполнения заказчиком своих обязательств по перечислению предоплаты, указанной в п.5.2. Срок выполнения всего объема работ с 

<

дата> по 

<

дата>.

Указанный в п.3.1.2 договора срок может быть увеличен в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком любых своих обязательств по договору (в том числе: обязательств по оплате работ, обязательств по предоставлению материалов, обязательств по приемке работ, и т.д.), и при согласовании сторонами дополнительного объема/перечня работ, выполняемого в рамках договора, а также при независящих от подрядчика, погодных условиях, при которых невозможно производить работы, требующие определенных температурно-влажностных условий.

<

дата>, между заказчиком и поставщиком было заключено дополнительное соглашение№ к договору № от 

<

дата> (далее - Соглашение).

Пунктом 1 соглашения предусмотрено, что стороны согласны перенести срок строительства на весенний период года, и начать строительство с 

<

дата>. Либо в более ранний срок при благоприятных погодных условиях.

Согласно п.2 Соглашения подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кровли с фронтонами на зимний период, так же выполнить работы по заливке полов в бане при благоприятных погодных условиях (отсутствии устойчивых морозов). Так же закрыть полое пространство между первым венцом и фундаментом. Срок начала работ перенесен на 

<

дата>. Срок выполнения работ 

<

дата>.

В соответствии с п. 3 Соглашения Подрядчик обязуется выполнить монтаж бытовой комнаты на участке Заказчика до 

<

дата>.

Общая стоимость всех работ, выполняемых подрядчиком по договору и согласованных в сметной документации, составляет 808 000 руб. (п.5.1. договора).

Заказчик обязуется в течение 1 рабочего дня с даты подписания договора оплатить подрядчику аванс в размере 240 000 руб. от общей стоимости работ, 320 000 руб. по выполнению подрядчиком 40% работ, 200 000 руб. по выполнению подрядчиком 80% работ, 48 000 руб. в течение 1 рабочего дня после подписания сторонами акта сдачи-приемки всего объема работ (п.5.2-5.4 договора).

Истцом ФИО1 уплачено ответчику 718 000 руб., что подтверждается квитанциями от 

<

дата> на сумму 240 000 руб., 

<

дата> на сумму 153 000 руб., 

<

дата> на сумму 320 000 руб., 

<

дата> на сумму 5 000 руб. 

Иных сведений о получении денежных средств по договору подряда в материалах дела не имеется.

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела.

Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

На основании ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Суд считает, что между ФИО1 (заказчик) и ООО «ТИКТАК» (исполнитель) заключен договор строительного подряда. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст.310 ч.1 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно ст. 28 ч.1 ФЗ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пояснений представителя истца, работы по строительству бани в срок до 

<

дата>. ответчиком не выполнены, то есть договор подряда ответчиком не исполнен. Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

Ответчиком не представлено в суд доказательств исполнения договора подряда от 

<

дата>.

Истцом заявлено требование о расторжении договора подряда и взыскании суммы. 

В соответствии со ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст. 452 ГК РФ).

Требование о расторжении договора подряда № от 

<

дата> и возврате денежных средств, ФИО1 направлено ответчику по почте 

<

дата>. 

В соответствии с изложенным, истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

В соответствии с изложенным, суд считает, что ООО «ТИКТАК» не исполнило надлежащим образом своих обязательств по договору подряда.

Поскольку работы в установленный договором подряда срок не выполнены, данное обстоятельство является существенным нарушением условий договора, в связи с чем, договор подряда № от 

<

дата> между ФИО1 и ООО «ТИКТАК» подлежит расторжению.

Суду не представлено доказательств возврата ответчиком ООО «ТИКТАК» истцу ФИО1 предварительно оплаченной суммы по договору подряда в общем размере 718 000 руб. 

В соответствии с изложенным, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму предварительно оплаченную по договору подряда в размере 718 000 руб.

Согласно ст. 13 п.6 ФЗ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом удовлетворены требования истца- потребителя на сумму 718 000 руб., в связи с чем штраф, предусмотренный п.6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей», должен составлять 359 000 руб.

Согласно ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Так как истец освобожден от уплаты госпошлины в соответствии со ст.333.36 ч.2 п.4 НК РФ при подаче в суд иска, в соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика в бюджет Муниципального образования «г. Ижевск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 10 380 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования ФИО1 к ООО «ТИКТАК» о расторжении договора подряда, взыскании суммы – удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда № от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ООО «ТИКТАК».

Взыскать с ООО «ТИКТАК» в пользу ФИО1 сумму по договору № от 

<

дата>. в размере 718 000 руб.; штраф в размере 359 000 руб.

Взыскать с ООО «ТИКТАК» в бюджет Муниципального образования «г. Ижевск» государственную пошлину в размере 10 380 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Первомайский районный суд г. Ижевска, УР. 

Мотивированное решение суда изготовлено 

<

дата>. 

Судья: А.А. Владимирова