Дело № 5-264/2024

УИД 75RS0001-02-2023-009220-61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

19 апреля 2024 года 

<

...> 

Судья Центрального районного суда г. Читы Маркова О.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.15.15.3 КоАП РФ, в отношении должностного лица – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, исполняющего обязанности министра - ФИО3, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ старшим инспектором Контрольно-счетной палаты РФ ФИО6 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.15.3 КоАП РФ, в отношении должностного лица – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта, исполняющего обязанности министра - ФИО3.

Собранные материалы по факту совершения ФИО1 административного правонарушения в соответствии с положениями ст. 28.8 КоАП РФ представлены на рассмотрение в судебном порядке. 

В судебное заседание ФИО3 не явился, о дате и времени судебного заседания извещен, в телефонограмме ссылаясь на занятость по работе, возражал относительно рассмотрения дела в его отсутствие, вместе с тем, с ходатайством об отложении в суд не обратился, доказательств уважительности причин, не позволивших участвовать в судебном заседании, не предоставил. Участвуя в судебных заседаниях ранее (27.03.2024, 12.04.2024), ФИО3 вину не признавал, пояснял, что Министерством отчеты направлялись в электронном виде своевременно в Росавиацию, тогда как в Росавиации отчеты утверждались позднее. В обоснование представил выписку о направлении отчетов.

Представитель Контрольно-счетной палаты РФ ФИО6, участвуя в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, пояснил, что нарушения сроков представления отчетов Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее Министерства) подтверждаются, материалами дела, в том числе, копиями электронных документов, выгруженных из государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет».

Представитель Прокуратуры Забайкальского края ФИО7 полагала, что вина ФИО3 подтверждена материалами дела, вместе с тем, по ряду эпизодов истек срок привлечения к административной ответственности. 

Заслушав участников, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Объектом указанного правоотношения являются бюджетные правоотношения, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов.

Объективную сторону данного правоотношения составляет нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, и (или) финансовым органом, главным распорядителем, получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий их предоставления (расходования).

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) межбюджетные трансферты это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 129 (далее - БК РФ) межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставляются, в том числе в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации.

Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формы которых предусмотрены абзацами третьим - пятым статьи 129 БК РФ, в том числе субсидий, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской -Федерации» (далее - Правила № 999).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» установлены Приложением №8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением правительства РФ от 20.12.2027 г.№1596. 

В ходе проведения проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва) установлено нарушение главным распорядителем и получателем средств бюджета - Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее - Министерство), которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий их предоставления (расходования).

28 декабря 2020 года Росавиацией и Правительством Забайкальского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край) (этап 1.1)» № 107-09-2020-005 (далее - Соглашение 005) в 2020 - 2023 годах.

В соответствии с пунктом «з(1)» пункта 10 Правил № 999, пунктом 6.1.1 Соглашения 005 уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, осуществляющим взаимодействие с Росавиацией, на который со стороны субъекта возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения) Соглашения 005 и своевременное представление достоверной отчетности, является Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Пунктом 4.3.6 Соглашения 005 (с учетом изменений) определена обязанность Министерства обеспечивать представление в Росавиацию в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах Забайкальского края, в целях софинансирования которых предоставляется бюджета Субсидия, по форме согласно приложению № 5, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия;

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия: по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 7;

- достижении значения(ий) результата(ов) использования Субсидии по форме согласно приложению № 6, (ежемесячные, квартальные отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом).

Лимиты бюджетных обязательств в целях софинансирования расходных обязательств на 2022 год в размере 431,86 млн. рублей были доведены Росавиацией бюджету Забайкальского края расходным расписанием от 24 декабря 2021 г. № 107/00107/813.

В соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 г. № 104н (в редакции, действовавшей в период совершения административного правонарушения), на основании данного расходного расписания Министерству разрешено распределять распорядителям и получателям бюджетных средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, находящимся в ведении Министерства, бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, или принимать бюджетные обязательства и осуществлять платежи, в установленных расходным расписанием пределах.

В соответствии со статьями 158, 162, а также пунктом 3 статьи 219 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств, в том числе как получатель бюджетных средств, обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов, принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Таким образом, Министерству как главному распорядителю бюджетных средств разрешено распределять распорядителям и получателям бюджетных средств (в том числе и себе как получателю бюджетных средств) бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, или принимать бюджетные обязательства и осуществлять платежи, в установленных уведомлением пределах доведенного межбюджетного трансферта.

Соответственно, в целях соблюдения порядка предоставления (расходования) субсидии на Министерство возложена обязанность по обеспечению достижения результатов предоставления субсидии, а также представлению в Федеральное агентство воздушного транспорта полной и достоверной отчетности в установленные сроки, в установленной форме и требуемым содержанием, в том числе отчетов:

- о расходах, бюджета Забайкальского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5, а также об исполнении графика выполнения мероприятий по форме согласно приложению № 6 не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным:

на 1 января 2022 года - не позднее 5 января 2022 года, на 1 февраля 2022 года - не позднее 5 февраля 2022 года, на 1 марта 2022 года - не позднее 5 марта 2022 года, на 1 октября 2022 года - не позднее 5 октября 2022 года, на 1 ноября 2022 года - не позднее 5 ноября 2022 года, на 1 января 2023 года - не позднее 5 января 2023 года;

- о достижении значения(ий) результата(ов) использования Субсидии по форме согласно приложению № 7, (ежемесячные, квартальные отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом): 

на 1 февраля 2022 года - не позднее 7 февраля 2022 года, на 1 марта 2022 года - не позднее 5 марта 2022 года, на 1 апреля 2022 года - не позднее 7 апреля 2022 года, на 1 мая 2022 года - не позднее 12 мая 2022 года, на 1 июня О0?2 года - не позднее 7 июня 2022 года, на 1 июля 2022 года - не позднее 7 июля 2022 года, на 1 октября 2022 года - не позднее 7 октября 2022 года, на 1 ноября 2022 года - не позднее 8 ноября 2022 года.

С учетом императивного характера бюджетных правоотношений, Министерство ни Правилами № 999, ни Соглашением 005 не наделено правом произвольно исполнять установленные обязанности. Именно своевременность и достоверность представленной во исполнение Соглашения 005 отчетности отражают исполнение порядка и достижение целей предоставления субсидии.

В нарушение установленного Правилами № 999 порядка предоставления (расходования) субсидии в части представления отчетности в срок, установленный пунктом 4.3.6 Соглашения 005, Министерством не обеспечено представление в Росавиацию в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» следующих отчетов.

Не представлены отчеты:

о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2022 года.

Кроме того, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по состоянию на 1 января 2022 года представлен 6 апреля 2022 года (т.е. с нарушением установленного срока на 91 календарный день), по состоянию на 1 февраля 2022 года представлен 6 апреля 2022 года т.е. с нарушением установленного срока на 60 календарных дней), по Достоянию на 1 марта 2022 года представлен 6 апреля 2022 года 1т-е. с нарушением установленного срока на 32 календарных дня), по состоянию 1 октября и 1 ноября 2022 года представлены 16 ноября 2022 года 4 с нарушением установленного срока на 42 и 11 календарных дней соответственно), по состоянию на 1 января 2023 года представлен 19 января 2^3 года (т.е. с нарушением установленного срока на 14 календарных дней). 

Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2022 года представлены 6 апреля 2022 года (т.е. с нарушением установленного срока на 91, 60 и 32 календарных дня соответственно), по состоянию на 1 октября и 1 ноября 2022 года представлен 16 ноября 2022 года (т.е. с нарушением установленного срока на 42 и 11 календарных дней соответственно).

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 июня, 1 июля, 1 октября и 1 ноября 2022 года представлены 16 ноября 2022 года (т.е. с нарушением установленного срока на 162, 132, 40, и 8 календарных дней соответственно).

В соответствии с пунктом 6.1.1. Соглашения 005 уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, осуществляющим взаимодействие с Федеральным агентством воздушного транспорта, на который со стороны субъекта возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения) Соглашения 005 и представление отчетности, является Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Таким образом, необеспечение Министерством своевременного представления в Федеральное агентством воздушного транспорта в ГИИС Электронный бюджет» достоверных отчетов о расходах бюджета Забайкальского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, об исполнении графика выполнения мероприятий, о достижении значения(ий) результата(ов) использования Субсидии является грубым нарушением условий и (или) порядка предоставления (расходования) субсидии, непосредственно влияющее на результаты финансово-бюджетного контроля за целевым и эффективным расходованием средств федерального бюджета со стороны Министерства, принятие федеральным органом исполнительной власти надлежащих управленческих решений при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» и пояснительной записке исполняющего обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, направленной в адрес Счетной палаты Российской Федерации письмом от 26 июня 2023 г. № 05-6052 контроль за исполнением подготовки вышеуказанных отчетов осуществлял заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края ФИО8.

ФИО3 назначен на должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (по вопросам дорожного хозяйства и транспорта) приказом от 15 августа 2019 года № 84л/с.

Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 10 марта 2022 г. № 68-р с 11 марта 2022 г. исполнение обязанностей министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта были возложены на ФИО3 - заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (до 20 октября 2022 года).

Приказом исполняющего обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 26 мая 2023 года № 115л/с ФИО3 уволен с занимаемой должности.

Согласно пункту 3.2. должностного регламента заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края по вопросам дорожного хозяйства и транспорта, утвержденного 3 июля 2019 года, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края исполняет следующие обязанности:

- осуществляет организацию и координацию работы отдела транспорта с Целью обеспечения исполнительской дисциплины подчиненных и обеспечение Функций министерства в сфере транспорта на территории Забайкальского края;

организует работу по подготовке предложений в план подготовки Проектов законов Забайкальского края на планируемый финансовый год по Управлениям; 

- осуществляет контроль за исполнением поручений Губернатора Забайкальского края по вопросам реализации государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения;

- осуществляет организацию и координацию деятельности Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в части государственного регулирования и контроля в сфере транспортного обслуживания населения;

- осуществляет контроль за реализацией проектов по развитию транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры.

Согласно пункту 7 указанного регламента в процессе осуществления профессиональной служебной деятельности в пределах установленной компетенции гражданский служащий, замещающий должность заместителя министра, взаимодействует с федеральными органами государственной власти.

В соответствии с должностным регламентом министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, утвержденным 8 июля 2020 года гражданский служащий, замещающий должность министра, исполняет следующие должностные обязанности:

- распределяет обязанности между заместителями;

- несет персональную ответственность за неисполнение или нарушение действующего законодательства.

Согласно пунктам 17.1. и 17.12. Положения о Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 20 мая 2019 г. № 197, министр осуществляет руководство и организует Деятельность министерства, а также осуществляет иные полномочия в Соответствии с законодательством.

Таким образом, именно на ФИО9 как заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и исполняющего обязанности министра возложена Региональная ответственность за надлежащее исполнение условий Соглашения 005 при обеспечении соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, а также соблюдения сроков предоставления соответствующей отчетности.

Обстоятельства, препятствующие ФИО3 надлежащим образом исполнить должностные полномочия в части соблюдения условий и порядка предоставления (расходования) субсидии, не установлены.

Необходимые действия в пределах компетенции, направленные на соблюдения сроков представления в Федеральное агентство воздушного транспорта в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» соответствующих отчетов, в установленные сроки ФИО1 не осуществлены, в связи с чем оснований для применения положения части 4 статьи 24.5 КоАП РФ не имеется.

Целью предоставления межбюджетного трансферта из федерального бюджета являлась реконструкция аэропортового комплекса 

<

адрес>) (этап 1.1).

Условия финансирования регионального проекта по реконструкции аэропортового комплекса 

<

адрес> в Забайкальском крае за счет федерального бюджета предполагали соблюдение уровня софинансирования объема, строительства со стороны Забайкальского края. 

Согласно пунктам 4.1.2, 4.1.4 Типовой формы соглашения своевременная достоверная отчетность субъекта Российской Федерации обеспечивает возможность Росавиации и Счетной палате Российской Федерации осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, а также результатов ее использования.

Пунктом 7.2 Типовой формы соглашения установлено, что подписанное сторонами соглашение действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

В соответствии с пунктами 4.1.2, 4.1.3, 7.2 Соглашения 005 указанное обязательное для применения регулирование сохранено и предполагает исполнение Министерством обязанности по представлению отчетности до достижения результата предоставления межбюджетного трансферта, то есть 2023 года включительно.

Таким образом, ФИО3, замещая должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и исполняя должность министра, допустил нарушение условий и (или) порядка предоставления (расходования) субсидии в отсутствие нецелевого использования бюджетных средств, совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доводы ФИО3 о своевременном предоставлении отчетов опровергаются материалами дела, в частности в ждоказательство нарушения сроков представления отчетов Счетной палатой Российской Федерации представлены электронные образы (копии) электронных документов – отчетов Министерства в адрес Федерального агентства воздушного транспорта:

Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о достижении значений результатов использования субсидии на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о достижении значений результатов использования субсидии на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о достижении значений результатов использования субсидии на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о достижении значений результатов использования субсидии на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, на ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, на ДД.ММ.ГГГГ, подписан электронной подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, учитывая, что срок привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет 2 года, и на момент рассмотрения дела об административном правонарушении по нарушениям, совершенным ранее двухлетнего срока, истек, полагаю, что из объема вменяемого деяния следует исключить:

- Не предоставление отчетов о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля 2022 года;

- нарушение срока предоставления отчета о расходах по использованию субсидии по состоянию на 1 января 2022 год (предоставлен 06 апреля 2023 г.), по состоянию на 1 февраля 2022 (предоставлен 06 апреля 2022), по состоянию на 1 марта 2022 (предоставлен 6 апреля 2022),

- нарушение срока предоставления отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2022 (представлены 06 апреля 2023 г.) поскольку срок привлечения к административной ответственности за данные правонарушения составляет 2 года и на момент рассмотрения дела об административном правонарушении истек. 

Исключение перечисленных выше нарушений из общего объема нарушений, зафиксированных в протоколе, не влечет освобождение должностного лица от административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) административную ответственность, не установлены.

Оценивая собранные по делу доказательства, судья приходит к выводу, что субъективная сторона правонарушения доказана материалами дела.

Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не усматривается.

При назначении вида и размера наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, в связи с чем, полагает назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией данной статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, паспорт: № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Забайкальскому краю в 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.15.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Исключить из протокола об административном правонарушении: не предоставление отчетов о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля 2022 года;

- нарушение срока предоставления отчета о расходах по использованию субсидии по состоянию на 1 января 2022 год (предоставлен 06 апреля 2023 г.), по состоянию на 1 февраля 2022 (предоставлен 06 апреля 2022), по состоянию на 1 марта 2022 (предоставлен 6 апреля 2022),

- нарушение срока предоставления отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по состоянию на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2022 (представлены 06 апреля 2023 г.) поскольку срок привлечения к административной ответственности за данные правонарушения составляет 2 года и на момент рассмотрения дела об административном правонарушении истек. 

Административный штраф подлежит уплате по реквизитам: получатель: ИНН

<

***>, КПП 770401001, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Счетная палата Российской Федерации) в Операционном департаменте Банка России// Межрегиональное операционное УФК г.Москва, БИК 024501902, Единый казначейский счет 40102810045370000002, казначейский счет (номер счета получателя средств) 03100643000000019500, ОКТМО 45383000, КБК 305 1 16 01155 01 0000 140

УИН 30530500111231101239

наименование платежа: штраф за административное правонарушение.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу. 

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, представляет в суд. 

В случае невыполнения указанных требований, лицо будет нести ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения его копии в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г. Читы, либо непосредственно в Забайкальский краевой суд.

Судья О.А. Маркова