ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Жуковский Московская область

15 июля 2019 года

Жуковский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Ковалёва Е.А.

при секретаре Камшилиной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МОЭСК» к ФИО2 о расторжении договоров и взыскании расходов, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МОЭСК» обратился в суд с иском к ФИО2 о расторжении договоров от 04.10.2012 года №№ 38-12-302-1475(908547), 38-12-302-1474 (908546), 38-12-302-1473(902817) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети ПАО «МОЭСК», взыскании расходов в размере 

<

данные изъяты>, а также расходов по уплате госпошлины в размере 

<

данные изъяты>. 

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 04.10.2012 года между ФИО2 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1475(908547) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:32). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:08:060231:32.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

04.10.2012 года между ФИО2 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1474(908546) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:34). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:08:060231:34.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1473(902817) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:33). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес> кадастровый номер участка 50:08:060231:33.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

С учетом дополнительных соглашений № 3 от 08.12.2014 года срок осуществления технологического присоединения по указанным договорам определен не позднее 31.12.2015 года. 

Истец исполнил свои обязательства по подготовке и выдаче ответчику технических условий, а также по выполнению технических условий в своей части перед ответчиком в полном объеме. 

Ответчик от исполнения своих обязательств по вышеуказанным договорам уклонился, претензия, направленная истцом в адрес ответчика, осталась без ответа. 

В судебном заседании представитель истца ПАО «МОЭСК» заявленные требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить. 

Ответчик ФИО2, будучи надлежащим образом извещенным о слушании дела, в суд не явился, о причине неявки суду не сообщил; документ, подтверждающий уважительность неявки, не представил; о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил, в связи с чем суд находит возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства на основании ст.233 ГПК РФ.

Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела и дав оценку всем представленным доказательствам, находит заявленные истцом требования подлежащими удовлетворению.

Судом установлено, что 04.10.2012 года между ФИО2 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1475(908547) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:32). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:08:060231:32.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

04.10.2012 года между ФИО2 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1474(908546) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:34). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:08:060231:34.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

04.10.2012 года между ФИО2 и ПАО «МОЭСК» были заключен договор № 38-12-302-1473(902817) на осуществление ТП жилых домов, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Костровское с/п, дер. Корсаково (кадастровый номер 50:08:060231:33). К указанному договору было заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2013 года, № 2 от 18.12.2013 года, № 3 от 08.12.2014 года. В соответствии с условиями указанного выше договора, истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям с напряжением 10 кВ энергопринимающих устройств ФИО2, максимальная мощность которых составляет 750 кВт, категория надежности III (третья). Технологическое присоединение электропринимающих устройств ответчика необходимо для снабжения жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский р-н, Костровское с/пос., дер. Корсаково, 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:08:060231:33.

Согласно п. 10 Договора плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>. 

Техническими условиями от 16.08.2013 года №№ 38-13-202-8144(917983/104), 38-13-202-8152(917987/104), 38-13-202-8145(917978/104) предусмотрено выполнение сетевой организацией следующего комплекса работ, необходимого для обеспечении технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2:

- Установка нового РП-10 кВ вблизи нагрузки;

- Установка дополнительной ячейки в ПС № 683 «Ядрошино». Тип ячейки определяется проектом;

- От вновь установленной ячейки в ПС № 683 «Ядрошино» до новой РП-10 кВ запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ (ориентировочная длина 7,0 км). Параметры ЛЭП определить проектом. 

20.08.2013 года для исполнения договоров технологического присоединения, заключенных с ФИО2, в своей части между ПАО «МОЭСК» и ООО «Кабельщик» был заключен договор строительного подряда № 80/13-К-ПИР-СМР с выполнением следующих видов работ:

- выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

- поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и авторского надзора в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документации. 

Стоимость работ по договору строительного подряда от 20.08.2013 года № 80/13-К-ПИР-СМР составила 

<

данные изъяты>. 

Указанные денежные средства были оплачены истцом в адрес ООО «Кабельщик», что подтверждается платежными документами, представленными в материалах дела. 

Таким образом, судом установлено, что истцом в рамках заключенного с ответчиком договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям истца сумма выполненных работ составила 33 238 728,77 рублей. 

В ходе исполнения договоров технического присоединения ПАО «МОЭСК» подготовило и выдало ответчику технические условия №№ 38-13-202-8145(917978/104), 38-13-205-8144(917983/104), 38-13-202-8152(917987/104). Стоимость их подготовки и выдачи, согласно расчету, представленном истцу, составила 

<

данные изъяты>.

Учитывая тот факт, что ответчиком не исполнены обязательства по внесению платежей в счет оплаты за мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренного договором, суд считает необходимым взыскать сумму в размере 

<

данные изъяты>.) с ответчика в пользу истца. 

Пунктом 15 договоров от 04.10.2012 года № З8-12-302-1475(908547), № З8-12-302-1474(908546), № З8-12-302-1473(902817) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусмотрена возможность расторжения договора по требованию одной из сторон, по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 450 ГПК РФ договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной.

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГПК РФ, ч. 1 ст. 781 ГПК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в срок и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Ст. 783 ГПК РФ предусмотрено, что Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Как усматривается из искового заявления, ответчик, в нарушении условий договоров, уклоняется от исполнения договорных обязательств. 

Претензия, направленная в адрес ответчика в рамках досудебного урегулирования спора, была оставлена без ответа. В связи с чем имеются основания для удовлетворения исковых о расторжении договоров от 04.10.2012 года № З8-12-302-1475(908547), № З8-12-302-1474(908546), № З8-12-302-1473(902817) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

При подаче в суд иска истцом была уплачена госпошлина в размере 

<

данные изъяты>, которая в соответствии со ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 233-237,ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление ПАО «МОЭСК» к ФИО2 о расторжении договоров и взыскании расходов – удовлетворить.

Расторгнуть договоры от 04.10.2012 года № З8-12-302-1475(908547), № З8-12-302-1474(908546), № З8-12-302-1473(902817) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенные между ОАО «МОЭСК» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МОЭСК» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МОЭСК№ расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>.

Ответчик ФИО2 вправе подать в Жуковский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения копии решения.

По истечении срока подачи заявления об отмене заочного решения на решение в течение одного месяца может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Жуковский городской суд.

Судья Е.А. Ковалёв 

Мотивированное решение изготовлено 19.07.2019 г.

Судья Е.А. Ковалёв