Дело № 2-455/2025

УИД 22RS0002-01-2025-000788-36

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

8 октября 2025 года с. Алтайское

Алтайский районный суд Алтайского края в составе: 

председательствующего Банниковой Ю.Б.,

при помощнике судьи Бобровской Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к филиалу ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО1 обратился с настоящим иском к филиалу ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», указывая на то, что является собственником земельного участка с кадастровым номером№ расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома. Договором предусмотрена обязанность ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение 6 месяцев со дня заключения договора. Данная обязанность ответчиком не исполнена.

Ссылаясь на изложенное, просит обязать филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» исполнить обязательства по указанному договору в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ соответчиком по делу привлечено юридическое лицо ПАО «Россети Сибирь».

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещен, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие; ранее в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска по изложенным в нем основаниям. 

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание представителя не направил, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещен в том числе по месту нахождения филиала; в отзыве на иск заявленные требования не признал, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, и указывая, что срок, в течение которого истец просит возложить обязанность исполнить обязательства по договору, является невыполнимым, срок исполнения решения просит установить 6 месяцев.

Руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> (выписка из ЕГРН - л.д. 11-14).

ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заявитель) и ответчиком ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВТ; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (л.д. 5-7).

Согласно п.5 указанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора; пунктом 21 договора установлено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 72983,06 рублей; указанная сумма оплачена истцом в полном объеме (справка ПАО Сбербанк по операции от ДД.ММ.ГГГГ – л.д.20).

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Таким образом, договор заключен ДД.ММ.ГГГГ, соответственно срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек в 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ

Пунктом 6 договора определены обязанности сетевой организации – надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (включая урегулирование отношений с иными лицами), с осуществлением фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Пунктом 10 технических условий № предусмотрено, что сетевая организация осуществляет, в том числе, подготовку технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке; строительство ЛЭП-0,4 кВ; монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (л.д.8-9).

Как следует из содержания иска и не оспаривается ответчиком, до настоящего времени обязанности по договору сетевой организацией не исполнены.

Разрешая спор, суд исходит из следующего.

В соответствии с абз. 4 п. 1 статьи 26 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

Согласно п. 1 статьи 26 указанного Федерального закона, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила №), которыми урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В соответствии с п. 3 Правил № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 14 Правил №, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил № технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Подпунктом б пункта 16 Правил № установлены предельные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Применительно к рассматриваемой ситуации срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев (абз. 13 пп. б п. 16 Правил №).

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчиком доказательств отсутствия вины в нарушении обязательств, возникших перед истцом в силу заключения вышеуказанного договора, суду не представлено.

Доводы ответчика о тяжелом финансовом положении отклоняются судом, поскольку ответчик является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, с учетом положений ч. 1 ст. 2 ГК РФ осуществляемую на свой риск, в связи с чем тяжелое финансовое положение не является основанием для вывода об отсутствии вины ответчика в неисполнении обязательств и соответственно о возможности освобождения его от ответственности за нарушение условий договора.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о возложении на ответчика ПАО «Россети Сибирь» обязанности исполнить обязательства, предусмотренные вышеназванным договором, в связи с чем данные требования подлежат удовлетворению.

Оснований для возложения каких-либо обязанностей на филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» у суда не имеется, поскольку филиал не является самостоятельным юридическим лицом; договор об осуществлении технологического присоединения заключен с ПАО «Россети Сибирь», а не с филиалом. 

В соответствии с ч.1,2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика и значимость его для истца, лишенного возможности пользоваться электроэнергией в жилом доме; учитывая отсутствие со стороны ответчика доказательств невозможности его своевременного исполнения по не зависящим ответчика обстоятельствам, длительность неисполнения ответчиком указанного обязательства – суд полагает обоснованным установить ответчику срок исполнения настоящего решения в указанной части – в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. 

При этом доводы ответчика о необходимости установления срока исполнения решения продолжительностью 6 месяцев – суд отклоняет за необоснованностью, принимая во внимание, что с учетом времени, прошедшего со дня предъявления настоящего иска (более полутора месяцев), а также периода вступления решения в законную силу, срок исполнения решения продолжительностью один месяц является разумным.

Таким образом иск подлежит удовлетворению в полном объеме в части требований к ПАО «Россети Сибирь», являющемуся надлежащим ответчиком по делу. В удовлетворении требований к филиалу ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» следует отказать.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 рублей.

Hа основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск в части требований к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» (ИНН № обязанность в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ФИО1 .

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (№) в доход бюджета муниципального образования 

<

адрес> государственную пошлину в размере 3000 рублей.

В удовлетворении требований к филиалу ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» – отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Алтайский краевой суд через Алтайский районный суд Алтайского края в течение месяца с момента его вынесения в окончательной форме.

Судья Ю.Б. Банникова

Мотивированное решение изготовлено 17.10.2025.