Дело № 2-5296/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Волгоград 29 марта 2017 года

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе председательствующего судьи Александриной С.В.

при секретаре судебного заседания Цабыбиной Н.А.

с участием истца ФИО2, ее представителя ФИО5, представителя ответчика ФИО6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к МУП «Волгоградские межрайонные электрические сети» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа,

установил:

ФИО2 обратилась в суд с иском к МУП «Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее МУП ВМЭС») о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа. В обоснование требований истец указала на заключение ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком договора 2061\ТП-14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Однако в нарушение условий договора ответчик выполнил свои обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств только ДД.ММ.ГГГГ. Из-за несовременного исполнения условий договора, истец испытывала дискомфорт, ввиду отсутствия света и отопления обострились хронические заболевания, в связи с чем, истец вынуждена была нести расходы на лечение, за отопление. Просит суд взыскать с ответчика в ее пользу в возмещение материального вреда в размере 180 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 180 000 рублей, взыскать затраты на лечение в размере 10 000 рублей, затраты на топливо в размере 50 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 15 000 рублей, штраф, предусмотренный Законом РФ "О защите прав потребителей".

ФИО2, ее представитель ФИО5, исковые требования поддержали, просили их удовлетворить. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО6, просил в иске отказать. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" регулирует порядок доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Данный порядок предусматривает технологическое присоединение на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; необходимость затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе затрат сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства; соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения; оказание услуг по передаче электрической энергии покупателю на основании договора возмездного оказания услуг, исполнение обязательств по которому должно осуществляться надлежащим образом; права на ограничение режима потребления электрической энергии. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены "Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В тех случаях, когда отдельные виды гражданско-правовых отношений с участием потребителей, помимо норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулируются и специальными законами Российской Федерации, то к отношениям, вытекающим из таких договоров, Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" может применяться в части, не противоречащей Гражданского кодекса Российской Федерации и специальному закону.

В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

При рассмотрении дела судом было установлено заключение ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и МУП «ВМЭС» договора 2061\ТП-14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по адресу: Волгоград, Твардовского, 29\27, ФИО2 выданы технические условия №д-2014 от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Договор об осуществлении технологического присоединения является самостоятельным видом договора, регулируемым специальным законодательством: Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительств РФ ДД.ММ.ГГГГ №).

Так, согласно п. 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мо�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????????????????��???????�?�?�??j�??????????????J?J??�???�??????J?J�?????????J?J??�?????????J?J??�???????�?�???????????�?�???????J?J??�?????????J?J????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?��

Договором 2061\ТП-14 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по адресу: Волгоград, Твардовского, 29\27, заключенного между ФИО2 и МУП «ВМЭС» предусмотрены обязанности заявителя:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Как следует из материалов дела истцом не предоставлено каких-либо доказательств надлежащего исполнения указанного требования.

Письменное обращение с претензией на имя директора МУП «ВМЭС» не свидетельствуют о выполнении истцом условий договора и Правил, в соответствии с которыми сторона договора должна представить в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию.

При этом ответчиком представлены акты от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сетевой организацией произведен осмотр (обследование) электроустановки ФИО2 на предмет готовности к осуществлению подключения и подаче напряжения, были выявлены несоответствия фактически выполненных заявителем мероприятий техническим условиям 379-д-2014 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Установлен аппарат защиты –автоматический выключатель ВА 47-29 на номинальный ток 63А, не соответствующий максимальной электрической мощности указанной в ТУ;

Истек срок государственной проверки прибора учета энергии.

Уведомлений об устранении выявленных замечаний в МУП «ВМЭС» от ФИО2 не поступало, и суду такие доказательства не представлены.

Таким образом, по состоянию на даты составления актов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 не была исполнена обязанность по подготовке электропринимающих устройств к технологическому присоединению (пункт ДД.ММ.ГГГГ\ТП-14), что исключало возможность подачи электрического напряжения на индивидуальный жилой дом ФИО2 в согласованный договором срок.

Из материалов дела следует, что выполнение мероприятий по технологическому подключению было завершено ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ.