Мотивированное 

решение

 изготовлено 9 сентября 2025 года 

Дело № 2-504/2025

УИД 22 RS0003-01-2025-000961-46

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Бийск 26 августа 2025 года

Бийский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Агапушкиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Понькиной Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании задолженности, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора, взыскании задолженности.

В обоснование заявленных требований ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (далее по тексту сетевая организация, истец) и ФИО1 (далее по тексту заявитель, ответчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. В соответствии с п.1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 45 кВт (общая с учетом существующий 50 кВт); категория надежность третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 5 кВт. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка № (пункт 2 договора). Технические условия являются неотъемлемой частью договора, приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет три года со дня заключения договора (пункт 4 договора, пункт 12 технических условий), который истек ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет 4 месяца со дня заключения договора. Срок исполнения обязательств истек ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного экземпляра договора в сетевую организацию (пункт 22 договора). Договор поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, дата заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора Заявитель обязуется: после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного сетевой организации (абзац 5 пункта 8 договора); надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора м обязательства но оплате расходов на технологическое присоединение (абзац 6 пункта 8 договора). Сетевой организацией обязательства по договору исполнены ДД.ММ.ГГГГ, соответствующая информация размещена в личном кабинете заявителя. В адрес Заявителя был направлен подписанный сетевой организацией акт об осуществлении технологического присоединения (исх. №). Указанная почтовая корреспонденция возвращена в адрес сетевой организации ввиду истечения сроков хранения. В силу ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным. Подписанный заявителем акт об осуществлении технологического присоединения в адрес сетевой организации не поступал. Указанное свидетельствует о невыполнении заявителем условий договора, предусмотренных абзацем 5 пункта 8 договора. Также заявителем не выполнены обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, что говорит о нарушении абз.6 п.8 и раздела 3 договора. В адрес ответчика направлена претензия от №) с требованием о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, уведомлении сетевой организации, а также предложено расторгнуть договор путем направления заявления, с дальнейшим подписанием соглашения о расторжении договора. Указанная почтовая корреспонденция возвращена в адрес сетевой организации ввиду истечения сроков хранения. Таким образом, ввиду нарушения заявителем существенных условий договора имеются основания для расторжения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Кроме того, ответчиком не оплачены расходы на технологическое присоединение в сумме 36762 руб. 12 коп., фактически понесенные затраты сетевой организацией на основании Решения Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: 7503 руб.84 коп. – за подготовку и выдачу технических условий; 29258 руб.28 коп. – за проверку выполнения технических условий, по действующему на момент заключения договора тарифу.

На основании изложенного истец просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1; взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ года в размере 36762 рубля 12 копеек, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 24000 рублей.

Представитель истца ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» ФИО2, участвующая в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи, исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежаще. 

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам. 

Отношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей регулируются как нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), общими положениями ГК РФ об обязательствах и договорах, так и специальным энергетическим законодательством (Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками.

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункты 16, 17 Правил).

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Судом установлено и из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 45 кВт (общая с учетом существующий 50 кВт); категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 5 кВт. (п.1 договора).

Заявитель принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка №

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 4 месяца со дня заключения настоящего договора (п. 5).

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 №505 и составляет 36762 руб. 12 коп., в том числе НДС 20% в сумме 6127 руб. 02 коп. (п. 10).

Пунктом п. 11 договора предусмотрено, что плата за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10% в размере 3676 руб. 21 коп., в том числе НДС 20% в сумме 612 руб. 70 коп. вносится в течение 15 календарных дней с даты заключения договора; 30% в размере 11028 руб. 64 коп., в том числе НДС 20% в сумме 1838 руб. 11 коп. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20% в размере 7352 руб. 42 коп., в том числе НДС 20% в сумме 1225 руб. 40 коп. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 30% в размере 11028 руб. 64 коп., в том числе НДС 20% в сумме 1838 руб. 11 коп. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% в размере 3676 руб. 21 коп., в том числе НДС 20% в сумме 612 руб. 70 коп. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств представляет собой комплекс мероприятий, предусмотренных п. 18 Правил № 861.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определен в Технических условиях, являющихся приложением к договору.

Сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта ответчика, в материалы дела представлены акт допуска в эксплуатацию/проверки расчетного учета электроэнергии, акт о выполнении технических условий. Односторонним актом об осуществлении технологического присоединения зафиксировано, что мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» в адрес ФИО1 были направлены акты о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ для подписания со стороны заявителя.

Стороной ответчика доказательств выполнения условий договора в части направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, а также исполнения обязательства по внесению платы за технологическое присоединение суду не представлено.

Таким образом, задолженность ФИО1 перед ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» составляет 36762 руб. 12 коп., в связи с чем требования истца о взыскании с ответчика задолженности по данному договору являются обоснованными и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь изложенными обстоятельствами и на основании ст.ст.450-452 Гражданского кодекса РФ, ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» ДД.ММ.ГГГГ направило ответчику претензию № с предложением расторгнуть договор путем подписания дополнительного соглашения о расторжении и возмещения понесенных сетевой организацией расходов.

Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В силу п. 2 ст. 451 ГК РФ договор может быть расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В силу ст. 452 Гражданского кодекса РФ требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено в суд после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо не получения ответа в срок, указанный в предложении.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд полагает требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 руб. Возвратить ПАО «Россети Сибирь» из соответствующего бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 20000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ года.

Руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1. 

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (ИНН №) задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ года в размере 36762 рубля 12 копеек, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 4000 рублей.

Возвратить ПАО «Россети Сибирь» из соответствующего бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 20000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ года.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Бийский районный суд Алтайского края путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья Л.А. Агапушкина