РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июня 2018 года г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Матвиенко О.А., при секретаре Шмыревой Н.А., с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, действующей на основании доверенности от Дата, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2327/2018 по исковому заявлению ФИО1 к ЗАО «Иркутсклесстрой» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услуг представителя,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований указано, что Дата между истцом ФИО1 и ответчиком ЗАО «Иркутсклесстрой» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в соответствии с которым ответчик (застройщик) обязался в срок до Дата организовать и осуществить строительство многоэтажного жилого дома блок-секция № с помещениями по строительному адресу: Адрес, и передать истцу объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру, строительный № на 8 этаже, общей площадью по проекту ........ кв.м., в том числе общей площадью ........ кв.м., с балконом площадью ........ кв.м. Истец обязался оплатить ответчику обусловленную договором цену - ........ руб. (с учетом стоимости квартиры и балкона). Договор, в соответствии с действующим законодательством, зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (регистрационный округ №), запись регистрации №. Свои обязательства по внесению денежных средств истец, как участник долевого строительства, исполнил своевременно и в полном объеме: так, часть из них была оплачена истцом за счет собственных средств, а часть - за счет кредитных средств по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России». Исходя из приведенных выше условий договора, объект долевого строительства должен быть передан истцу в срок не позднее Дата. Однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено до настоящего времени, соответственно, не подписан и акт приема-передачи истцу объекта долевого строительства. Просрочка исполнения обязательств по договору на Дата с Дата составила ........ календарных дней. Неустойка за период с Дата по Дата ранее уже была присуждена Октябрьским районным судом г. Иркутска. Таким образом, застройщиком в пользу участника долевого строительства подлежит к оплате неустойка за период с Дата по Дата. Количество дней просрочки составляет ........ дней, сумма неустойки, в свою очередь, составляет ........ руб., исходя из следующего расчета: с Дата по Дата ключевая ставка ........ руб., с Дата по Дата ключевая ставка ........ руб., Дата по Дата ключевая ставка ........ руб., с Дата по Дата ключевая ставка ........ руб., с Дата по Дата ключевая ставка ........ руб., с Дата по Дата ключевая ставка ........ руб. Итого ........ руб. Также истец имеет право на компенсацию морального вреда. Существенно нарушив свои обязательства по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве (а именно значительно просрочив передачу объекта долевого строительства в собственность истца), ответчик причинил последнему моральный вред, который выразился в серьезных переживаниях по поводу перспективы исполнения ответчиком своих обязательств перед ним вообще. Истец оценивает причиненный ему ответчиком моральный вред в ........ руб. За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя взыскивается штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Застройщик систематически осуществляет свои обязательства с нарушением права лиц, являющихся участниками долевого строительства, подтверждением данного факта может служить опубликованный в официальном источнике в сети интернет (адрес: http://babr24.com) список недобросовестных застройщиков г. Иркутска, среди которых числиться ЗАО «Иркутсклесстрой». Обращаю внимание суда на то, что в настоящее время работа по завершению строительства многоквартирного жилого дома ведется крайне медленно и положительная динамика есть только благодаря тому, что участниками (с ним в том числе) подаются многочисленные заявления в инстанции различного рода с целью ускорения работы застройщика по сдаче дома в эксплуатацию. Данные действия отнимают у него огромное количество времени (вынужден отпрашиваться с работы, меньше времени проводить с семьей и т.д.), денег (проезд, обращение к компетентным специалистам за составлением обращений), ввиду чего ухудшается его моральное и эмоциональное состояние. Кроме того, ранее взысканная судом неустойка застройщиком так до конца и не выплачена, выплачена лишь незначительная ее часть, несмотря на то, что застройщиком постоянно производятся отчуждения находящихся у него в собственности помещений. В настоящее время он с женой и ребенком проживают в однокомнатной квартире, вынужден испытывать неудобства ввиду нехватки жилой площади, согласно нормативам, установленным на территории г. Иркутска. Столь длительное затягивание сроков сдачи объекта негативно сказывается на его финансовом положении, потому как после сдачи дома в эксплуатацию планировал погасить часть ипотечного кредита с продажи квартиры, в которой проживают в данный момент, т.к. сумма ежемесячного платежа по ипотеке велика для него и его семьи. Также планировал отдать займ, который был получен от родственников супруги на первоначальный взнос. По вине застройщика уже более 2х лет он не может этого сделать и вынужден терпеть множественные неудобства. Таким образом, взыскание им с ЗАО «Иркутсклесстрой» указанной в законе неустойки, будет иметь не только компенсационный характер за длительные ожидания сдачи многоквартирного дома, в котором им приобретено жилое помещение, но и возместительную направленность в части покрытия всех его убытков, связанных со сложившейся в его жизни ситуации из-за не сданного своевременно жилья.

Истец просит взыскать с ответчика ЗАО «Иркутсклесстрой» в пользу ФИО1 в счет неустойки ........ руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере ........ руб., в счет компенсации морального вреда ........ руб., понесенные по настоящему гражданскому делу судебные расходы по оплате услуг представителя на составление искового заявления в соответствии с представленным соглашением об оказании юридической помощи и расписке в принятии денежной суммы в размере ........ руб.

В судебном заседании истец ФИО1 поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности от Дата, не признала исковые требования в полном объеме, в письменном виде возражений на исковое заявление не представила, но просила применить ст. 333 ГК РФ и уменьшить неустойку, ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства по своевременной передаче застройщиком квартиры участнику долевого строительства, а также, снизить размер компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг представителя.

Выслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, изучив имеющиеся в деле доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему выводу.

Ст. 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты гражданских прав, в том числе, путем взыскания неустойки, компенсации морального вреда и иными способами, предусмотренными законом.

При заключении договора участия в долевом строительстве между сторонами возникают правоотношения по привлечению денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома, которые регулируются положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Согласно ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Последствия уклонения дольщика от принятия объекта долевого участия предусмотрены ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, в соответствии с которой, если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный частью 4 настоящей статьи срок или при отказе участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в части 3 настоящей статьи).

Из анализа приведенных положений законодательства следует, что законом установлена обязанность застройщика перед участником долевого строительства передать объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, в срок, предусмотренный договором. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004), либо составления такого акта в одностороннем порядке (ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). В случае нарушения предусмотренного договором срока застройщик обязан уплатить участнику долевого строительства неустойку в размере, установленном законом (ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

Судом установлено, что Дата между ЗАО «Иркутсклесстрой» (застройщик) и ФИО1 (участник) был заключен договор участия в долевом строительстве №, по условиям которого застройщик обязался построить 10 этажный многоквартирный кирпичный жилой дом блок/секция №, расположенный на земельном участке, площадью ........ кв. м., кадастровый № по адресу: Адрес и передать участнику трехкомнатную квартиру, строительной площадью ........ кв. м., в т.ч. общей площадью ........ кв. м., площадью балкона ........ кв. м., расположенную на 8 этаже, строительный №, а участник обязался уплатить установленную договором стоимость долевого вклада ........ руб. и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов (п. п. 1.1, 1.3, 2.1, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.3 договора).

Согласно п. п. 3.1.2 - 3.1.3 договора, застройщик обязался обеспечить сдачу объекта и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не позднее Дата, после чего передать участнику квартиру по акту приема-передачи при условии полного выполнения обязательств по договору в течение шести месяцев, а если оплата произведена не полностью, то в течение двух месяцев с момента полной оплаты стоимости помещения.

Оплата по договору участия в долевом строительстве истцом внесена в полном объеме, в размере ........ руб., что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру № от Дата и № от Дата на суммы ........ руб., а также поручением владельца счета по счету от Дата и банковским ордером № от той же даты ОАО «Сбербанк России» на сумму ........ руб. и ответчиком не оспаривается.

Однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до настоящего времени не получено, акт приема-передачи не подписан. Более того, как видно из справки, данной ЗАО «Иркутсклесстрой», по состоянию на Дата готовность б/с № строящегося многоквартирного дома составляет 95%.

При этом каких-либо дополнительных соглашений о продлении сроков строительства и передачи квартиры между сторонами не подписывалось.

Следовательно, обязательства, предусмотренные договором участия в долевом строительстве, застройщик своевременно не исполнил, тогда как, должен был передать квартиру участнику долевого строительства не позднее Дата.

Учитывая факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, который состоит в том, что квартира не передана истцу в срок, установленный договором, суд полагает, что по правилам ч. 2 ст. 6 № 214-ФЗ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка (пени).

Расчет неустойки, произведенный истцом, судом проверен, ответчиком не оспорен, ответчик ходатайствует о применении ст. 333 ГК РФ и уменьшении неустойки, ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства по передаче застройщиком квартиры участнику долевого строительства.

Суд отмечает, что решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от Дата, вступившим в законную силу по гражданскому делу № с ЗАО «Иркутсклесстрой» в пользу ФИО1 была взыскана неустойка, в связи с нарушением условий договора участия в долевом строительстве № от Дата за период Дата-Дата в размере ........ руб.

Неустойка (пени) по договору участия в долевом строительстве должна исчисляться в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, которая по информации Банка России от Дата с Дата до Дата (включительно) - 9 % годовых, от Дата с Дата до Дата - 8,5 % годовых, от Дата с Дата до Дата - 8,25 % годовых, от Дата с Дата до Дата (включительно) - 7,75 % годовых, от Дата с Дата до Дата (включительно) - 7,5 % годовых, от Дата с Дата по настоящее время - 7,25 % годовых, от цены договора, равной 4 000 000 руб., за каждый день просрочки, исходя из периода Дата-Дата (срок окончания периода исчисления неустойки обозначен в исковом заявлении), за 294 дня:

Соответственно, размер неустойки (пени), определяется из расчета:

........

........

........

........

........

........

........ руб.

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ) - п. 69.

Согласно п. 71 приведенного постановления, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки - п. 73 приведенного постановления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 15 января 2015 года № 6-О, ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право суда уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Вместе с тем часть первая статьи 333 ГК РФ, предусматривающая возможность установления судом баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате совершенного им правонарушения, не предполагает, что суд в части снижения неустойки обладает абсолютной инициативой - исходя из принципа осуществления гражданских прав в своей воле и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ) неустойка может быть уменьшена судом при наличии соответствующего волеизъявления со стороны ответчика. В противном случае суд при осуществлении судопроизводства фактически выступал бы с позиции одной из сторон спора (ответчика), принимая за нее решение о реализации права и освобождая от обязанности доказывания несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Данную точку зрения разделяет и Верховный Суд Российской Федерации, который относительно применения ст. 333 ГК РФ в делах о защите прав потребителей и об исполнении кредитных обязательств указал, что оно возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, причем в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ и ч. 1 ст. 56 ГПК РФ истец-кредитор, требующий уплаты неустойки, не обязан доказывать причинение ему убытков - бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике, заявившем о ее уменьшении (п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17; п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.05.2013).

Суд, исходя из обстоятельств дела, имеющихся доказательств, разрешая ходатайство о применении к возникшим между сторонами правоотношениям положений ст. 333 ГК РФ и уменьшении неустойки, учитывая длительность не соблюдения ответчиком условий договора участия в долевом строительстве, регулирующих срок исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, нарушенный им почти на два года, при условии, что объект не введен в эксплуатацию и жилое помещение не передано, последствия такого нарушения, значимость предмета договора для истца, стоимость квартиры, являющуюся для него существенной, оплаченную за счет заемных денежных средств, а погашение долгов планировалось путем реализации 1-комнатной квартиры, в которой проживает семья, необходимость сохранения баланса законных интересов обеих сторон договора, принимая во внимание факт взыскания судом неустойки по исковому заявлению истца за часть периода просрочки, степень вины и реальные возможности ответчика в сложившейся ситуации, многозатратность, трудоемкость и сложность работ по строительству жилого многоквартирного дома, а также тот факт, что застройщик является юридическим лицом, которое ведет строительство за счет привлечения денежных средств дольщиков и сталкивается с трудностями, с учетом соотношения размеров неустойки и основного обязательства по договору, компенсационного характера неустойки, как меры ответственности и недопустимости неосновательного обогащения истца за счет ответчика, считает, что сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по своевременной передаче жилого помещения и полагает возможным уменьшить неустойку до ........ руб., что отвечает требованиям разумности и справедливости.

Определенный размер неустойки, по мнению суда, в наибольшей степени обеспечит баланс прав и законных интересов сторон - истца, которому будет компенсировано нарушение права на своевременное получение объекта долевого строительства, с одной стороны и ответчика, на которого должно быть возложено бремя ответственности за нарушение принятого на себя обязательства по договору участия в долевом строительстве, с другой стороны.

Само по себе наличие у ЗАО «Иркутсклесстрой» задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (справка № от Дата) не может служить основанием для уменьшения неустойки.

Согласно ч. 9 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, при установлении нарушения прав потребителя причинение морального вреда презюмируется.

Суд, определяя размер компенсации морального вреда, исходя из приведенных положений Закона РФ «О защите прав потребителей» и разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда РФ, а также положений, закрепленных в ст. ст. 151, 1099-1100 ГК РФ, учитывая характер причиненных истцу нравственных страданий, вызванных длительным ожиданием передачи квартиры, приобретенной для личного проживания, вынужденным проживанием семьи в стесненных условиях, беспокойством за вложенные в строительство денежные средства в значительном размере, наличием долговых обязательств, обращением в различные инстанции с целью ускорения строительства объекта, которое занимает много времени и требует финансовых затрат, сильные переживания, отражающиеся на эмоциональном состоянии, ставшие следствием задержки исполнения ответчиком обязательств по договору участия в долевом строительстве, его поведение, считает, что с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 10 000 руб., что отвечает требованиям разумности и справедливости.

Законодателем установлена повышенная ответственность за нарушение обязательства стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе, строительную деятельность, в связи с чем, удовлетворение судом исковых требований дольщика к застройщику о взыскании неустойки обязательно влечет наложение на ответчика штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законных требований потребителя.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из разъяснений, содержащихся в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012 следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Как видно из материалов дела, Дата ФИО1 обращался к ЗАО «Иркутсклесстрой» с претензией о выплате неустойки за нарушение срока на передачу объекта долевого строительства, но реакции не последовало. Таким образом, требование потребителя в добровольном порядке не было удовлетворено, что наряду с установленным судом фактом нарушения его прав является основанием для взыскания штрафа.

Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 года, утвержденному Президиумом ВС РФ 05 февраля 2014 года, разъяснениям, данным в п. 45 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан», размер присужденной судом компенсации морального вреда должен учитываться при определении размера штрафа, взыскиваемого с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, установленных законом.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, из расчета ........, в размере ........ руб.

При этом, исходя из обстоятельств дела, представленных доказательств, с учетом существа допущенного ответчиком нарушения, принципа разумности и справедливости, оснований для применения ст. 333 ГК РФ и снижении размера штрафа, суд не усматривает. Доводы ответчика суд учел при снижении размера неустойки.

Ч. 1 ст. 88 ГПК РФ предусмотрено, что судебные издержки состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей и другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Как видно из материалов дела, ФИО1, не имея специальных познаний в области юриспруденции, вынужден был обратиться за квалифицированной юридической помощью, заключающейся в формировании правовой позиции по делу и составлении иска к Г.А.А., в связи с чем, понес расходы в размере ........ руб., что подтверждается соглашением об оказании юридической помощи (юридических услуг) от Дата, распиской на сумму ........ руб. и актом приема-передачи выполненных работ от той же даты.

Суд признает указанные расходы необходимыми, связанными с рассмотрением данного дела, и, с учетом сложности спора, объема юридической помощи, времени, потраченного на формирование правовой позиции по делу, на основании произведенного анализа документов, действующего законодательства РФ, судебной практики и на составление искового заявления, стоимость юридических услуг, сложившуюся в регионе, исходя из требований разумности и справедливости, полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг представителя в размере ........ руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ, ст. ст. 333.19, 333.36 НК РФ, с ответчика в доход муниципального образования город Иркутск подлежит взысканию государственная пошлина в размере ........ руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере ........ руб., компенсацию морального вреда в размере ........ руб., штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере ........ руб., расходы на оплату услуг представителя в размере ........ руб.

В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя в большем размере - отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой» в доход муниципального образования город Иркутск государственную пошлину в размере 4 500 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме Дата.

Судья О.А. Матвиенко