Дело №2-812/2025

24RS0004-01-2024-003168-96

Заочное 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 февраля 2025 года Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего Никитина А.В., 

при секретаре Коренко Е.А., 

с участием представителя истца помощника прокурора Березовского района Красноярского края Жалба И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Красноярского края действующий в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, 

у с т а н о в и л:

прокурор 

<

адрес> Красноярского края действующий в интересах ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивировали тем, что 

<

дата> между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №.2400.3813.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям гаража, расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, район гаражей за амбулаторией, бокс №, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:546. В соответствии с пунктом 6 названного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, размер платы 550 рублей.

В этой связи просит суд:

- возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь», в течении 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, в соответствии с договором №.2400.3813.21 от 

<

дата> осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям гаража, расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, район гаражей за амбулаторией, бокс №, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:546.

- взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 1 рубль 38 копеек за каждый день просрочки начиная с 

<

дата> по день фактического осуществления технологического присоединения.

Представитель истца помощник прокурора 

<

адрес> Красноярского края ФИО3, в судебном заседании исковые требования поддержала, просила их удовлетворить. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, в адрес суда прислал возражения на иск, в которых просил в случае удовлетворения исковых требований установить срок исполнения решения суда в течении трех месяцев, в удовлетворении требований о взыскании неустойки, морального вреда, отказать в полном объеме.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена своевременно, должным образом.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в отсутствие ответчика. 

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

<

дата> №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В силу п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Как установлено судом, что 

<

дата> между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №.2400.3813.21 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.1 вышеуказанного договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих

устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего договора.

Из п. 3 указанного выше договора следует, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, район гаражей за амбулаторией, бокс №, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:546.

Также в соответствии с п. 5 указанного выше договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляется 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 6 указанного выше договора).

В соответствии с п. 7 договора ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока указанного в технически условиях осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Пунктом 9 договора на заявителя возложена обязанность: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств, надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 обязательства.

Кроме того, в соответствии с условиями указанного выше договора ФИО1 обязалась оплатить услуги ответчика в размере 550 рублей.

Из технических условий № являющихся приложением к договору от 

<

дата> №.2400.3813.21 следует, что ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 

<

дата> № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; Строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте № настоящих технических условий, до границы установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ.; Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №.

В настоящее время мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не исполнены.

Оценивая представленные доказательства, суд исходит из того, что в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного договором от 

<

дата> №.2400.3813.21 в связи с чем, суд полагает необходимым возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность в соответствии с договором от 

<

дата> №.2400.3813.21 осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, район гаражей за амбулаторией, бокс №, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:546, а именно: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 

<

дата> № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; Строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте № настоящих технических условий, до границы установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ.; Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №.

Суд полагает необходимым установить срок, в течение которого необходимо осуществить мероприятия по технологическому присоединению – в течение 2-ух (одного) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

<

дата> № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При определении размера компенсации, суд учитывает характер причиненных ФИО1 физических и нравственных страданий, с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, а также степени вины причинителя вреда, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца в счет компенсации морального вреда 10 000 рублей. 

В силу п. 1 ч. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 20 договора №.2400.3813.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выданных технических условий для присоединения к электрическим сетям от 

<

дата>, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящем абзаце порядке, за год просрочки.

Принимая во внимание то, что ПАО «Россети Сибирь» по договору №.2400.3813.21 от 

<

дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, в течение 6 месяцев с момента заключения договора, однако принятые на себя обязательства в установленный срок не исполнило, суд находит обоснованными требования истца о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойки в размере 1 рубль 38 копеек (550? 0,25 %) начиная с 

<

дата> по день вступления решения суда в законную силу.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований потребителя в размере 5 000 рублей (10 000 рублей *50%).

Исходя из ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер госпошлины, подлежащий взысканию с ответчика в соответствии со ст. 333.19 НК РФ, составляет 7 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 233-237 ГПК РФ, суд 

р е ш и л:

исковые требования прокурора 

<

адрес> Красноярского края действующий в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, удовлетворить.

Возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» в течение 2-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить, в соответствии с договором от №.2400.3813.21 от 

<

дата> технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств гаража, расположенного по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, район гаражей за амбулаторией, бокс №, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301018:546.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда 10 000 рублей, штраф от суммы присужденной судом в размере 5 000 рублей, а всего 15 000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку в размере 1 рубль 38 копеек за каждый день просрочки, начиная с 

<

дата> по дату вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» госпошлину в доход местного бюджета в размере 7 000 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.В. Никитин

Мотивированное решение изготовлено 

<

дата>.