Дело № 2-80/2025

УИД 39RS0022-01-2024-001723-95

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 января 2025 года г. Черняховск

Черняховский городской суд Калининградской области в составе 

председательствующего судьи Ефременковой В.В., 

при секретаре судебного заседания Колесовой Т.В.,

с участием представителя истца ФИО1 – ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО5 к АО «Россети Янтарь» о понуждении исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за просрочку исполнения договорных обязательств, компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, расходов на оплату услуг представителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику АО «Россети Янтарь», просит: обязать ответчика в течение трех календарных месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить свои обязательства по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям: в доступном для эксплуатационно – технического обслуживания персоналом АО «Россети Янтарь» месте построить трансформаторную подстанцию напряжением 15/0,4 кВ. Место строительства тип ТП, количество и мощность трансформаторов определить проектной документацией; от ближайшей опоры (определить проектной документацией) ВЛ 15 кВ № 15-475 до ТП новая (п.10.1) выполнить строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1,15 км (ориентировочно). При строительстве ВЛЗ 15 кВ применить ж/б, провод СИП-3 сечением согласно расчету, климатические условия: район по ветру -3, район по гололеду -2, максимальное рабочее значение температуры наружного воздуха +35 градусов. При строительстве КЛ 15кВ применить кабель напряжением 20кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение экрана кабеля и токопроводящих жил определить на стадии разработки проекта; строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП (п.10.1) в строну участка заявителя с применением СИП -4 ориентировочной протяженностью 0,27 км. Сечение провода, трассу проектируемой ВЛИ 0,4 определить проектом. Прибор учета (ПУ) установить на опоре (номер уточнить при монтаже) ВЛИ 0,4 кВ Л- новая от ТП новой (п.10.1), установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, от зажимов провода ВЛИ 0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения.

Взыскать с ответчика в ее пользу неустойку, предусмотренную п. 17 договора № за период просрочки исполнения договорных обязательств с 04 июля 2024 года по 25 ноября 2024 года в размере 31186 руб. 29 коп.; компенсацию морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя в размере 15000 руб.; взыскать с ответчика в пользу истца штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50% взыскиваемой суммы; взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30000 руб.

В обоснование требований указано, что согласно договору № ответчик принял на себя обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта истца – индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, КН №. Земельный участок с указанным кадастровым номером принадлежит ей на праве собственности.

Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным 03 июля 2023 года – со дня внесения истцом оплаты в размере 12 904 руб. 67 коп. (15% платы за технологическое присоединение, составляющей 86 031 руб. 15 коп.) за технологическое присоединение по договору. Срок выполнения мероприятий по договору составляет один год, то есть до 03 июля 2024 года. Работы по договору до настоящего времени не выполнены, несмотря на ее обращения. В связи с чем за нарушение условий договора ответчик обязан уплатить неустойку. 

Истица ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте его проведения извещена. В письменном ходатайстве просила рассматривать дело без ее участия, на удовлетворении исковых требований настаивает, доверяет представлять ее интересы представителю ФИО2

В судебном заседании представитель истицы ФИО1 по доверенности ФИО2 поддержал исковые требования по доводам, изложенным в иске. 

Ответчик АО «Россети Янтарь» о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представителя в суд не направил. В письменном отзыве на иск просит в удовлетворении исковых требовании отказать, так как организацией предпринимаются все меры к завершению выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Доказательств причинения морального вреда и причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями истец в дело не представила, стоимость услуг представителя в размере 30 000 руб. является завышенной.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, и дав оценку всем доказательствам по делу в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (далее Правила), объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Согласно п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 ст. 328 ГК РФ предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Согласно п. 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно пп. «г» п. 25(1) Правил, в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Правилами технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 предусмотрено обязательное указание в договоре положений об обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (абзац 3 пп. «в» п. 16).

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При этом согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено, что на основании договора № 5116/06/23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между АО «Россети Янтарь» и ФИО1 сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ПУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, с учетом ранее присоединенной 15,00 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение -0.4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 1 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: малая жилая застройка (индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом) расположенный по адресу: 

<

адрес>, КН № (п. 2 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 86 031 руб. 15 коп (п. 10 договора).

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случае нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) (п. 17 договора).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (полностью или частично в соответствии с п. 11а договора) на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).

Приложением к договору являются технические условия № В5116/23 для присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (л.д. 30), согласно которым сетевая организация должна осуществить мероприятия, которые истцом указаны в исковых требованиях.

03 июля 2023 года ФИО1 были внесены на банковский счет АО «Россети Янтарь» денежные средства на оплату работ по договору в размере 12 904 руб. 67 коп., что подтверждается документами 

<

данные изъяты> (л.д. 33); 25809 руб. 35 коп., что подтверждается платежным поручением № от 23.07.2023 г. (л.д. 34); 30 110 руб. 90 коп., что подтверждается платежным поручением № от 24.08.2023 г. (л.д. 35); 17 206 руб. 23 коп., что подтверждается платежным поручением № от 14.02.2024 г. (л.д. 36). 

Следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 03 июля 2024 года.

Обращения ФИО1, направленные в адрес сетевой организации АО «Россети Янтарь» оставлены без удовлетворения, о чем свидетельствуют ответы от 26 сентября 2024 года и 21 ноября 2024 года (л.д. 36-37,146).

13 декабря 2024 года по факту нарушения АО ««Россети Янтарь» сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по № от 03.07.2023 об осуществлении технологического присоединения объекта, расположенного по 

<

адрес>, (кад. №) заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области вынесено постановление, которым АО «Россети Янтарь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей. 

Факт невыполнения указанных мероприятий по договору в установленный им срок ответчиком не оспаривается. 

За период просрочки исполнения обязательств с 04.07.2024 года по 25.11.2024 года (145 дней) с ответчика подлежит взысканию неустойка, предусмотренная договором: 86031 руб. 15 коп. х 0,25% х 145 = 31 186 руб. 29 коп. Суд не находит оснований для уменьшения размера неустойки по заявлению АО «Россети Янтарь», так как она соразмерна последствиям нарушения ответчиком обязательств по договору и не влечет для истца необоснованной выгоды.

Поскольку права потребителя были нарушены действиями ответчика, связанными с ненадлежащим исполнением условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о взыскании денежной компенсации морального вреда. 

Определяя размер компенсации морального вреда, суд в соответствии с требованиями разумности и справедливости согласно ст.1101 ГК РФ, приходит к выводу о взыскании компенсации морального вреда в сумме 3000 рублей.

Также с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф, предусмотренный Законом о защите прав потребителей за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от присужденной судом к взысканию денежной суммы: 3000 руб. + 31 186 руб. 29 коп. / 2 = 17 093 руб. 15 коп.

Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Договором на оказание юридических услуг № (л.д. 42-43), квитанцией (л.д. 44) подтверждается стоимость и оплата истицей в размере 30 000 рублей услуг представителя ФИО2. Учитывая сложность дела, объем исковых требований, категорию спора, суд считает, что судебные расходы подлежат взысканию частично в сумме 15000 рублей.

В порядке ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой освобожден истец, в размере 4 000 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.193-199 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО6 ИНН № удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (ИНН 

<

***>) исполнить обязательства по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение трех календарных месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- в доступном для эксплуатационно – технического обслуживания персоналом АО «Россети Янтарь» месте построить трансформаторную подстанцию напряжением 15/0,4 кВ. Место строительства тип ТП, количество и мощность трансформаторов определить проектной документацией;

- от ближайшей опоры (определить проектной документацией) ВЛ 15 кВ № 15-475 до ТП новая (п.10.1) выполнить строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1,15 км (ориентировочно). При строительстве ВЛЗ 15 кВ применить ж/б, провод СИП-3 сечением согласно расчету, климатические условия: район по ветру -3, район по гололеду -2, максимальное рабочее значение температуры наружного воздуха +35 градусов. При строительстве КЛ 15кВ применить кабель напряжением 20кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение экрана кабеля и токопроводящих жил определить на стадии разработки проекта;

- строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП (п.10.1) в строну участка заявителя с применением СИП -4 ориентировочной протяженностью 0,27 км. Сечение провода, трассу проектируемой ВЛИ 0,4 определить проектом;

- прибор учета (ПУ) установить на опоре (номер уточнить при монтаже) ВЛИ 0,4 кВ Л- новая от ТП новой (п.10.1), установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, от зажимов провода ВЛИ 0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1 ФИО7 неустойку, предусмотренную договором № за период просрочки с 04 июля 2024 год по 25 ноября 2024 года в размере 31186 руб. 29 коп., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя – 17 093 руб. 15 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 руб., всего 66 279 рублей 44 копейки.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Черняховский городской суд Калининградской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 27 января 2025 года.

Судья В.В. Ефременкова