РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 декабря 2025 года	 адрес

Лефортовский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Игониной О.Л.,

при помощнике судьи фиоо.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-7279/2025 (УИД 77RS0014-02-2025-007600-43) по иску ФИО1, ФИО1 к адрес «ГАЛАКТИОН» об обязании устранить недостатки объекта долевого строительства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истцы ФИО1, ФИО1 обратились в суд с иском к ответчику адрес «ГАЛАКТИОН» об обязании устранить недостатки объекта долевого строительства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, ссылаясь на то, что 27.03.2024 года между ФИО1, ФИО1 (участники) и адрес «ГАЛАКТИОН» (застройщик) был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома № Люб101-17(кв)-1/17/1(1) (АК), в соответствии с которым адрес «ГАЛАКТИОН» обязался передать участникам долевого строительства объект долевого строительства - жилое помещение, назначение: квартира, условный номер: 211, этаж расположения: 17, номер подъезда (секции): 1, проектная общая площадь: 40,40 кв.м, количество комнат: 1. На основании п. 4.1 договора участия в долевом строительстве доля участия участников долевого строительства составляет сумма Финансовые обязательства по договору исполнены участниками долевого строительства в полном объеме. 31.03.2025 года между сторонами подписан передаточный акт, по которому объект долевого строительства передан ответчиком истцам. Истцами были обнаружены строительные недостатки объекта долевого строительства. Согласно заключению специалиста фио № 2835/СТЭ-25 в квартире № 211, расположенной в многоквартирном доме по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, установлено, что фактическое качество выполненных работ не соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации, а также иным обязательным требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Стоимость устранения строительных недостатков объекта долевого строительства составляет сумма

Основываясь на изложенном, истцы, уточнив требования в ходе рассмотрения дела в порядке ст.39 ГПК РФ, просят суд обязать ответчика устранить строительные недостатки объекта долевого строительства в течение 45 дней с момента вступления решения в законную силу, взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения требований об устранении недостатков за период с 01.01.2026 года по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф, расходы по оплате досудебного исследования в размере сумма, расходы по оплате юридических услуг в размере сумма, расходы на проведение обследования квартиры в размере сумма, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма

Истец ФИО1, ФИО1, их представитель, в судебное заседание не явились, извещены.

Представитель ответчика адрес «ГАЛАКТИОН» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, представил в материалы дела письменные возражения на иск, в которых просил отказать в удовлетворении требований в полном объеме, в случае удовлетворения исковых требований просил предоставить срок для устранения недостатков объекта долевого строительства не менее 60 календарных дней, снизить заявленный ко взысканию размер компенсации морального вреда до разумных пределов, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

С учетом изложенного, а также положений ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в данном судебном заседании в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований ст. 56 ГПК РФ и по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, регулируются нормами Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 30.12.2004 г. № 214).

В соответствии с частью 1 статьи 4 указанного ФЗ от 30.12.2004 г. № 214, по договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с ч. 9 ст. 4 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

В случае если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в ч. 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2 ч. 2 ст. 7 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214).

В соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.

Согласно ч. 6 ст. 7 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных дефектов (недостатков) при условии, что такие недостатки выявлены в течение гарантийного срока.

В соответствии со ст. 8 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 предусмотрено, что передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Судом установлено и следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, что 27.03.2024 года между ответчиком адрес «ГАЛАКТИОН» (застройщик) и ФИО1, ФИО1 (участники долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № Люб101-17(кв)-1/17/1(1) (АК), в соответствии с которым ответчик (застройщик) обязался передать истцам, как участникам долевого строительства, объект долевого строительства — квартиру, расположенную в строящемся доме и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать соответствующий объект долевого строительства участникам долевого строительства, а участники долевого строительства обязались уплатить обусловленную настоящим договором цену и при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости принять объект долевого строительства.

Государственная регистрация данного договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве произведена в установленном законом порядке.

Объектом долевого строительства является жилое помещение, назначение: квартира, условный номер: 211, этаж расположения: 17, номер подъезда (секции): 1, проектная общая площадь: 40,40 кв.м, количество комнат: 1.

На основании п. 4.1 договора участия в долевом строительстве доля участия участников долевого строительства составляет сумма

Финансовые обязательства по договору исполнены участниками долевого строительства в полном объеме.

31.03.2025 года между сторонами подписан передаточный акт, по которому объект долевого строительства передан ответчиком истцам.

За время эксплуатации квартиры истцом были обнаружены строительные недостатки объекта долевого строительства.

Согласно заключению специалиста фио № 2835/СТЭ-25 в квартире № 211, расположенной в многоквартирном доме по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, установлено, что фактическое качество выполненных работ не соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации, а также иным обязательным требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Стоимость устранения строительных недостатков объекта долевого строительства составляет сумма

По ходатайству стороны ответчика судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО «ЦСЭ «РАТТАН».

Согласно выводам эксперта ООО «ЦСЭ «РАТТАН», по результатам проведенного обследования помещений квартиры, расположенной по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, кв.211, установлено, что в квартире имеются недостатки (дефекты) в части соответствия строительным нормам и правилам, указанные в таблице 3 «Сводная ведомость недостатков», а именно: полы (комната, ламинат): наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней, наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; межкомнатная дверь (комната): зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков (п.5.3.7 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня; оконный блок (комната, ПВХ): негерметичность узлов примыкания по периметру оконных блоков (Г.2.1 ГОСТ 30971-2012) срок устранения 3-4 дня, механические повреждения ПВХ профиля (п.Д.7.1 ГОСТ 30674-2023) срок устранения 10-12 дней; полы (кухня, ламинат): наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней; стены (кухня, обои): наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; оконный блок (кухня, ПВХ): отклонение от вертикали профиля оконного блока 5 мм на 1 м (п.4.2.4 ГОСТ 30673-2013) срок устранения 3-4 дня, механические повреждения ПВХ профиля (п.Д.7.1 ГОСТ 30674-2023) срок устранения 10-12 дней; полы (прихожая, ламинат): наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней; стены (прихожая, обои): отклонение от вертикали 8 мм на 2 м (табл.7.4 СП 71.13330.2017) срок устранения 40-45 дней, наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; дверь входная (прихожая, стальная): царапины, сколы (механические повреждения) (п.5.3.11 ГОСТ 31173-2016, п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) срок устранения 3-4 дня; полы (санузел, напольная плитка): уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 7-9 дней; стены (санузел, плитка): отклонение от вертикали 5 мм на 1 м (табл.7.6 СП 71.13330.2017) срок устранения 40-45 дней, неравномерная ширина швов (табл.7.6 СП 71.13330.2017) срок устранения 10-12 дней; межкомнатная дверь (санузел): отклонение дверного полотна/коробки от плоскости/прямолинейности 8 мм на 2 м (п.5.3.4 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня, зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков (п.5.3.7 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня. Недостатки возникли вследствие нарушения застройщиком технических регламентов, сводов правил. Стоимость приведения квартиры в состояние, пригодное для предусмотренного договором использования, удовлетворяющее условиям договора, положениям техническим требованиям, исходя из расценок, взимаемых за аналогичные работы в данной местности (среднерыночных цен), составляет сумма Материалы и конструкции, которые подлежат замене и пригодные к использованию в дальнейшем отсутствуют, в связи с чем, их стоимость не рассчитывалась. Разумный срок необходимый для устранения недостатков в квартире по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, кв.211, указан в таблице 3 «Сводная ведомость недостатков» в зависимости от характера дефекта.

Суд принимает указанное заключение в качестве доказательства, отвечающего требованиям относимости и допустимости, поскольку экспертное заключение содержит подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы мотивированы, имеют соответствующую квалификацию и опыт работы, выводы экспертов ответчиком не опровергнуты. Кроме того, заключение отвечает требованиям ст. 86 ГПК РФ, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» выводы экспертов не носят характера вероятности, согласуются с действительными обстоятельствами по делу, и в совокупности с материалами дела позволяют установить фактические обстоятельства.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что на ответчика надлежит возложить обязанность устранить недостатки объекта долевого строительства, переданного истцам, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, кв.211, согласно выводам судебной экспертизы в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Согласно ч. 2 ст. 10 ФЗ от 30.12.2004 № 214, моральный вред, причиненный гражданину - участнику долевого строительства, заключившему договор исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вследствие нарушения застройщиком прав гражданина - участника долевого строительства, предусмотренных настоящим Федеральным законом и договором, подлежит компенсации застройщиком при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных гражданином - участником долевого строительства убытков.

Суд находит обоснованными требования истцов о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, учитывая, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных гражданином - участником долевого строительства убытков, суд усматривает вину застройщика в нарушении условий договора и передаче объекта долевого строительств с не оговоренными недостатками и не устраненными в добровольном порядке, судом установлено наличие вины ответчика в нарушении прав истца, выразившееся в ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по договору участия в долевом строительстве, с ответчика в пользу каждого истца подлежит взысканию денежная компенсация морального вреда в размере сумма, что, по мнению суда, является соразмерным и разумным, полагая, что заявленная истцами сумма компенсации явно завышена.

Истцы просят взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения требований об устранении недостатков за период с 01.01.2026 года по день исполнения решения суда, штраф.

В соответствии ч. 8 ст. 7 ФЗ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за нарушение срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, за нарушения сроков исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора, требования о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков (дефектов) застройщик уплачивает участнику долевого строительства за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период соответствующего нарушения, от стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков (дефектов), или от суммы, подлежащей возмещению участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, приобретающий жилое помещение исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предусмотренная настоящей частью неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере, но не более стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков (дефектов). Если недостаток (дефект) объекта долевого строительства (жилого помещения) является основанием для признания такого объекта долевого строительства (жилого помещения) непригодным для проживания, размер неустойки (пени), предусмотренной настоящей частью, рассчитывается от цены договора.

Согласно ч. 3 ст. 10 ФЗ от 30.12.2004 № 214, при удовлетворении судом требований гражданина - участника долевого строительства, заключившего договор исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, суд в дополнение к присужденной в пользу гражданина - участника долевого строительства сумме взыскивает с застройщика в пользу гражданина - участника долевого строительства штраф в размере пяти процентов от присужденной судом суммы, если данные требования не были удовлетворены застройщиком в добровольном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» неустойка (штраф, пени), иные финансовые санкции, подлежащие с учетом части 9 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» уплате гражданину - участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не начисляются за период со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2024 года включительно. Постановление вступило в силу 22 марта 2024 года.

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2024 № 1916 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2024 г. № 326» внесены изменения в указанное выше постановление.

В соответствии с абз. 4 п. 1 постановления Правительства РФ от 18 марта 2024 № 326 (в редакции постановления Правительства РФ от 26 декабря 2024 г. № 1916) неустойка (штраф, пени), подлежащая с учетом части 8 статьи 7 и части 3 статьи 10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» уплате гражданину - участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не начисляется за период с 1 января 2025 г. до 30 июня 2025 г. включительно.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2025 № 925 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2024 № 326, которыми установлен иной порядок исполнения обязательств. В силу указанных изменений предусмотрена отсрочка исполнения обязательств по рассматриваемым требованиям до 31 декабря 2025 г. включительно.

Поскольку претензия была направлена истцом ответчику 03.06.2025 года - в период действия моратория, с учетом положений Постановления Правительства РФ от 18.03.2024 № 326, Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2024 № 1916, неустойка и штраф взысканию с ответчика не подлежит.

Кроме того, наличие строительных недостатков объекта долевого строительства, их объем, и обязанность ответчика по их устранению в срок не превышающий 45 календарных дне с даты вступления судебного акта в законную силу установлены настоящим решением суда, в связи с чем, суд полагает, что обязательства ответчиком по устранению недостатков объекта долевого строительства в настоящее время не нарушены, в связи с чем, к нему не может быть применена мера ответственности в виде начисления и уплаты истцам неустойки за нарушение сроков исполнения требований об устранении недостатков. Истцами не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что их право будет нарушено на будущее время.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

При распределении судебных расходов, суд в соответствии со ст. 98 ГПК РФ приходит к выводу, что с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию документально подтвержденные связанные с рассмотрением настоящего дела расходы по оплате досудебного исследования в размере сумма, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма

Расходы истцов, связанные с обследованием объекта долевого строительства в размере сумма, удовлетворению не подлежат, поскольку не представлено доказательств необходимости несения указанных расходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Из представленного истцами договора на оказание юридических услуг усматривается, что истцами понесены расходы по оплате юридических услуг в размере сумма С учетом сложности данного дела, объема представленных и исследованных судом документов, количества и продолжительности судебных заседаний, разумности, на основании ст. ст. 98, 100 ГПК РФ суд считает возможным удовлетворить требование о взыскании расходов по оплате юридических услуг частично в размере сумма

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москва подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1, ФИО1 к адрес «ГАЛАКТИОН» об обязании устранить недостатки объекта долевого строительства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов – удовлетворить частично.

Возложить на адрес «ГАЛАКТИОН» (ОГРН 

<

***>) обязанность в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, устранить недостатки объекта долевого строительства, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, адрес отделение, д.48, кв.211, а именно: наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней, наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; межкомнатная дверь (комната): зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков (п.5.3.7 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня; оконный блок (комната, ПВХ): негерметичность узлов примыкания по периметру оконных блоков (Г.2.1 ГОСТ 30971-2012) срок устранения 3-4 дня, механические повреждения ПВХ профиля (п.Д.7.1 ГОСТ 30674-2023) срок устранения 10-12 дней; полы (кухня, ламинат): наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней; стены (кухня, обои): наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; оконный блок (кухня, ПВХ): отклонение от вертикали профиля оконного блока 5 мм на 1 м (п.4.2.4 ГОСТ 30673-2013) срок устранения 3-4 дня, механические повреждения ПВХ профиля (п.Д.7.1 ГОСТ 30674-2023) срок устранения 10-12 дней; полы (прихожая, ламинат): наличие на покрытии пола трещин, вздутия, приподнятые кромки покрытия (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 5-7 дней; стены (прихожая, обои): отклонение от вертикали 8 мм на 2 м (табл.7.4 СП 71.13330.2017) срок устранения 40-45 дней, наличие воздушных пузырей, замятин, доклеек и отслоения (п.7.6.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 26-32 дня; дверь входная (прихожая, стальная): царапины, сколы (механические повреждения) (п.5.3.11 ГОСТ 31173-2016, п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) срок устранения 3-4 дня; полы (санузел, напольная плитка): уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов (табл.8.15 СП 71.13330.2017) срок устранения 7-9 дней; стены (санузел, плитка): отклонение от вертикали 5 мм на 1 м (табл.7.6 СП 71.13330.2017) срок устранения 40-45 дней, неравномерная ширина швов (табл.7.6 СП 71.13330.2017) срок устранения 10-12 дней; межкомнатная дверь (санузел): отклонение дверного полотна/коробки от плоскости/прямолинейности 8 мм на 2 м (п.5.3.4 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня, зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков (п.5.3.7 ГОСТ 475-2016) срок устранения 2-3 дня.

Взыскать с адрес «ГАЛАКТИОН» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате досудебного исследования в размере сумма, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма, расходы по оплате юридических услуг в размере сумма

Взыскать с адрес «ГАЛАКТИОН» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате досудебного исследования в размере сумма, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма, расходы по оплате юридических услуг в размере сумма

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с адрес «ГАЛАКТИОН» (ОГРН 

<

***>) государственную пошлину в доход бюджета субъекта РФ – города федерального значения Москва в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Лефортовский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 30 марта 2026 года.

Судья	 	 	 О.Л. Игонина