Дело № 2-145/2025

22RS0032-01-2025-000107-04

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Горняк 03 апреля 2025 года

Локтевский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Марфутенко В.Г.,

при секретаре Топольской Н.А., 

с участием помощника прокурора Локтевского района Тицких О.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Локтевского района Алтайского края в интересах ФИО2 к ПАО «Россетти Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Локтевского района, действующий в интересах ФИО7, обратился в Локтевский районный суд Алтайского края с исковым заявлением к ПАО «РоссетиСибирь», ссылаясь на то, что прокуратурой Локтевского района по обращению ФИО7 и ФИО3 проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики при осуществлении технологического присоединения.

Установлено, что между ФИО7 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на присоединение объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. В соответствии с заключенным договором срок технологического присоединения составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию обязанностей по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В соответствии с пунктом 10 Договора технологического присоединения, размер платы составляет 26 863 рубля 86 копеек.

Указанная сумма оплачена дочерью ФИО7 ФИО4 в полном объеме.

Согласно п. 21 Договора, он считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Поскольку оплата произведена 05.07.2024, договор считается заключенным с этой даты. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течении 6 месяцев, т.е. до 05.01.2025.

Однако ответчик не выполнил в установленный срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, от установленной законом и договором обязанности уклоняется.

Указывает, что согласно ч.1 ст. 4 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее по тексту - Федеральный закон № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным (абз. 4 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 утверждены «Правила технологического присоединенияэнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила № 861).

В силу п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с пп. «б» п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным условием договора.

В соответствии с пп. «б» п. 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в п. 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединениянергопринимающихустройств, максимальная мощностькоторыхсоставляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжениекоторыхпредусматривается по одному источнику.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполнятьсянадлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктом 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Согласно ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Расчет неустойки:

Период с 06 января 2025 (со дня, следующего за днем истечения срока для осуществления мероприятий по технологическому присоединению) по 21 февраля 2025 = 47 дней.

Плата за технологическое присоединение - 26 863 рубля 86 копейки.

26 863,86 рублей*0,25%*47=3 153 рубля 70 копеек.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами, и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Согласно части 2 статьи 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

ПАО «Россети Сибирь» нарушением условий договора о технологическом присоединении, причинен моральный вред Г., который он с учетом объема и характера нравственных или физических страданий, степени вины ПАО «Россети Сибирь» определил в размере 5 000 рублей.ФИО7 является пенсионером, инвалидом 3 группы. Кроме того, нарушение сроков, гарантированных законом, ущемляет права ФИО7 обратившегося в Сетевую организацию на своевременное подключение к электрическим сетям. Вне зависимости от наличия технических трудностей, связанных с проведением мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация обязана надлежаще исполнить соответствующие мероприятия в установленный законом и договором срок.

Процессуальный истец просил обязатьПАО «Россети -Сибирь»исполнитьдоговор обосуществлении технологического присоединения кэлектрическим сетям объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с условиями и характеристиками, указанными в договоре от «05» июля 2024 года в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; взыскатьсПАО«РоссетиСибирь»в пользуГребенниковаАнатолия ФИО5 за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 3 153 рубля 70 копеек; взыскатьс ПАО «РоссетиСибирь»ФИО15 ФИО6 денежную сумму в размере 5 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Представитель процессуального истца - помощник прокурора Локтевского района Тицких О.И. в судебном заседании уточнил исковые требования, просил взыскать с ПАО «РоссетиСибирь»в пользуГребенниковаАнатолия ФИО5 за нарушение срока исполнения обязательств по договору в ранее указанном размере 3 153 рубля 70 копеек, но исходяиз требований п. 17 договора обосуществлении технологического присоединения кэлектрическим сетям от «05» июля 2024 года, т.е. договорную неустойку, в остальной части заявленные требования оставил в прежней редакции. Просил удовлетворить требования, с учетом их уточнения, в полном объеме, по доводам, изложенным в иске.

Материальный истец ФИО7 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебном заседании 12 марта 2025 года заявленные прокурором исковые требования просил удовлетворить, пояснил, что к ним домой приезжал представитель ПАО «Россети Сибирь» в г. Горняке ФИО1. Он пояснил, что у Россетей нет технической возможности исполнить условия договора. Приезжал он несколько раз. Тогда ФИО7 сам купил бытовой электрокотел, потому что возникла необходимость обогревать жилье в связи с наступлением холодов, это было уже 19 ноября. Бытовой котел работает от обычной розетки, но ему недостаточно мощности. Когда включен котел, другие бытовые приборы холодильник и другие отключаются. Для котла нужна мощность 380. Когда включен котел, не работают другие электроприборы. Когда выключен котел, тогда работают другие электроприборы: холодильник, водонагреватель, например. Поэтому приходилось мучиться вот так. За электричество вынуждены платить по 13-14 тыс. руб. в месяц. 

Третье лицо ФИО3 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, в судебном заседании 12 марта 2025 года заявленные прокурором исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в судебное заседание представили отзыв, в котором просили исковые требования оставить без удовлетворения, по доводам указанным в отзыве. 

Указывают, что главной причиной, неисполнения принятых на себя обязательств, послужило тяжелое финансовое положение филиала общества, отсутствие доходов по статье тех. присоединения и недостаточность финансирования инвестиционной программы.

Кроме того, указанный объем работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетёвых районов, чем поставит их в невыгодное положение, что в свою очередь приведет к нарушению прав и законных интересов потребителей других районов электрических сетей, обусловленному нехваткой средств для поддержания их энергокомплекса в качественном состоянии, что не согласуется с универсальным положением статьи 17 Конституции Российской Федерации.

В случае удовлетворения искового заявления, просили суд указать срок исполнения 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Также указали, что ссылка истца в иске на право требования взыскания компенсации морального вреда в связи с нарушением сроков исполнения договора, не может быть принята судом в качестве оснований для компенсации морального вреда, поскольку, по основаниям статьи 151 Гражданского кодекса РФ не доказан факт причинения истцу физических и нравственных страданий. 

В части требований о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение принятого обязательства, указывают, чтообщая сумма подлежащей взысканию неустойкине может превышать26 863.86 руб. - цены договора.

Суд, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту решения - ГПК РФ), счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что 05.02.2025 в прокуратуру Локтевского района с заявлением обратились ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в котором указали, что заключенный между ФИО7 и ПАО «Россети Сибирь» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.07.2024 до настоящего времени не исполнен, просили провести проверку и защитить их права.

ФИО7 на праве собственности с 12.03.2015 принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 12.03.2015 серия 

<

адрес>.

В соответствии с п. 1 статьи 26 Федерального закона 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В силу п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил № 861).

Согласно п. 14 Правил № 861 заявка направляется заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным условием договора, исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Как установлено в судебном заседании, 05.07.2024 между ФИО7 и ПАО «Россети Сибирь», являющейся сетевой организацией, заключен типовой договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на присоединение объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 6 кВт;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 6 кВт по уровню напряжения 0,23 кВ.

Согласно п. 5 Договора срок технологического присоединения составляет 6 месяца со дня заключения договора.

Договорсчитается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 Договора).

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы составляет 26 863 рубля 86 копеек.

Оплата предусмотренных договором услуг произведена 05.07.2024 дочерью материального истца ФИО4 в полном объеме в сумме 26 863 рубля 86 копеек, что подтверждено представленной справкой по операции ПАО «Сбербанк».

В соответствии с пунктом 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию обязанностей по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Таким образом, учитывая дату внесения ФИО7 суммы оплаты предусмотренных договором услуг, технологическое присоединение к электрическим сетям объекта материального истца ответчиком должно было быть произведено не позднее 05.01.2025.

До настоящего времени условия Договора ПАО «Россети Сибирь» надлежащим образом не исполнены, технологическое присоединение к электрическим сетям объекта материального истца не произведено.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Таким образом, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в судебном заседании с достоверностью установлено, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако принятые на себя обязательства по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 ГПК РФ не представлено.

Ссылка стороны ответчика на невозможность исполнения мероприятий по технологическому присоединению по причинам отсутствия источника финансирования и тяжелого финансового положения общества к обстоятельствам непреодолимой силы не относится, и, как основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательства, судом учтено быть не может.

Таким образом, отказ от исполнения действующего договора является незаконным, нарушающим права истца.

Учитывая вышеизложенное, суд приходить к выводу, что сетевая организация при отсутствии обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательства, заключая договор с физическим лицом, обязана в установленный договором срок надлежащим образом исполнить обязательства, предусмотренные договором, в том числе мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя. 

Следовательно, имеются основания для удовлетворения исковых требований в части возложения на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № в соответствии с условиями и характеристиками, указанными в договоре № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 июля 2024 года.

Истец просит установить срок исполнения настоящего решения - в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в письменном отзыве приведенный срок полагал чрезмерно коротким, при удовлетворении иска просил суд указать срок исполнения в 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика, учитывая возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акт, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, полагает возможным установить срок исполнения судебного акта в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу, полагая такой срок достаточным для исполнения сетевой организацией принятых на себя обязательств.

В силу п. 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки за период с 06 января 2025 года по 21 февраля 2025 года в размере 3 153 рубля 70 копеек согласно расчета, указанного в иске, с учетом утонения последнего процессуальным истцом в данной части, а именно: период с 06 января 2025 (со дня, следующего за днем истечения срока для осуществления мероприятий по технологическому присоединению) по 21 февраля 2025 = 47 дней. Плата за технологическое присоединение - 26 863 рубля 86 копейки. 26 863,86 рублей*0,25%*47=3 153 рубля 70 копеек.

Данный расчет, с учетом положений п. 10, п. 17 Договора, судом проверен, является арифметически верным, принят судом во внимание, считается правильным.

Оценив представленные доказательства, суд учитывая все существенные обстоятельства дела, длительность и последствия нарушения обязательства, принцип соразмерности ответственности последствиям нарушения обязательства, степень вины ответчика, определяет подлежащий взысканию размер неустойки в размере, заявленном истцом.

Истцом заявлено требование о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями (т.е. гражданами, имеющими намерение заказать или приобрести либо заказывающими, приобретающими или использующими товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

С учётом изложенного, суд приходит к выводу, что к возникшим между сторонами правоотношениям применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно положениям статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

ФИО2 обладает преклонным возрастом (74 года), является пенсионером по старости, инвалидом 3 группы по общему заболеванию бессрочно с первой степенью ограничения способности к трудовой деятельности, проживает совместно с супругой, ФИО3 (возрастом 71 год), пенсионером по старости, инвалидом 3 группы по общему заболеванию бессрочно.

В результате неисполнения ответчиком ПАО «Россети Сибирь» условий договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 июля 2024 года, материальный истец, помимо установленного факта нарушения прав потребителя неисполнением условий договора, несет нравственные страдания, связанные с нарушением режима функционирования бытовых электроприборов.

При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает факт нарушения прав истца как гражданина-потребителя, характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, степень нравственных страданий истца, вынужденного длительный период времени ожидать исполнения сетевой организацией своего обязательства, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным определить его в размере 3 000 рублей.

Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая взысканные в пользу истца суммы в общем размере 6 153 рубля 70 копеек (3 153 рублей 70 копеек + 3 000 рублей), суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 3076 рублей 85 копеек.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования с учетом уточнения - удовлетворитьчастично.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) обязанность в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № в соответствии с условиями и характеристиками, указанными в договоре № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 июля 2024 года.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 06 января 2025 года по 21 февраля 2025 года в размере 3 153 рубля 70 копеек, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 3076 рублей 85 копеек.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Локтевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Марфутенко В.Г. 

Мотивированное решение изготовлено 16 апреля 2025 года.