Дело №2-652/2017 г. Валдай 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 октября 2017 года Валдайский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Соколова С.Б., с участием прокурора –помощника прокурора Валдайского района Соловьева К.А., представителя ответчика МАОУ «Средняя школа №1 им. М.Аверина» – ФИО1, представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Администрации Валдайского муниципального района – ФИО2, при секретаре Алиевой Х.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Валдайского района Новгородской области, действующего в защиту прав и законных интересах неопределенного круга лиц, к МАОУ «Средняя образовательная школа №1 им. М.Аверина» об обязании совершить определенные действия, 

установил:

Прокурор Валдайского района обратился в суд с иском к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная школа №1 им. М.Аверина» (далее Учреждение) об устранении протечки кровли, приводящие к протеканию потолка в кабинете химии, в кабинете физики, в помещении рекреации, расположенных на втором этаже здания филиала МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г. Валдай» в с. Едрово, расположенного по адресу: 

<

адрес> и выполнении косметического ремонта потолков в указанным помещениях, не позднее 2 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. 

В обоснование иска указано, что в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии в здании школы, присутствуют следы протеканий и замачиваний на стенах и потолке, отслоившаяся штукатурка, что не обеспечивает безопасность жизни и здоровья лиц, посещающих здание филиала МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г. Валдай» в с. Едрово.

В судебном заседании прокурор иск поддержал.

Представитель ответчика МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г. Валдай» ФИО1 исковые требования признала в полном объеме, пояснила, что ею неоднократно подавались заявки, касающиеся косметического ремонта, однако из-за недостаточного финансирования косметический ремонт завершить невозможно, также пояснила, что выполнение косметического ремонта в полном объеме не предоставляется возможным, поскольку ремонт необходимо проводить в период каникул. Кроме того, представитель ответчика просила предоставить возможность ликвидировать выявленные нарушения, касающиеся ремонта кровли и косметического ремонта в учебных помещениях, в летний период по причине недостаточного финансирования, а ремонт кровли требует соответствующих погодных условий, в связи с чем просила установить срок для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства до 01 сентября 2018 года.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Администрации Валдайского муниципального района – ФИО2 против заявленных требований не возражала, просила установить срок для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства до 01 сентября 2018 года, в связи с недостаточностью финансирования, а также сезонностью работ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Последствия признания представителем ответчика иска, предусмотренные ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, представителю ответчика разъяснены.

Судом признание представителем ответчика иска принято, поскольку оно не противоречит закону (ч.1 ст. 39 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. «СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.29. «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), не нарушает прав и законных интересов других лиц, что в силу ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 173 ГПК РФ является основанием для принятия судом решения об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определённые действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

Разрешая вопрос о сроке исполнения решения суда, суд учитывает порядок привлечения подрядных организаций к выполнению работ, время, необходимое для решения вопроса о финансировании работ, проведения конкурса, и полагает необходимым определить этот срок до 01 сентября 2018 года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, поскольку прокурор района был освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина должна быть взыскана с ответчика.

Руководствуясь ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 173, ст. ст. 194-199, 206 ГПК РФ, суд 

р е ш и л:

Иск прокурора Валдайского района удовлетворить.

Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа №1 им. М.Аверина» в срок до 01 сентября 2018 года устранить протечки кровли, приводящие к протеканию потолка в кабинете химии, в кабинете физики, в помещении рекреации, расположенных на втором этаже здания филиала МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина г. Валдай» в с. Едрово, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и выполнить косметический ремонт потолков в указанным помещениях. 

Взыскать с Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №1 им. М.Аверина» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

На решение лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба, а прокурором - представление, в Новгородский областной суд через Валдайский районный суд Новгородской области в течение месяца. 

Судья: подпись

Копия верна: судья С.Б. Соколов

Решение вступило в законную силу «……….»…………………..2017 года.