УИД 77RS0013-02-2025-011538-19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 января 2026 года Кунцевский районный суд адрес в составе:

судьи Кругликовой А.В.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-959/26 по иску ООО «Капитель» к ООО «ТВИН», ФИО1 о взыскании денежных средств, пени, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам, в котором просит взыскать солидарно денежные средства в размере сумма, пени в размере сумма за период с 03.07.2025 по 24.07.2025, пени в размере сумма за период с 25 07.2025 по 11.08.2025 (дату расторжения Договора), пени в размере сумма за период с 01.08.2025 по 31.10.2025 (день предъявления искового заявления) за просрочку исполнения обязательств по погашению (возврату) аванса (п. 17.3. Договора), пени за просрочку исполнения обязательств по погашению (возврату) аванса на основании п.17.3 Договора за период с 01.11.2025 - по день погашения задолженности, в размере 1/300, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от размера выданного, но не погашенного (не возвращённого) в срок аванс, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

Иск мотивирован тем обстоятельством, что 02 июня 2025 года между ООО «КАПИТЕЛЬ», (Генподрядчик, Истец) и ООО «ТВИН» (Подрядчик) заключён Договор № 0206/Шеп14/ЭОМ на выполнение комплекса работ по устройству системы электроснабжения на объекте «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: адрес) по адресу: адрес, внутригородское муниципальное образование Лефортово, адрес, земельный участок 14 (адрес) адрес». Согласно условиям Договора Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлечёнными силами и средствами комплекс работ по устройству системы электроснабжения Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией за цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, установленные Графиком производства работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

02 июня 2025 года между ООО «КАПИТЕЛЬ» (Кредитор) и ФИО1 (поручитель), заключен Договор поручительства от 02 июня 2025 года к указанному Договору, согласно условиям которого поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником своих обязательств по договору № 0206/Шеп14/ЭОМ на выполнение комплекса работ по устройству системы электроснабжения на объекте «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: адрес) по адресу: адрес, внутригородское муниципальное образование Лефортово, адрес, земельный участок 14 (адрес) адрес», заключённого Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТВИН» 02 июня 2025 года и Дополнительным соглашениям, заключённым и заключаемых в будущем в рамках действия Основного договора.

Размер ответственности Поручителя (размер требований, предъявляемых к Поручителю по стоящему Договору) определяется размером ответственности Должника по Основному договору без каких-либо ограничений и исключений (п. 1.2. Договора поручительства).

В соответствии с п. 2.2. Договора результатом выполненных Работ по Договору является исполнение Подрядчиком работ в полном объёме согласно условиям Договора, а также подписание Итогового акта исполнения обязательств между Сторонами.

В соответствии с п. 3.1. Договора цена Договора согласована Сторонами Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Подрядчиком Работ (оказанием услуг) в соответствии с настоящим Договором, и составляет сумма, в том числе НДС 20% сумма.

На основании п. 3.3. Договора Генподрядчик вправе перечислить авансовый платёж в размере не более 80 % от Цены Договора.

По состоянию на 31 октября 2025 года Генподрядчиком произведена оплата/авансирование по Договору в размере сумма, в т.ч. НДС 20%, что подтверждается платёжным поручением № 3033 от 10 июня 2025 года.

По состоянию на 24 июля 2025 года подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте, что влечёт неизбежное получение отрицательного результата по Объекту.

24 июля 2025 года Генподрядчик направил Подрядчику/Ответчику 1 претензию об исполнении обязательств по договору.

Данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск по основаниям, изложенным в нем.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 не возражал против удовлетворения иска.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «Твин» не явился, извещен, причины неявки суду не сообщил.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, судом извещался о дне слушания дела.

В порядке ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ сторон от исполнения обязательств по Договору не допускается.

На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Из материалов дела следует, что 02 июня 2025 года между ООО «КАПИТЕЛЬ», (Генподрядчик) и ООО «ТВИН» (Подрядчик) заключён Договор № 0206/Шеп14/ЭОМ на выполнение комплекса работ по устройству системы электроснабжения на объекте «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: адрес) по адресу: адрес, внутригородское муниципальное образование Лефортово, адрес, земельный участок 14 (адрес) адрес», согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлечёнными силами и средствами комплекс работ по устройству системы электроснабжения Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией за цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, установленные Графиком производства работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

02 июня 2025 года между ООО «КАПИТЕЛЬ» (Кредитор) и ФИО1 (поручитель), заключен Договор поручительства от 02 июня 2025 года к указанному Договору, согласно условиям которого поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником своих обязательств по договору № 0206/Шеп14/ЭОМ на выполнение комплекса работ по устройству системы электроснабжения на объекте «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: адрес) по адресу: адрес, внутригородское муниципальное образование Лефортово, адрес, земельный участок 14 (адрес) адрес», заключённого Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТВИН» 02 июня 2025 года и Дополнительным соглашениям, заключённым и заключаемых в будущем в рамках действия Основного договора.

Размер ответственности Поручителя (размер требований, предъявляемых к Поручителю по стоящему Договору) определяется размером ответственности Должника по Основному договору без каких-либо ограничений и исключений (п. 1.2. Договора поручительства).

В соответствии с п. 2.2. Договора результатом выполненных Работ по Договору является исполнение Подрядчиком работ в полном объёме согласно условиям Договора, а также подписание Итогового акта исполнения обязательств между Сторонами.

В соответствии с п. 3.1. Договора цена Договора согласована Сторонами Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Подрядчиком Работ (оказанием услуг) в соответствии с настоящим Договором, и составляет сумма, в том числе НДС 20% сумма.

На основании п. 3.3. Договора Генподрядчик вправе перечислить авансовый платёж в размере не более 80 % от Цены Договора.

По состоянию на 31 октября 2025 года Генподрядчиком произведена оплата/авансирование по Договору в размере сумма, в т.ч. НДС 20%, что подтверждается платёжным поручением № 3033 от 10 июня 2025 года.

На основании п. 4.1. Договора сроки выполнения Работ (оказания услуг) по Договору:

Дата начала Работ - дата заключения Договора, т.е. 02 июня 2025 года;

Дата окончания Работ - дата, указанная в Графике производства работ (Приложение №1) - не позднее 30 марта 2026 года.

Порядок сдачи-приёмки работ по Договору предусмотрен разделом 5 Договора.

В соответствии с условиями Договора Генподрядчик обязан осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ, в соответствии с утвержденной Проектной документацией и выданной в производство работ Рабочей документацией, условиями Договора и требованиями положений (в том числе, рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и адрес нормативных документов и правил (п. 6.4. Договора).

Генподрядчик вправе осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Работ (оказания услуг) Подрядчиком (п. 6.14. Договора); проверять и контролировать целевое расходование Подрядчиком денежных средств, полученных от Генподрядчика. Количество и сроки проведения проверок определяются Генподрядчиком самостоятельно и с Подрядчиком не согласовываются. По результатам проверок составляются акты, которые передаются Подрядчику не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после окончания проверки (п. 6.15. Договора); ежемесячно если по усмотрению Представителя Генподрядчика не установлен иной срок, получать отчет о проделанной работе (п. 6.17. Договора).

В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан выполнить Работы (услуги) в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) (п. 7.1.1. Договора); выполнить Работы (услуги) профессиональным образом, максимально безопасно, экономически объективно и с учетом требований окружающей среды, в соответствии с требованиями положений (в т.ч. числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и адрес нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим Договором (п. 7.1.2. Договора); выполнить все Работы (оказать услуги) по настоящему Договору собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядчиков в порядке, установленном настоящим Договором (п. 7.1.3. Договора).

На основании Раздела 17 Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 17.1. Договора).

Неустойка (штраф, пени) уплачивается виновной Стороной на основании письменного требования (претензии) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. Письменное требование (претензия) направляется в адрес виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре (п. 23 Договора).

По состоянию на 24 июля 2025 года подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте, что влечёт неизбежное получение отрицательного результата по Объекту.

24 июля 2025 года Генподрядчик направил Подрядчику/Ответчику 1 претензию об исполнении обязательств по договору.

В срок до 28 июля 2025 года предоставить Генподрядчику отчёт о проделанной работе (п. 6.17. Договора), платежные документы, финансовую отчетность и иные документы, подтверждающие в том объеме целевое использование денежных средств (п. 7.1.20 Договора), копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов и оборудования (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку (изготовление) Материалов и Оборудования, товарных накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику) (п. 7.2.6. Договора).

В срок до 31 июля 2025 года предоставить Генподрядчику отчет об использовании авансовых платежей, надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками выполнение соответствующих работ (оказание услуг), надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на ставку Оборудования, Конструкций, Материалов, Изделий, а также копии договоров, заключенных между подрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ, счета на оплату Оборудования, Конструкций, Материалов, Изделий, выставленные Подрядчику поставщиками, платежные поручения на оплату Оборудования и Материалов, товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение Оборудования и Материалов, счета-фактуры на поставленные товарно-материальные ценности и выполненные Работы (п. 3.5. Договора), в письменном виде детальное описание части Работ, передаваемой Подрядчиком субподрядчику, с указанием полного наименования, ИНН субподрядчика, адреса местонахождения и адреса для корреспонденции, предполагаемого места (части) производства субподрядных работ и обоснование привлечения субподрядчика (п. 13.1.1. Договора, п. 13.2. Договора).

В срок до 31 июля 2025 года возвратить Генподрядчику сумму в размере неотработанного (не погашенного) авансового платежа (п. 7.1.10. Договора), в размере сумма

В срок до 07 августа 2025 года (п. 17.23. Договора) оплатить Генподрядчику пени (п. 17.2. Договора) - просрочку исполнения обязательства по предоставлению Детального понедельного графика на утверждение Генподрядчику (п. 7.1.8. Договора) в размере сумма 02 июня 2025 года (дата заключения Договора) + 30 дней (п. 7.1.8. Договора) = 03 июля 2025 года (следующий день после дня истечения срока).

25 июля 2025 года Сторонами составлен и подписан Акта итогового обмера (фиксации) фактически выполненных Подрядчиком работ, согласно к которому Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте.

Согласно п. 7 Акта итогового обмера (фиксации) Подрядчик обязывался в срок до 08 августа 2025 года возвратить Генподрядчику сумму в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа в размере сумма В случае неисполнения условий настоящего пункта Генподрядчик оставляет за собой право на разрешение указанного вопроса судебном порядке в отношении Подрядчика с требованием о взыскании неустойки (пени, штрафов), предусмотренных разделом 17 Договора, в том числе за несвоевременный возврат суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа до даты фактического исполнения обязательств, в внесением всех судебных расходов на ООО «ТВИН» (п. 7 Акта итогового обмера (фиксации).

Вышеуказанные требования Генподрядчика в установленные сроки Подрядчиком не были исполнены.

Доказательств обратного материалы дела не содержат и не оспариваются стороной ответчика.

При указанных фактических обстоятельствах дела, с учетом вышеприведенных правовых норм, с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию уплаченный по договору подряда аванс в размере сумма

В соответствии с п.17.23 Договора с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию пени в размере сумма за период с 03.07.2025 по 24.07.2025.

Условиями договора (п. 17.2. Договора) предусмотрена ответственность в виде начисления пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей и дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, если иной размер не предусмотрен настоящим разделом.

В связи с допущенной ответчиками просрочкой исполнения обязательств, в пользу истца подлежит взысканию пени сумма за период с 25.07.2025 по 11.08.2025.

На основании условий Договора, пени по Договору за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по погашению (возврату) аванса начисляется за каждый день нарушения Подрядчиком срока погашения аванса (в том числе промежуточного), начиная и дня, следующего после дня истечения установленного срока погашения аванса (в том числе - межуточного) по день погашения задолженности, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера выданного, но не погашенного (не возвращённого) в срок аванса (п. 17.3. Договора).

В соответствии с п.17.3 Договора подряда с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию пени в размере сумма за период с 01.08.2025 по 31.10.2025, пени за период с 01.11.2025 по день погашения задолженность, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от размера выданного, но не погашенного в срок аванса.

В порядке ст.98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194- 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с солидарно с ООО «ТВИН» (ИНН ИНН

<

***>), ФИО1 (паспортные данные) в пользу ООО «Капитель» (ИНН 

<

***>) денежные средства в размере сумма, пени в размере сумма за период с 03.07.2025 по 24.07.2025, пени сумма за период с 25.07.2025 по 11.08.2025, пени в размере сумма за период с 01.08.2025 по 31.10.2025, пени за период с 01.11.2025 по день погашения задолженность, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от размера выданного, но не погашенного в срок аванса, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления.

Мотивированное решение изготовлено 10 марта 2026 года.

Судья