КОПИЯ

Дело № 2-1746/2020

УИД 42RS0002-01-2020-001964-02 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Беловский городской суд Кемеровской области 

в составе председательствующего судьи Орловой Л.Н.

при секретаре Бурухиной Е.В.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Белово Кемеровской области 

12 ноября 2020 г.

гражданское дело по иску ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» к ФИО2 о взыскании убытков и пени, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть 

<

адрес>» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 О взыскании убытков и пени.

Исковые требования мотивированы тем, что между ООО «КЭнК» и ФИО2 был заключен договор № от 03.05.2017об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств нежилого помещения, расположенного: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с момента заключения договора. Таким образом, срок выполнения мероприятий истек.

В соответствии с вышеуказанным договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «КЭнК» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения, а ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно техническим условиям (приложение № 2 к договору) ответчик был обязан произвести строительство ЛЭП-0,4кВ и установить ВУ, ВРУ, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в пределах своего земельного участка, разработку проектной документации в границах своего земельного участка.

При этом, сетевая организация (ООО «КЭнК») обязалось осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям после надлежащего выполнения заявителем всех мероприятий, предусмотренных Договором (п. 6 Договора).

Таким образом, неисполнение ответчиком обязательств по строительству ЛЭП-0,4 кВ, установке ВУ, ВРУ препятствовало исполнению договора сетевой организацией (ООО «КЭнК») в части фактического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Обязательства ответчика являются встречными по отношению к обязательствам ООО «КЭнК».

Ответчик не исполнил своих обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в установленный договором срок.

Условиями договора, а именно п. 15 договора предусмотрена возможность расторжения договора по требованию одной из сторон.

В соответствии со статьями 450.1, 328, 719 ГК РФ ООО «КЭнК» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ расторгло договор в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств ответчиком.

В связи с исполнением договора об осуществлении технологического присоединения № 03-47/17 от 03.05.2017г. ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть г. Белово» понес следующие расходы:

· расходы на строительство объекта электросетевого хозяйства составляют 64 820,67 рублей;

· расходы по договору № от 24.05.2017г., заключенному между Истцом и АО «ПО «Инженерная геодезия» на оказание услуг по топографической съемке местности для проектирования и изготовлению схемы границ земель составляют 6 200,00 рублей;

· расходы по договору № от 06.06.2017г., заключенному между Истцом и ООО«Электротехпроект» на выполнение проектных работ составляют 9 816,00 рублей;

· расходы по договору № от 08.08.2017г., заключенному между Истцом и АО «ПО «Инженерная геодезия» на подготовку исполнительной съемки составляют 3 200,00 рублей;

· расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной при регистрации права собственности на электросетевой объект в размере 22 000,00 рублей.

Итого расходы по строительству и регистрации электросетевого объекта составили 106 036,67 рублей.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ответчику было предложено в добровольном порядкеоплатить убытки. Ответа, как и оплаты, не последовало.

Кроме того, согласно п. 17 Договора сторона договора, допустившая нарушение срокаосуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана оплатить второйстороне неустойку в размере 0,5% от указанного размера платы по договору за каждый деньпросрочки (в пределах года).

Сумма данной неустойки составила 1003,75 рублей, из расчета 550,00 рублей х 5% х365.

Общая сумма убытков и неустойки, подлежащая оплате, составляет 107040,43 рублей.

Истец просит: взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «КЭнК» филиал «Энергосеть г. Белово» убытки в размере 106 036,67 рублей; взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «КЭнК» филиал «Энергосеть г. Белово» неустойку в размере 1 003,75 рублей; взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере3 340,81 рублей.

В судебном заседание представитель истца ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме по обстоятельствам и основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО2 В судебное заседание не явилась, извещена о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, ранее исковые требования не признавала, поясняла, что нежилое здание в настоящее время принадлежит новому собственнику по договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, полагает, в связи с этим она не должна оплачивать, что либо по договору, заключенному с истцом, либо должна оплачивать не в полном объеме.

Третье лицо ФИО, привлеченный к участию в деле определением Беловского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дела в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Во исполнение указанного Закона об электроэнергетике Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иными лицами, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно пункта 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 (физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 данных Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В судебном заседание установлено и не оспаривалось сторонами, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» с одной стороны (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) с другой стороны, заключен Договор №, по условиям которого, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) ЛЭП-0,4кВ, ВРУ- 0,4 кВ нежилого здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств- 15 кВт; категория надежности- III категории; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение- 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств-0 кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (л.д.6-9).

Согласно п.2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания, расположенного по 

<

адрес>

В соответствии с пунктом 5 вышеуказанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 6 данного договора, на истца возложена обязанность надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях:

- в течение 10календарных дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 80 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществление технологического присоединения и направить их заявителю.

Судом установлено, что часть обязательств истцом выполнена, однако дальнейшее их исполнение не представляется возможным в силу того, что обязательства являются встречными и неисполнение своих обязательств ответчиком лишает возможности истца исполнить свои обязательства в полном объеме.

До момента подачи иска и надень его рассмотрения по существу, ответчик не выполнил обязанности предусмотренные пунктом 8 договора (доказательств обратного суду не представлено), а именно по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах грани участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а именно:

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиям, не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий;

- не принял участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям фактического приема (подачи) напряжения и мощности, не подписал акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, а также не представил мотивированный отказ от его подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов сетевой организации;

- не уведомил сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Технические условия к договору № от ДД.ММ.ГГГГ являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора.

В технических условиях для присоединения к электрическим сетям стороны определили, что ООО КЭнК» осуществляет: работы по строительству объектов электрического хозяйства- от существующих объектов электрического хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств: строительство ВЛИ- 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 786-6/0,4 кВ до точки присоединения № 1; фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям после надлежащего выполнения заявителем всех мероприятий, предусмотренных Договором (п. 6 Договора).

В свою очередь ФИО2 обязаласьпроизвести строительство ЛЭП-0,4кВ и установить ВУ, ВРУ, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в пределах своего земельного участка, разработку проектной документации в границах своего земельного участка.

Истец в адрес ответчика направлял письма-уведомления, в которых содержалось предложение истца проинформировать об осуществлении присоединения либо сообщить об отсутствии необходимости исполнения договора, также в адрес ответчика была направлена претензия с расчетом договорной неустойки. Кроме того, истец уведомлял ответчика о том, что договор в случае неисполнения со стороны ответчика его условий, будет расторгнут, с обязательным взысканием понесенных затрат. Однако, до момента подачи иска, никаких действий кроме подачи заявления о расторжении договора от ответчика в адрес истца не поступило. Кроме вышеуказанных мероприятий, истец обращался к ответчику с предложением о подписании соглашения о расторжении договора, но ответчик от заключения данного соглашения отказался.

Длительное не исполнение обязательств, принятых на себя ответчиком, исключает возможность других заявителей воспользоваться зарезервированной за ответчиком мощностью и, соответственно, ограничивает возможность получения прибыли сетевой организации.

Кроме того, истцом были понесены затраты на мероприятия по технологическому присоединению ответчика в видестроительства объекта электросетевого хозяйства в сумме 64 820,67 рублей (л.д.16);услуг по топографической съемке местности для проектирования и изготовлению схемы границ земель (по договору № от 24.05.2017г., заключенному между Истцом и АО «ПО «Инженерная геодезия»)в сумме 6 200,00 рублей (л.д.18-20);проектных работ (по договору № от 06.06.2017г., заключенному между Истцом и ООО «Электротехпроект») в сумме 9816,00 рублей (л.д.21-24); в виде расходов по договору № от 08.08.2017г., заключенному между Истцом и АО «ПО «Инженерная геодезия» на подготовку исполнительной съемки в сумме 3200,00 рублей (л.д.25-27);расходов по оплате государственной пошлины, уплаченной при регистрации права собственности на электросетевой объект в размере 22000,00 рублей (л.д.28)..

Итого расходы по строительству и регистрации электросетевого объекта составили 106036,67 рублей.

Поскольку ответчик не исполнил обязательств, определенных договором, а односторонний отказ от исполнения обязательств по договору не допускается, истец имеет право на взыскание с ответчика договорной неустойки, предусмотренной пунктом 17 заключенного договора.

Договор № заключен сторонами ДД.ММ.ГГГГ, общий размер платы определен пунктом 10 договора и составляет 550 рублей.

Порядок расчета неустойки определен в пункте 17 заключенного сторонами договора и составляет 0,5% от указанного размера платы по договору за каждый день просрочки( в пределах года).

Следовательно, общая сумма неустойки (пени) будет рассчитана следующим образом: общая сумма по договору 550 рублей х период просрочки исполнения обязательств, который составляет 365 дней х 0,5% = 1003 рубля75 копеек.

Таким образом, предъявленный ООО «КЭнК» иск является законным и обоснованным.

Согласно ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Истцом при подаче настоящего искового заявления понесены судебные издержки по уплате государственной пошлины в сумме 3340,81 рублей за подачу иска, что подтверждено документально платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу требований ст. 98 ГПК РФ, судебные расходы на оплату государственной пошлины при подаче иска подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме, поскольку данные расходы были понесены истцом в связи с необходимостью обращения в суд для защиты нарушенных ответчиком прав в результате ненадлежащего исполнения последним взятых на себя договорных обязательств.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово»106036 рублей 67 коп. убытки, 1003 рубля 75 коп. неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 3340 рублей 81 коп., всего взыскать110381 рубль 23 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Беловский городской суд Кемеровской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья (подпись) Л.Н. Орлова 

Мотивированное решение составлено 19.11.2020.