22RS0011-02-2021-000539-95 Дело № 2-177/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Рубцовск 04 июня 2021 года

Рубцовский районный суд Алтайского края в составе: и.о. судьи Рубцовского районного суда судьи Рубцовского городского суда Алтайского края Хоченовой Е.В., при секретаре Лагуновой Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-177/2021 по иску акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

Истец - акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» обратилось с указанным исковым заявлением к ФИО1, в котором просило: 

-расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 1826/15, заключенный между АО «СК Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>) и ФИО1;

-взыскать в пользу АО «СК Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>) с ФИО1 расходы в сумме 163 923 руб. 60 коп., понесенные АО «СК Алтайкрайэнерго» в связи с исполнением договора об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 1826/15;

-взыскать в пользу АО «СК Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>) с ФИО1 понесенные судебные расходы на оплату государственной пошлины;

-в случае удовлетворения заявленных требований, направить в адрес истца решение с отметкой о вступлении в законную силу, исполнительный документ для предъявления в службу судебных приставов.

В обоснование заявленных требований указано, что на основании поданной ФИО1 (далее - Заявитель, Ответчик) заявки на технологическое присоединение между АО «СК Алтайкрайэнерго» (Сетевая организация, Истец, Исполнитель) и ФИО1 заключен договор от 22.06.2015 № 1826/15 об осуществлении технологического присоединения (далее - Договор) банно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> (далее - Объект), согласно п. 1.1 которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности; объектов электросетевого хозяйства АО «СК Алтайкрайэнерго» (включая их; проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими; лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами: принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями Договора, а также, согласно п. 2.4. Договора, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, и после их выполнения, уведомить об этом сетевую организацию.

В силу абз. 20 п. 15 Правил № 861 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Договор был заключен 16.07.2015 по факту поступления в адрес сетевой организации подписанного Заявителем экземпляра договора.

Поскольку договор подписан Заявителем и направлен в адрес сетевой организации, следовательно, стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора.

На основании подписанного сторонами Договора, сетевой организацией заявителю выданы счет от 16.07.2015 № 1892 на осуществление платежа по) заключенному договору, а также технические условия, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 1.5. Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев и истек 16.01.2016.

Обязательства сетевой компании, предусмотренные п. 2.1. Договора и п. 1 Технических условий, были исполнены в полном объеме, что подтверждается следующими документами: договором на создание проектной продукции от 23.07.2015 №07/72, проектной документацией (шифр 24/08-15-07), актом сдачи-приемки выполненных работ от 25.09.2015, счетом-фактурой от 25.09.2015 № 132, счетом на оплату от 24.08.2015 № 111/2, платежным поручением от 21.10.2015 № 508, распоряжением от 24.09.2015 № 1926, договором на производство геодезических работ от 28.09.2015 № 15/41-15, счетом-фактурой от 16.10.2015 №226, актом от 16.10.2015 №125, платежным поручением от 26.10.2015 № 577, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2015 № 1826/15, актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 30.11.2015 № 1826/15 (1), актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 30.11.2015 № 1826/15 (2), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных- объектов основных средств от 30.11.2015 № ОРОО-000105, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств от 30.11.2015 № 0Р00-000106, акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 30.11.2015 № ОР0О-000054, гранд-сметой от 30.11.2015 № 1826/15 (на ВЛ), гранд-сметой от 30.11.2015 № 1826/15 (на ТП), гранд-сметой от 30.11.2015 №1826/15 (на КЛ), актом списания материальных запасов от 09.11.15, актом списания материальных запасов от 10.11.15, актом списания материальных запасов от 20.11.15, путевым листом от 05.11.2015 №6892, путевым листом от 09.11.2015 №6979, путевым листом от 09.11.2015 №6974, путевым листом от 09.11.2015 №6975, путевым листом от 09.11.2015 №6986, путевым листом от 09.11.2015 №6991, путевым листом от 20.11.2015 № 7267, расчетом затрат на ГСМ, расчетом затрат на ФОТ, карточкой счета 08.09.

Обязанности Заявителя по Договору определенные в п. 2.4. Договора и в п.2: Приложения № 2 к Договору (технические условия), им выполнены не были.

Правила № 861 устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

г. 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

Приведенные выше нормы свидетельствуют о том, что понятие технологического присоединения более обширное, и включает в себя целый комплекс мер, а не только фактическое подключение потребителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Осуществление технологического присоединения сетевой организацией находится в прямой зависимости от выполнения мероприятий Заявителем, поскольку осуществить фактическое присоединение в отсутствие уведомления о выполнении технических условий Заявителем не представляется возможным.

Вместе с тем, в адрес АО «СК Алтайкрайэнерго» уведомление о выполнении технических условий Заявителем и готовности его электроустановок к технологическому присоединению по истечении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению не поступило.

АО «СК Алтайкрайэнерго», в свою очередь, подготовив и выдав Заявителю технические условия, выполнив мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные п. 1 технических условий, исполнила часть своих обязательств по договору, понеся определенные производственные издержки. Не компенсированные издержки уменьшают имущественную базу сетевой компании.

В силу п. 16.5 Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Сетевой организацией в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, подготовлено, подписано со своей стороны и направлено для подписания в адрес заявителя соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, являющееся одновременно актом приема-передачи выполненных работ, согласно которому Заявитель обязуется оплатить Исполнителю денежные средства, затраченные сетевой организацией на подготовку и выдачу технических условий, выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных п. 1 технических условий, в размере 163 923 руб. 60 коп. в течение 30 календарных дней с момента заключения соглашения о расторжении договора.

Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами (п. 3 Соглашения).

Договор технологического присоединения считается расторгнутым с момента подписания Соглашения (п. 2 Соглашения).

Ответчик на соглашение о расторжении договора не отреагировал.

Затраты АО «СК Алтайкрайэнерго» являются компенсацией фактически понесенных расходов на подготовку сетевой организацией технических условий, в соответствии с приложением № 3 к Решению Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.12.2014 № 671, действовавшим на период разработки технических условий, в сумме 9 274 руб. 50 коп., а также расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных п. 1 технических условий, в сумме 154 649 руб. 10 коп.

Согласно Договору объем присоединяемой ФИО1 мощности банно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> составляет 15 кВт. Размер ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт (включительно) к электрическим сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» за подготовку и выдачу технических условий Заявителю составляет - 515,25 р. (без учета НДС).

Итого, сумма затрат АО «СК Алтайкрайэнерго» составила 163 923 руб. 60 коп. и рассчитывается следующим образом:

((515,25 руб./кВт * 15 кВт) + (106 874,25 руб. + 15 000 руб. + 7 000 руб.)) * 1,2 -163 923 руб. 60 коп., где:

- 525,25 руб./кВт - ставка стоимости подготовки и выдачи сетевой организацией технических условий Заявителю (без НДС);

- 15 кВт - объем присоединяемой Заявителем мощности;

- 106 874,25 руб. - затраты АО «СК Алтайкрайэнерго» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных п. 1 технических условий (без учета НДС);

- 15 000 руб. - затраты АО «СК Алтайкрайэнерго» на подготовку проектной документации (без учета НДС);

- 7 000 руб. - затраты АО «СК Алтайкрайэнерго» на производство геодезических работ (без НДС);

-1,2-НДС;

АО «СК Алтайкрайэнерго» в адрес ответчика была направлена претензия от 11.12.2020 № СК/07.1-63-пр с требованием уплаты образовавшейся задолженности, однако оставлена последним без удовлетворения.

Поскольку ответчиком требования сетевой организации в добровольном порядке удовлетворены не были, АО «СК Алтайкрайэнерго» вынуждено обратиться в суд с требованиями о защите нарушенного права.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям искового заявления.

Ответчик ФИО1 и представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласились, ссылаясь на возражения, указанные в письменном отзыве ответчика на иск.

Согласно письменному отзыву ответчика на иск, он просит в исковых требованиях отказать в полном объеме. При этом указывает, что 22 июня 2015 года между истцом и ответчиком заключен договор № 1826/15 об осуществлении технологического присоединения, также мной получен счет № 1892 от 16 июля 2015 года, согласно которого его обязанность по оплате за технологическое присоединение по договору № 1826/15 от 22.06.2015 должна быть осуществлена в строго определенное сторонами время в соответствии с условиями п. 3 договора. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 13 месяцев (пункт 1.5), а общий срок действия технических условий, то есть самого договора - составляет 2 года с момента заключения настоящего договора.

Договор заключен 22 июня 2015 года, следовательно, 22 июня 2017 года действие договора возмездного оказания услуг по осуществлению технологического присоединения прекратилось, так как стороны не производили никаких конклюдентных действий на его продление.

Порядок оплаты по данному договору определен сторонами в счете от 16.07.2015, исходя из чего, истцом пропущен срок исковой давности по взысканию суммы долга по данному договору, так как оплата по нему производится по частям и сторонами точно установлены сроки оплаты, от которых исчисляется срок исковой давности.

С учетом выше изложенного, просил применить к правоотношениям сторон срок исковой давности, как по основным требованиям, так и по дополнительным и просит отказать в исковых требованиях истцу в полном объеме.

Кроме того, ответчик указал, что 10.10.2016 между ним и ФИО5 было заключено соглашение о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.01.2015 № 9157, о чем он сообщил истцу, направив заявление об изменении стороны в договоре от 22.06.2015 об осуществлении технологического присоединения.

Полагал, что истец злоупотребляет своими правами, зная с 28.11.2016 об утрате ответчиком интереса к исполнению договора технологического присоединения, а также в течение длительного времени не проявляя экономического интереса к ответчику в части взыскания задолженности по договору технологического присоединения.

Учитывая недобросовестное поведение истца, а также длительное отсутствие экономического интереса к ответчику в части взыскания задолженности по счету № 1892 от 16.07.2015 на оплату, а также заявления ответчика о применении срока исковой давности по любым требованиям, просит в исковых требованиях отказать в полном объеме.

Выслушав участников, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Таким образом, по правовой природе договор технологического присоединения является комплексным, включает элементы договора об оказании услуг, проведении работ.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила), регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств (подключаемых объектов в сфере теплоснабжения) к электрическим сетям сетевой организации или системе теплоснабжения (далее - технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям или системе теплоснабжения.

Согласно пункту 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно подп. "а" п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).

Судом установлено, что на основании поданной ФИО1 заявки на технологическое присоединение между АО «СК Алтайкрайэнерго» и ФИО1 заключён договор от 22.06.2015 № 1826/15 об осуществлении технологического присоединения (далее - Договор) 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно п. 1.1 которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности; объектов электросетевого хозяйства АО «СК Алтайкрайэнерго» (включая их; проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими; лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами: принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями Договора, а также, согласно п. 2.4. Договора, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, и после их выполнения, уведомить об этом сетевую организацию.

Согласно п.1.4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении №2. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.4 технических условий). 

Технические условия на электроснабжение объекта устанавливают мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые АО «СК «Алтайкрайэнерго» до границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя (п.1), а также мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые заявителем в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства (п.2).

Таким образом, по содержанию технические условия представляют собой оформленные в виде отдельного документа обязанности заявителя и сетевой организации, которые возлагаются на них по договору.

Согласно п. 2.1 договора сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра в течение 6 месяцев со дня заключения договора осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

На заявителя, согласно п.2.4 договора, была возложена обязанность: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности в течение 7 дней со дня получения от сетевой организации документов о технологическом присоединении (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения) подписать полученные документы либо предоставить мотивированный отказ от подписания. По истечении указанного срока и отсутствии возражений со стороны заявителя полученные документы о технологическом присоединении считаются подписанными сторонами без возражений; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно п.3.1 договора плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.12.2014 № 671 и составляет 82 355 руб. 45 коп. 

В соответствии с п. 16(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Указанный пункт введен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 N 999.

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п.1.5 договора составляет 6 месяцев. 

Судом установлено, что АО «СК «Алтайкрайэнерго» фактически выполнило мероприятия, указанные в п.2.1 договора и п.1 технических условий, что подтверждено документально.

Ответчиком факт неисполнения его обязательств по договору не оспаривался, доказательств в опровержение указанных обстоятельств не представлено.

Соглашение о расторжении договора технологического присоединения направлялось истцом в адрес ответчика 27.12.2019 и 20.10.2020.

В обоснование требования о расторжении договора указано на неисполнение заявителем обязательств по договору, в связи с чем, технологическое присоединение оказалось невозможным. 

При установленных по делу обстоятельствах нарушения ответчиком срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части расторжения договора.

Довод стороны ответчика о том, что названный договор прекратил свое действие 22 июня 2017 г. в связи с истечением установленного срока действия технических условий (п.1.4 договора), суд находит ошибочным, поскольку данный пункт договора об осуществлении технологического присоединения устанавливает только срок действия технических условий и не содержит условий об окончании срока действия договора, напротив, согласно п. 5.2 договора от 22 июня 2015 г. данный договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Таким образом, оснований полагать, что договор прекратил свое действие 22.06.2017, и, соответственно, подлежит применению общий срок исковой давности к требованиям о его расторжении, не имеется.

Вместе с тем, доводы ответчика об истечении срока исковой давности по требованиям о взыскании убытков суд находит заслуживающими внимания в связи со следующим. 

Согласно пунктов 2 - 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Как указано в пункте 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу пункта 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом обязанность доказать размер убытков, предъявленных к возмещению, и факт их несения лежит на истце.

Судом установлено, что заключенным сторонами договором на сетевую организацию не возложена обязанность по разработке и составлению технических условий, они были подготовлены одновременно с проектом договора, являлись его частью, в тексте технических условий отсутствует отметка об их согласовании. Более того, обязанность согласовать принципиальную схему электроснабжения электроприемников от точки присоединения с филиалом Рубцовских МЭС до начала строительства объекта возложена на заявителя.

В материалы дела представлена информация от Рубцовских МЭС по вопросу подключения к электрическим сетям 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> от 18.06.2015 (л.д. 183), однако в этом документе не содержится сведений о том, по чьей инициативе он был подготовлен и кому выдан, является ли он формой согласования технических условий. Истцом несение расходов на оформление указанного документа не подтверждено. Кроме того технические условия датированы 22.06.2015, то есть позже составления информации от Рубцовских МЭС.

Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 названного Кодекса.

В силу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

П.п. 1, 2 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Согласно п. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Учитывая изложенное, расходы сетевых компаний на технологическое присоединение не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением тарифа, в связи с чем, размер убытков, подлежащих возмещению истцу, не должен превышать общую стоимость услуг, определенную сторонами в договоре, в сумме 82 355 руб. 454 коп.

Согласно п.3.2 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется частями с оплатой:

10 % в размере 8 235 рублей 55 копеек в течение 15 дней со дня заключения договора;

30 % платы в размере 24 706 рублей 63 копейки в течение 60 дней со дня заключения договора;

20 % платы в размере 16 471 рубль 09 копеек в течение 180 дней со дня заключения договора;

30 % платы в размере 24 706 рублей 64 копейки в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 % платы в размере 8 235 рублей 54 копейки в течении е 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Соглашаясь с доводами стороны ответчика о применении к требованиям о взыскании денежной суммы срока исковой давности, суд однако полагает, что данный срок следует исчислять не с момента истечения сроков оплаты, установленных договором, а с 22 июня 2017 г., поскольку истец должен был узнать о нарушении ФИО1 своих обязательств по договору не ранее истечения двухлетнего срока действия технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора от 22.06.2015.

Учитывая, что исковое заявление было подано в суд 05 февраля 2021 года, суд полагает срок исковой давности пропущенным.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований в части расторжении договора об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 1826/15, заключенный между АО «СК Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>) и ФИО1.

В остальной части заявленных требований следует отказать.

В соответствии со статьёй 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика ФИО1 в пользу истца АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» взыскивается сумма государственной пошлины в размере 6 000 руб.,за удовлетворение искового требования неимущественного характера, уплата которой истцом подтверждена документально. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» удовлетворить частично.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 1826/15, заключенный между АО «СК Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>) и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» сумму уплаченной государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В остальной части заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Рубцовский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья Е.В. Хоченова