Дело № 2-3755/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 декабря 2017 года Керченский городской суд Республики Крым в составе: 

председательствующего судьи Киселева Е. М.,

при секретаре Сербиной О. Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Керчи гражданское дело по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 и ФИО3 о защите прав потребителя,

установил:

в марте 2017 года истец обратилась в суд с указанным иском, в котором просила взыскать с ответчиков в её пользу стоимость оплаченных работ по договору подряда в размере 72000 рублей, неустойку (пеню) за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 72000 рублей и 16000 рублей расходов на оплату услуг представителя.

Исковые требования мотивированы тем, что 14.09.2016 года стороны заключили договор подряда на ремонтные работы в помещении заказчика № по 

<

адрес> 

<

адрес>.

В соответствии с положениями п.1.1 этого договора ответчик взял на себя обязательства по монтажу системы отопления в полуторамесячный срок. Стоимость работ по договору составляла 110000 рублей. Часть суммы истец оплатила 14.09.2016 года в размере 72000 рубля. Ответчиком оговоренный объем работ в срок не выполнен.

Представитель истца просила суд иск удовлетворить.

Ответчик ИП ФИО2, в зал судебных заседаний не явился и мнения по иску в суд не представил.

Соответчик ФИО3, суду дал пояснения, что по поручению ИП ФИО2, выполнял работы согласно договору подряда от 14.09.2016 года, и часть работ была выполнена. Однако, заказчик безмотивно стала препятствовать работе.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о том, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Так из материалов дела следует, что 14.09.2016 года стороны заключили договор подряда.

По этому договору подрядчик ИП ФИО2, принял на себя обязательства по выполнению ремонтные работ своими силами и средствами в помещениях заказчика № по 

<

адрес>, а именно по монтажу системы отопления в полуторамесячный срок. Стоимость работ по договору составляла 110000 рублей, часть которой, истец оплатила 14.09.2016 года в размере 72000 рубля. 

Таким образом, суд считает, что стороны являются субъектами правоотношений, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» в котором закреплено, что настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. 

Возникшие между сторонами взаимоотношения предусмотрены гражданско-правовыми нормами, регулирующими строительно-подрядные и бытовые подрядные правоотношения. 

В силу статья 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 главы 37 ГК РФ, о правах заказчика по договору бытового подряда.

Статьи 730 и 731 ГК РФ предусматривают, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны. 

В соответствии со статьёй 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Статья 732 ГК РФ обязывает подрядчика до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора.

Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

Анализируя вышеуказанный договор подряда между сторонами и обстоятельства спора, установленные судом, суд пришел к выводу о том, что этот договор подряда сторонами до настоящего времени не исполнен, поскольку отсутствуют документы подтверждающие принятие работ, либо действия заказчика свидетельствующие о принятии работ.

Статьёй 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей" предусмотрены последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. 

Уплаченная истцом ответчику сумма в 72000 рублей суд считает убытками, поскольку работы не выполнены ответчиком до настоящего времени.

Размер неустойки ответной стороной не оспорен.

Требования к соответчику ФИО3 удовлетворены быть не могут, поскольку на договоре подряда не основаны.

Судебные расходы документально не подтверждены. 

Руководствуясь ст. ст. 194, 199 ГПК РФ, ст. ст. 708,730, 731, 732, 740 ГК РФ, суд - 

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя, удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 стоимость оплаченных работ по договору подряда в размере 72000 рублей, неустойку (пеню) за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 72000 рублей, а всего 144000 рублей.

В остальной части иска отказать.

В части требований к ФИО3, отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход государства 4080 рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым в течение месяца.

Судья Киселев Е.М.