№

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 января 2024 года г. Уварово

Уваровский районный суд Тамбовской области в составе судьи Стрельцовой Н.Н., при секретаре Новиковой О.Д.,

с участием прокурора Милосердовой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя Уваровского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга несовершеннолетних лиц к ООО "Окна Тамбова" об обязании совершить действия,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель Уваровского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга несовершеннолетних лиц обратился в суд с иском к ООО "Окна Тамбова" об обязании совершить действия, просит суд обязать ООО "Окна Тамбова" в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу выполнить в полном объеме условия муниципального контракта № на выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки и кровли, внутренних сетей и отделки помещений здания МБОУ "Моисеево-Алабушская СОШ", расположенной по адресу: 

<

адрес>, а именно: завершить работы по покраске помещений (1 этаж), подключить и ввести в эксплуатацию сантехнику, выполнить в полном объеме работы по ремонту фасада и входной группы, установить отмостку над аварийным участком стены здания, установить дверные противопожарные блоки ДПМ-01/30 в кол.2 шт., произвести в соответствии с ГОСТ монтаж дверных блоков в помещении спортивного зала, произвести работы по отделке лестничной клетки материалом класса КМ0, окрасить и отгрунтовать проходные гильзы систем отопления и водоснабжения.

В обоснование иска указал, что после проведения проверки исполнения федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», установлено, что 03 марта 2023 г. в рамках исполнения программы «Развитие образования» между ООО «Окна Тамбова» и МБОУ "Моисеево-Алабушская СОШ" заключен муниципальный контракт №_181367 на выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки и кровли, внутренних сетей и отделки помещений здания школы. 

Аванс подрядчику был выплачен. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом установлен по 27.08.2023 г., до настоящего момента работы не выполнены, что повлекло нарушение прав обучающихся на получение образования в надлежащих условиях, гарантированных Конституцией РФ и Федеральным законодательством. 

Претензионный порядок со стороны МБОУ "Моисеево-Алабушская СОШ" 

<

адрес> к ответчику результатов не дал, в связи с чем Уваровской межрайонной прокуратурой было принято решение обратиться в суд с указанными требованиями.

Прокурор Милосердова Е.М. в судебном заседании настаивала на исковых требованиях, объяснила, что до настоящего времени исковые требования не исполнены, документов, подтверждающих обратное, не имеется.

Представитель ответчика - ООО «Окна Тамбова», извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, исковые требования признал в полном объеме, о чем в материалах дела имеется письменное заявление.

Представитель третьего лица - МБОУ "Моисеево-Алабушская СОШ", извещен надлежаще в судебное заседание не явились. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Принимая во внимание, что признание иска сделано ответчиками добровольно, не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, оно может быть принято судом, а исковые требования истца подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.173, 197-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя Уваровского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга несовершеннолетних лиц к ООО "Окна Тамбова" об обязании совершить действия удовлетворить.

Обязать ООО "Окна Тамбова" ОГРН 

<

***> в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу выполнить в полном объеме условия муниципального контракта № на выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки и кровли, внутренних сетей и отделки помещений здания МБОУ "Моисеево-Алабушская СОШ", расположенной по адресу: 

<

адрес>, а именно: завершить работы по покраске помещений(1 этаж), подключить и ввести в эксплуатацию сантехнику, выполнить в полном объеме работы по ремонту фасада и входной группы, установить отмостку над аварийным участком стены здания, установить дверные противопожарные блоки ДПМ-01/30 в количестве двух штук, произвести в соответствии с ГОСТ монтаж дверных блоков в помещении спортивного зала, произвести работы по отделке лестничной клетки материалом класса КМ0, окрасить и отгрунтовать проходные гильзы систем отопления и водоснабжения.

Взыскать с ООО "Окна Тамбова" ОГРН 

<

***> в доход бюджета муниципального образования городского округа город Уварово Тамбовской области государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тамбовского областного суда через Уваровский районный суд Тамбовской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Н.Н. Стрельцова

Решение в окончательной форме принято 18.01.2024

Судья Н.Н. Стрельцова