КОПИЯ 

Дело № 2-3226/2025

УИД - №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 июня 2025 года город Сергиев Посад

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Чистиловой А.А.,

при секретаре Сметаниной П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО6 к АО «Мособлгаз» о возложении обязанности газифицировать дом, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 обратился в суд с исковыми требованиями к АО «Мособлгаз» о возложении обязанности газифицировать дом, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. 

В обоснование заявленных требований указано, что ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Между истцом и ответчиком заключен договор №-

<

адрес> от 07.09.23г. о поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификацин. Согласно условиям договора, ответчик за плату взял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные к сети газораспределения или технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладению и пуску газа установлен 365 дней.

Согласно п.10 Договора размер платы за подключение составил 23 028 рублей.

Указано, что до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены, мероприятия по подключению домовладения и пуску газа не произведены.

ФИО1 обратился к ответчику с требованием об исполнении условий договора, в ответ на обращение ответчик сообщил, что на данный момент ведутся мероприятия по проектированию распределительного газопровода, после завершения которых, возможно приступить к строительно-монтажным работам.

Считает, что имеются законные основания для взыскания с ответчика неустойки за нарушение срока окончания работ. Неустойка должна исчисляться со следующего рабочего дня, когда должна была быть произведена газификация жилого дома истца по договору, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Не исполнив обязательства по технологическому присоединению принадлежащего истцу жилого дома в установленный Договором срок, ответчик нарушил права истца как потребителя в той части, в которой истцом была произведена оплата по технологическому присоединению в границах участка истца, в связи с чем по правилам ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца надлежит взыскать компенсацию морального вреда, штрафа. На основании изложенного истец ФИО1 просил суд: 

- обязать Акционерное Общество «Мособлгаз» в лице филиала АО «Мособлгаз» Север» газифицировать дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с договором №-

<

адрес>- 23 от ДД.ММ.ГГГГ

- взыскать с Акционерного Общества «Мособлгаз» в лице филиала АО «Мособлгаз» Север» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока окончания работ в размере 153366 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности ФИО7 в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований по доводам письменных возражений на иск.

В материалы дела представлены письменные возражения, из которых усматривается, что истец просит суд в удовлетворении исковых требований отказать. Необходимость строительства распределительного газопровода и газопровода - ввода до границ земельного участка Истца, с указанием срока выполнения указанных мероприятий до конца декабря 2027 года, закреплена в пункте 90466 Пообъектного плана- графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2.2. приложения к ФИО2 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2035 года», утвержденной постановлением ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (в действующей редакции постановления ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП) (опубликовано на официальном сайте ФИО2 

<

адрес>. 

Осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения ранее срока, указанного в ФИО2 безвозмездной газификации, не представляется возможным ввиду отсутствия сетей газораспределения, территориально и технически позволяющих осуществить пуск газа в домовладение Истца.

Доказательств готовности сети газораспределения ранее сроков, указанных в ФИО2, Истцом не предоставлено.

Возмездные работы в рамках Договора выполнены Ответчиком в полном объеме, что подтверждено документально разработанным проектом газификации жилого дома по адресу: 

<

адрес>.

Вместе с тем, выполнение работ по Договору обусловлено исполнением встречных обязательств со стороны Истца в соответствии с требованиями Правил подключения №, закрепленных п. 6 Договора, по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

Истец принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, в т.ч. уведомить исполнителя о выполнении технических условий, предоставить акт первичного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, наличие которого является обязательным условием пуска газа, протокол проверки заземлителей и заземляющих устройств, договор на обслуживание сигнализатора загазованности, а также договор по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и договора о поставке природного газа.

Однако до настоящего времени встречные обязательства в полном объеме Истцом не исполнены, уведомление о выполнении технических условий в соответствии с требованиями Правил подключения № и указанные документы Истцом в адрес АО «Мособлгаз» не направлялись и получены не были, доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Из вышеизложенного следует, что мероприятия, предусмотренные Правилами подключения №, п. 6 заключенного между Сторонами Договора и Техническими условиями - Приложением № к Договору, Истец не выполнил, а именно, со своей стороны не обеспечил своевременную готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а, следовательно, АО «Мособлгаз» не нарушены условия Договора, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Оснований для применения неустойки по Закону РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» не имеется, поскольку в отношении безвозмездного договора №-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ указанный закон не применяется, а платная составляющая исполнена в полном объеме, что подтверждено соответствующими доказательствами.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие истца. 

Выслушав объяснения представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547.

Пунктом 2 Правил закреплено понятие "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В соответствии с п. 8 Перечня поручений по реализации Послания ФИО3, утвержденного Президентом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Пр-753 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено ФИО2 

<

адрес> "Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2030 года" (далее - ФИО2 социальной газификации), утвержденной постановлением ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 778/50 (с последующими изменениями и дополнениями).

АО "Мособлгаз" является исполнителем ФИО2 социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики ФИО2 

<

адрес>.

Согласно пункту 5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункту 9 Правил договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН. 

На указанном участке расположен жилой дом с кадастровым номером №

04.09.2023г. между АО «Мособлгаз» и ФИО8 был заключен Договор №-

<

адрес> поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п.1 договора исполнитель (АО «Мособлгаз») принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности до границ земельных участков без взимания средств Заявителя при условии, что в насланном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и газопотребления основного абонента.

Заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 2 Договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимися неотъемлемой частью договора.

Согласно п.3 Договора определен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа – составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Однако, к указанной дате мероприятия не были выполнены в полном объеме, что не отрицается ответчиком.

Согласно п.10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется исходя из стандартных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-Р и составляет 23 028 рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 процентов 3 838 руб. 03 коп.

Таким образом, в рамках заключенного Договора мероприятия по подключению до границ принадлежащего заявителю земельного участка, в частности, проектирование и строительство сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, а также врезка построенной сети газораспределения к построенной сети газопотребления, осуществляются на безвозмездной основе.

Договор заключен в соответствии с типовой формой, утвержденной Правилами.

Истец произвел оплату по Договору в соответствии с п. 10, в подтверждение чего в материалы дела представлен счет на оплату с квитанцией.

В материалы дела представлены технические условия №

<

адрес>Д/13 на подключение (технологичексое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

В порядке ст. 56 ГПК РФ ответчиком в обоснование своей правовой позиции в материалы дела представлены: 

- постановление ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. №-ПП о внесении изменений в ФИО2 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2035 года», из которого следует, что строительство распределительного газопровода и газопровода- ввода до границ земельного участка истца, с указанием срока выполнения указанных мероприятий до конца декабря 2027 года, закреплена в пункте 90466 Пообъектного плана- графика догазификации; 

- свидетельство №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что разработаны части проекта - газоснабжение. Наружные газопроводы. Пояснительная записка. Чертижи; 

- дополнительное соглашение № к Договору от ДД.ММ.ГГГГ. №-

<

адрес>, из которого следует, что внесены изменения в п. 3 ч. 1 Договора №-

<

адрес>, а именно срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2027г. Пункт 6 Договора технических условий №

<

адрес>Д/13 изложен в следующей редакции – срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2027г. 

В настоящее время дополнительное соглашение № к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 04.09.2023г. №-

<

адрес>, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет не позднее 31.12.2027г., истцом не подписано. 

Разрешая спор, суд руководствуется положениями Постановления ФИО5 РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку работы ответчиком выполняются, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 социальной газификации стала бессрочной. В редакции Правил, действовавшей на дату заключения Договора, было закреплено, что срок осуществления мероприятий по подключению, определяемый ФИО2 газификации, не может выходить за пределы 2022 года (абзац 2 пункта 121 Правил). Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2187 абзац 2 пункта 121 Правил был признан утратившим силу, ФИО2 догазификации перестала быть ограничена 2022 годом.

Согласно ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, при этом в соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Истцом в адрес ответчика направлены обращения об исполнении договора догазификации.

На обращение истца от ДД.ММ.ГГГГ. №№ по вопросу исполнения ответчиком договора дан ответ, согласно которому примерный срок согласования проектно – изыскательской документации ДД.ММ.ГГГГ., в связи со сложностью по получению согласования от ОАО «РЖД», ПАО «Россети».

Ответчик утверждает, что АО "Мособлгаз" требуется дополнительное время для завершения мероприятий по подключению, выполняемых до границ земельного участка заявителя.

В соответствии с п. 3 Договора срок выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год со дня заключения Договора.

Вместе с тем, согласно п. 9 Правил подключения № Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

Согласно п. 5 ст. 426 ГК РФ предусмотрено, что условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

В соответствии с положениями п. 121 Правил подключения № срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется ФИО2 газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Согласно пункту 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках газификации осуществляется в соответствии с ФИО2 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2035 года», утвержденной Постановлением ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Необходимость строительства распределительного газопровода и газопровода- ввода до границ земельного участка истца, с указанием срока выполнения указанных мероприятий до конца декабря 2027 года, закреплена в пункте 90466 Пообъектного плана- графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2.2. приложения к ФИО2 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2035 года», утвержденной постановлением ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (в действующей редакции постановления ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП) (опубликовано на официальном сайте ФИО2 

<

адрес>.

Согласно и. 61, 74 Правил подключения № мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (Истцом), что закреплено в п.п. 1, 6 Договора, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (Ответчиком).

При этом Правила подключения не ограничивают Истца в выборе подрядчика для выполнения работ внутри границ его земельного участка, заявитель вправе обратиться в любую специализированную организацию по данному вопросу.

Вместе с тем, в соответствии п. 12 Правил подключения №, заявитель (Истец) вправе обратиться к исполнителю (Ответчику) с просьбой осуществить возмездные мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.

В рамках сложившихся правоотношений стороны пришли к согласию о выполнении АО «Мособлгаз» возмездных мероприятий, предусмотренных п. 12 Правил подключения №, а именно - проектирование сети газопотребления в границах земельного участка Истца.

Стоимость указанных мероприятий составила 23028 рублей, согласно п. 10. Договора, в соответствии с п. 1. Распоряжения Комитета по ценам и тарифам ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-Р.

Возмездные работы в рамках Договора выполнены Ответчиком в полном объеме, что подтверждено документально разработанным проектом газификации жилого дома по адресу: 

<

адрес>.

Вместе с тем, выполнение работ по Договору обусловлено исполнением встречных обязательств со стороны Истца в соответствии с требованиями Правил подключения №, закрепленных п. 6 Договора, по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

Истец принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, в т.ч. уведомить исполнителя о выполнении технических условий, предоставить акт первичного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, наличие которого является обязательным условием пуска газа, протокол проверки заземлителей и заземляющих устройств, договор на обслуживание сигнализатора загазованности, а также договор по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и договора о поставке природного газа.

Однако до настоящего времени встречные обязательства в полном объеме Истцом не исполнены, уведомление о выполнении технических условий в соответствии с требованиями Правил подключения № и указанные документы Истцом в адрес АО «Мособлгаз» не направлялись и получены не были, доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Из вышеизложенного следует, что мероприятия, предусмотренные Правилами подключения №, п. 6 заключенного между Сторонами Договора и Техническими условиями - Приложением № к Договору, Истец не выполнил, а именно, со своей стороны не обеспечил своевременную готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а, следовательно, АО «Мособлгаз» не нарушены условия Договора, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Ответчик утверждает, что АО "Мособлгаз" не отказывается от исполнения обязательств по Договору, заключенному с ФИО1, подтверждает их наличие и безусловное намерение исполнить свои обязательства (о чем также свидетельствует направленное в адрес истца дополнительное соглашение о продлении срока выполнения мероприятий по подключению домовладения). Однако, осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения ранее срока, указанного в ФИО2 безвозмездной газификации, - не представляется возможным ввиду отсутствия сетей газораспределения территориально и технически позволяющих осуществить пуск газа в домовладение истца.

Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требования истца о возложении обязанности на АО "Мособлгаз" исполнить условия договора от 04.09.2023г. №-

<

адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, поскольку работы выполняются, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 социальной газификации стала бессрочной.

Кроме того при принятии указанного решения суд учитывает требования ст.13 ГПК РФ об обязательности судебных постановлений, ст.210 ГПК РФ об исполнении решения суда в совокупности с положениями пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном решении», решение суда должно быть исполнимым.

Согласно разъяснениям Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", утвержденным приказом МАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 160, так как, исходя из Закона "О защите прав потребителей", законодательством о защите прав потребителей регулируются отношения, возникающие из возмездных договоров, то отношения, вытекающие из безвозмездных гражданско-правовых договоров, данным законодательством не регулируются.

Исполнителем в соответствии с абз.5 преамбулы Закона "О защите прав потребителей" является организация, независимо от ее организационно-правовой формы, выполняющая работы или оказывающая услуги потребителям по возмездному договору.

В п.10 договора от 04.09.2023г. указано, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определена в размере 23 028 руб. 20 коп., в том числе НДС 20 процентов 3 838 руб. 03 коп.

Поскольку в настоящем случае правоотношения сторон по делу возникли в связи исполнением безвозмездного договора на проведение мероприятий по догазификации, предусмотренной ФИО2 

<

адрес> "Развитие газификации в ФИО2 

<

адрес> до 2030 года", утвержденной Постановлением ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 778/50 (с последующими изменениями и дополнениями), АО Мособлгаз является исполнителем ФИО2 социальной газификации, а государственным заказчиком которой является Министерство энергетики ФИО2 

<

адрес>, то на эти правоотношения действие Закона РФ "О защите прав потребителей" не распространяется.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании компенсации морального вреда на основании статьи 15 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также взыскании неустойки, которая по своей правовой природе является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, направленной на восстановление нарушенного права, не подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь приведенными нормами действующего законодательства, суд не находит оснований для удовлетворения требований ФИО4 к АО «Мособлгаз» о возложении обязанности газифицировать дом, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 195-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ФИО6 к АО «Мособлгаз» о возложении обязанности газифицировать дом, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд Московской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 18 июля 2025 года.

Судья подпись А.А. Чистилова