дело № 2-1532/18

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

28 июня 2018 года г. Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе председательствующего судьи Черникова С.Г., 

при секретаре Ногаян А.В.,

с участием:

-от истца: представителя по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Муниципального образования городской округ «город Ростов-на-Дону», в лице Администрации города Ростова-на-Дону, к гр. Забуга ДД.ММ.ГГГГ о взыскании ущерба, процентов, морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

Администрация города Ростова-на-Дону, действуя в интересах Муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону», обратилась в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону с исковым заявлением к ФИО2, в котором просит: 

«Взыскать с Забуга ФИО8 в пользу Муниципального образования городской округ «город Ростов-на-Дону», в лице Администрации города Ростова-на-Дону, имущественный ущерб в размере 13525050 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2771421.41 руб., моральный вред в размере 1000 000 руб.».

Свою просьбу заявитель объясняет тем, что между муниципальным казенным учреждением «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» и ООО «Союз строй» были заключены четыре муниципальных контракта по ремонту помещений, находящихся на балансе МКУ «ГХУ города Ростова-на-Дону». Истец полностью выполнил принятые обязательства по муниципальному контракту в части оплаты согласованных работ. Однако подрядная организация ООО «Союз строй» выполнила строительные работы ненадлежащим образом, выполненные работы не соответствуют полному исполнению условий контрактов. В свою очередь, ФИО2, являлся в исследуемый период не только финансовым директором подрядной организации, но и участником общества с долей уставного капитала 33%, который имея умысел на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, давал указания неосведомленному о его преступных намерениях директору общества на заключение муниципальных контрактов, с целью последующего предоставления актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, содержащих сведения о завышении объемов по выполненным работам по капитальному ремонту и хищения на их основании из муниципального бюджета денежных средств в крупном размере. По факту хищения бюджетных средств в отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ. Приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.10.2016, ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.4 ч.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа.

В судебном заседании от 28.06.2018, представитель заявителя ФИО1 поддержал заявленные требования и показал, что истец просит взыскать денежные средства, которые по результатам строительно криминалистической экспертизы, а затем по приговору суда были выявлены, как фактически невыполненные работы по капитальному ремонту, но похищенные ответчиком в результате составления фиктивных справок и сведений о завышенных объемах по выполненным работам.

Дело рассмотрено в отсутствие ФИО2 по ст. 167 ГПК РФ.

Рассмотрев гр.дело, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, – вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Из материалов дела известно, что между муниципальным казенным учреждением «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» и ООО «Союз строй» были заключены муниципальные контракты по капитальному ремонту помещений, находящихся на балансе МКУ «ГХУ города Ростова-на-Дону».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, участники капитального ремонта заключили муниципальные контракты №№, стоимостью 25609438.55 руб. и 53044118.00 руб., соответственно, по ремонту зданий МФЦ, расположенных по ул. 

<

адрес> (лит.АА1), пр. 

<

адрес> (лит.ЕЕ1), ул. 

<

адрес> (лит. АА1,А2), ул. 

<

адрес>, бул. 

<

адрес>а», ул. 

<

адрес>, принадлежащих муниципальному образованию. 

ДД.ММ.ГГГГ, участники ремонта заключили муниципальные контракты №№ по капитальному ремонту (ремонтно восстановительные работы) внутренних помещений объекта №№4 и устройство пандуса для маломобильной группы населения в здании объекта культурного наследия федерального значения – Здание городской Думы, кон. XIX в., по ул. 

<

адрес>, на сумму 21485499.00 руб. и 3902452.00 руб., соответственно.

Обязательства по оплате принятых работ исполнены истцом путем перечисления ответчику денежных средств платежными поручениями №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО2, осуществляя личное руководство за ходом выполняемых работ по капитальному ремонту по вышеуказанным муниципальным контрактам, достоверно зная о том, что работы по выполнению электромонтажных, демонтажных, общестроительных, реставрационных, вентиляционных, непредвиденных работ, работы по капитальному ремонту отопления, водоснабжения, кондиционирования, бытовой канализации, теплоснабжения, по капитальному ремонту оборудования связи, пожарной сигнализации, выполнения работ по непредвиденным затратам, системы телефонной связи, автостоянки и парковки выполнены в меньшем объеме, чем указаны в актах о приемке выполненных работ, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение бюджетных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. 

<

адрес>, передал на подпись неосведомленному о его преступленных намерениях ФИО3, изготовленные неустановленным в ходе следствия лицом, акты формы КС-2 № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости проведенных работ по капитальному ремонту, которые ФИО3 по указанию ФИО2 подписал и передал в МКУ «ГХУ города Ростова-на-Дону», тем самым ФИО2 обманул представителя МКУ «ГХУ города Ростова-на-Дону» о фактических объемах выполненных работ по муниципальным контрактам № №, по муниципальному контракту № № и по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем по муниципальному контракту № № не были выполнены следующие работы: устройство стяжек цементных толщиной 20 мм в объеме 95,6 м2, устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. в объеме 118,8 м2, установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) - 51 кВт, радиаторы Calidor Super 500/100 14 секций в количестве 18 шт. (акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.03.2014); изготовление вновь иконных и дверных коробок, с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента, клееных из 4-х слоев в объеме 42, 5 м2, изготовление внутренних филенчатых двухпольных глухих дверных полотен с прямолинейной верхней частью, по старому образцу в объеме 32м2, подготовка деревянных гладких поверхностей под "французский лак" в объеме 39,8 м2, отделка деревянных гладких поверхностей под "французский лак" в объеме 39,8 м2 (акт о приемки выполненных работ № 3 от 25.03.2014); установка изготовленных вновь дверных коробок в каменных стенах с пригонкой по месту в количестве 19 шт., смена и реставрация прямолинейных сложных наличников к оконным и дверным проемам - 95 м, установка наличников с тумбочками - 95 м, изготовление дверной петли (размер карты 175x50 мм) в количестве 38 шт., пригонка и навеска вновь изготовленных внутренних двухпольных дверей в количестве 19 шт., изготовление комплекта ручек-скоб разм. 46 см (58,5) с дубовым стержнем и бронзовыми цапфами в количестве 19 комплектов, установка прибора из 2-х ручек с цапфами в количестве 38 шт., реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных по камню цементным или известковым раствором в объеме 450,3 м2, утолщение намета на 1 см при оштукатуривании известковым раствором в объеме 450,3 м2, сетка стеклянная строительная в объеме 4м2, сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен в объеме 450,3 м2, сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков в объеме 104,7 м2, реставрация художественного щитового наборного паркетного пола в объеме 87,8 м2 ( акт о приемке выполненных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ); демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых в объеме 11,3 м2, установка плинтусов из мраморных плит в объеме 20.25 \i2, улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) под плитку в объеме 29 м2, гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону в объеме 95 м2, плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом в объеме 95 м2, улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) в объеме 408, 2 м2, установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 в объеме 11,3 м2, воссоздаваемые деревянные окна с комплектом монтажных материалов и фурнитурой в объеме 11,3 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); устройство потолков реечных алюминиевых в объеме 39,6м2, уголок декоративный (пристенный) - 12,4 м, извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении в количестве 64 шт., извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей в количестве 2 шт., извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении в количестве 3 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ в количестве 2 шт., извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А в количестве 3 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 в количестве 67 шт., устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля в количестве 3 шт., УКШ-1 в количестве 3 шт., громкоговоритель или звуковая колонка в помещении в количестве 3 шт., громкоговоритель СН-510 в количестве 3 шт., УК-П в количестве 52 шт., световые настенные указатели (ВЫХОД) в количестве 6 шт., табло ВЫХОД в количестве 6 шт., короба пластмассовые: шириной до 40 мм - 280м, кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм - 260 м, кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм - 20 м, провод в коробах, сечением до 35 мм2 - 605 м, кабель KnCHr(A)-FRLS 2x0.5 -505м, кабель KnCHr(A)-FRLS 2x1,0 - 55м, кабель KIICHr(A)-FRLS 2x1,5 - 45 м, Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 - 200 м, Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм - 200м ( акт о приемке выполненных работ № №); устройство покрытий из плит древесностружечных в объеме 113, 1 м2, шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм в количестве 11,9 шт., фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм в объеме 116,1537 м2, сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см — 565,5 отверстий, улучшенная окраска масляными составами по дереву полов в объеме 113, 1 м2, олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) - 0,28275 т, циклевка паркетных полов в объеме 113, 1 м2, покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза в объеме 113.1 кв.м. (акт о приемке выполненных работ №№).

По муниципальному контракту № № не были выполнены работы: установка блоков тепломассообмена производительностью до 20 тыс.мЗ/час в количестве 1 блока, установка сплит-системы LG S18AHQ в количестве 1 шт., извещатель ЛС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении в количестве 8 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 в количестве 8 шт., громкоговоритель или звуковая колонка в помещении в количестве 13 шт., громкоговоритель СН-510 в количестве 13 шт., кабель-канал (короб) «Электропласт» 12x12 мм в количестве 50 м, кабель-канал (короб) «Электропласт» 15x10 мм в количестве 30м, провод в коробах, сечением до 35 мм2 в количестве 80 м, кабель КПСнг(А)-FRLS 2x0.5 в количестве 50 м, кабель КПСнг(А)-FRLS 2x1,0 в количестве 30 м, КПСнг(А)-FRLS 2x1.5 в количестве 30м, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь роема до 3 м2 в объемом 2,09 м2, воссоздаваемые деревянные двери с комплектом монтажных материалов и фурнитурой в объеме 2,09 м2, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 в объеме 0,91 м2, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен в объеме 266,4 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

<

КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих в объеме 35 м2, листы гипсокартонные влагостойкие, ППРОК, толщиной 13 мм в объеме 73,5 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях Т- образных - 0,05 т, стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей массой до 0,01 т- 0,05 т, знак дорожный в количестве 5 шт., устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки в объеме 44м2, звонок электрический с кнопкой -2 комплекта, звонок электрический марки ЭГ-1 в количестве -2 шт., установка указателя на стене в количестве 31 шт., тактильные пиктограммы 150x150 в количестве 20 шт., противоскользящий наступенный профиль желтого цвета 52x500 в количестве 4 шт., наклейка желтая пленка в количестве 6 шт., табличка с шифром брайля в количестве 1 шт. (акт о приемке выполненных работ № №).

По муниципальному контракту № № не были выполнены работы: помещения, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> а именно: устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля в объеме 31,5 м2, панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAF в объеме 32,44 м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен в объеме 22,4 м2, шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску в объеме 340 м2, оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям в объеме 241 м2, оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам в объеме 99 м2, стеклообои VETERMAN, рогожка средняя в объеме 344,96 м2, стеклообои V1TRULAN, файн (флизелиновые обои под покраску) в объеме 35,84 м2, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску в объеме 22,4 м2, штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен в объеме 25,9 м2, гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону в объеме 25,9 м2, плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) в объеме 25,9 м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен в объеме 30 м2, фактурная отделка фасадов мраморной крошкой в объеме 30 м2, устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см в объеме 21,8 м2, гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм в объеме 20,86 м2, устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тактильная напольная плитка) в объеме 12 м2, тактильная напольная плитка для полов в объеме 12м2, устройство плинтусов из плиток керамических в объеме 129 м2, гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм в объеме 2,9355 м2, гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм в объеме 16, 995 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем в объеме 2,5мЗ, устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки в объеме 50 м2, стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13 в объеме 52, 5 м2, отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) КОРОЕД в объеме 50 м2, устройство желобов подвесных в количестве 2,5 м, устройство водосточных труб в количестве 3 м, желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет в количестве 1 шт., держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет в количестве 2 шт., воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет в количестве 1 шт., паук МП, диаметр 100 мм в количестве 1 шт., труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет в количестве 1 шт., держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет в количестве 3 шт., колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет в количестве 1 шт., монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м в объеме 8,1 м 2, профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 - 0,050787 т, утепление покрытий керамзитом в объеме 2,6 мЗ, устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм в объеме 25 м2, устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 в объеме 25 м2, устройство пароизоляции оклеечной в один слой в объеме 25 м2, устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 в объеме 25 м2, дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ПУН 300x300 в объеме 5 м2, огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 в объеме 5 м2, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 в объеме 5 м2, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в объеме 0,09 мЗ, разборка покрытий и оснований щебеночных в объеме 0,45 мЗ, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 в объеме 0,9 мЗ, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка в объеме 0,3 мЗ, песок природный для строительных работ средний в объеме 0,33 мЗ, устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. в объеме 3 м2;- тактильная тротуарная плитка для наружных работ в объеме 3 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); помещения, расположенного по адресу: г

<

адрес>, а именно: очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов в объеме 160 м2, лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м в количестве 2 шт. (акт о приеме выполненных работ № №); установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 в объеме 39,291 м2, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 в объеме 26,205 м2, установка j блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 в объеме 3,36 м2, устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля в объеме 81,11 м2, панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL в объеме 83,54 м2, сплошное выравнивание знутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен в объеме 95,5 м2, шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску в объеме 118,5 i2, оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности в объеме 95,5 м2, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску в объеме 118,5 м2, штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен в объеме 132, 42 м2, гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и Зетону в объеме 132,42 м2, плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) в объеме 132,4 м2, устройство :тяжек цементных толщиной 20 мм в объеме 14,59 м2, устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 в объеме 4,59 м2, устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см в объеме 4,59 м2, гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм в юъеме 13,96 м2, тактильная напольная плитка для полов в объеме 7,5 м2, устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 202,6 м, гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм в объеме 20, 463 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т в количестве 1 шт., дизель-генераторная установка 400 В SDMO J 66K-IV в количестве 1 шт., подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 1,2 т в количестве 1 шт., монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 2 т (монтаж контейнера 1,8 т) в количестве 1 шт., контейнер для размещения дизель-генераторной установки 3000x2000 мм "Север-ЗК" в количестве 1 шт. (акт о приемке выполненных работ № №); монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т в количестве 1 шт., прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг в количестве 17 шт., аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т в количестве 1 шт., ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм в количестве 2 шт., прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг в количестве 1 шт., бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа в количестве 4 шт., гильза защитная в количестве 2 шт., бобышка под гильзу в количестве 2 шт., установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 15 мм в количестве 1 узла, насос погружной для грязной воды 7500 SP GARDENA Grundfos в количестве 1 шт., установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм в количестве 1 шт., клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм в количестве 1 шт., кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм в количестве 1 шт., прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм в количестве 10 м, трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм в количестве 9,29 м, блочный тепловой пункт в количестве 1 шт., манометр ДМ02, 0..16 бар, 100 мм, G1/2 в количестве 8 шт., манометр ДМ02, 0..16 бар, 100 мм, G1/2 в количестве 4 шт., ТБ-1 0..160 С, термометр биметаллический в количестве 3 шт., ТБ-1 0..120 С, термометр биметаллический в количестве 2 шт., тепловычислитель СПТ 943.1 (пр. класс 0812903410) в количестве 1 шт., расходомер SONO 1500 СТ/3, 5/25/фл/тепло+пасп (пр.класс 0812912246) в количестве 2 шт., комплект термометров КТПТР-01-1-80 мм (пр. класс 0812903410) в количестве 1 шт. (акт о приемке выполненных работ № №); генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт в количестве 1 шт., регулятор возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ в количестве 1 шт., поперечная дифференциальная токовая защита генератора односистемная в количестве 1 комплекта, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами в количестве 24 точки, фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ - 24 фазировки, присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10 шт. - 1 присоединение (акт о приеме выполненных работ № №); монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) - 0,1058 т, ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы - 0,1058 т, болты распорные MP 12x100 в количестве 68 шт., окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в объеме 8 м2, монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) - 0,923 т, отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - 0,923 т, болты распорные MP 12x100 в количестве 14 шт., монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м в объеме 27 м2, профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 - 0,02981 т, заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей - 0,001 т, огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 в объеме 25 м2, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в объеме 25 м2 (акт о приеме выполненных работ № №), а всего на сумму 2 949 631 рубль; помещения, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> а именно: установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 в объеме 1,99 м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков в объеме 46,8 м2, третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску в объеме 46,8 м2, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в объеме 46,8 м2, фактурная отделка фасадов мраморной крошкой в объеме 18 м2, шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску в объеме 114,2 м2, устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (тактильная плитка)"в объеме 6,12 м2, тактильная напольная плитка (для внутренних работ) (для слабовидящих) в объеме 6,242 м2, устройство плинтусов из плиток керамических в объеме 324,2 м2, гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм в объеме 21,5 м2, гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм в объеме 11,9 м2 (акт о приемке выполненных работ № №); установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным в количестве 8 шт. (акт о приемке выполненных работ №№); монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м - 0,8542 т, отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т - 0,1759 т, отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - 0,6783 т, болт анкерный с гайкой, размер 16,0x110 мм в количестве 14 шт., установка монтажных изделий массой до 20 кг - 0,0688 кг, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в объеме 2 м2, монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м в объеме 27,1 м2, профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6-0,169917т, винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям- 0,003 т, заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей -0,0015 т (акт о приемке выполненных работ № №); светильник встраиваемый диодный в количестве 16 шт. (акт о приемке выполненных работ № №); извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении в количестве 10 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М) в количестве 10 шт., (акт о приемке выполненных работ № №).

Так, по муниципальному контракту № № не были выполнены работы по капитальному ремонту административных объектов:

помещения расположенного по адресу: г. 

<

адрес> лит. А,А1,А2: установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в объеме 66, 8 м2, скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных в количестве 19 комплектов, блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба в объеме 66,8 м2, установка противопожарных дверей: однопольных глухих в объеме 7,9244 м2, дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) в количестве 6 комплектов, грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и тд) в объеме 433, 3 м2, оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности в объеме 226, 5 м2, стеклообои TASSOGLAS, рогожка крупная в объеме 50, 715 м2, клей для стеклообоев FINTEX -6,75 кг, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен в объеме 226, 5 м2, устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см в объеме 336, 29 м2, гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм в объеме 588,99 м2, грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и тд) в объеме 133, 83 м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков в объеме 297 м2, высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами в объеме 521,8 м2, штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 64 «короед», зерно 2 мм (цветная) -260,9 кг, устройство плоских однослойных кровель из 1ВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: металлического листа со сваркой полотен в объеме 4,2075 м2, поликарбонат сотовый толщиной 25 мм цветной в объеме 4, 562316 м2, установка смесителей в количестве 5 шт., смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором - 5 комплектов, плитки тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Домино" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм в объеме 657, 88 м2 (акт о приемке выполненных работ № №), а всего на сумму 2 177 821 рубль;

помещения, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> лит. АА1: установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в объеме 6,4 м2, скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных - 3 комплекта, блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба в объеме 6,4 м2, оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности в объеме 475,4 м2, клей для стеклообоев FINTEX - 7,09 кг, стеклообои TASSOGLAS, рогожка крупная в объеме 537, 15 м2, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску в объеме 262, 4 м2, устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям в объеме 91 м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков в объеме 91 м2, демонтаж штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен в объеме 21, 3 м2, устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям в объеме 128 м2, высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами в объеме 128 м2, штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 64 "короед", зерно 2 мм (цветная) - 16,692 кг, грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и тд) в объеме 108, 05 м2, наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа 

<

кабанчик>) на цементном растворе стен в объеме 4,3 м2, плитка фасадная в объеме 4,3 м2, изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных в объеме 6,42 м2, плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50 - 6,29 мЗ (акт о приемке выполненных работ № №); установка противопожарных дверей: однопольных глухих в объеме 2,86 м2, дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) - 1 комплект ( акт о приемке выполненных работ № №); устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см в объеме 136 м2, керамогранит в объеме 130, 11 м2 ( акт о приемке выполненных работ № №), а всего на сумму 1 057 039 рублей; помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> лит. ЕЕ1: установка противопожарных дверей: однопольных глухих в объеме 5,265 м2, дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) - 3 комплекта, установка дверного доводчика к металлическим дверям - 3 шт., закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе - 3 шт., грунтование водно- дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и тд) в объеме 67 м2, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых в объеме 28м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен в объеме 330, 2 м2, оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности в объеме 48 м2, стеклообои TASSOGLAS, рогожка крупная в объеме 54, 24 м2, клей для стеклообоев FINTEX - 0,71 кг, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску в объеме 439 м2, грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и тд) в объеме 526 м2, краска акриловая ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS - 72,58 л, устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям в объеме 526м2, сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков в объеме 107,5 м2, устройство стяжек цементных толщиной 20 мм в объеме 21,2 м2, устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 в объеме 21,2 м2, устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих - 68 м, плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм - 69 м, наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен в объеме 28, 3 м2, клей плиточный «Ceresit» СМ117 для керамогранита - 5,09 кг, гранит керамический в объеме 28, 3 м2, огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 в объеме 26, 95 м2, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в объеме 4, 901 м2, устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: металлического листа со сваркой полотен в объеме 10,85 м2, поликарбонат сотовый толщиной 25 мм цветной в объеме 12, 535295 м2, плитки тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Домино" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм в объеме 234, 35 м2, установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий - 85, 8 м, камни бортовые БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 мЗ/ (ГОСТ 6665-91) - 85, 8 шт., установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) - 15 кВт, Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт — 73 шт. ( акт о приемке выполненных работ № 3 от 03.10.2014); установка в жилых и общественных зданиях окопных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых в объеме 26,13 м2, блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом в объеме 26, 13 м2, сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 26, 13 м2 (акт о приемке выполненных работ № 6 от 14.10.2014); монтаж опорных конструкций этажерочного типа - 0,10395 т, прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм - 0,10395 т, устройство слуховых окон - 1 слуховое окно ( акт о приемке выполненных работ № №.

Данные обстоятельства стали известны в ходе проведения предварительного следствия по уголовному делу №№) ОРП на ТО ОП №3 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону и были установлены приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д.15, 78). 

На основании ст. 61 ГПК РФ, - 4. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Эти же обстоятельства подтверждаются приобщенной к гр.делу копией судебной стоительно технической экспертизы АНО «Судебно – Экспертный центр» №№, являющейся одном из доказательств виновности ответчика в хищении денежных средств по уголовному делу.

Так, согласно выводам судебной экспертизы в заключении АНО «Судебно – Экспертный центр» №№, известно, что стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту (ремонтно реставрационным работам) внутренних помещений №№ (столовая) в здании объекта культурного наследия федерального значения: Здание городской Думы, кон. XIX в., по ул. 

<

адрес> составляет 5819994.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ» в целях размещения МФЦ, расположенного по ул. 

<

адрес> (лит.ЕЕ1), но не отраженных в актах формы КС-2, составляет 884414.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ» в целях размещения МФЦ, расположенного по ул. 

<

адрес> (лит.АА1), составляет 1057 039.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ» в целях размещения МФЦ, расположенного по ул. 

<

адрес> (лит. АА1А2), составляет 2177821.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ», расположенного по ул. 

<

адрес>, составляет 342771.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ», расположенного по ул. 

<

адрес> составляет 2949631.00 руб.;

-стоимость невыполненных работ по капитальному ремонту административного объекта МКУ «ГХУ», расположенного по ул. 

<

адрес>, составляет 293380.00 руб.

Всего: 13525050 руб.

При таком положении исковые требования о взыскании с ответчика ущерба на сумму 13525050 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Поскольку факт незаконного пользования денежными средствами подтвержден имеющимися в деле доказательствами, с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами по основаниям ст. 395 ГКРФ за период с ДД.ММ.ГГГГ

Расчет: Сумма, на которую подлежат взысканию проценты: 13525050 руб.

Период неустойки: с ДД.ММ.ГГГГ, количество дней: 151 (под 8.25%) = 461611.81 руб., 14 дней (под 11.24%) = 58309.64 руб., 30 дней (под 11.19%) = 124393.41 руб., 33 (10.25%) = 125338.31 руб., 29 (10.14%) = 108963.73 руб., 30 (9.52%) = 105828.88 руб., 33 (9.17%) = 112131.93 руб., 28 (9.11%) = 94519.72 руб., 17 (6.93%) = 43654.41 руб., 24 (6.93%) = 61461.37 руб., 25 (7.53%) = 69565.32 руб., 27 (8.73%) = 87103.54 руб., 29 (8.45%) = 90555.01 руб., 34 (7.77%) = 97624.25 руб., 28 (7.45%) = 77085.39 руб., 29 (7.81%) = 83696.41 руб., 17 (7.01%) = 44037.71 руб., 49 (10.50%) = 190126.73 руб., 104 (10%) = 384318.36 руб., 85 (10%) = 314966.92 руб., 10 (9.75%) = 36128.56 руб.

Всего: 2771 421.41 руб. 

Рассматривая исковые требования о взыскании с ответчика морального вреда на сумму 1000 000 руб., суд приходит к выводу об отклонении заявленных требований, поскольку в силу положений ст. 150, 151 ГК РФ, имущественные требования о возмещении ущерба не предусматривают компенсацию морального вреда. 

В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ, - государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в доход государства, пропорционально удовлетворенной части иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Забуга ФИО9 в пользу Муниципального образования городской округ «город Ростов-на-Дону», в лице Администрации города Ростова-на-Дону, имущественный ущерб в размере 13525050 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2771421.41 руб.

Исковые требования о взыскании морального вреда оставить без удовлетворения.

Взыскать с ФИО2 госпошлину в доход местного бюджета в размере 60000 руб.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца с момента составления полного текста. 

Полный текст составлен 03.07.2018.

Судья С.Г.Черников