Гражданское дело №

УИД: 68RS0№-32

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 октября 2025 года 

<

адрес>

Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Грязнева Е.В.,

при секретаре Агафоновой В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании убытков в виде фактически понесенных расходов на подготовку и выдачу технических условий № к указанному договору в размере 11276,06 рублей, неустойки за период с 18.05.2024г. по 17.05.2025г. в размере 276605,23 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 29636 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что 17.05.2023г. между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Отъясский сельсовет, 

<

адрес>, кадастровый №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность устройств – 20 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение, в соответствии с условиями договора. 

По условиям договора, заявитель также обязуется выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (далее ТУ); после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о их выполнении и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления Заявителем в Сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

Также указано, что срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения договора (Пунктом 5 Договора установлен срок выполнения мероприятий со стороны Заявителя и Сетевой организации - 1 года со дня заключения настоящего Договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ).

Размер платы за технологическое присоединение был определен в соответствии с приказом Управления по регулированию тарифов 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-э и составляет 303 961,79 руб., включая НДС (пункт 10 Договора).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации (пункт 12 Договора)

Ввиду невнесения платы за услуги по технологическому присоединению в части 1-го, 2-го и 3-го платежей в установленные договором сроки, письмом от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> истец уведомил ответчика об образовавшейся задолженности по договору на сумму 136782,81 рублей, с требование ее погашения в течение 30 календарных дней.

Впоследствии указанные требования по осуществлению оплаты как с 1-го по 3-й платеж, так и за последующие периоды, итого на общую сумму 303 961,79 руб., включая НДС, ФИО1 были проигнорированы.

Кроме того, к моменту окончания срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению (ДД.ММ.ГГГГ), равно как и на дату окончания действия ТУ (ДД.ММ.ГГГГ), в нарушение абзаца 2 пункта 8 Договора, от Ответчика уведомления о выполнении им ТУ в адрес Истца не поступило.

Неисполнение стороны мероприятий по технологическому присоединению в установленный срок свидетельствует о нарушении ответчиком существенных условий договора и влечет невозможность осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств последнего со стороны истца, ввиду чего такой дДоговор подлежит расторжению.

В судебное заседание представитель истца ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в ранее поданном заявлении ходатайствовал о его рассмотрении в свое отсутствие, исковые требования поддержал, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени его проведения извещался надлежащим образом, причина неявки неизвестна, возражений на исковые требования не представлено, в связи с чем суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании п. 1 ст.ст. 420,421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ).

В силу статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия. Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами, при участии уполномоченного органа государственной власти.

В пункте 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителем электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила технологического присоединения №), предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил технологического присоединения №, к которым, в том числе, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Исходя из положений пункта 16 Правил технологического присоединения №, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю (подпункт «а»).

Заявитель при исполнении договора обязан выполнить необходимые технические мероприятия в своей части и внести установленную плату.

Согласно ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком 17.05.2023г. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.

Согласно п.1 договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевогохозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 20 (кВт); категория надежности - III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 (кВ), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Также в соответствии с условиями договора ФИО1 обязуется выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (абзац 1 пункта 8 договора). 

Более того после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя обязался уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (абзац 2 пункта 8 Договора).

В соответствии с п.4 договора и п.13 технических условий срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения договора.

На основании п.5 договора установлен срок выполнения мероприятий со стороны заявителя и сетевой организации - 1 года со дня заключения настоящего договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.г.

Согласно п.10 договора размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Управления по регулированию тарифов 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-э и составляет 303 961,79 рублей.

Пунктом 11 договора предусмотрен следующий порядок внесения заявителем платы за технологическое присоединение: 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора (1-й платеж); 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней, со дня заключения договора (2-й платеж); 20% вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора (3-й платеж); 30% - в течение 15 дней со дня фактического присоединения (4-й платеж); 10% - в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения (5-й платеж).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации (пункт 12 Договора).

Ввиду невнесения ответчиком платы за услуги по технологическому присоединению в части первых трех платежей в установленные договором сроки, истец 09.08.2023г. направил ФИО1 письмо № 

<

данные изъяты> об образовавшейся задолженности на сумму 136782,81 рублей, выставив требование о погашении задолженности в течение 30 календарных дней с даты направления письма.

Со стороны ответчика требования истца не были выполнены как в части оплаты за первые три платежа, так и за последующие периоды, итого на общую сумму 303961,79 рублей.

Кроме того, к моменту окончания срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению (ДД.ММ.ГГГГ), равно как и на дату окончания действия ТУ (ДД.ММ.ГГГГ), в нарушение условий договора, от ответчика уведомления о выполнении им ТУ в адрес истца не поступило. 

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В рамках исполнения обязательств по договору истцом были понесены расходы по подготовке и выдаче технических условий заявителю на общую сумму 11276,06 рублей.

Так, согласно приложению № к приказу Управления по регулирования тарифов 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-э, ставка затрат на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в расчете на 1 технологическое присоединение в части подготовки и выдачи Сетевой организацией технических условий заявителю составляет: 9396,72 руб. + 1879,34 руб. (НДС 20%) = 11 276,06 руб., включая НДС.

В соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Абзацем 1 пункта 17 Договора, а также абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения № предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Согласно представленному расчету размер неустойки составляет 276605,23 рублей (303961,79 руб. х 0,25 % х 364 календарных дня (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) / 100 = 276 605,23 руб.).

На основании изложенного, учитывая, что до настоящего времени ответчиком задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ не погашена, доказательств обратного суду не представлено, с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» подлежат взысканию денежные средства в виде убытков, понесенных на подготовку и выдачу технических условий № в размере 11276,06 рублей, а также неустойки за период с 18.05.2024г. по 17.05.2025г. в размере 276605,23 рублей. 

В соответствии с п. 1,2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора

Как установлено судом ответчиком не выполнены возложенные на него обязанности по осуществлению мероприятий для технологического присоединения, нарушены существенные условия договора, в связи, с чем суд считает необходимым расторгнуть заключенный 17.05.2023г. между ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» и ФИО1 договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

На основании ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 29636 рублей.

Руководствуясь ст. 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» удовлетворить.

Расторгнуть заключенный 17.05.2023г. между ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» и ФИО1 договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» убытки, понесенные за подготовку и выдачу технических условий № в размере 11276,06 рублей, неустойку за период с 18.05.2024г. по 17.05.2025г. в размере 276605,23 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 29636 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Со стороны ответчика заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Истцом и третьими лицами заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца с момента принятия решения судом в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 27.10.2025г.

Судья Е.В. Грязнева