гражданское дело №2-89/2025 (2-945/2024)

УИД 09RS0007-01-2024-001282-53 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 марта 2025 года ст-ца Зеленчукская, КЧР

Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего судьи Борлаковой Ф.Л.,

при секретаре судебного заседания Акбаевой Б.Б.,

с участием: представителя истца - помощника прокурора Зеленчукского района Хачирова И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Зеленчукского районного суда гражданское дело по иску прокурора Зеленчукского района КЧР в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Карачаево-Черкесскому республиканскому казенному предприятию «Дирекция капитального строительства», Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики об обязании ответчиков в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по консервации объекта незавершенного строительства

у с т а н о в и л:

Прокурор Зеленчукского района, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Карачаево-Черкесскому республиканскому казенному предприятию «Дирекция капитального строительства», Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, в котором, с учетом уточнений, просил обязать Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации объекта незавершенного строительства «40 кв. жилой дом в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>

В обоснование иска указал, что прокуратурой района проведена проверка по обращению ФИО2 по вопросу ограничения доступа граждан, в том числе несовершеннолетних к потенциально опасному объекту незавершенного строительства в 

<

адрес>.

Установлено, что при содержании многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, нарушены положения действующего законодательства.

Проверка показала, что по адресу: 

<

адрес> находится объект незавершенного строительства (многоквартирный дом), состоящий на балансе КЧРКП «Дирекция капитального строительства на основании распоряжения Министерства финансов и имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № «О передаче объектов незавершенного строительства КЧРКП «Дирекция капитального строительства», на котором не ведутся строительные работы в течение длительного времени (более 18 лет), при этом объект капитального строительства не законсервирован.

Согласно ответу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №, балансодержателем затрат данного объекта незавершенного строительства является КЧРКП «Дирекция капитального строительства». Земельный участок, на котором осуществлено возведения объекта недвижимости передан в постоянное (бессрочное) пользование КЧРКП «Дирекция капитального строительства».

Из пункта 2 Устава Карачаево-Черкесского Республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства», утвержденного распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №, учредителем предприятия является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. КЧРКП «Дирекция капитального строительства» находится в ведомственном подчинении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (пункт 4 Устава).

Главным распорядителем бюджетных средств по отношению к КЧРКП «Дирекция капитального строительства» является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Из информации КЧРКП «Дирекция капитального строительства» следует, что балансовая стоимость объекта незавершенного строительства составляет 34 001 583 рублей, при этом причиной приостановления строительства послужило отсутствие финансовых средств.

В соответствии с расчетом технической готовности объекта «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>» следует, что на объекте выполнены работы по устройству фундаментов, стен, перегородок, перекрытий и кровли, исходя из чего удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах устанавливает, что техническая готовность объекта в настоящее время составляет 47 %.

Названный объект незавершенного строительства длительное время не используется по назначению (более 18 лет), окна не заложены, дверей в здании не имеется, внутри помещений имеются разрушения, по периметру здания отсутствуют ограждения и сигнальные ленты, при этом доступ к ним не ограничен, в том числе и для граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в связи с чем данный объект является потенциально опасным с точки зрения общественной безопасности.

Недостроенные здания, в которые есть свободный доступ - потенциально опасные объекты с точки зрения общественной безопасности и антитеррористической защищенности. Они могут стать местом пребывания преступных элементов, лиц без определенного места жительства, а также нелегально находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан. Беспрепятственное проникновение в такие здания, создает условия для совершения противоправных действий и возникновения ситуаций террористической направленности.

В целях устранения выявленных нарушений ДД.ММ.ГГГГ прокурором Зеленчукского района в адрес директора КЧРКП «Дирекция капитального строительства» внесено представление, которое рассмотрено, что подтверждается ответом от ДД.ММ.ГГГГ №, однако балансодержателем (собственником) недостроенного здания надлежащих и действенных мер, направленных на устранение нарушений и воспрепятствование свободному доступу людей в здание (постройку) не предпринято.

Непринятие мер по обеспечению безопасности эксплуатируемого здания недопустимо, поскольку его обрушение может причинить вред жизни, здоровью несовершеннолетних.

Наличие свободного доступа не исключает возможность совершения правонарушений в его помещении, в том числе лицами, имеющими террористические намерения, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, опасность для сохранности имущества третьих лиц.

Данные обстоятельства носят длящийся характер, поскольку меры по консервации не принимаются с 2007 года, что ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

Определениями суда, занесенными в протокол судебного заседания, к участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц привлечены Министерство имущественных и земельных отношений КЧР и территориальное управление Росимущества в КЧР, поскольку при рассмотрении дела могут быть затронуты права и законные интересы вышеуказанных учреждений.

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Зеленчукского района Хачиров И.В. поддержал иск в полном объеме, настаивал на его удовлетворении.

Представитель ответчика Министерство строительства и ЖКХ КЧР в итоговое судебное заседание, будучи надлежаще извещенным не явился. В судебном заседании представитель ответчика ФИО4 возражала против удовлетворения исковых требований, считая их незаконными и необоснованными. Представила письменные возражения, согласно которым из выписки из ЕГРН об объекте недвижимости правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> является Карачаево-Черкесская Республика в лице КЧР КП «Дирекция капитального строительства» на праве постоянного (бессрочного) пользования. Согласно письму Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № о сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства консолидированного бюджета балансодержателем затрат по объекту «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>» является КЧР КП «Дирекция капитального строительства». Во исполнение представления Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений закона от КЧР КП «ДКС» в адрес Министерства поступило обращение от ДД.ММ.ГГГГ № с просьбой рассмотреть возможность завершения строительства в рамках государственных программ либо выделении средств на консервацию объекта «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>. Рассмотрев поступившее обращение, письмом от ДД.ММ.ГГГГ № Министерство сообщило, что в целях включения объекта «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>» в профильные государственные программы и выделения необходимого финансирования в адрес Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики были направлены предложения по формированию проекта республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., включающие затраты на проектно-изыскательские работы по рассматриваемому объекту (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №). Однако после рассмотрения проекта бюджета Карачаево-Черкесской Республики данные средства не были предусмотрены. В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») о новых подходах к управлению незавершенными объектами капитального строительства, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №п-П13, по рассматриваемому объекту от имени Правительства Карачаево- Черкесской Республики направлялись предложения в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о включении в число объектов капитального строительства, строительство которых необходимо завершить в первоочередном порядке (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №). Направленные предложения не были поддержаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В целях сокращения объемов и количества объектов незавершенного строительства и в соответствии с п. 30 постановления Правительства РФ формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений» Министерство строительства и ЖКХ КЧР направило в адрес Минстроя России обращение о предоставлении сведений об объектах незавершенного строительства, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики и включенных в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, а также информацию о принятых управленческих решениях и сроках их реализации, в отношении объектов, включенных в федеральный реестр (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №). Минстрой России письмом от ДД.ММ.ГГГГ №-ДВ/11 сообщил, что в федеральный реестр включено 8 незавершенных объектов капитального строительства, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе, «40 кв. жилой дом в 

<

адрес> Информация о принятых управленческих решениях и сроках их реализации, в отношении объектов, включенных в федеральный реестр, не предоставлена. Министерство строительство и ЖКХ КЧР направило повторный запрос в адрес Минстроя России о предоставлении информации о принятом управленческом решении и сроке его реализации, в отношении рассматриваемого объекта незавершенного строительства (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №). В соответствии с ответом Минстроя России от ДД.ММ.ГГГГ №-ДВ/11 объект «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>» включен в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства на основании протокола заочного заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №-МВК. Согласно Протоколу заочного голосования членов президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №пр в отношении Объекта принято управленческое решение: приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики не являясь собственником, обязанным нести бремя содержания объекта, не являясь правообладателем земельного участка, на котором расположен Объект, не являясь застройщиком или техническим заказчиком, а также балансодержателем затрат по объекту, в чьи обязанности входит обеспечение консервации объекта незавершенного строительства, предприняло все возможные меры в рамках своих полномочий.

Представитель ответчика РГБУ «Дирекция капитального строительства» в итоговое судебное заседание, будучи надлежаще извещенным не явился. В судебных заседаниях представители ответчика ФИО5, ФИО6 возражали против удовлетворения исковых требований, полагали что РГБУ «Дирекция капитального строительства» не является по настоящему делу надлежащим ответчиком, поскольку ответчик не сможет исполнить решение суда.

Представитель третьего лица Администрации Зеленчукского муниципального района, будучи надлежаще извещенным, в судебное заседание не явился, в ходатайстве просил вынести судебный акт в соответствии с действующим законодательством с учетом доводов прокурора.

Представители третьих лиц - Министерства имущественных и земельных отношений КЧР и Территориального управления Росимущества в КЧР будучи надлежаще извещенными в судебное заседание не явились, о причинах неявки не известили, ходатайств не заявляли.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав помощника прокурора Зеленчукского района, представителей ответчиков исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 1 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура осуществляет от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с частью 4 статьи 52 ГрК РФ при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании договора строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором указанные лица должны подготовить земельный участок для строительства и (или) объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

Согласно статье 35 ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

Пунктом 6.2.1 строительных норм и правил Российской Федерации ("Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (далее - СНиП 12-03-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от ДД.ММ.ГГГГ N 80 определено, что устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.

При этом производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены (пункт 6.2.2 СНиП 12-03-2001).

На основании ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

В соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 802, решение о консервации объекта принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем (п. 2).

В случаях, указанных в пункте 2 настоящих Правил, застройщик (заказчик) обеспечивает приведение объекта и территории, используемой для его возведения (далее - строительная площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды (п. 3).

Решение о консервации объекта (за исключением объекта государственной собственности) и об источнике средств на оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик (заказчик) (п. 4).

В состав работ по консервации объекта входят в том числе: а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных); б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов; в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий; г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние; д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта); е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки (п. 9).

Таким образом, консервация объекта, строительство которого приостановлено на срок, превышающий 6 месяцев, - это комплекс мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, исключение угрозы для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

В судебном заседании установлено, что адресу: 

<

адрес> находится объект незавершенного строительства (многоквартирный дом), состоящий на балансе КЧРКП «Дирекция капитального строительства на основании распоряжения Министерства финансов и имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № «О передаче объектов незавершенного строительства КЧРКП «Дирекция капитального строительства», на котором не ведутся строительные работы в течение длительного времени, при этом объект капитального строительства не законсервирован.

Балансовая стоимость вышеуказанного объекта составляет 34 001 583 рублей, причиной приостановления строительства послужило отсутствие финансовых средств. В соответствии с расчетом технической готовности объекта «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>» следует, что на объекте выполнены работы по устройству фундаментов, стен, перегородок, перекрытий и кровли, исходя из чего удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах устанавливает, что техническая готовность объекта в настоящее время составляет 47 %.

Согласно выписки из ЕГРН об объекте недвижимости правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> является Карачаево-Черкесская Республика в лице КЧР КП «Дирекция капитального строительства» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Сторонами не оспаривалось, что на момент подачи иска, рассмотрения дела и вынесения по делу решения строительство объекта фактически было приостановлено на срок, существенно превышающий 6 месяцев.

В целях устранения указанных нарушений законодательства прокурором Зеленчукского района в КЧРКП «Дирекцию капитального строительства» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. 

На указанное представление КЧРКП «Дирекция капитального строительства» предоставлен ответ, согласно которому КЧРКП «Дирекция капитального строительства» обратилось в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с просьбой рассмотреть возможность завершения строительства в рамках государственных программ либо выделении средств на консервацию объекта «40 кв. жилой дом в 

<

адрес>

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Частью 3 ст. 22 указанного Закона прокурор или его заместитель, в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 данного Закона, вносит представление об устранении нарушений закона.

Согласно п. 1 ст. 24 данного Закона, представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению; в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Из указанных норм следует, что внесенные прокурором в рамках осуществления своих полномочий представления подлежат безотлагательному рассмотрению органом или должностным лицом, которому они внесены - невыполнение данного требования свидетельствует о нарушении соответствующим должностным лицом или органом Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1.

Судом установлено, что внесенное прокурором представление в РГБУ «Дирекция капитального строительства» не исполнено в нарушение градостроительного законодательства, а именно решение о консервации объекта не принято.

Из представленной и исследованной судом документации следует, что по отношению к РГБУ «Дирекция капитального строительства» распорядителем денежных средств для строительства указанного в иске объекта выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

При этом ни ответчиками, ни третьими лицами не представлены доказательства того, что в отношении возводимого объекта принималось решение о консервации.

В своих возражениях Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР указывает на то, что финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта государственной собственности, или расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта государственной собственности в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется за счет средств федерального бюджета, в связи с чем вышеуказанный ответчик, не являясь собственником, обязанным нести бремя содержания объекта, не являясь правообладателем земельного участка, на котором расположен объект, не являясь застройщиком или техническим заказчиком, а также балансодержателем затрат по объекту, в чьи обязанности входит обеспечение консервации объекта незавершенного строительства, полагает, что предприняло все возможные меры в рамках своих полномочий

Данные доводы нельзя признать обоснованным, поскольку Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР является не только распорядителем государственных средств по данному объекту, но и учредителем РГБУ «Дирекция капитального строительства», фактически осуществляя контроль за его деятельностью.

Также суд полагает необоснованными доводы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР о том, что в проекте бюджета Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены средства на проведение проектно-изыскательских работ, а также тот факт, что недостроенный объект включен в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства по которому принято управленческое решение о приватизации (отчуждении), поскольку отсутствие денежных средств в бюджете КЧР не может являться основанием для освобождения ответчиков от обязанности произвести консервацию, а решение о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства недостроенного объекта не опровергает того обстоятельства, что балансодержателем объекта незавершенного строительства является РГБУ «Дирекция капитального строительства», находящееся в ведомственном подчинении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Удовлетворить иск прокурора Зеленчукского района КЧР в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Республиканскому государственному бюджетному учреждению «Дирекция капитального строительства» и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Обязать Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации объекта незавершенного строительства «40 кв. жилой дом в 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Зеленчукский районный суд.

Мотивированное решение изготовлено 24 марта 2025 года

Председательствующий по делу судья Борлакова Ф.Л.