Дело № 2-1916/2024

УИД 23RS0036-01-2024-003464-59

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

27 мая 2024 г. г. Краснодар

Судья Октябрьского районного суда г. Краснодара Старикова М.А.

при помощнике судьи Петренко И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей, об обязании исполнить обязательства по договору в натуре, взыскании судебной неустойки.

В обоснование требований указано, что 20 февраля 2023 года между ФИО3 и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером № согласно которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора, выданы технические условия, которые являются Приложение №1 к договору №-Т.П.(т) от 20.02.2023г.Предусмотренные договором обязанности ФИО1 выполнены в полном объеме. На основании договоров купли-продажи от 12 мая 2023г. право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, а также жилой дом, расположенным на нем, перешло ФИО2, что подтверждается Выписками из ЕГРН. По настоящее время АО «Краснодаргоргаз» мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа, не выполнены. Обращения (заявление, претензия) ФИО2 ответчиком АО «Краснодаргоргаз» проигнорированы.

В связи с чем, истец вынуждена обратиться в суд, с учетом уточнения заявленных требований, просит суд признать недействительным пункт 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г. к договору №-Т.П.(т) от 20.02.2023г., заключенного между АО «Краснодаргоргаз», ФИО1, ФИО2, ООО «Газпром газификация», а также признать недействительным одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» пункта 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. с установлением нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г., обязать АО «Краснодаргоргаз» выполнить работы, в соответствии с условиями договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда, взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда в случае его неисполнения в течение установленного судом срока.

В судебное заседание истец ФИО2 и ее представитель ФИО5, действующий на основании нотариальной доверенности, исковые требования поддержали в полном объеме, просили удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика просил в удовлетворении уточненных исковых требований истца отказать в полном объеме, предоставил возражения на исковое заявление, в которых указал, что АО «Краснодаргоргаз» не нарушен срок исполнения обязательств по договору, дополнительным соглашением к договору от 25.04.2024г. установлен новый срок по выполнению мероприятий по подключению до 30.08.2024г.

Третье лицо ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, о дате судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил. В материалы дела представил отзыв, в котором просил суд рассмотреть дело по существу в отсутствие представителя и направить почтой копию решения суда.

Третье лицо ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить, указал о необходимости исполнения договора со стороны АО «Краснодаргоргаз».

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения» определено, что подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с пунктом 71 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению)объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а)разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в)мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Из материалов дела следует, что 17 февраля 2023года АО «Краснодаргоргаз» выдало ФИО1 технические условия № ТУ (Д)/1002-09/2023/381на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №

Пунктом 6 технических условий установлено, что срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения - 135 дней.

В соответствии с пунктом 11 технических условий Исполнитель осуществляет: Проектирование и строительство сети газораспределения низкого давления от подземного стального газопровода низкого давления наружным диаметром 325 мм, проходящего по 

<

адрес> напротив земельного участка с кадастровым номером №, до границы земельного участка по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №. Диаметр проектируемого газопровода определить расчетом; Проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №; Получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» предусмотрено, что настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 81 Правил договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

20 февраля 2023 года между АО «Краснодаргоргаз», ФИО1 и ООО «Газпром газификация» был заключен Договор №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее по тексту – Договор №-Т.П.(т) от 20.02.2023г.).

Согласно пункту 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – жилого дома (далее – объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее-сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером № и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 11 договора установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 35 000 руб., в том числе НДС 5 833,33 руб.

Во исполнение п. 11 договора 22 февраля 2023 года произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) в размере 35 000 руб., что подтверждается кассовым чеком.

В соответствии с пунктом 14 договора датой исполнения обязательства заявителя по внесению платы считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 свои обязательства по договору исполнил в полном объеме.

Вместе с тем, работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства исполнителем не проводились.

На основании договора купли-продажи земельного участка с объектом недвижимости от 12 мая 2023г. право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, а также жилой дом, расположенным на нем, перешло истцу ФИО2, что подтверждается Выписками из ЕГРН.

Истец обратилась к АО «Краснодаргоргаз» с заявлением о переоформлении документов о технологическом присоединении.

Дополнительным соглашением от25.04.2024г., заключенного между АО «Краснодаргоргаз» (Исполнитель), ФИО1 (Заявитель), ФИО2 (Сторона 3) и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) были внесены следующие изменения в договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П.(т) от 20 февраля 2023 г.:

1. Пункт 1 договора изложить в следующей редакции: По настоящему договору исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства жилого дома, расположенного Российская Федерация, 

<

адрес>

2. В связи со сменой собственника Стороны пришли к соглашению о замене Заявителя по Договору №-Т.П.(т) от 20 февраля 2023 г. на Сторону 3. 

3. Заявитель передает свои права и обязанности Стороне 3 по Договору №-Т.П.(т) от 20 февраля 2023 г. с момента подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. 

4. Пункт 3 договора изложить в следующей редакции: Выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до 30 августа 2024 г. 

5. Права и обязанности по Договору №-Т.П.(т) от 20 февраля 2023 г. переходят от Заявителя к Стороне-3.

АО «Краснодаргоргаз» письмом от 22.04.2024г. (На № 0172024/5517) известил ФИО2 о продлении срока действия технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023 г. на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, а также, на основании приложенных правоустанавливающих документов, внесении в них изменения путем изменения местоположения объекта, правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства, в связи с чем пункты 2., 3., 6., 13. указанных технических условий следует читать в новой редакции: 

2. Заявитель: ФИО2 (тел. №)

3. Объект капитального строительства: жилой дом, расположенный (проектируемый) по адресу: 

<

адрес>

6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024 г. 

13. Срок действия настоящих технических условий до 30.08.2024 г.

Остальные пункты, указанные в технических условиях № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023 г. остаются в силе.

Данное письмо является неотъемлемым приложением к техническим условиям № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023 г.

В связи с заключением сторонами дополнительного соглашения от 25.04.2024г.ответчик АО «Краснодаргоргаз»считает, что им не нарушен срок исполнения обязательства по договору в связи с продлением срока выполнения мероприятий по подключению до 30.08.2024г.

Истец ФИО2 в заявлении об уточнении исковых требований по делу №2-1916/2024 не соглашается с установлением в пункте 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г. и установлении в пункте 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г. и просит признать их недействительными. В своих пояснениях ФИО2 пояснила, что своего согласия на изменение срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г. не давала, была вынуждена заключить дополнительное соглашение от 25.04.2024г. на тех условиях, которые установил АО «Краснодаргоргаз», указывает, что 24.05.2024 г. получив условия дополнительного соглашения выразила несогласие на их подписание с установлением нового срока, но ответчик отказался убирать данное условие из дополнительного соглашения, в связи с чем, 25.04.2024г. ФИО2 и ФИО1 подписали дополнительное соглашение на условиях диктуемых АО «Краснодаргоргаз».

Суд считает подлежащими удовлетворению требование ФИО2 о признании недействительным пункта 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г. к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №-Т.П.(т) от 20.02.2023г., заключенного между АО «Краснодаргоргаз», ФИО1, ФИО2, ООО «Газпром газификация», а также признать недействительным одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» пункта 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. с установлением нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г.

АО «Краснодаргоргаз» не предоставил подтверждений, что ФИО2 имела возможность заключить дополнительное соглашение от 25.04.2024г. без установления ответчиком нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г.

Судом принимается во внимание, что необходимость заключения дополнительного соглашения от 25.04.2024г. было вызвано только изменением правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства и не должно влиять на уже установленный договором №-Т.П.(т) от 20.02.2023г.срокподключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства.

Согласно п.3 Договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора.

По общему правилу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Взаимоотношения в области подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования урегулированы Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547.

В соответствии с пунктом 52 Правил № 1547 Договор о подключении должен содержать существенные условия, в том числе срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), согласно абз. б п. 52 Правил №1547).

Согласно пункта 53 Правил №1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил): 135 дней - для заявителей первой категории.

Данная норма пункта 53 Правил №1547 носит императивный характер.

При этом положения 54 Правил №1547 в рассматриваемом случае не применяются, потому что данная норма применяется если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории предусматривают особенности, которые в рассматриваемом случае отсутствуют.

Истец ФИО2 относится к заявителям первой категории, согласно классификации категорий заявителей, установленных пунктом 2 Правил №1547.

Пунктом 3 договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора, т.е. в договоре установлен предельный срок (135 дней) исполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Между тем, пункт 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г. вносит изменения в уже установленный ранее договором №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. срок выполнения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа, продлевая его до 30 августа 2024 г.

Однако, согласно указанным выше нормам вносимые в договор изменения не могут затрагивать общий срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанный в пункте 3 договора№-Т.П.(т) от 20.02.2023г., так как, указанный общий срок является существенным условием договора.

В соответствии с частью 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Согласно статье 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. в силу статьи 426 ГК РФ является публичным.

В соответствии с частью 5 статьи 426 ГК РФ, условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 данной статьи, ничтожны.

Включение в договор условий об осуществлении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с нарушением предельных сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных пунктом 53 Правил №1547 (то есть более 135 дней), действующим законодательством не предусмотрено и является нарушением положения пункта 53 Правил.

Суд считает необходимым признать недействительным пункт 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г., которым установлено, что пункт 3договора изложить в следующей редакции: выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до 30 августа 2024г.

При этом суд критически относится к позиции представителя ответчика АО «Краснодаргоргаз» о том, что необходимость внесения изменения в договор №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. в части установления новых сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения вызвано тем, что срок по договору истек, а в силу статей 425 и 453 Гражданского кодекса российской Федерации заключение дополнительного соглашения не предусматривается по договору с истекшим сроком.

Согласно ч.3 ст.425 ГК РФ Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Согласно пункта 40 договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г., Настоящий договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра настоящего договора, а в случае если настоящий договор подписывается в личном кабинете заявителя с использованием электронной цифровой подписи, он считается заключенным с момента подписания его заявителем и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору либо до момента его расторжения.

Учитывая условия пункта 40 договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г., договор является действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств. Нарушение АО «Краснодаргоргаз» сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, установленного пунктом 3 договора, не влечет окончание срока действия договора, что не препятствует заключению дополнительных соглашений к нему и без изменения сроков исполнения АО «Краснодаргоргаз» своих обязательств по договору. Доказательств обратного ответчик суду не предоставил.

АО «Краснодаргоргаз» предоставил истцу ФИО2 письмо №ТУ-ОТ/1901-09/2024/2240 от 22.04.2024г., которое является неотъемлемым приложением к техническим условиям № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г.

В письме №ТУ-ОТ/1901-09/2024/2240 от 22.04.2024г., указано об изменении в том числе пункта 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. с установлением нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г.

Данное одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» в технических условиях срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства нарушает требования, установленные Правилами №1547, в связи с тем, что техническими условиями № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. уже установлен срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, который составляет 135 дней.

Требование ФИО2 о признании недействительным одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» пункта 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. с установлением нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г. подлежит удовлетворению.

Суд соглашается с тем, что для ФИО2, являющейся экономически слабой и зависимой стороной по сделке, в рассматриваемой ситуации заключение дополнительного соглашения с условием об увеличении срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа, а также одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» в технических условиях срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, при уже выполненных со стороны заявителя обязательств по договору, в том числе выполнении возложенных на заявителя обязательств предусмотренных п.12 Технических условий, о чем ответчик был уведомлен, является не выгодным и нарушающим ее интересы в связи с невозможностью использования газа на объекте капитального строительства.

Судом установлено, что по настоящее время АО «Краснодаргоргаз» не выполнены условия договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства–жилого дома к сети газораспределения в течение 135 дней, то есть в срок до 05 июля 2023года.

Доказательств выполнения работ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства– жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения в срок до 05 июля 2023года, ответчиком суду не представлено и не оспаривается.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Учитывая изложенное, суд считает подлежащими удовлетворению требования истца об обязании ответчика выполнить работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с условиями договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее -постановление Пленума № 7), удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от27.06.2017 № 1367-О, от 24.11.2016 № 2579-О указано на то, что положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума № 7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Учитывая обстоятельства дела, подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика судебной неустойки в случае неисполнения им решения суда в части возложения обязанности исполнить обязательства по договору в натуре, в размере 2 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда. Такой размер судебной неустойки мотивирован длительным периодом просрочки, а также тем, что истец не может использовать газ на объекте капитального строительства – жилом доме. Меньший же размер судебной неустойки не сможет поставить ответчика в такое положение, когда исполнение решения суда для него будет более выгодным, чем его неисполнение.

Кроме того, согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в соответствии с положениями ст. 333.19 НК РФ в размере 300 руб.

Согласно ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей – удовлетворить. 

Признать недействительным пункт 4 дополнительного соглашения от 25.04.2024г. к договору №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сетям газораспределения, заключенного между АО «Краснодаргоргаз», ФИО1, ФИО2, ООО «Газпром газификация», признать недействительным одностороннее изменение АО «Краснодаргоргаз» пункта 6 Технических условий № ТУ(Д)/1002-09/2023/381 от 17.02.2023г. с установлением нового срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства до 30.08.2024г.

Возложить на АО «Краснодаргоргаз» обязанность выполнить работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с условиями договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда в части возложения на Акционерное общество «Краснодаргоргаз» обязанности в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства –жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с условиями договора №-Т.П.(т) от 20.02.2023г., в случае его неисполнения в течение установленного судом срока.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход государства государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение изготовлено 31.05.2024 г.

Судья: