УИД № 17RS0017-01-2024-007373-62

Дело № 2-463/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 февраля 2025 года г. Кызыл 

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего судьи Биче-оол С.Х., при секретаре Ооржак А.М., с участием истца М.Т.Г., представителя ответчика Ш.А-Х.Ч. .,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску М.Т.Г. к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

М.Т.Г. обратилась в суд с иском к АО «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Указывает, что она является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ответчиком договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. По условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Размер платы составляет 

<

данные изъяты>. Указанная сумма оплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. Она неоднократно обращалась к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получала ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.

В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,014 % ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

По расчетам истца размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты>, исходя из расчета: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ = № дней.

Ставка рефинансирования на дату заключения договора 16 %

Плата за технологическое присоединение – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> = 

<

данные изъяты>

Просит ответчика обязать исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 

<

данные изъяты>; компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании истец М.Т.Г. поддержала исковые требования, пояснив о том, что требование исполнено, но она подключилась к трансформатору соседей, который работает на два общества, в связи с чем напряжение низкое, невозможно вечером делать детям уроки. 

Представитель ответчика Ш.А-Х.Ч. . по доверенности не согласился с требованиями, просил прекратить производство по делу, т.к. требования фактически исполнены. Просил снизить неустойку и отказать в удовлетворении компенсации морального вреда, т.к. не предоставлены подтверждающие документы.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ч. 1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч. 2).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно выписке из ЕГРН М.И.Г. владеет на праве собственности жилым помещением по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Из материалов дела следует, что «Россети Сибирь Тываэнерго» (Сетевая организация) и М.Т.Г. (Заявитель) заключили типовой договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) «Малоэтажная жилая застройка», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами и принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

В соответствии с п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка №.

В пункте 10 Договора стороны определили размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 

<

данные изъяты>.

М.Т.Г. во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору произвела оплату по Договору в размере 

<

данные изъяты>, что подтверждается чеком по операции.

Как указано выше, по договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Значит, свои обязательства сетевая организация должна была выполнить до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку к указанному сроку ответчик свои обязательства по Договору не выполнил, М.Т.Г. обратилась в Сетевую организацию письменно.

На ее обращение АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ДД.ММ.ГГГГ ответило, что в рамках исполнения вышеуказанного договора АО «Россети Сибирь» разработало проектно-сметную документацию на строительство воздушных линий ВЛ № кВ, в настоящее время торгово-закупочные процедуры по приобретению материалов завершены, ожидают их поставку, и если температурный режим позволит, технологическое присоединение осуществят в 1 квартале ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением руководителя Тывинского УФАС России по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россети Сибирь Тываэнерго» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность на которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, на АО «Россети Сибирь Тываэнерго» наложен административный штраф в размере 

<

данные изъяты>.

Указанным постановлением по делу об административном правонарушении установлено, что АО «Россети Сибирь Тываэнерго» нарушило сроки технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя М.Т.Г. при наличии возможность соблюсти нормы Правил технологического присоединения.

Согласно Акту допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу проживания истицы установлен прибор учета электроэнергии №, который допущен в эксплуатацию. 

Таким образом, факт нарушения прав истца действиями ответчика нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, поскольку ответчик в нарушение приведенных норм права и вопреки условиям договора не исполнил в установленный договором срок обязанность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств М.Т.Г. к электрическим сетям.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойка, определение которой содержится в п. 1 ст. 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную № % ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Согласно расчету истца размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты>, исходя из расчета:

ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ = № дней

Ставка рефинансирования на дату заключения договора 16 %

Плата за технологическое присоединение – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> = 

<

данные изъяты>

Ответчик возражений или иного расчета суду не представил.

Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку компенсация морального вреда при нарушении прав потребителя при наличии вины причинителя вреда прямо предусмотрена законом, то требование истца о компенсации морального вреда является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как вина ответчика АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в нарушении прав истца как потребителя, выразившееся в неисполнении обязательств по договору.

Учитывая, что в данном случае установлено нарушение прав потребителя, а также с учетом требований разумности и справедливости, суд удовлетворяет требования истца о компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты>. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Иск М.Т.Г. к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» (ИНН №) в пользу М.Т.Г. (паспорт №) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 

<

данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва в течение месяца со дня принятия мотивированного решения путём подачи апелляционной жалобы через Кызылский городской суд Республики Тыва.

Судья С.Х. Биче-оол

Мотивированное решение

изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.