РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 августа 2025 года город Москва 

Суд в составе председательствующего судьи Щербинского районного суда г. Москвы Шаболтас А.В. при помощнике ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-13659/2025 по исковому заявлению ФИО2 ... к ПАО «Россети Московский регион» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 ... обратился в суд с иском к ответчику ПАО «Россети Московский регион» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании морального вреда.

В обоснование исковых требований истец указал, что, 26.01.2024 г. между ПАО «Россети Московский регион» (далее сетевая организация, исполнитель, ответчик)) и ФИО2 (далее потребитель, заказчик, истец) был заключён договор ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее договор).

В соответствии с п. 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение): строящегося жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов принадлежащих электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 150 кВт; категория надёжности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств: 0 кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 2 договора предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящегося жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: адрес, д. Сергеевка, кадастровый номер: ....

Согласно п. 3 договора, точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).

На основании п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 г. № 320-Р и составляет: сумма, в том числе НДС.

Заказчик выполнил свои обязательства по оплате. 10.02.2024 г. Потребитель оплатил денежные средства в размере сумма, что подтверждается квитанцией об оплате 

26.03.2024 г. ФИО2 оплатил денежные средства в размере сумма, что подтверждается квитанцией об оплате. Итого Заказчик оплатил сумма.

Сетевая организация обязана была осуществить работы по технологическому присоединению до 26.07.2024 г. Однако, исполнителем были нарушены сроки проведения работ.

Между сетевой организацией и заказчиком было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.01.2024 о нижеследующем: внести изменения в пункты 13 технических условий ...) от 26.01.2024 г. и изложить их в следующей редакции: 1.1. «13. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет до 30.09.2024 г.»

В установленные дополнительным соглашением сроки, исполнитель не приступил к выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

01.11.2024 заказчик направил обращение через личный кабинет Россети по вопросу сроков исполнения мероприятий по договору.

13.11.2024 сетевая организация направила ответ заказчику. Из содержания ответа усматривается: «что исполнителем при осуществлении разработки проектной возникла необходимость территории которых планируется разместить объекты электросетевого хозяйства. После получения всех согласований, строительно-монтажные работы будут выполнены в кратчайший срок. Плановый срок выполнения работ был отложен на более позднюю дату.

Дополнительная информация будет направлена в срок до 23.01.2025 г.».

27.11.2024 заказчик повторно через личный кабинет Россети направил обращение по вопросу проведения мероприятий в срочном порядке, так как заказчиком была произведена оплата по условиям договора.

06.12.2024 сетевая организация направила ответ заказчику. Из содержания ответа усматривается: «Для осуществления мероприятий, предусмотренных Договором ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СБЭМ» был заключён договор подряда. В связи с финансовой несостоятельностью подрядной организации осуществлена процедура расторжения указанного договора. После расторжения договора будут проведены торгово-закупочные процедуры для выполнения строительно-монтажных работ. Ввиду вышеизложенного срок выполнения строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям исполнителем был перенесён на неопределённый срок».

17.12.2024 истец был вынужден обратиться к ответчику с претензией в порядке досудебного урегулирования спора. 24.12.2024 г. ответчик предоставил ответ на претензию.

В связи с финансовой несостоятельностью подрядной организации осуществлена процедура расторжения указанного договора. После расторжения договора будут проведены торгово-закупочные процедуры для выполнения строительно-монтажных работ. Ввиду вышеизложенного срок выполнения строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский Регион» был перенесён на неустановленный срок.

Доводы ответчика о том, что подрядная организация финансово несостоятельна, необоснованные, так как не представлено доказательств того, что ООО «СБЭМ» было признано банкротом. Не представлено документов, подтверждающих несостоятельность подрядной организации. Ответчик не предоставил никакой информации по поводу процесса расторжения договора с подрядной организацией, а именно на какой стадии все находится. Более того, ответчиком до настоящего времени не приняты меры по организации торгово-закупочных мероприятий для проведения строительно-монтажных работ.

17.12.2024 истец обратился с заявлением в Федеральную Антимонопольную Службу по Московской области по факту противоправных действий ответчика. 

16.01.2025 ФАС предоставило письменный ответ, из которого усматривается, что в отношении ПАО «Россети Московский Регион» было возбуждено дело № 050/04/9.21-66/2025 об административном правонарушении ответственность, за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.

07.04.2025 истец повторно направил ответчику обращение по вопросу согласования сроков проведения мероприятий по технологическому присоединению.

17.04.2025 ответчик предоставил ответ. В ответе указано, что ведётся процедура расторжения договора с подрядной организацией и после расторжения будут проведены новые торгово-закупочные мероприятия для проведения строительно-монтажных работ.

Таким образом, сетевая организация нарушила условия договора и своевременно не исполняет взятые на себя обязательства. Заказчик не имеет возможности пользоваться земельным участком, вынужден тратить время и денежные средства для решения данного вопроса. Между истцом и ответчиком более не подписывалось никаких документов по продлению сроков проведения строительно-монтажных работ.

На основании вышеизложенного, просит суд: обязать ПАО «Россети Московский Регион» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору ...) от 26.01.2024 г., объект - строящийся жилой дом, расположенный по адресу: адрес, д. Сергеевка, кадастровый номер: ..., в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Московский Регион» в пользу истца: денежные средства в размере сумма в качестве неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору ...) от 26.01.2024 г.; денежные средства в размере сумма в счёт компенсации морального вреда; денежные средства в размере сумма в качестве штрафа в размере 50 % за нарушение прав потребителя.

В свою очередь ответчик ПАО «Россети Московский Регион» представил суду письменные возражения, в которых просит суд: в удовлетворении исковых требований в полном объёме отказать; снизить размер неустойки, штрафа, морального вреда до уровня предельной соразмерности. 

Истец ФИО2 в судебное заседание явился, исковые требовани поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Ответчик ПАО «Россети Московский Регион» ФИО3 в судебное заседание явилась, исковые требования не признала, просила отказать в удовлетворении иска.   

Выслушав истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 707 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1).

Судом установлено и из материалов следует, что 26.01.2024 г. между ПАО «Россети Московский регион» (далее сетевая организация, исполнитель, ответчик)) и ФИО2 (далее потребитель, заказчик, истец) был заключён договор ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее договор).

В соответствии с п. 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение): строящегося жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов принадлежащих электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 150 кВт; категория надёжности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств: 0 кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 2 договора предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящегося жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: адрес, д. Сергеевка, кадастровый номер: ....

Согласно п. 3 договора, точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).

На основании п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 г. № 320-Р и составляет: сумма, в том числе НДС.

Заказчик выполнил свои обязательства по оплате. 10.02.2024 г. Потребитель оплатил денежные средства в размере сумма, что подтверждается квитанцией об оплате 

26.03.2024 г. ФИО2 оплатил денежные средства в размере сумма, что подтверждается квитанцией об оплате. Итого Заказчик оплатил сумма.

Сетевая организация обязана была осуществить работы по технологическому присоединению до 26.07.2024 г. Однако, исполнителем были нарушены сроки проведения работ.

Между сетевой организацией и заказчиком было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.01.2024 о нижеследующем: внести изменения в пункты 13 технических условий ...) от 26.01.2024 г. и изложить их в следующей редакции: 1.1. «13. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет до 30.09.2024 г.»

В установленные дополнительным соглашением сроки, исполнитель не приступил к выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

01.11.2024 заказчик направил обращение через личный кабинет Россети по вопросу сроков исполнения мероприятий по договору.

13.11.2024 сетевая организация направила ответ заказчику. Из содержания ответа усматривается: «что исполнителем при осуществлении разработки проектной возникла необходимость территории которых планируется разместить объекты электросетевого хозяйства. После получения всех согласований, строительно-монтажные работы будут выполнены в кратчайший срок. Плановый срок выполнения работ был отложен на более позднюю дату.

Дополнительная информация будет направлена в срок до 23.01.2025 г.».

27.11.2024 заказчик повторно через личный кабинет Россети направил обращение по вопросу проведения мероприятий в срочном порядке, так как заказчиком была произведена оплата по условиям договора.

06.12.2024 сетевая организация направила ответ заказчику. Из содержания ответа усматривается: «Для осуществления мероприятий, предусмотренных Договором ...) от 26.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СБЭМ» был заключён договор подряда. В связи с финансовой несостоятельностью подрядной организации осуществлена процедура расторжения указанного договора. После расторжения договора будут проведены торгово-закупочные процедуры для выполнения строительно-монтажных работ. Ввиду вышеизложенного срок выполнения строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям исполнителем был перенесён на неопределённый срок».

17.12.2024 истец был вынужден обратиться к ответчику с претензией в порядке досудебного урегулирования спора. 24.12.2024 г. ответчик предоставил ответ на претензию.

В связи с финансовой несостоятельностью подрядной организации осуществлена процедура расторжения указанного договора. После расторжения договора будут проведены торгово-закупочные процедуры для выполнения строительно-монтажных работ. Ввиду вышеизложенного срок выполнения строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский Регион» был перенесён на неустановленный срок.

Доводы ответчика о том, что подрядная организация финансово несостоятельна, необоснованные, так как не представлено доказательств того, что ООО «СБЭМ» было признано банкротом. Не представлено документов, подтверждающих несостоятельность подрядной организации. Ответчик не предоставил никакой информации по поводу процесса расторжения договора с подрядной организацией, а именно на какой стадии все находится. Более того, ответчиком до настоящего времени не приняты меры по организации торгово-закупочных мероприятий для проведения строительно-монтажных работ.

17.12.2024 истец обратился с заявлением в Федеральную Антимонопольную Службу по Московской области по факту противоправных действий ответчика. 

16.01.2025 ФАС предоставило письменный ответ, из которого усматривается, что в отношении ПАО «Россети Московский Регион» было возбуждено дело № 050/04/9.21-66/2025 об административном правонарушении ответственность, за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.

07.04.2025 истец повторно направил ответчику обращение по вопросу согласования сроков проведения мероприятий по технологическому присоединению.

17.04.2025 ответчик предоставил ответ. В ответе указано, что ведётся процедура расторжения договора с подрядной организацией и после расторжения будут проведены новые торгово-закупочные мероприятия для проведения строительно-монтажных работ.

Таким образом, сетевая организация нарушила условия договора и своевременно не исполняет взятые на себя обязательства. Заказчик не имеет возможности пользоваться земельным участком, вынужден тратить время и денежные средства для решения данного вопроса. Между истцом и ответчиком более не подписывалось никаких документов по продлению сроков проведения строительно-монтажных работ.

На основании вышеизложенного, просит суд: обязать ПАО «Россети Московский Регион» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору ...) от 26.01.2024 г., объект - строящийся жилой дом, расположенный по адресу: адрес, д. Сергеевка, кадастровый номер: ..., в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Московский Регион» в пользу истца: денежные средства в размере сумма в качестве неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору ...) от 26.01.2024 г.; денежные средства в размере сумма в счёт компенсации морального вреда; денежные средства в размере сумма в качестве штрафа в размере 50 % за нарушение прав потребителя.

В свою очередь ответчик ПАО «Россети Московский Регион» представил суду письменные возражения, в которых просит суд: в удовлетворении исковых требований в полном объёме отказать; снизить размер неустойки, штрафа, морального вреда до уровня предельной соразмерности. 

В силу п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причинённых таким необоснованным отказом или уклонением.

Пунктом 7 указанных правил установлена процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным п. 2 настоящих Правил; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в п. 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, объектов лиц, указанных в п. 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВт включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с учётом положений п. 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приёма (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический приём (подача) напряжения и мощности осуществляется путём включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

В отношении заявителей, указанных в п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Абзацем 13 пункта п. «б» п. 16 Порядка срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Ответчиком ПАО «Россети Московский Регион» доводы истца не оспорены, представлены достаточные и достоверные доказательства надлежащего исполнения условий договора в нарушение ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Суд рассмотрел представленные доказательства и установил, что Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по Договору ...) от 26.01.2024 г. 6 месяцев. Дополнительным соглашением № l от 22.08.2024 г. срок выполнения мероприятий пролонгирован до 30.09.2024 г.

В настоящее время работы со стороны сетевой организации выполнены частично. Мероприятия по технологическому присоединению по п. 10.2.1. - выполнены в полном объёме, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № 1/108-23-302-182021(305802) от 04.06.2025 г.

Для выполнения мероприятий, технических условий между ПАО «Россети Московский Регион» и ООО «СБЭМ» заключён договор строительного подряда.

В виду того, что текущий владелец доли в уставном капитале ООО «СБЭМ», руководитель - банкрот или в процессе банкротства (дело № А47-21589/2024), деятельность подрядной организации приостановлена.

ПАО «Россети Московский Регион» 08.07.2025г. исх. № ЮЭС/01/2533 направлено уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке.

ПАО «Россети Московский Регион» инициирована повторная торгово- закупочная процедура для реализации Технических условий по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

При таких обстоятельствах, поскольку доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения представлено, суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору.

Подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании в его пользу в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» компенсации морального вреда, при решении вопроса о размере которой суд учитывает требования разумности и справедливости, степень и характер нравственных страданий истца и находит возможным взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере - сумма.

Учитывая положения п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», исходя из принципа разумности и справедливости взыскание судом штрафа в размере сумма является обоснованным.

Согласно п. 3 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что с ответчика ПАО «Россети Московский Регион» подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2 ... (паспортные данные; ИНН:

<

***>; адрес: адрес, адрес) к ПАО «Россети Московский регион» (ИНН:

<

***>; ОГРН:

<

***>) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании морального вреда – удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Московский Регион» (ИНН:

<

***>) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору ...) от 26.01.2024 г., объект - строящийся жилой дом, расположенный по адресу: адрес, д. Сергеевка, кадастровый номер: ....

Взыскать с ПАО «Россети Московский Регион» (ИНН:

<

***>) в пользу ФИО2 ... паспортные данные денежные средства в размере сумма в счёт компенсации морального вреда, штраф в размере - сумма

Взыскать с ПАО «Россети Московский Регион» (ИНН:

<

***>) в бюджет г. Москвы государственную пошлину в размере - сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения суде в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 09 сентября 2025 года.

Судья А.В. Шаболтас