2-572/2024

50RS0033-01-2023-007117-14

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 января 2024 года

Орехово-Зуевский городской суд Московской области

В составе федерального судьи Судаковой Н.И., при секретаре судебного заседания Вихоревой О.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 ФИО6 к ООО «Эко-Строй» о взыскании денежных средств по договору подряда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Эко-Строй» о взыскании денежных средств по договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 149 140 руб. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком заключен договор на выполнение работ №, по условиям которого ООО «Эко-Строй» обязуется выполнить строительные работы на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. Согласно локального сметного расчета по количеству строительных материалов и объему выполняемых работ по строительству каркасного дома общая стоимость составляет 1 496 473 руб. 40 коп., в том числе стоимость строительных материалов – 869 273 руб. 40 коп., стоимость работ – 602 200 руб., стоимость применения машин и механизмов – 25 000 руб. По условиям п. 5.4 договора на выполнения работ оплата происходит поэтапно в соответствии со сметой и планом графиком-работ. Во исполнение вышеуказанного пункта договора им были оплачены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в размере 101 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб. Ответчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены следующие работы: разработка проектно-сметной документации стоимостью 13 000 руб., разбивка по осям, монтаж свай механическим способом стоимостью 69 920 руб., а всего стоимость составила 89 920 руб. План-график строительных работ определяет начало работ по строительству каркасного дома с ДД.ММ.ГГГГ, а окончание работ ДД.ММ.ГГГГ. Ответчику в установленном порядке передано утвержденное проектно-техническое задание, обеспечено финансирование двух этапов строительства, также частично оплачен третий этап строительства, обеспечен доступ ООО «Эко-Строй» на отмеченный земельный участок для проведения строительных работ. Ответчик в начале сентября 2023 г. осуществил установку свайного фундамента, отгрузил по месту выполнения работ часть строительных материалов на ориентировочную сумму 68 940 руб., больше никаких работ им произведено не было, строительство не завершено. Он неоднократно обращался в адрес ответчика ООО «Эко-Строй» с требованием исполнить принятые на себя обязательства и окончить строительство каркасного дома. Однако никаких действий по исполнению заключенного договора не предпринято. Исходя из этого, просит взыскать с ООО «Эко-Строй» сумму в размере 149 140 руб. в счет возврата денежных средств по договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебное заседание ФИО1 не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представитель ООО «Эко-Строй» ФИО2 в судебное заседание не явился, предоставил суду заявление, в котором исковые требования ФИО1 полностью признал. 

Стороны в гражданском процессе пользуются всей полнотой предоставленных им прав. Ответчику понятны последствия признания иска и принятия его судом о том, что невозможно повторное предъявление иска в суд теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела.

Ответчик иск признал и судом принято признание иска ответчиком, поскольку признание иска не противоречит закону, не нарушает права и охраняемые законом интересы иных лиц.

В силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 173 ч. 3, 194, 198 ч.4 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Эко-Строй» (ОГРН №; ИНН №) в пользу ФИО1 ФИО7 (ИНН №) в счет возврата денежных средств по договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 149 140 руб. (сто сорок девять тысяч сто сорок руб.)

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Орехово-Зуевский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: Н.И. Судакова