Дело № 2 -457/2026

УИД 75RS0002-01-2025-006061-61

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

17 февраля 2026 г. 

<

адрес>

Ингодинский районный суд 

<

адрес>

в составе председательствующего судьи Порошиной Е.В.,

при секретаре Палий Т.Г.,

с участием представителя ответчика ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обратился в суд с вышеназванным заявлением, ссылаясь на то, что им была подана заявка через электронный портал услуг ПАО «Россети», ДД.ММ.ГГГГ с ним заключен договор №.

<

данные изъяты> на технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение «Смоленское», территория 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, приложением к договору являются технические условия, цена договора 16 789,95 руб. ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение в течение 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ Им была оплачена сумма по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 789,95 руб. Ответчик же нарушил все сроки и его права как потребителя, никаких работ не выполнил. Просил обязать ответчика исполнить условия типового договора №.

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, 

<

адрес>, сельское поселение «Смоленское», территория 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>. Взыскать с ответчика в пользу ФИО2 неустойку за нарушение установленного договором срока технологического присоединения, в размере 13 306 руб. за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., штраф, в размере 50 % от суммы присужденной судом.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО1 исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве, указала, что для выполнения технических условий нужны большие затраты. Денежных средств в таком количестве у ПАО «Россети Сибирь» не имеется, заключены кредитные договоры, которые в настоящее время не погашены. Инвестиционная программа уже исполнена, просила установить срок для исполнения договора не менее 6 месяцев, уменьшить размер неустойки в связи с трудным имущественным положением ответчика, размер госпошлины. Указала, что размер компенсации морального вреда и факт его наличия не доказан, полагала, что истец не верно рассчитал размер неустойки.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, суд приходит к следующему.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 был заключен договор № №.

<

данные изъяты> на технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение «Смоленское», территория 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, приложением к договору являются технические условия, цена договора 16 789,95 руб.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5)

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (п.6).

Согласно п. 8 договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п. 11 правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Свои обязательства по договору истцом выполнены, ФИО2 оплачена работа по договору 16 789,95 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

ПАО «Россети Сибирь» доказательств выполнения каких - либо работ по договору не представлено.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты> сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Положениями ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты> "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты>.

В соответствии с подп. "б" п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. "б" п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу пункта 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты>, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты> "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

<

данные изъяты> "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 6 заключенного между сторонами договора, срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Указанный срок истек ДД.ММ.ГГГГ

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности доводов истца в части нарушения ответчиком условий договора, нарушении прав потребителя.

В соответствии с п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статьей 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего исполнения заключенного между сторонами договора, исходя из объема нарушений и его длительности, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости в размере 5 000 руб.

Согласно п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такое неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

Согласно расчету истца, расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (за 317 дней) составляет 13 306 руб. Данный расчет суд находит арифметически верным.

В соответствии с п. 6 ст. 13, Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом присуждена сумма 18 306 (5000 +13 306), штраф составит 9 153 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд полагает возможным установить для исполнения решения суда срок четыре месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Данный срок устанавливается с учетом имущественного положения ответчика, наличием кредиторской задолженности ПАО «Россети Сибирь», необходимостью сохранения баланса интересов сторон.

Согласно статье 90 ГПК РФ основания и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В силу части 2 статьи 333.20 НК РФ Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.

С учетом трудного имущественного положения ответчика, подтвержденного представленными суду документами, суд полагает уменьшить размер подлежащей уплате ответчиком госпошлины до 3 500 руб.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194 - 198 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь», ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2, паспорт 

<

данные изъяты> №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением 

<

данные изъяты> России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для электроснабжения объекта Малоэтажная жилая застройка (жилой дом – кадастровый номер объекта 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, сельское поселение «Смоленское», территория 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2, компенсацию морального вреда 5 000 руб., неустойку за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 306 руб., штраф 9 153 руб., всего 27 459 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в бюджет городского округа «

<

адрес>» расходы по уплате госпошлины 3 500 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Порошина Е.В.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ