Дело № 2-5382/2023 

27RS0004-01-2023-006660-05

Заочное 

решение

 

Именем Российской Федерации

09 ноября 2023 года г.Хабаровск

Индустриальный районный суд г.Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Карпенко А.В.,

при секретаре судебного заседания Мирошкиной В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Синергия» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами,

Установил:

ООО «Синергия» обратилось в суд с иском к ответчику ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Свои требования мотивировало тем, что 22.08.2023 между истцом и ответчиком ФИО1, действующим как физическое лицо с применением налогового режима «налог на профессиональный доход» был заключен договор подряда № 28 на выполнение работ в соответствии с техническим заданием по капитальному ремонту с устройством теплоизоляции и тонкой штукатуркой по сетке фасада пристройки средней части здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Сроки выполнения работ с 23.08.2023 по 03.09.2023, общая стоимость работ составляет 1312387 рублей, окончательный расчет производится заказчиком в течение 10 рабочих дней после выполнения работ и подписания сторонами акта выполненных работ. 22.08.2023 на расчетный счет ответчика истцом было осуществлено перечисление авансового платежа в размере 393716 рублей. Однако к работам ответчик так и не преступил, на объекте ни ответчик, ни рабочие не появились. 04.09.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия об отказе договора и возврате полученного аванса, однако ответа на претензию не последовало. Истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в размере 393716 рублей, убытки, связанные с уплатой банковской комиссии за перевод денежных средств в размере 6660 рублей 11 копеек и 2256 рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.09.2023 по 01.10.2023 в размере 3624 рубля 34 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные в порядке ст.395 ГК РФ от суммы долга в размере 393716 рублей за период со 02.10.2023 по дату принятия судебного решения, штраф за необоснованный отказ от исполнения договора в размере 262477 рублей 40 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9887 рублей.

В судебное заседание представитель истца не явился, о времени и месте судебного заседания извещался своевременно и надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В судебное заседание ответчик ФИО1 не явился, о времени и месте судебного заседания извещался своевременно и надлежащим образом, путем направления заказной почтовой корреспонденции. Об уважительных причинах неявки в суд ответчик не сообщил, об отложении слушания дела и рассмотрении дела в его отсутствие не просил. 

В соответствии со ст.233 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

В силуст.309 ГКРФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласност.310 ГКРФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п.1 ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Судом установлено, что 22.08.2023 между ООО «Синергия» и ФИО1, действующим как физическое лицо с применением налогового режима «налог на профессиональный доход», был заключен договор подряда № 28, на выполнение работ в соответствии с техническим заданием по капитальному ремонту с устройством теплоизоляции и тонкой штукатуркой по сетке фасада пристройки средней части здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно п.3 договора, сроки выполнения работ установлены с 23.08.2023 по 03.09.2023. 

Согласно п.4.1 договора, общая стоимость работ составляет 1312387 рублей. 

Согласно п.4.3 договора, заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ в течение трех рабочих дней с даты начала фактического выполнения работ подрядчиком в размере 393716 рублей.

В соответствии с п.4.4 договора, окончательный расчет производится заказчиком в течение 10 рабочих дней после выполнения работ и подписания сторонами акта выполненных работ.

Как следует из материалов дела, истцом по договору были внесены платежи на сумму 294716 рублей и 99 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №89 от 22.08.2023 и № 90 от 22.08.2023 соответственно.

Однако до настоящего времени взятые на себя обязательства перед ООО «Синергия» ответчиком ФИО1 не исполнены, срок исполнения обязательств по договору истек. 

Доказательства исполнения обязательств по договору подряда в установленный срок ответчиком не представлены.

В силу ч.3 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п.7.4.1 договора, в случае невыхода на работу подрядчик обязуется предоставить заказчику уведомление о своем невыходе на работу заблаговременно.

В соответствии с п.7.4.3 договора, если отсутствие подрядчика на работе является неоправданным или необоснованным, он будет подвержен штрафам со стороны заказчика в размере 20% от стоимости работ согласно п.4.1 договора. 

В соответствии с п.7.4.5 договора, в случае повторяющихся невыходов на работу без уважительных причин заказчик может расторгнуть договор или принять другие меры в соответствии с законодательством. 

Согласно п.9.2 договора, при необоснованном отказе подрядчика от исполнения согласованных условий договора будет налагаться штраф в размере 20% от стоимости работ согласно п.4.1 договора.

04.09.2023 в адрес ответчика была направлена претензия об отказе от исполнения договора, возврате денежных средств в 393716 рублей, убытков в размере 6660 рублей 11 копеек и 2256 рублей 50 копеек, штрафа в размере 262477 рублей 40 копеек, которая до настоящего времени не удовлетворена.

Ответчик, в нарушение требований ст.56 ГПК РФ, не представил суду доказательства надлежащего исполнения обязательств перед истцом, в связи с чем, исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда от 22.08.2023 в размере 393716 рублей являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истцом заявлены требования о взыскании штрафа за необоснованный отказ от исполнения договора в размере 262477 рублей 40 копеек, что составляет 20% от общей стоимости работ по договору.

Указанная сумма подлежит взысканию в пользу истца.

В соответствии со ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

Истец также понес расходы по оплате банковской комиссии за перевод денежных средств в размере 8916 рублей 61 копейка, что подтверждается банковским ордером № 4164 от 22.08.2023. Данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужыми денежными средствами, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется существующей в месте жительства учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его существующей части.

Согласно разъяснениям, данным в п.37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты, предусмотренные п.1 ст.395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (вследствие причинения вреда).

Истцом заявлены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.09.2023 по 01.10.2023 в размере 3624 рубля 34 копейки.

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, судом проверен и признан правильным. В связи с чем, указанная сумма подлежит взысканию в пользу истца.

Учитывая, что проценты, определенные ст.395 ГК РФ, являются платой за пользование чужими денежными средствами, они подлежат взыскании с 02.10.2023 по день фактического исполнения обязательства. 

Согласно ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9887 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Синергия» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 

<

данные изъяты> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежную сумму в размере 393716 рублей, убытки в размере 8916 рублей 61 копейка, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.09.2023 по 01.10.2023 в размере 3624 рубля 34 копейки, штраф в размере 262477 рублей 40 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9887 рублей.

Взыскать с ФИО1 

<

данные изъяты> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из суммы долга в размере 393716 рублей с 02.10.2023 по дату его фактического исполнения решения.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Карпенко А.В.

Мотивированное решение изготовлено 16.11.2023