Дело № 2-854/25 (УИД 42RS0016-01-2025-000714-83)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

г.Новокузнецк 28 августа 2025 года

Куйбышевский районный суд г.Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Нейцель О.А.

при секретаре судебного заседания Лосевой М.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Бизнес-Плюс» о взыскании задолженности по договору подряда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Бизнес-Плюс» о взыскании задолженности по договору подряда.

Требования мотивированы тем, что 14.10.2024 между истцом и ООО «Бизнес-Плюс» заключен договор подряда на кровельные и ремонтные работы. По условиям п.п.1.1, 1.2 договора, подрядчик обязуется выполнить работу по капитальному ремонту кровли бассейна и перехода здания «Детский дом-школа «Дом детства», в 

<

адрес>. Срок работ сторонами определен с 14.10.2024 по 10.11.2024. Согласно п. 4.1 договора, за выполненную работу заказчик обязуется выплатить подрядчику 650 руб. за кв.м. Оплата производится частями, за фактически выполненные работы, по понедельникам, в офисе заказчика в 

<

адрес>, наличными денежными средствами. В соответствии с условиями договора, подрядчик обязан передать результат работ заказчику по акту о сдаче-приемке выполненных работ, а заказчик в течение 3 дней после получения извещения от подрядчика об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить подрядчику. 11.11.2024 подрядчиком выполнены работы по капитальному ремонту кровли бассейна и перехода здания «Детский дом-школа «Дом детства» на общую сумму 225 550 руб., о чем сторонами составлен и подписан акт сдачи-приемки работ. Срок оплат по данному акту до 18.11.2024. Работы, выполненные подрядчиком, заказчиком приняты без замечаний, акты сдачи-приемки работ подписаны сторонами. Претензий относительно качества и своевременности оказанных работ от заказчика не поступало. 21.10.2024 подрядчику выдан аванс на сумму 30 000 руб. Остаток задолженности составил 195 550 руб., которая до настоящего времени не выплачена ответчиком. После обращения с претензией 10.02.2025 о выплате задолженности, ответчик требования не исполнил. В связи с тем, что ответчик не исполнил свои обязательства, с него также подлежат взысканию проценты, предусмотренные п.5.2 договора. На основании изложенного, руководствуясь ст. 309,310,330, 702, 711 ГК РФ, истец просит взыскать с ООО «Бизнес-Плюс» в свою пользу задолженность по договору подряда в размере 195 550 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19 110 руб., за период с 19.11.2024 по 07.04.2025, а далее в размере 1/300 ставки Центрального банка за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, за период с 08.04.2025 по дату фактического исполнения ответчиком решения суда, взыскать госпошлину в размере 7423 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала в полном объеме, по доводам и основаниям изложенным в иске.

Представитель ответчика ООО «Бизнес-Плюс» в судебное заседание не явился. О дне слушания дела извещён надлежащим образом.

Согласно ст.113 ГПК РФ, судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле.

По правилам п.1 ст. 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 67 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п.1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен заказными письмами с уведомлениями, которые возвращены в суд, по истечении срока хранения. Нежелание участника процесса получать судебные извещения о явке в суд свидетельствует об его уклонении от участия в состязательном процессе, что не может повлечь неблагоприятные последствия для суда и не должно отражаться на правах других лиц на доступ к правосудию. 

Представители 3их лиц- ГКОУ «Детский дом-школа «Дом детства», ООО «Формат» в судебное заседание не явились, о дне слушания дела извещены надлежащим образом.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ, суд считает необходимым рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Заслушав представителя истца, изучив письменные доказательства, суд приходит к следующему выводу: 

В силу ст. 12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст.420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В соответствии со ст.421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч.1).

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ч.2).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В соответствии со ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

19.08.2024 между ГКОУ «Детский дом-школа «Дом детства», именуемое Заказчик и ООО «Формат», именуемый Подрядчик был заключен государственный контракт на капитальный ремонт кровли зданий ГКОУ «Детский дом-школа «Дом детства».

В соответствии с п.1.2 контракта, объем работ составлял -капитальный ремонт кровли спортзала, столовой актового зала, бассейна, Центра ПВ и ПС ГКОУ «Детский дом-школа «Дом детства» по адресу 

<

адрес>. Срок выполнения работ по 31.10.2024. Цена контракта составила 3700 654,49 руб.

В соответствии с информацией ГКОУ «Детский дом-школа «Дом детства», работы выполнены 10.12.2024, сумма оплаты составила 2324240 руб. 

14.10.2024 между ООО «Бизнес-плюс» (Заказчик), с одной стороны и ФИО1 (Подрядчик), с другой стороны, был заключен договор подряда № на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бассейна и перехода здания «Детский дом-школа «Дом детства», находящегося в 

<

адрес>, согласно техническому заданию (смете), являющейся неотъемлемой частью договора. 

В соответствии с п.1.3 договора, работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки: начало работ 14.10.2024, окончание работ 10.11.2024. Общая продолжительность работ составляет 20 календарных дней.

Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в смете (п.2.1 договора).

Работу Подрядчик выполняет из материалов заказчика, на своем оборудовании и своими инструментами и своими расходными материалами (п. 2.2 договора).

В соответствии с п.п. 3.1.2, 3.1.3 договора, Подрядчик обязан выполнить работы в срок, указанный в п.1.3 договора и предать результат работ Заказчику по акту о сдаче-приемке выполненных работ.

В соответствии с п.п. 3.2.2, 3.2.3 договора, Заказчик обязан в течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ по истечение срока, указанного в п.1.3 настоящего договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Оплатить Работу по цене и в порядке, указанной в п.4 настоящего договора.

В соответствии п. 4.1 договора, за выполненную работу Заказчик обязуется выплатить подрядчику 650 руб. за 1 кв.м. готовой кровли в следующем порядке: оплата производится частями, пропорционально выполненным работам по понедельникам, в офисе заказчика по адресу : 

<

адрес>2, за фактически выполненные работы, согласно Приложению № 4 (п. 4.1.1 договора).

В соответствии с п. 4.2 договора, уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем выплаты наличных денежных средств в кассе заказчика.

Объем работ согласован сторонами, что подтверждается сметой, подписанной сторонами 14.10.2024.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 20.11.2024, между ООО «Бизнес-плюс» и ФИО1, общая стоимость работ по договору составляет 225 550 руб., из которых 30 000 руб. выплачено истцу 21.10.2024, оставшаяся часть в размере 195 550 руб. должна быть выплачена 01.11.2024.

В соответствии с актом № от 11.11.2024, стоимость работ по капитальному ремонту кровли бассейна и перехода здания «Детский дом-школа «Дом детства», складывается из площади объекта- 347 кв.м., стоимости 1 кв.м.- 650 руб. и составляет 225 550 руб. 

Из указанного акта, подписанного сторонами, следует, что вышеперечисленные услуги Заказчиком ФИО1 выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Таким образом, подрядчик ФИО1 свои обязательства по условиям договора подряда от 14.10.2024, выполнил надлежащим образом, в установленные сроки, тогда как, ответчик нарушил условия договора, не оплатив ему оставшуюся часть стоимости выполненных работ, в размере 195 550 руб. (225 550 руб.-30 000 руб.). 

Ответчиком, а также третьими лицами, привлеченными к участию в дело, не оспаривается факт заключения указанного договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бассейна и перехода здания «Детский дом-школа «Дом детства», расположенного в 

<

адрес>, на условиях согласованных сторонами.

В связи с чем, 06.02.2025 истцом, в адрес ответчика была направлена претензия, согласно которой, он просил погасить задолженность по договору подряда в размере 195 550 руб. и выплатить неустойку в размере 10 950 руб., однако требования, изложенные в претензии, исполнены не были.

Поскольку судом установлено, что ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по оплате выполненных истцом работ, с ответчика ООО «Бизнес-плюс» в пользу истца ФИО1 подлежат взысканию денежные средства в размере 195 550 руб.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии с п. 5.2 договора подряда, за нарушение сроков окончания выполненных работ, указанных в п.4 настоящего договора, заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Поскольку, как установлено судом, ответчиком не исполнены обязательства по оплате стоимости выполненных работ по договору подряда от 14.10.2024, требования истца о взыскании с ООО «Бизнес-плюс» процентов, в соответствии с п. 5.2 договора подряда, в рамках заявленных истцом требований, за период с 19.11.2024 по 28.08.2025 являются обоснованными и подлежат удовлетворению в размере 37 793,30 руб., исходя из следующего расчета:

за период с 19.11.2024 – 08.06.2025: 195 550 руб. (сумма задолженности) х 21% (ключевая ставка)/300 х 202 дн. (количество дней в периоде) = 27 650,77 руб.

за период с 09.06.2025 – 27.07.2025: 195 550 руб. (сумма задолженности) х 20% (ключевая ставка)/300 х 49 дн.(количество дней в периоде) = 6387,97 руб.

за период с 28.07.2025 – 28.08.2025: 195 550 руб. (сумма задолженности) х 18% (ключевая ставка)/300 х 32 дн. (количество дней в периоде) = 3754,56 руб. А всего 37 793,30 руб.

Иного расчета, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено.

Согласно, разъяснениям п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Учитывая вышеизложенные разъяснения, с ответчика ООО «Бизнес-Плюс» в пользу ФИО1 подлежит взысканию неустойка за каждый день просрочки, начиная, с 29.08.2025 до момента фактического исполнения ответчиком обязательства по выплате задолженности в размере 195 550 руб., исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от суммы 195 550 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Так, истцом при подаче данного искового заявления, уплачена государственная пошлина в размере 7 423 руб., что подтверждается чеком по операции от 02.04.2025.

Таким образом, с ответчика, в пользу истца, подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины, в размере 7423 руб., а оставшаяся часть в размере 577 руб. подлежит взысканию в доход бюджета Новокузнецкого городского округа, исходя из следующего расчета (195 550 руб. (убытки) +37 793,30 руб. (неустойка))-100000 руб.х3%+4000 руб.)-7423 руб.=577 руб.

Иных требований не заявлено.

Допустимых и достоверных доказательств, в силу ст. 56 ГПК РФ, опровергающих вышеизложенные обстоятельства, суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Бизнес-Плюс» о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Бизнес-Плюс» (ИНН №) в пользу ФИО1 (паспорт №) задолженность по договору подряда от 14.10.2024 в размере 195 550 руб., неустойку в размере 37 793,30 руб., госпошлину в размере 7423 рубля.

Взыскать с ООО «Бизнес-Плюс» (ИНН №) в пользу ФИО1 неустойку за каждый день просрочки, начиная, с 29.08.2025 до момента фактического исполнения ответчиком обязательства по выплате задолженности в размере 195 550 руб., исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от суммы 195 550 руб.

Взыскать с ООО «Бизнес-Плюс» (ИНН №) в доход бюджета Новокузнецкого городского округа госпошлину в размере 577 руб.

Решение может быть обжаловано в Кемеровской областной суд в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, через Куйбышевский районный суд г.Новокузнецка.

Мотивированное решение изготовлено 11.09.2025

Председательствующий О.А. Нейцель