Дело № 2-1737/2026 11 марта 2026 года

УИД 78RS0020-01-2025-008217-33 г.Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Петровой Е.С.

При секретаре Рубан М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя,

с участием истца ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя, просит взыскать денежные средства в сумме 722 000 рублей, уплаченные в качестве предварительной оплаты (аванса) по договору №01/2904/2025 от 29.04.2025, неустойку в размере 722 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 440 рублей.

Истец обосновывает требования неисполнением ответчиком обязанности по строительству объекта в соответствии с условиями заключенного договора.

Истец иск поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явилась, извещена о дне, месте и времени судебного разбирательства в соответствии со ст.165.1 п.1 ГК РФ.

Суд, выслушав участника процесса, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) был заключен договор №01/2904/2025 от 29.04.2025 об оказании услуг (выполнении работ) (далее - договор), в соответствии с которым подрядчик взял на себя обязательство построить объект с характеристиками, указанными в спецификации, на участке заказчика, расположенном по адресу: ..., кадастровый № 0, а заказчик - принять и оплатить выполненные работы. Схема планировки, материалы и иные характеристики объекта строительства указаны в Приложении №1 (спецификация) к договору.

Цена договора составила 903 000 рублей, порядок оплаты в соответствии с Приложением №2 к договору определен следующий: 1 этап - 108 000 рублей в момент подписания договора; 2 этап - 163 000 рублей за день до установки фундамента; 3 этап - 451 000 рублей за день до завоза материала на участок заказчика; 4 этап - 135 000 рублей в течение трех дней после возведения каркаса; 5 этап - 46 000 рублей в день подписания акта выполненных работ.

Плановая дата начала работ по договору 11.06.2025, плановая дата окончания работ по договору 17.07.2025.

30.04.2025 истцом был произведен авансовый платеж (1 этап) в размере 108 000 рублей. 10.05.2025 истцом был произведен следующий авансовый платеж (2 этап) в размере 163 000 рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ по договору 15.06.2025 с нарушением сроков. 19.06.2025 истцом был произведен авансовый платеж (3 этап) в размере 451 000 рублей. Подрядчик в нарушение условий договора не выполнил свои обязательства, 18.07.2025 завез часть материалов, 08.08.2025 подрядчик приступил к работам по возведению каркаса.

19.08.2025 подрядчик направил в адрес истца акты освидетельствования скрытых работ.

24.08.2025 истцом был произведен осмотр выполненных работ, в результате которого подрядчику было направлено заявление об отказе от приемки результата работ в связи с несоответствием планировки, прилагаемой к договору.

Подрядчиком работы не возобновлялись, недостатки не устранены, не завезен материал в соответствии с 3-м этапом порядка оплаты по договору.

Истцом оплачен по договору аванс в общей сумме 722 000 рублей.

Доказательства выполнения обязательств по договору №01/2904/2025 от 29.04.2025 ответчиком не представлены, результат работ истцу не передан.

25.09.2025 истцом в адрес ответчика была направлена претензия совместно с уведомлением об отказе от договора.

Учитывая вышеизложенное, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму неотработанного аванса в размере 722 000 рублей.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или) предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Срок окончания работ по договору – 17.07.2025, размер неустойки за период с 18.07.2025 по 25.09.2025 составляет: 722 000 * 69 дней * 3% = 1 494 540 рублей. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 722 000 рублей в соответствии с ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Учитывая степень нравственных страданий истца, степень вины нарушителя, имущественное положение, требования разумности и справедливости, суд считает, что требование истца о возмещении морального вреда подлежит удовлетворению в сумме 20 000 рублей.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Указанный штраф взыскивается независимо от того, заявлено ли такое требование суду. Размер штрафа в пользу истца составляет 732 000 рублей ((722 000 + 20 000 + 722 000) : 2).

Основания для снижения сумм неустойки и штрафа у суда отсутствуют.

В соответствии со ст.98 ч.1 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате госпошлины в размере 4 400 рублей.

В силу ст.103 ГПК РФ с учетом размера удовлетворенных исковых требований суд взыскивает с ответчика госпошлину в доход бюджета Санкт-Петербург в сумме 28 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору №01/2904/2025 от 29.04.2025, в размере 722 000 (Семьсот двадцать две тысячи) рублей, неустойку в размере 722 000 (Семьсот двадцать две тысячи) рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, штраф в размере 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей, а всего 2 200 400 (Два миллиона двести тысяч четыреста) рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 госпошлину в доход бюджета Санкт-Петербург в сумме 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение составлено 13.03.2026