Дело № 2 -1079/2019 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 ноября 2019 года г. Кингисепп

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Улыбиной Н.А. 

при секретаре Лауконен А.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием истца ФИО1, представителя истца – адвоката Саакадзе Г.В., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя ответчика АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» ФИО2, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, 

гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее по тексту – АО «ЭК Ленэнерго») об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, морального вреда, судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 09 сентября 2019 года обратился в суд с иском к АО «ЭК Ленэнерго» об обязании выполнить и передать по акту работы, предусмотренные договором подряда от 22 апреля 2019 года № 109/19, взыскать с ответчика неустойку в размере 73100 рублей за период с 20 июня по 08 сентября 2019 года, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, судебных расходов на оплату услуг представителя 10 000 рублей. 

В обоснование требований указано, что 22 апреля 2019 года между истцом и АО «ЭК Ленэнерго» заключен договор № 109/19 на выполнение работ по внешнему электроснабжению домовладения № в д.

<

адрес>. По указанному договору ответчик обязался выполнить комплекс проектных и строительно-монтажных работ, указанных в сметном расчете, в течение 40 рабочих дней, то есть о ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ составила 73 100 рублей. Истец произвел оплату договора в установленные сроки путем перечисления ответчику денежных средств. Однако, ответчик до настоящего времени свои обязательства по договору не выполнил, допустил просрочку исполнения работ. Ссылаясь на положения закона «О защите прав потребителя» истец просит защиты своего нарушенного права. 

В судебном заседании ФИО1 с участием представителя – адвоката Саакадзе Г.В. исковые требования поддержал. Полагал, что ответчик должен был самостоятельно обратиться в ПАО «Ленэнерго» и получить необходимые для исполнения договора № 109/19 от 22.04.2019 года документы, в том числе, копию договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго», технические условия, уведомление об исполнении сетевой организацией обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, либо направить в адрес истца требование о предоставлении необходимых документов для выполнения работ по договору. 

Представитель ответчика АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» ФИО2, принимавшая участие в судебном заседании посредствам видеоконференц-связи, исковые требования не признала, поддержала доводы письменных возражения (л.д. 33-34), указав, что между ФИО1 и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» был заключен договор от 22.04.2019 № 109/19, согласно которому заказчик поручает, принимает и оплачивает, а исполнитель обязуется выполнить работы по внешнему энергоснабжению объекта «жилой дом», расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. По условиям договора АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в течение 40 рабочих дней обязалось выполнить работы, предусмотренные договором. В свою очередь, истец обязан был предоставить документы, необходимые для выполнения ответчиком работ по договору, в том числе, копию договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго», технические условия, являющиеся неотъемлемой частью к нему. Между тем, указанные документы заказчиком исполнителю представлены не были, что привело к невозможности исполнения условий договора АО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Указала, что без указанных документов у исполнителя отсутствовала возможность определить границу земельного участка заказчика для установки дополнительной промежуточной (одностроечной) опоры с монтажом провода СИП до 25 метров, провести монтаж узла учета электрической энергии в соответствии с Техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заказчика и прочих работ, указанных в Приложении № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения № I от 07.06.2019. Кроме того, исключительно в Технических условиях к Договору технологического присоединения содержится исчерпывающая информация о требованиях к узлу учета, технических характеристиках технологического присоединения, мероприятий, подлежащих выполнению согласно ТУ уведомления Сетевой организации о выполнении Технических условий. АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» не имеет возможности фактически исполнить свои обязательства, в частности, по предоставлению документов, завершающих процедуру технологического присоединения. Пояснила, что выполнение работ будет возможно после выполнения заказчиком обязанностей, установленных договором, с учетом его продления на период допущенной истцом просрочки. При этом, на претензию истца ответчиком был направлен ответ с разъяснениями причин переноса сроков окончания работ в связи с не предоставлением истцом необходимых документов. Ссылаясь на недобросовестность заказчика по исполнению своих обязательств, просила отказать ФИО1 в удовлетворении иска. Указала, что в настоящее время АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» желает расторгнуть с истцом договор № 109/19 от 22.04.2019 года и возвратить ФИО1 уплаченные по нему денежные средства, поскольку в наступающий зимний период проведение работ по установке электрической опоры представляется затруднительным. 

Представитель третьего лица - Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Выслушав участников судебного разбирательства, изучив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования неподлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, который носит публичный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее Правил).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 22 апреля 2019 года между ФИО1 (заказчик) и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (исполнитель) был заключен договор № 109/19 (далее - договор), согласно которому, заказчик поручает, принимает и оплачивает, а исполнитель обязуется выполнить работы по внешнему энергоснабжению объекта «жилой дом», расположенного на земельном участке по адресу; 

<

адрес>, кадастровый №. полный перечень работ, а также условия и стоимость выполнения работ содержатся в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора (л.д. 8-13). 

В соответствии с п. 2.1 договора исполнитель обязан не позднее 40 (сорок) рабочих дней с даты заключения договора выполнить предусмотренные договором работы, указанные в Приложении № 1, в соответствии с действующими нормативными требованиями.

В случае неготовности на дату окончания работ объектов электросетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго», необходимого для осуществления технологического присоединения объекта, срок окончания работ переносится. Исполнитель обязуется выполнить работы по договору не позднее 40 (сорок) рабочих дней с даты выполнения сетевой организацией мероприятий, обеспечивающих возможность технологического присоединения объекта. 

Исполнитель обязан передать заказчику результат выполнения работ согласно Приложению № 1 (п.2.1.2. договора). 

Согласно п. 2.3.1., 2.3.2. договора, заказчик обязан оказывать содействие сотрудникам исполнителя при исполнении ими обязательств по договору; предоставить исполнителю технические и юридические документы, а также информацию, необходимые для выполнения обязательств по договору, в том числе, согласно Приложению № 2, в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Стоимость работа по договору устанавливается в соответствии со сметным расчетом и составляет 52 500 рублей. 

Заказчик перечисляет исполнителю первый платеж в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления исполнителем счета в размере 26250 рублей, второй платеж – в течение 40 (сорок) рабочих дней с момента выставления исполнителем счета в размере 26 250 рублей. 

В силу положений п. 4.1. договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

В соответствии с п. 4.2 договора в случае задержки заказчиком исполнения условий, предусмотренных п.2.3.2., 2.3.3., 3.2. договора, исполнитель имеет право перенести окончание работ на соответствующий срок либо, письменно предупредив заказчика за один рабочий день, в одностороннем порядке расторгнуть договор, удержав денежные средств за фактически выполненные работы. 

В соответствии с п. 5.1. договора исполнитель в течение одного рабочего дня после выполнения работ направляет заказчику подписанный со своей стороны акт приема-сдачи выполненных работ в двух экземплярах. 

В соответствии с Приложением № 1 к договору от 22.04.2019 № 109/19 АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» обязалась выполнить следующие работы: проектное обследование электроустановки заявителя техническим специалистом; монтаж узла учета электрической энергии в соответствии с ТУ ПАО «Ленэнерго»; подготовка исполнительной документации смонтированной электроустановки (л.д. 12). 

В Приложении № 2 к договору от 22.04.2019 № 109/19 представлен перечень документов, необходимых для исполнения обязательств по договору, согласно которому заказчику было необходимо предоставить следующие документы: копия правоустанавливающего документа - свидетельства о собственности или договора аренды на объект; копия договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго» и технические условия, являющиеся неотъемлемой частью к нему; копия уведомления об исполнении сетевой организацией обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с балансодержателем; план-схема мест установки опор, согласованная с заинтересованными лицами (при необходимости); копия паспорта страницы с информацией о дате и месте рождения, месте регистрации, номером паспорта, дате и месте выдачи паспорта; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия согласия на опосредованное подключение от балансодержателя; доверенность на имя представителя (л.д. 13). 

07 июня 2019 года между ФИО1 (заказчик) и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (исполнитель) было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 109/19 от 22.04.2019 года, которым изменен порядок расчетов по договору в связи с увеличением объема работ исполнителя (л.д. 16) 

В соответствии с Приложением № 1 дополнительному соглашению № 1 от 07.06.2019 года к договору № 109/19 от 22.04.2019 года АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» обязалась выполнить установку одной дополнительной промежуточной (одностоечной) опоры (в границах земельного участка заказчика) с монтажом провода СИП до 25 метров стоимостью работ 20600 рублей (л.д. 17). 

Истцом обязательства по оплате договора были выполнены в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет ответчика, что подтверждается платежными документами от 22.04.2019 на сумму 26250 руб., от 16.05.2019 на сумму 26250 руб., от 07.06.2019 на сумму 20600 руб. (л.д.18-20) и не оспаривается ответчиком. 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992года №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. В договоре о выполнении работ может предусматривается срок выполнения работы, если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы может определяться датой, к которой должно быть закончено выполнение работы или датой, к которой исполнитель должен приступить к выполнению работ. 

В соответствии со ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992года №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (п. 5).

Истцом 12 августа 2019 года в адрес ответчика была направлена претензия, в которой ФИО1 предлагал АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в срок до 27 августа 2019 года завершить производство предусмотренных договором № 109/19 от 22.04.2019 года и дополнительным соглашением к нему № 1 от 07.06.2019 года работ, с выплатой неустойки за нарушение сроков выполнения работ, которая была получена ответчиком 20 августа 2019 года (л.д. 21,22). 

На указанную претензию ответчиком был дан ответ от 10.09.2019 года об отсутствии со стороны исполнителя просрочки исполнения обязательств, поскольку истцом в нарушение п.2.3.2. условий договора № 109/19 от 22.04.2019 года не были представлены документы, предусмотренные Приложением № 2, необходимые для исполнения ответчиком обязательств по договору. 

До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не выполнены. 

Согласно пункту 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

На основании вышеизложенных норм, подрядчик имел право не приступать к работе или приостановить ее в отсутствие предоставления заказчиком необходимых для выполнения исполнителем обязательств по договору документов. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 ГК РФ).

05 сентября 2019 года АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в адрес истца было направлено соглашение о расторжении договора № 109/19 от 22.04.2019 года с возращением исполнителем заказчику уплаченных денежных средств в размере 73100 рублей. Указанное соглашение № 19-592 истцом подписано не было. 

Из пояснений ответчика в судебном заседании следует, что нарушение срока выполнения работ возникло ввиду отсутствия со стороны заказчика встречного предоставления исполнителю предусмотренных Приложением № 2 к договору № 109/19 от 22.04.2019 года документов, необходимых для выполнения обязательств по договору. При этом, подрядчик ссылался на то, что действуя разумно и добросовестно, исполнял принятые обязательства в объеме, соответствующем встречному предоставлению заказчика.

Доказательств надлежащего исполнения истцом положений п.п. 2.3.1., 2.3.2. договора № 109/19 от 22.04.2019 года в материалы дела не представлено. 

В тоже время суд признает необходимым согласиться с доводами ответчика о невозможности без данных документов исполнителю определить границу земельного участка заказчика для установки дополнительной промежуточной (одностроечной) опоры с монтажом провода СИП до 25 метров, провести монтаж узла учета электрической энергии в соответствии с Техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заказчика и прочих работ, указанных в Приложении № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № I от 07.06.2019. Кроме того, исключительно в Технических условиях к Договору технологического присоединения содержится исчерпывающая информация о требованиях к узлу учета, технических характеристиках технологического присоединения, мероприятий, подлежащих выполнению согласно Технических условий. Без уведомления Сетевой организации о выполнении Технических условий АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» не имеет возможности фактически исполнить свои обязательства.

При этом, доводы ФИО1 о том, что ответчик должен был самостоятельно обратиться в ПАО «Ленэнерго» и получить необходимые для исполнения договора № 109/19 от 22.04.2019 года документы, в том числе, копию договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго», технические условия, уведомление об исполнении сетевой организацией обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, либо направить в адрес истца требование о предоставлении необходимых документов для выполнения работ по договору, суд признает несостоятельными, поскольку по условиям договора № 109/19 от 22.04.2019 года, изложенные в Приложении № 2 к договору № 109/19 от 22.04.2019 года документы, необходимые для выполнения АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» обязательств по договору подлежали предоставлению ответчику именно истцом. 

Согласно п. 1. 2, ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

При таких обстоятельствах, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что ответчик вправе был в силу положений п. 2 ст. 719 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по предоставлению документов, необходимых для выполнения исполнителем обязательств по договору, поэтому не находит оснований для удовлетворения заявленных истцом требований. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56,59,60,194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В иске ФИО1 к Акционерному обществу «Энергосервисная компания Ленэнерго» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, морального вреда, судебных расходов, - отказать. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы через Кингисеппский городской суд.

Судья: Улыбина Н.А.