Дело № 2-219/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 июля 2024 года с. Советское

Советский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Левыкина Д.В.,

при секретаре Аксютиной Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Советского района Алтайского края в интересах ******1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение,

Установил:

Истец прокурор Советского района Алтайского края в интересах ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение. В обоснование иска указано, что прокуратурой Советского района Алтайского края проведена проверка по обращению ******1 по вопросу нарушения его прав при технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что 22.09.2023 года между ******1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №.2200.4403.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок реализации мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Однако, до настоящего времени договор не исполнен, установленное в жилом помещении энергопринимающие устройства к сети электроснабжения не подключены. Таким образом, в нарушение условий договора ПАО «Россети Сибирь» мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> не выполнило. 

На основании изложенного истец просит: обязать филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» осуществить подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети в соответствии с договором №20.2200.4403.23 от 22 сентября 2023 года в течении одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда. 

Материальный истец ******3 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Представил письменный отзыв, в котором ссылается, что дополнительным соглашением №1 от 15.04.2024 года к договору №20.2200.4403.23 от 22.09.2023 года срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению продлен до 05.03.2025 года. Представитель ответчика просит отказать в удовлетворении исковых требований, а в случае удовлетворения требований установить срок для исполнения решения суда в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда. 

Заместитель прокурора Советского района Алтайского края в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. Пояснил, что согласно представленного дополнительного соглашения к договору №20.2200.4403.23 от 22.09.2023 года срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению продлен до 05.03.2025 года, в связи с чем осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома необходимо в срок до 05.03.2025 года.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело без участия представителя ответчика.

Выслушав заместителя прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Из абзаца 1 статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Правоотношения, возникшие между сторонами, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года№442, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861, установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Подпунктом «г» пункта 25(1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В силу п. 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 14 Правил №861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 14 Правил №861 заявка направляется заявителем – физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику,

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил № 861).

Как следует из материалов дела, 22.09.2023 года между ******1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №20.2200.4403.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Разделом 2 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению.

Основанием для обращения истца в суд послужило неисполнение обязательств по указанному договору ответчиком.

15.04.2024 года между ПАО «Россети Сибирь» и ******1 заключено дополнительное соглашение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2200.4403.23 от 22.09.2023 года. 

Согласно п.1 дополнительного соглашения №1 от 15.04.2024 года срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в договоре и технических условиях, являющихся приложением к договору при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 05.03.2025 года.

Статьей 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако в установленный договором срок работы по технологическому присоединению ответчик не выполнил.

Таким образом, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в судебном заседании с достоверностью установлено, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако принятые на себя обязательства по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ не представлено.

Сетевая организация при отсутствии обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательства, заключая договор с физическим лицом, обязана в установленный договором срок надлежащим образом исполнить обязательства, предусмотренные договором, в том числе мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя. 

Таким образом, отказ от исполнения действующих договоров является незаконным, нарушающим права истца.

Согласно ст. 206 ГПК РФ суд может принять решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия и в установленный срок.

Как следует, из дополнительного соглашения №1 от 15.04.2024 года срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению продлен до 05.03.2025 года. 

Суд приходит к выводу, что с учетом срока нарушения ответчиком условий договора №20.2200.4403.23 от 22.09.2023 года срока до 05.03.2025 года для исполнения возлагаемых обязанностей для ответчика будет являться объективно достаточным. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Решил:

Исковые требования прокурора Советского района Алтайского края в интересах ******1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, удовлетворить.

Обязать филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» осуществить подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети в соответствии с договором №20.2200.4403.23 от 22 сентября 2023 года сроком до 05 марта 2025 года. 

Мотивированное решение будет изготовлено 30 июля 2024 года. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Советский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья Д.В. Левыкин