ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Жуковский Московская область

20 июня 2018 года

Жуковский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Ковалёва Е.А.

при секретаре Марченко А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец просит взыскать с ответчика: неустойку за просрочку передачи объекта долевого строительства в размере 

<

данные изъяты>.; компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>., штраф в пользу потребителя.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал и пояснил, что 15.06.2017 г. между истцом и ООО «СТРОЙКОМ-БЕТОН» заключен договор уступки права требования и обязательств по договору №К.15-389 участия в долевом строительстве от 15.09.2016 года, заключенного между ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» и ООО «СТРОЙКОМ-БЕТОН».

В соответствии с данными договорами застройщик ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» обязался построить многоквартирный дом и передать дольщику объект долевого строительства (двухкомнатную квартиру, указанную в п.1) в срок - четвертый квартал 2016г. Истец свои обязательства по договору уступки прав требования выполнил, оплатив ООО «СТРОЙКОМ-БЕТОН» стоимость квартиры в размере 

<

данные изъяты>. Дом введен в эксплуатацию 31.12.2017 года, квартира истцу передана по передаточному акту 17 марта 2018 года. Претензия потребителя удовлетворена не была. Действиями ответчика нарушены права истца как потребителя.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о слушании дела извещался надлежащим образом по адресу, указанному в материалах дела.. 

Принимая во внимание, что ответчиком является юридическое лицо, которое не лишено возможности направить в суд для разрешения настоящего спора другого представителя, а также учитывая надлежащее извещение ответчика, согласие истца на рассмотрение дела в отсутствие ответчика с вынесением заочного решения, суд находит возможным в соответствии со ст.233 ГПК РФ рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы настоящего дела и гражданского дела 2-412/18, и дав оценку всем представленным доказательствам, считает иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению.

В соответствии со ст.6 п.1 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

На основании ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ст.10 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные данным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В силу ст.6 п.2 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Действующее гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения обязательства и меры имущественной ответственности за неисполнение обязательства, в связи с чем, размер неустойки должен носить компенсационный характер и не должен нарушать прав других лиц, в частности, влечь обогащение истца за счет ответчика.

Судом установлено, что 15.06.2017 г. между истцом и ООО «СТРОЙКОМ-БЕТОН» заключен договор уступки права требования и обязательств по договору №К.15-389 участия в долевом строительстве от 15.09.2016 года, заключенного между ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» и ООО «СТРОЙКОМ-БЕТОН».

В соответствии с условиями указанных договоров застройщик ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» обязался построить многоквартирный дом по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, 

<

адрес>, участок 15 и передать дольщику объект долевого строительства (двухкомнатную квартиру, указанную в п.2.2 Договора № К.15-389 от 15.09.2016 г. и п. 1 договора уступки права требования от 15.06.2017 г.) в срок до 01.01.2017 г. Истец свои обязательства по договору уступки прав требования выполнил, оплатив ООО «СТРОЙКОМ БЕТОН» стоимость квартиры в размере 

<

данные изъяты>. В нарушение установленного договорами срока квартира истцу передана по передаточному акту 17 марта 2018 года. Действиями ответчика нарушены права истца как потребителя.

Принимая во внимание, что между сторонами заключен договор долевого участия в строительстве, истец исполнил свои обязательства по оплате квартиры, тогда как ответчик в установленный договором срок квартиру не передал, суд приходит к выводу, что у истца возникло право на взыскание с ответчика неустойки за нарушение срока передачи объекта.

Сторона истца просит взыскать неустойку за период с 20.06.2017 г. по 01.03.2018 г. в размере 

<

данные изъяты>. Расчет и размер неустойки не противоречат действующему законодательству, ответчик возражений по размеру неустойки суду не представил, в связи с чем, суд полагает возможным удовлетворить заявленные исковые требования в этой части в полном объеме. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Принимая во внимание, что судом установлено нарушение ответчиком прав потребителя, выразившееся в нарушении сроков передачи товара, что причинило истцу нравственные страдания, суд находит возможным с учетом степени вины ответчика, степени нравственных страданий истца, принципа разумности взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>

Истец обращался к ответчику с претензией о выплате неустойки и компенсации морального вреда вследствие нарушения сроков передачи объекта долевого строительства. Требования истца ответчиком остались без удовлетворения.

Часть 6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает взыскание штрафа в размере 50% от взысканных судом сумм иска в случае несоблюдения в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Размер штрафа составляет 

<

данные изъяты>) х 50%). 

На основании ч.1 ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 п.1 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в соответствии с удовлетворенными требованиями. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3, 56, 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Взыскать с ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» в пользу ФИО1 неустойку за период с 20.06.2017 года по 01.03.2018 года в размере 

<

данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> штраф в пользу потребителя в размере 

<

данные изъяты>.

В остальной части требований – отказать.

Взыскать с ООО Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования г.о.Жуковский Московской области в размере 

<

данные изъяты>

Ответчик вправе подать в Жуковский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда в Московский областной суд через Жуковский городской суд.

Судья: