Дело № 2-4123/17

31 августа 2017 года Санкт-Петербург

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

(извлечение для размещения на Интернет-сайте суда)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Петровой М.Е., 

при секретаре Сорокиной Е.К., 

с участием истцов – ФИО1, ФИО2, 

представителя ответчика – ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к ООО Строительная компания «Дальпитерстрой» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, 

у с т а н о в и л:

Истцы обратились с иском к ответчику о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, указав, что 17.03.2014 года между ООО СК «Дальпитерстрой» и ООО «Х» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно условиям которого застройщик обязуется своими силами построить (создать) жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Х и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру Х, а участник долевого строительства обязуется уплатить застройщику обусловленную договором цену и принять квартиру по акту приема-передачи. 21.01.2016 года между ООО «Х» и ФИО2, ФИО1 было заключено соглашение об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве на основании которого к истцам перешли права и обязанности участника долевого строительства в рамках договора от 17.03.2014 года, в отношении вышеуказанной квартиры со строительным Х. Согласно акту зачета взаимных требований от 21.04.2014 года обязательства участника долевого строительства по договору от 17.03.2014 года были исполнены в полном объеме. Согласно п. 3.1 соглашения от 21.01.2016 года истец обязался оплатить цеденту произведенную уступку права требования в суме 4217500 рублей. Согласно п. 2.1 договора участия в долевом строительстве жилого дома от 17.03.2014 года застройщик обязался передать квартиру участнику долевого строительства по акту приема-передачи в 1 квартале 2015 года после ввода объекта в эксплуатацию. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартира истцу не передана. 01.02.2017 года ответчику была направлена претензия с предложением оплатить предусмотренную законом неустойку. На претензию ответчик не ответил. 05.04.2017 года повторная претензия была вручена ответчику под роспись. Размер неустойки за период с 21.01.2016 года по 10.04.2017 года составляет 1222653,25 рублей. Просил взыскать в пользу истцов неустойку в сумме 1222653,25 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 750000 рублей, штраф в сумме 611326,63 рублей. 

Истцы в судебное заседание явились, исковые требования поддержали по основаниям, изложенным в иске. Просили сумму неустойки взыскать в их пользу в солидарном порядке. 

Представитель ответчика в судебное заседание явился, исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве, в котором указал, что заявленная истцом сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Кроме того, на дату рассмотрения дела дом введен в эксплуатацию. Просил уменьшить размер неустойки, моральный вред, убытки, штраф на основании ст. 333 ГК РФ. 

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав представленные доказательства и материалы дела в целом, суд приходит к следующему.

Согласно нормам ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Как следует из материалов дела, 17.03.2014 года между ООО СК «Дальпитерстрой» и ООО «Х» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно условиям которого застройщик обязуется своими силами построить (создать) жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Х и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру Х, а участник долевого строительства обязуется уплатить застройщику обусловленную договором цену и принять квартиру по акту приема-передачи. (л.д. 17-26).

21.01.2016 года между ООО «Х» и ФИО2, ФИО1 было заключено соглашение об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве на основании которого к истцам перешли права и обязанности участника долевого строительства в рамках договора от 17.03.2014 года, в отношении вышеуказанной квартиры со строительным Х. 

Согласно акту зачета взаимных требований от 21.04.2014 года обязательства участника долевого строительства по договору от 17.03.2014 года были исполнены в полном объеме. (л.д. 26).

Согласно п. 3.1 соглашения от 21.01.2016 года истец обязался оплатить цеденту произведенную уступку права требования в суме 4217500 рублей.

Согласно п. 2.1 договора участия в долевом строительстве жилого дома от 17.03.2014 года застройщик обязался передать квартиру участнику долевого строительства по акту приема-передачи в 1 квартале 2015 года после ввода объекта в эксплуатацию.

Квартира по акту приема-передачи до настоящего времени истцам не передана, указанные обстоятельства сторонами не оспариваются. 

28.01.2017 года в адрес ответчика истцом была направлена претензия о выплате неустойки (л.д. 13-14). Претензия истца ответчиком оставлена без удовлетворения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6 ФЗ-214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее ФЗ-214) в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ-214 обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В силу положений ст. 10 указанного закона, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Согласно представленному расчету размер неустойки за период с 21.01.2016 года по 10.04.2017 года составляет сумму 1222653,25 рублей (л.д. 11). Указанный расчет судом проверен, является верным. 

В силу ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения N 263-О от 21 декабря 2000 года, положения пункта 1 статьи 333 ГК Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Суд принимает во внимание разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Так согласно п. 69 указанного постановления подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ) (п. 71).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (п. 73).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки (п. 75).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", ст. 333 ГК РФ суд, учитывая период длительности просрочки исполнения обязательства, то обстоятельство, что на дату вынесения решения дом введен в эксплуатацию, а также тот факт, что на момент приобретения квартиры истцам (по договору цессии) уже было известно о наличии просрочки исполнения обязательства по передаче квартиры со стороны застройщика, приходит к выводу о необходимости снижения размера неустойки до суммы 611326,63 рублей (что составляет 1/2 доли от заявленного истцами размера неустойки).

Согласно ст. 15 Закона РФ «О Защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Факт нарушения прав потребителя установлен судом в ходе рассмотрения дела. Установление факта нарушения прав потребителя является достаточным основанием для удовлетворения требований потребителя о взыскании денежной компенсации морального вреда. С учетом принципов разумности и справедливости суд взыскивает с ответчика в пользу истцов денежную компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, по 10000 рублей в пользу каждого. 

В силу ст. 13 п. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Размер штрафа составляет сумму 315663,32 рублей (611326,63+20000)Х50%). 

На основании ст. 333 ГК РФ, принимая во внимание явное несоответствие взыскиваемого размера штрафа последствиям нарушенного обязательства, учитывая, что применение штрафных санкций не должно служить средством обогащения потребителя, суд полагает возможным снизить размер штрафа до суммы 200000 рублей, взыскав по 100000 рублей в пользу каждого истца. 

Руководствуясь ст. 194- 199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л :

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» солидарно в пользу ФИО1, ФИО2 неустойку за период с 21.01.2016 года по 10.04.2017 года в сумме 611326 рублей 63 копейки.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей, штраф в сумме 100 000 рублей.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей, штраф в сумме 100 000 рублей

В остальной части иска – ОТКАЗАТЬ.

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд Санкт-Петербурга. 

Судья: