КОПИЯ

УИД 60RS0020-01-2025-001502-64 Дело № 2-1120/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 ноября 2025 года город Псков

Псковский районный суд Псковской области в составе 

председательствующего судьи Тарасова П.А.,

при секретаре Барановой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» в лице Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании выполнить условия договора на технологическое присоединение, взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к публичному акционерному обществу (далее - ПАО) «Россети Северо-Запад» в лице Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка с КН №:22, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СП «Завеличенская волость», д. ФИО2, СНТ ФИО2, уч. 22, по договору ПСК-№-С/23 от 03.02.2024, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 06.08.2024 по 10.07.2025 в размере 37 083 руб.

В обоснование иска указано, что ФИО1 является собственником вышеуказанного земельного участка. Между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения для присоединения к электрическим сетям земельного участка № ПСК-№. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора. 03.02.2024 истцом произведена оплата услуг по технологическому присоединению, в связи с чем, мероприятия по технологическому присоединению должны были быть исполнены ответчиком не позднее 03.08.2024.

Ввиду того, что до настоящего времени ответчиком обязательства по договору не исполнены, истец обратилась в суд с настоящим иском.

Истец ФИО1 и ее представитель ФИО3 в судебном заседании поддержали заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россети Северо-Запад» ФИО4 в судебном заседании возражала против удовлетворения требований в заявленном размере, поскольку истцом неустойка посчитана арифметически неверно, представила письменный отзыв, исходя из которого не оспаривала факт отсутствия технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка истца, вместе с тем указала, что исполнение обязательств по договору осложнено значительным увеличением заявок на технологическое присоединение и объемом работ по заключенным договорам, а также периодически возникают задержки поставки материалов и недостаточность финансирования, поэтому просила увеличить срок подключения до 30.06.2026.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п.3 ст.401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (здесь и далее - в редакции на момент заключения спорного договора, далее - Правила присоединения).

В соответствии с п. 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил присоединения).

Судом установлено, что истец является собственником земельного участка с КН №:22, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (л.д. 26-27).

ФИО1 обратилась с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям вышеуказанного земельного участка. ПАО «Россети Северо-Запад» направилоФИО1 договор №ПСК-№ об осуществлении технологического присоединения и технические условия для присоединения к электрическим сетям земельного участка (л.д.10-15).

Согласно п.7.1 Типовых условий договора договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора (пункт 1.5 договора).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке и в сроки, указанные в п.3.2 Типовых условий договора. Размер оплаты за технологическое подключение составляет 42 380,59 руб.

Оплата истцом услуг по технологическому присоединению выполнена согласно выставленному счету: 03.02.2024 в размере 6 357,09 руб., 23.02.2024 в размере 12 714,18 руб., 24.03.2024 в размере 14 833,20 руб., что подтверждается чеками по операциям, и стороной ответчика не оспаривалось (л.д.16).

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению должны были быть исполнены ответчиком не позднее 03.08.2024.

Принимая во внимание тот факт, что ответчик обязанность по осуществлению технологического присоединения в установленный договором срок не исполнил, до настоящего времени присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произвел, суд приходит к выводу о том, что исковые требования о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств спорного земельного участка подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая сущность и длительность допущенного ответчиком нарушения прав истца, руководствуясь ст. 206 ГПК РФ, суд полагает возможным установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено ответчиком - в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, полагая этот срок разумным и достаточным. Доводы стороны ответчика об увеличении срока технологического подключения суд полагает несостоятельными с учетом времени просрочки исполнения обязательств.

Разрешая требования о взыскании неустойки за период с 06.08.2024 по 10.07.2025 в размере 37 083 руб., суд приходит к следующему. 

Согласно п.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п.1 ст.333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В п.73 постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ).

Из п.75 указанного Постановления Пленума ВС РФ следует, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Из приведенных правовых норм и разъяснений Пленума ВС РФ следует, что уменьшение неустойки производится судом исходя из оценки ее соразмерности последствиям нарушения обязательства, однако такое снижение не может быть произвольным и не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, а также без указания судом мотивов, по которым он пришел к выводу об указанной несоразмерности.

При этом снижение неустойки не должно влечь выгоду для недобросовестной стороны, особенно в отношениях коммерческих организаций с потребителями.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил присоединения и пунктом 5.4 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Рассчитанный стороной истца размер неустойки за период с 06.08.2024 по 10.07.2025 составляет 37 083 руб.

Указанный расчет является арифметически не верным, поскольку согласно расчету неустойки, изложенной в исковом заявлении, истцом взят в расчет 351 день просрочки, однако фактически просрочка за период с 06.08.2024 по 10.07.2025 составляет 339 дней и составляет 35 917,55 руб.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер допущенного нарушения, срок нарушения ответчиком прав истца - потребителя, а также учитывая отсутствие доказательств явной несоразмерности, начисленной неустойки последствиям нарушения ответчиком обязательства, суд не находит оснований для уменьшения неустойки в порядке ст.333 ГК РФ.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 35 917,55руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 17 958,78 руб. (35 917,55/2=17 958,78).

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

Поскольку истец на основании подп. 4 п. 2 ст. 333. 36 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, на основании подп.1 и 3 п.1 ст. 333.19 НК РФ, подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 000 руб., из которых 4 000 руб. - за требования имущественного характера и 3 000 руб. - за требования неимущественного характера (об обязании выполнить условия договора). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 

<

***> в лице Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить условия договора №ПСК-№ от 03.02.2024 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка с КН №:22, расположенного по адресу: 

<

адрес>, №

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 

<

***> в лице Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № неустойку за период с 06.08.2024 по 10.07.2025 в размере 35 917,55 руб., штраф в размере 17 958,78 руб., а всего 53 876,33 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 

<

***> в лице Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в доход бюджета муниципального образования «Город Псков» госпошлину в размере 7 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Псковский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через Псковский районный суд Псковской области.

Судья /подпись/ П.А. Тарасов

Мотивированное решение изготовлено 30 декабря 2025 года.

Решение не вступило в законную силу.

Копия верна:

Судья П.А. Тарасов