Дело НОМЕР

УИД 52RS0НОМЕР-59

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 декабря 2024 года г. Н.Новгород

Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Котевой М.Г., при секретаре Назаровой К.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 взыскании задолженности по договору, неустойки, судебных расходов,

у с т а н о в и л :

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО3 взыскании задолженности по договору, неустойки, судебных расходов, в обоснование требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО3 был заключен договор на разработку дизайн-проекта.

Согласно п. 1.1. Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать Дизайн-проект 1-комнатной квартиры (квартиры/помещения или иное) общей площадью 41,0 (сорок один) кв. м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кв. б/н на 21 этаже.

Согласно п. 5.1. Договора при завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику документацию, представляющую собой промежуточный результат работ или результат работ в целом. Такая документация отправляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, указанной в реквизитах Договора, либо выгружается Исполнителем в облачное хранилище, на которое Заказчику предоставляется соответствующая ссылка. Вместе с документацией Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах.

Согласно п. 5.2. Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя результата работ по соответствующему этапу обязан рассмотреть и принять их, подписав при этом два экземпляра акта сдачи-приемки и один из них передать Исполнителю.

Согласно п. 5.3. Договора датой получения Заказчиком результатов работ считается дата отправки сообщения, содержащего результат (или промежуточный) результат работ, либо дата отправки сообщения, содержащего ссылку на облачное хранилище, в которое Исполнитель выгрузил результат (или промежуточный результат) работ.

Согласно п. 5.4. Договора в случае не передачи Исполнителю подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки в указанный срок, если Стороны не согласовали продление сроков приемки работ с соразмерным продлением общего срока выполнения работ по Договору, работы по соответствующему этапу считаются безоговорочно принятыми Заказчиком по истечении установленного срока на приемку и подлежат незамедлительной оплате.

Согласно фотографии экрана телефона из системы мгновенного обмена сообщениями ДД.ММ.ГГГГ Истцом Ответчику был направлен дизайн-проект, выполненный Истцом в соответствии с условиями Договора.

Согласно кассовому чеку НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ (номер почтового идентификатора 60314596005755) Истец направил в адрес Ответчика акты о приемке выполненных работ.

Стоимость отправки актов о приемке выполненных работ составила 274 рубля 04 копейки.

Согласно мотивированному отказу от подписания актов выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ Ответчик отказался от подписания актов выполненных работ в связи с неисполнением Истцом своих обязательств по Договору, выразившихся в превышении максимально запланированной суммы и не включении в нее черновых работ.

Отказ Ответчика от подписания актов выполненных работ не может быть признан Истцом мотивированным, поскольку заключенный сторонами Договор не содержит условий о включении в него стоимости черновых работ, кроме того, дизайн-проект не предполагает наличие такой информации, поскольку отражает концепцию художественного оформления интерьера, не являясь сметой на строительство.

Указанные обстоятельства также подтверждаются условиями заключенного сторонами Договора:

Согласно п. 1.3. Договора результатом работ по настоящему Договору является Дизайн-проект интерьера Объекта, представляющий собой файлы в формате. pdf, подготовленные с помощью программы Archicad.

Согласно разделу «Основные термины и понятия» дизайн-проект - комплект документации, отражающий концепцию художественного оформления интерьера и содержащий информацию о концептуальных, колористических, видовых особенностях интерьеров объекта, рекомендуемых элементах мебели, чистовых материалах отделки, элементах декора, элементах освещения и иных элементах объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, включающий в себя Планировочные решения (при необходимости), Эскизный проект (3D визуализации) и Рабочие чертежи, состав которых определяется настоящим Договором, Приложением НОМЕР «Техническое задание» и Приложением НОМЕР «Состав дизайн-проекта».

Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

На основании вышеизложенного, Истец полагает, что Ответчик необоснованно уклоняется от оплаты выполненных Истцом работ.

ДД.ММ.ГГГГ Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия.

Согласно кассовому чеку НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ (номер почтового идентификатора стоимость отправки претензии составила 75 рублей 50 копеек.

Ответа на данную претензию от Ответчика в адрес Истца не поступало, попыток мирного урегулирования спора Ответчиком не предпринято.

Общая сумма почтовых расходов Истца составила 349 рублей 54 копейки из расчета:

274 рубля 04 копейки + 75 рублей 50 копеек = 349 рублей 54 копейки.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно п. 4.5. Договора Заказчик обязуется:

своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.

Согласно п. 2.1. Договора общая стоимость работ по Договору составляет 90 200 (девяносто тысяч двести) рублей. Цена настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно приложению НОМЕР к Договору Ответчиком была оплачена денежная сумма в размере 30 000 рублей.

Сумма, подлежащая оплате Истцу, составляет: 60 200 рублей, из расчета: 

90 200 рублей - 30 000 рублей = 60 200 рублей.

Согласно п. 7.3. Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

60 200 рублей х 0,5% х 80 дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) = 24 080 рублей.

Согласно п. 2.2. Договора цена настоящего договора, указанная в пункте 2.1., включает в себя любые расходы, которые Исполнитель может понести в целях надлежащего выполнения работ, кроме расходов, которые в соответствии с настоящим договором прямо отнесены к дополнительным расходам Заказчика.

К дополнительным расходам Заказчика относятся:

расходы на распечатывание материалов в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора.

Согласно товарному чеку и кассовому чеку НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ Истец оплатил 1 740 рублей за изготовление дизайн-проекта на бумажном носителе.

На основании изложенного истец просит суд: взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 задолженность по оплате выполненных работ в размере 60 200 рублей; неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере - 24 080 рублей и далее по день фактической оплаты задолженности; расходы на изготовление дизайн-проекта на бумажном носителе в размере - 1 740 рублей; почтовые расходы в размере - 349 рублей 54 копейки; расходы по уплате государственной пошлины в размере - 2 728 рублей.

Истец, представитель истца в судебном заседании исковое заявление поддержали, просили удовлетворить, не возражали против вынесения заочного решения.

Остальные лица, участвующие в дела, в судебное заседание не явились, извещались судом о дате, времени, месте слушания дела надлежащим образом.

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд за судебной защитой, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела, направлять судебные извещения согласно ст. 113, 114 ГПК РФ.

По смыслу ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими права является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Учитывая задачи гражданского судопроизводства, принцип правовой определенности, распространение общего правила, закрепленного в ч. 3 ст. 167 ГПК РФ об отложении судебного заседания в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле при отсутствии сведений о причинах их неявки не соответствовало бы конституционным целям гражданского судопроизводства, что в свою очередь не позволит рассматривать судебную процедуру в качестве эффективного средства правовой защиты в том смысле, который заложен в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.ст. 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Таким образом, неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения дела по существу.

Следовательно, суд считает возможным разрешить правовой конфликт в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Выслушав пояснения истца, представителя истца, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, суд пришел к следующему.

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется эти услуги оплатить.

Согласно ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Как установлено п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО3 был заключен договор на разработку дизайн-проекта.

Согласно п. 1.1. Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать Дизайн-проект 1-комнатной квартиры (квартиры/помещения или иное) общей площадью 41,0 (сорок один) кв. м, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кв. б/н на 21 этаже.

Согласно п. 2.1. Договора общая стоимость работ по Договору составляет 90 200 (девяносто тысяч двести) рублей. Цена настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.

Пунктом 3.1 установлено, что срок начала работ, сроки выполнения этапов и срок окончательной сдачи работ Заказчику по договору устанавливается графиком выполнения работ – приложение НОМЕР.

Согласно п. 4.5. Договора Заказчик обязуется:

своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.

Согласно п. 5.1. Договора при завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику документацию, представляющую собой промежуточный результат работ или результат работ в целом. Такая документация отправляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, указанной в реквизитах Договора, либо выгружается Исполнителем в облачное хранилище, на которое Заказчику предоставляется соответствующая ссылка. Вместе с документацией Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах.

Согласно п. 5.2. Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя результата работ по соответствующему этапу обязан рассмотреть и принять их, подписав при этом два экземпляра акта сдачи-приемки и один из них передать Исполнителю.

Согласно п. 5.3. Договора датой получения Заказчиком результатов работ считается дата отправки сообщения, содержащего результат (или промежуточный) результат работ, либо дата отправки сообщения, содержащего ссылку на облачное хранилище, в которое Исполнитель выгрузил результат (или промежуточный результат) работ.

Согласно п. 5.4. Договора в случае не передачи Исполнителю подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки в указанный срок, если Стороны не согласовали продление сроков приемки работ с соразмерным продлением общего срока выполнения работ по Договору, работы по соответствующему этапу считаются безоговорочно принятыми Заказчиком по истечении установленного срока на приемку и подлежат незамедлительной оплате.

Договор подписан сторонами без разногласий.

Как указывает истец и не оспаривалось ответчиком в ходе рассмотрения дела, ответчиком внесена предоплата в счет исполнения своих обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истицей направлен дизайн-проект ответчику.

ДД.ММ.ГГГГ истица направила в адрес ответчика акты о приемке выполненных работ.

Ответчик отказался от подписания акта выполненных работ, о чем направил мотивированный отказ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ответчик отказался от подписания актов выполненных работ в связи с неисполнением истцом своих обязательств по Договору, выразившихся в превышении максимально запланированной суммы и не включении в нее черновых работ.

Согласно п. 1.3. Договора результатом работ по настоящему Договору является Дизайн-проект интерьера Объекта, представляющий собой файлы в формате. pdf, подготовленные с помощью программы Archicad.

Согласно разделу «Основные термины и понятия» дизайн-проект - комплект документации, отражающий концепцию художественного оформления интерьера и содержащий информацию о концептуальных, колористических, видовых особенностях интерьеров объекта, рекомендуемых элементах мебели, чистовых материалах отделки, элементах декора, элементах освещения и иных элементах объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, включающий в себя Планировочные решения (при необходимости), Эскизный проект (3D визуализации) и Рабочие чертежи, состав которых определяется настоящим Договором, Приложением НОМЕР «Техническое задание» и Приложением НОМЕР «Состав дизайн-проекта».

Из мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 получил со стороны истца следующие документы:

- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ

- Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ

- дизайн проект 1-комнатной квартиры по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>

Согласно п. 1.3. Договора результатом работ по настоящему Договору является Дизайн-проект интерьера Объекта, представляющий собой файлы в формате. pdf, подготовленные с помощью программы Archicad.

Согласно разделу «Основные термины и понятия» дизайн-проект - комплект документации, отражающий концепцию художественного оформления интерьера и содержащий информацию о концептуальных, колористических, видовых особенностях интерьеров объекта, рекомендуемых элементах мебели, чистовых материалах отделки, элементах декора, элементах освещения и иных элементах объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, включающий в себя Планировочные решения (при необходимости), Эскизный проект (3D визуализации) и Рабочие чертежи, состав которых определяется настоящим Договором, Приложением НОМЕР «Техническое задание» и Приложением НОМЕР «Состав дизайн-проекта».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ не предусмотрены конкретные критерии качества дизайн-проекта. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истицей услуги по договору были оказаны некачественно, имели место существенные недостатки. То обстоятельство, что заказчика не удовлетворили результаты выполненной работы, поскольку стоимость работ по разработанному дизайн проекту истца превысила максимально запланированную сумму, не учтена стоимость черновых работ, не может являться доказательством некачественного оказания услуг (выполнения работ).

Поскольку, дизайн проект ответчиком получен, оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме не была произведена, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика задолженности по оплате выполненных работ в размере 60 200,00 рублей. 

Также истец просит суд взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ, за период с 11.06.2024г. по 29.08.2024г. в размере - 24 080 рублей и далее по день фактической оплаты задолженности;

Из положений п. 1 ст. 330 ГК РФ следует, что неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.3. Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

Судом установлено, что ответчиком не произведена в полном объеме оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, требования истца о взыскании с ответчика неустойки являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что неустойка за нарушение срока оплаты по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.08.2024г. составляет 24 080,00 рублей исходя из следующего расчета:

Ставка по договору: 0,5 % в день

Установленный период начисления неустойки: ДД.ММ.ГГГГ - 29.08.2024г. (80 дней)

Долг на дату начала периода начисления неустойки: 60 200,00 рублей.

60 200 рублей х 0,5% х 80 дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) = 24 080 (двадцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

На основании изложенного, подлежат удовлетворению исковые требования о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства в размере 0,5% за каждый день из расчета от суммы задолженности в размере 60 200,00 рублей.

В пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 ГПК РФ).

На основании ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в чью пользу состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика расходов на изготовление дизайн-проекта на бумажном носителе в размере 1 740 рублей; почтовых расходов в размере 349 рублей 54 копейки; расходов по уплате государственной пошлины в размере -2 728 рублей.

Материалами дела подтверждены произведенные истцом расходы, являлись для истца необходимыми, в связи, с чем они подлежат возмещению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать в пользу ФИО1 (ИНН НОМЕР) с ФИО3 (ИНН НОМЕР) задолженность по оплате выполненных работ в размере - 60 200 рублей, неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере - 24 080 рублей и далее по день фактической оплаты задолженности на сумму долга 60 200 рублей, расходы на изготовление дизайн-проекта на бумажном носителе - 1 740 рублей, почтовые расходы - 349 рублей 54 копейки, расходы по уплате государственной пошлины - 2 728 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления

Судья М.Г. Котеева