2-131/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Уфа 16 января 2017 года

Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гималетдинова А.М.,

секретаря судебного заседания Суфиевой А.К.,

с участием истцов - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

представителя ответчика ООО «НОРД» - ФИО9,

представителя ответчика ООО «НОРД» - ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» - ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 к ООО «НОРД», ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» о защите прав потребителя

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 обратилась в суд с иском к к ООО «НОРД», ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» о защите прав потребителя.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, текст соглашения представили суду в письменном виде, просили его утвердить.

По условиям мирового соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» производит работы по устранению недостатков в объеме и сроки, указанном в Приложении №1 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению. 2. Стороны пришли к соглашению о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «НОРД» производит работы по устранению недостатков в объеме и сроки, указанном в Приложении №2 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению. 3. Управляющая компания ООО ЖУК «Строительные инвестиции» совместно с Истцами, подписывают акт о выполненных работах по недостаткам, указанных в Приложении №1 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению в течение 5-ти дней после выполнения работ. 4. Застройщик ООО «Норд» совместно с Истцами, подписывают акт о выполненных работах по недостаткам, указанных в Приложении №2 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению в течение 5-ти дней после выполнения работ. 5. По настоящему Мировому соглашению Истцы отказываются от требований по выплате неустойки, штрафа за неудовлетворение законных требований потребителя, судебных расходов, ранее предъявленных в рамках гражданского дела №2-7192/2016, рассматриваемого Ленинским районным судом города Уфы РБ. 6. Сторонам известны и понятны порядок заключения сторонами и утверждения судом мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные статьями 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ. Стороны констатируют, что понимают значение и смысл настоящего мирового соглашения и осознают юридические (правовые) последствия его подписания. 

Выслушав стороны, изучив и оценив материалы гражданского дела, мировое соглашение, суд приходит к следующему:

В соответствии со статьей 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, при этом, суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно статье 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Проверив добровольный характер мирового соглашения, суд считает возможным утвердить его и производство прекратить, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия окончания дела мировым соглашением, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, в том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, судом разъяснены, сторонам понятны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 220 ГПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 к ООО «НОРД», ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» о защите прав потребителя, по условиям которого:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» производит работы по устранению недостатков в объеме и сроки, указанном в Приложении №1 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению.

Приложение № 1. Перечень работ с указанием срока их выполнения. 

ЖК «Эко-парк «Сосны», 

<

адрес>.

ООО «ЖУК «Строительный инвестиции» в рамках мирового соглашения выполняет следующие виды работ:

Подъезд №1:

Удаление и отделка стержневой арматуры под лестницей между 1 и 2 этажами в срок до 30.01.17г.

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г. 

Подъезд №2:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Устранит причины одновременной разблокировки замков входных дверей в подъезд в срок до 30.01.17г.

Подъезд №3:

Установит лючок на монтажном коробе под ливневую систему водоотведения на 3 этаже в срок до 30.01.17г. 

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №4:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №5:

Удалит защитную пленку на оконном профиле помещении колясочной в срок до 30.01.17г.

Подъезд №7:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Удалит защитную пленку на оконном профиле помещении колясочной в срок до 30.01.17г.

Подъезд №8:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №9:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №10:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №11:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Приложение № 3. Перечень работ с указанием срока их выполнения

ЖК «Эко-парк «Сосны», 

<

адрес>

Следующий перечень работ выполняет ООО «НОРД» или ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» в зависимости от причин возникновения недостатков, выявленные в ходе комиссионного осмотра.

ООО «НОРД» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые подлежат устранению в рамках гарантийного срока. ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые носят эксплуатационный характер. 

Подъезд №1:

1.1 Общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2 Подъезд №2:

2.1. Производит очистку остатков засохших различных строительных смесей 

на поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру подъезда в срок до 20.05.17г.

2.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2.3. Производит отделочные работы на колонне 1 этажа в срок до 30.06.17г.

3. Подъезд №3:

3.1. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17

Подъезд №4:

4.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

4.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.3. Установит причины возникновения трещин и произведет отделочные работы по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.4. Установит причину и произведет отделочные работы трещин на потолке лестницы между 1 и 2 этажом в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

5.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

5.2. Произвести общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

5.3. Установит причины возникновения и устранит трещины по всему периметру подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

.Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

. Производит отделочные работы и устранит причины возникновения по периметру стен всего подъезда трещин в срок до 30.06.17г.

. Устранит причины протечки под порогом входной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

. Отремонтировать напольную плитку между 3 и 3,5 этажами в срок до 28.02.17г.

Подъезд №7:

. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

. Установит причины трещин по периметру подъезда и устранит последние, произведет отделочные работы в срок до 30.06.17г.

. Установит причины возникновения плесени на 1-м этаже на стене и входе в тех.помещение и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Подъезд №8:

. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной» и тамбура в срок до 30.06.17г.

. Определит причины трещин по периметру стен всего подъезда и устранить последние в срок до 30.06.17г.

Подъезд №9:

. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

. Установит причину и произведет отделочные работы трещин по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №10:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Фасад дома №40

По периметру вокруг дома производит общий косметический ремонт – устранение скол, трещин, неровностей, потертостей штукатурного слоя в срок до 30.06.17г.

2. Стороны пришли к соглашению о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «НОРД» производит работы по устранению недостатков в объеме и сроки, указанном в Приложении №2 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению.

Приложение № 2. Перечень работ с указанием срока их выполнения.

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес> 

ООО «НОРД» в рамках мирового соглашения выполняет следующие виды работ:

Подъезд №1:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит завершение отделочных работ в районе установленной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №2:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г. 

Установит причины протечки на коробе ливневой системы водоотведения, в том числе по потолку (на 3 этаже) между кВ. №37 и №38 и устранить последние в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит прибор искусственного освещения на 3-м этаже в срок до 28.02.17г.

Подъезд №3:

Установит причины протечки на коробе ливневой системы водоотведения, между кв. № и №№ и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №4:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г. 

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Произведет демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №7:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №8:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Произведет заделку окна и отделочные работы, из-за которого во входной группе внутренней стороны двора поддержание тепла тамбуре в холодное время года не представляется возможным, в срок до 28.02.17г.

Подъезд №10:

. Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

. Произведет заделку окна и отделочные работы, из-за которого во входной группе внутренней стороны двора поддержание тепла тамбуре в холодное время года не представляется возможным, в срок до 28.02.17г.

. Производит заделку ниши, предположительно, для слаботочных сетей, в помещении колясочной, с дальнейшим производством отделочных работ в срок до 30.06.17г.

. Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Заделывает отверстие в стене внутри входной группы с внешней стороны двора и производит отделочные работы в срок до 30.06.17г.

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит приборы искусственного освещения на 2 этаже в срок до 28.02.17г.

Фасад дома №40

По периметру вокруг дома в месте примыкания фасада к бессеру производит заделку шва в срок до 30.06.17г.

По периметру вокруг дома производит монтаж отколотых и/или не скрепленных цементным раствором/анкерением бессерных блоков в срок до 20.05.17г.

Придомовая территория

. Производит установку скамеек на территории всего комплекса в срок 30.01.17г.

. Производит ремонтные работы тротуара возле входа в подъезд №10 с внешней стороны двора в срок до 30.06.17г.

. Восстановление дорожного покрытия и плодородной почвы между домами № 40 и домами «Курай» в срок до 30.06.17г.

Приложение № 3. Перечень работ с указанием срока их выполнения

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>

Следующий перечень работ выполняет ООО «НОРД» или ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» в зависимости от причин возникновения недостатков, выявленные в ходе комиссионного осмотра.

ООО «НОРД» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые подлежат устранению в рамках гарантийного срока. ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые носят эксплуатационный характер. 

Подъезд №1:

1.1 Общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2 Подъезд №2:

2.1. Производит очистку остатков засохших различных строительных смесей 

на поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру подъезда в срок до 20.05.17г.

2.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2.3. Производит отделочные работы на колонне 1 этажа в срок до 30.06.17г.

3. Подъезд №3:

3.1. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17

4. Подъезд №4:

4.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

4.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.3. Установит причины возникновения трещин и произведет отделочные работы по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.4. Установит причину и произведет отделочные работы трещин на потолке лестницы между 1 и 2 этажом в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

5.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

5.2. Произвести общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

5.3. Установит причины возникновения и устранит трещины по всему периметру подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

.Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

. Производит отделочные работы и устранит причины возникновения по периметру стен всего подъезда трещин в срок до 30.06.17г.

. Устранит причины протечки под порогом входной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

. Отремонтировать напольную плитку между 3 и 3,5 этажами в срок до 28.02.17г.

Подъезд №7:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причины трещин по периметру подъезда и устранит последние, произведет отделочные работы в срок до 30.06.17г.

Установит причины возникновения плесени на 1-м этаже на стене и входе в тех.помещение и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Подъезд №8:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной» и тамбура в срок до 30.06.17г.

Определит причины трещин по периметру стен всего подъезда и устранить последние в срок до 30.06.17г.

Подъезд №9:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причину и произведет отделочные работы трещин по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №10:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Фасад дома №40

По периметру вокруг дома производит общий косметический ремонт – устранение скол, трещин, неровностей, потертостей штукатурного слоя в срок до 30.06.17г.

2. Управляющая компания ООО ЖУК «Строительные инвестиции» совместно с Истцами, подписывают акт о выполненных работах по недостаткам, указанных в Приложении №1 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению в течение 5-ти дней после выполнения работ.

Приложение № 1. Перечень работ с указанием срока их выполнения. 

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>

ООО «ЖУК «Строительный инвестиции» в рамках мирового соглашения выполняет следующие виды работ:

1. Подъезд №1:

Удаление и отделка стержневой арматуры под лестницей между 1 и 2 этажами в срок до 30.01.17г.

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г. 

2. Подъезд №2:

. Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

. Устранит причины одновременной разблокировки замков входных дверей в подъезд в срок до 30.01.17г.

Подъезд №3:

Установит лючок на монтажном коробе под ливневую систему водоотведения на 3 этаже в срок до 30.01.17г. 

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №4:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №5:

Удалит защитную пленку на оконном профиле помещении колясочной в срок до 30.01.17г.

Подъезд №7:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Удалит защитную пленку на оконном профиле помещении колясочной в срок до 30.01.17г.

Подъезд №8:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №9:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №10:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Подъезд №11:

Производит окончательный монтаж и отделочные работы металлического короба слаботочной системы в помещении «колясочной» не позднее 30.01.17г.

Приложение № 3. Перечень работ с указанием срока их выполнения

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>.

Следующий перечень работ выполняет ООО «НОРД» или ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» в зависимости от причин возникновения недостатков, выявленные в ходе комиссионного осмотра.

ООО «НОРД» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые подлежат устранению в рамках гарантийного срока. ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые носят эксплуатационный характер. 

Подъезд №1:

1.1 Общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2 Подъезд №2:

2.1. Производит очистку остатков засохших различных строительных смесей 

на поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру подъезда в срок до 20.05.17г.

2.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2.3. Производит отделочные работы на колонне 1 этажа в срок до 30.06.17г.

3. Подъезд №3:

3.1. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17

Подъезд №4:

4.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

4.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.3. Установит причины возникновения трещин и произведет отделочные работы по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.4. Установит причину и произведет отделочные работы трещин на потолке лестницы между 1 и 2 этажом в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

5.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

5.2. Произвести общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

5.3. Установит причины возникновения и устранит трещины по всему периметру подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

6.1.Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

6.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

6.3. Производит отделочные работы и устранит причины возникновения по периметру стен всего подъезда трещин в срок до 30.06.17г.

6.4. Устранит причины протечки под порогом входной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

6.5. Отремонтировать напольную плитку между 3 и 3,5 этажами в срок до 28.02.17г.

Подъезд №7:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причины трещин по периметру подъезда и устранит последние, произведет отделочные работы в срок до 30.06.17г.

Установит причины возникновения плесени на 1-м этаже на стене и входе в тех.помещение и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Подъезд №8:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной» и тамбура в срок до 30.06.17г.

Определит причины трещин по периметру стен всего подъезда и устранить последние в срок до 30.06.17г.

Подъезд №9:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причину и произведет отделочные работы трещин по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №10:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Фасад дома №

По периметру вокруг дома производит общий косметический ремонт – устранение скол, трещин, неровностей, потертостей штукатурного слоя в срок до 30.06.17г.

3. Застройщик ООО «Норд» совместно с Истцами, подписывают акт о выполненных работах по недостаткам, указанных в Приложении №2 и Приложении № 3 к настоящему мировому соглашению в течение 5-ти дней после выполнения работ.

Приложение № 2. Перечень работ с указанием срока их выполнения.

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес> 

ООО «НОРД» в рамках мирового соглашения выполняет следующие виды работ:

Подъезд №1:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит завершение отделочных работ в районе установленной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №2:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г. 

Установит причины протечки на коробе ливневой системы водоотведения, в том числе по потолку (на 3 этаже) между кВ. № и № и устранить последние в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит прибор искусственного освещения на 3-м этаже в срок до 28.02.17г.

Подъезд №3:

Установит причины протечки на коробе ливневой системы водоотведения, между кв. №№ и №№ и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №4:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г. 

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Произведет демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №7:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №8:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Произведет заделку окна и отделочные работы, из-за которого во входной группе внутренней стороны двора поддержание тепла тамбуре в холодное время года не представляется возможным, в срок до 28.02.17г.

Подъезд №10:

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Произведет заделку окна и отделочные работы, из-за которого во входной группе внутренней стороны двора поддержание тепла тамбуре в холодное время года не представляется возможным, в срок до 28.02.17г.

Производит заделку ниши, предположительно, для слаботочных сетей, в помещении колясочной, с дальнейшим производством отделочных работ в срок до 30.06.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Заделывает отверстие в стене внутри входной группы с внешней стороны двора и производит отделочные работы в срок до 30.06.17г.

Заменит трубы ливневой канализации на новую до 28.02.17г.

Производит демонтаж коробок, «утопку» и отделочные работы распределительных электрических коробок по периметру всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит приборы искусственного освещения на 2 этаже в срок до 28.02.17г.

Фасад дома №40

. По периметру вокруг дома в месте примыкания фасада к бессеру производит заделку шва в срок до 30.06.17г.

. По периметру вокруг дома производит монтаж отколотых и/или не скрепленных цементным раствором/анкерением бессерных блоков в срок до 20.05.17г.

Придомовая территория

Производит установку скамеек на территории всего комплекса в срок 30.01.17г.

Производит ремонтные работы тротуара возле входа в подъезд №10 с внешней стороны двора в срок до 30.06.17г.

Восстановление дорожного покрытия и плодородной почвы между домами № и домами «

<

данные изъяты> в срок до 30.06.17г.

Приложение № 3. Перечень работ с указанием срока их выполнения

ЖК «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>

Следующий перечень работ выполняет ООО «НОРД» или ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» в зависимости от причин возникновения недостатков, выявленные в ходе комиссионного осмотра.

ООО «НОРД» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые подлежат устранению в рамках гарантийного срока. ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» выполняет те виды работ, обнаруженные недостатки которые носят эксплуатационный характер. 

Подъезд №1:

1.1 Общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2 Подъезд №2:

2.1. Производит очистку остатков засохших различных строительных смесей 

на поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру подъезда в срок до 20.05.17г.

2.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

2.3. Производит отделочные работы на колонне 1 этажа в срок до 30.06.17г.

3. Подъезд №3:

3.1. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17

Подъезд №4:

4.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

4.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.3. Установит причины возникновения трещин и произведет отделочные работы по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

4.4. Установит причину и произведет отделочные работы трещин на потолке лестницы между 1 и 2 этажом в срок до 30.06.17г.

Подъезд №5:

5.1. Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

5.2. Произвести общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

5.3. Установит причины возникновения и устранит трещины по всему периметру подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №6:

6.1.Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

6.2. Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

6.3. Производит отделочные работы и устранит причины возникновения по периметру стен всего подъезда трещин в срок до 30.06.17г.

6.4. Устранит причины протечки под порогом входной двери на крышу дома в срок до 28.02.17г.

6.5. Отремонтировать напольную плитку между 3 и 3,5 этажами в срок до 28.02.17г.

Подъезд №7:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причины трещин по периметру подъезда и устранит последние, произведет отделочные работы в срок до 30.06.17г.

Установит причины возникновения плесени на 1-м этаже на стене и входе в тех.помещение и устранит последние в срок до 28.02.17г.

Подъезд №8:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной» и тамбура в срок до 30.06.17г.

Определит причины трещин по периметру стен всего подъезда и устранить последние в срок до 30.06.17г.

Подъезд №9:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Установит причину и произведет отделочные работы трещин по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №10:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Подъезд №11:

Производит очистку поверхности полов, металлических ограждений (перил) и т.д. по периметру всего подъезда от остатков засохших различных строительных смесей в срок до 20.05.17г.

Производит общий косметический ремонт - устранение сколов, неровностей, потертостей, трещин помещения «колясочной», тамбура и всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Определит причины и устранит трещины по периметру стен всего подъезда в срок до 30.06.17г.

Фасад дома №40

По периметру вокруг дома производит общий косметический ремонт – устранение скол, трещин, неровностей, потертостей штукатурного слоя в срок до 30.06.17г.

4. По настоящему Мировому соглашению Истцы отказываются от требований по выплате неустойки, штрафа за неудовлетворение законных требований потребителя, судебных расходов, ранее предъявленных в рамках гражданского дела № 2-131/2017 (2-7192/2016), рассматриваемого Ленинским районным судом города Уфы РБ.

5. Сторонам известны и понятны порядок заключения сторонами и утверждения судом мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные статьями 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ. Стороны констатируют, что понимают значение и смысл настоящего мирового соглашения и осознают юридические (правовые) последствия его подписания. 

Производство по делу прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд города Уфы в течение пятнадцати дней.

Председательствующий А.М. Гималетдинов