№ 2-1858/2024

72RS0019-01-2024-002539-85

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Тобольск 25 июля 2024 г.

Тобольский городской суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Галютина И.А., при секретаре Южаковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась с иском о взыскании денежных средств. Требования она мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ стороны заключили договор подряда на строительство беседки, цена договора 62800 руб. Первый авансовый платеж в размере 30000 руб. она перевела 04.06.2023, второй в сумме 32800 руб. 22.06.2023. Срок выполнения работ установлен до 07.08.2023. На сегодняшний день беседка отсутствует. Денежные средства не возвращены. Ответ на претензию о возврате денежных средств от 25.05.2024 не поступил. На основании изложенного истец просила взыскать с ответчика оплаченную по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 62800 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.2023 по 13.06.2024 в размере 8458,52 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 8000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2084 руб. 

Истец в судебном заседании на требованиях настаивала, пояснила, что обязательство до сих пор не исполнено, деньги не возвращены. Ответчик не отвечает на телефонные звонки, читает сообщения, но не отвечает на них. Один из платежей она перечислила матери, чтобы та перевела ответчику. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом. 

С согласия истца дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

На основании п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п.1); указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (п.2); указанные в п.2 ст.405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п.3).

В соответствии со ст.309, ст.310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании п.2 ст.405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

По договору подряда на строительство от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.9), заключенному между сторонами, ФИО2 проводит работы по изготовлению (строительству) беседки размером 3,5 х 3 м. Срок выполнения работ до 07.08.2023. Общая стоимость работ 62800 руб. Сумма авансового платежа составляет 62800 руб.

Факт оплаты авансовых платежей в общей сумме 62800 руб. подтвержден от 04.06.2023 и от 04.07.2023 (л.д.10-12).

24.05.2024 ФИО1 направила ФИО2 претензию, в которой просила вернуть денежные средства в размере 62800 руб. в течение 10 дней со дня получения претензии (л.д.15).

Так как доказательства строительства беседки или возвращения денег не представлены, требование о возврате уплаченной по договору подряда суммы подлежит удовлетворению. 

В силу п.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку денежные средства находились у ответчика, и он не выполнил предусмотренную договором подряда работу в установленный срок, не оспорил размер процентов, требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.2023 по 13.06.2024 в размере 8458,52 руб. подлежит удовлетворению.

На основании ч.1 ст.98 ГПК РФ подлежат взысканию с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере 2084 руб. (л.д.7), расходы по оплате юридических услуг в размере 8000 руб. (л.д.16-18).

Другие доказательства суду не представлены.

Руководствуясь ст.ст.12, 56, 98, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) оплаченную по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 62800 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.2023 по 13.06.2024 в размере 8458,52 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 8000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2084 руб. Всего взыскать 81342 рубля 52 копейки.

Ответчик вправе подать в Тобольский городской суд заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчик может обжаловать решение в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Тобольский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения.

Иные лица, участвующие в деле, могут обжаловать решение в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Тобольский городской суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья И.А. Галютин

Решение в окончательной форме изготовлено 01.08.2024.