РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 августа 2019 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи: Голубятниковой И.А.

при секретаре: Цыгановой С.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3331/19 по иску ФИО1 к ООО «Домстрой - 1» о взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с требованиями о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства - квартиры за период 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 564391,32 рублей, компенсации морального вреда 10000 рублей, штрафа, взыскании судебных расходов. В обоснование требований истец указал, что в апреле 2015 года заключил с ответчиком договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому истец обязался уплатить стоимость объекта строительства – квартиры в размере 2543640 рублей, а ответчик взял на себя обязательство в срок – 4 квартал 2016 года ввести дом в эксплуатацию, однако сообщение о переносе окончания строительства не сделал, соглашение об изменении срока ввода в эксплуатацию не направил, при этом истец свои обязательства по договору выполнил в полном объеме. 

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, пояснил, что квартира ему передана только 

<

дата>, как и предусмотрено пунктом 4.1.2 договора. Однако, квартира подлежала передаче до 

<

дата>, поскольку иное противоречит пунктам 4.1.3 и 4.2.2 договора. 

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что квартира передана истцу 

<

дата> в установленный договором срок, нарушения срока передачи квартиры нет. Истец был извещен о сдаче дома и приглашен на подписание передаточного акта.

Изучив материалы дела, суд не находит требования подлежащими удовлетворению. 

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для возмещения затрат на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также установление гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, регулируются Федеральным законом от 

<

дата> N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закона).

В соответствии со статьей 4 Закона по договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Обязанность застройщика передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, установлена статьей 6 Закона. 

Кроме того, этой же статьей предусмотрена ответственность застройщика в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, согласно которой застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 

Материалами дела установлено:

<

дата> между сторонами по делу заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

<

адрес>-КР12/109-К, предмет договора – 

<

адрес>, расположенная по адресу 

<

адрес> в районе 

<

адрес>, истец обязался уплатить цену договора – 2543640 рублей, ответчик – Застройщик обязался получить разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года (п. 1.10 договора) и передать истцу объект в течение 12 месяцев с даты получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию (п. 4.1.2 договора);

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено ответчиком 

<

дата>.

Обязательства истца по уплате цены договора за квартиру исполнены в полном объеме, квартира передана истцу по передаточному акту 

<

дата>, что сторонами не отрицается;

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, учитывая, что квартира истцу передана в срок, предусмотренный договором, то есть до истечения 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию, суд приходит к выводу об отсутствии нарушений ответчиком обязательств по договору в части срока передачи объекта долевого строительства.

Доводы истца, что квартира подлежала передачи до 

<

дата>, а также ссылка на противоречие пунктов 4.1.3 и 4.2.2 договора пункту 4.1.2 судом отклоняются.

Пункты договора 4.1.3 и 4.2.2 предусматривают обязанность ответчика после ввода объекта в эксплуатацию направить истцу сообщение о завершении строительства и готовности к передаче объекта и необходимости принять этот объект, а также обязанность истца приступить к принятию объекта в течение 7 дней с даты получения уведомления. 

Между тем, представителем истца не отрицается, что истец был приглашен для принятия объекта, что подтверждается непосредственно передаточным актом от 

<

дата>. Кроме того, нарушение срока ввода дома в эксплуатацию не повлекло нарушений прав истца на своевременное получение квартиры.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 4 этой же статьи договор участия в долевом строительстве должен содержать в том числе срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

Согласно части 1 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором, за исключением случая, установленного частью 3 данной статьи, предусматривающей возможность изменения установленного договором срока в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статьей 8 Закона об участии в долевом строительстве установлено, что передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (часть 2).

После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока (часть 3).

Из приведенных положений закона следует, что договор участия в долевом строительстве должен предусматривать как срок строительства (создания) многоквартирного дома, так и срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику этого строительства, при этом такая передача возможна не ранее получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию.

Исполнение застройщиком обязательства по строительству (созданию) многоквартирного дома удостоверяется разрешением на ввод дома в эксплуатацию, получение которого является обязанностью застройщика и до получения которого обязательства застройщика по строительству (созданию) многоквартирного дома не могут считаться исполненными.

При толковании условий договора о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику этого строительства следует учитывать положения статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Получение разрешения на ввод многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в эксплуатацию не является событием, которое должно с неизбежностью наступить, и в отдельности от других условий договора не может рассматриваться как самостоятельное условие о сроке.

При этом в силу императивных положений статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве речь идет именно о сроке исполнения обязательства, а не об обусловленности исполнения обязательства названным событием.

Согласно положениям статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Условиями заключенного сторонами договора срок передачи участнику долевого строительства объекта определен установлением двух последовательных и взаимосвязанных сроков: срока ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2016 года, то есть до 

<

дата>, а также срока, в течение которого после ввода объект должен быть передан участнику долевого строительства, - не позднее 12 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию, то есть до 

<

дата>.

При таких обстоятельствах, рассматриваемый договор участия в долевом строительстве предполагал передачу объекта строительства до 

<

дата>.

Поскольку судом не установлено нарушения обязательства в части передачи квартиры, оснований для привлечения ответчика к ответственности не усматривается. 

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 к ООО «Домстрой - 1» о взыскании денежных средств оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 

<

дата> 

Судья И.А.Голубятникова