Дело № 2-3177/2024

51RS0001-01-2024-003178-35

Изготовлено 16 июля 2024 года

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

09 июля 2024 года октябрьский районный суд города Мурманска

в составе председательствующего судьи Матвеевой О.Н.,

при секретаре Родиной Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, действующего в интересах несовершеннолетней 

<

данные изъяты>, к ООО «Ваш Дом» о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя в интересах несовершеннолетней 

<

данные изъяты>, обратился в суд с иском к ООО «Ваш Дом» о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование заявленных требований указано, что 20.04.2023 между 

<

данные изъяты> и ООО «Ваш Дом» был заключен договор № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора на расчетный счет ООО «Ваш Дом» для авансирования работ по договору, 15.05.2023 были перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Пунктом 1.5 Договора утверждены этапы и график проведения работ. 

Согласно пунктам 1.1, 1.5.1, 3.1.1, 3.1.2 Договора в течение мая 2023 года ООО «Ваш Дом» должна быть разработана проектная документация и смета на строительство индивидуального жилого дома. Данные обязательства ООО «Ваш Дом» своевременно исполнены не были.

Решением октябрьского районного суда г.Мурманска от 05.03.2024 по гражданскому делу №. вступившим в законную силу 12.04.2024, на ООО «Ваш Дом возложена обязанность представить для согласования проект и смету на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с пунктами 1.1, 3.1.1 договора от 20.04.2023 № в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. То есть, не позднее 22.04.2024. 

20.05.2024 ООО «Ваш Дом» передана проектная документация.

24.05.2024 ООО Ваш Дом» в адрес истца по электронной почте направлен акт № от 24.05.2024 на выполнение работ-услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Указанный акт подписан им с замечаниями. 

Просрочка по передаче проектной документации и сметы составляет 355 дней.

Просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором № от 20.04.2023, по первому этапу в размере 131000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, а также штраф в пользу потребителя.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом.

Представитель ответчика ООО «Ваш Дом» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, мнения относительно заявленных требований не представил. 

В соответствии с положениями статей 167, 233 Гражданского процессуального кодекса РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие истца и представителя ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что 20.04.2023 между ООО «Ваш Дом» и 

<

данные изъяты> в лице законного представителя ФИО1 заключен договор на строительство индивидуального жилого дома №.

Согласно пункту 1.1 Договора исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению архитектурного проекта индивидуального жилого дома общей площадью 76 кв.м., в два этажа мансардного типа, сборно-щитовой конструкции, его фундамента и сметы в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией применяемых материалов.

Пунктом 1.5 Договора предусмотрены этапы и график проведения работ: проектирование-май 2023 года, подготовка строительной площадки и обустройство фундамента – май – июнь 2023 года, возведение каркаса и внешняя отделка – июнь – июль 2023 года, внутренняя отделка – июль – август 2023 года, сдача объекта заказчику – сентябрь 2023 года.

Пунктом 2.2 Договора установлено, что Заказчик оплачивает 

<

данные изъяты> рублей в течение 15 рабочих дней со дня открытия специального счета по сертификату на предоставление меры государственной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на строительство жилого дома на территории Мурманской области.

Согласно пункту 3.1.1 Договора Исполнитель обязан произвести комплекс проектных работ по разработке технической документации индивидуального жилого дома, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

Пунктом 3.1.2 Договора установлено, что Исполнитель обязан в течение одного месяца после подписания настоящего Договора передать заказчику на бумажных и электронных носителях согласованную с Заказчиком проектную документацию. Остальную исполнительную документацию передать Заказчику после завершения работ по строительству. 

15.05.2023 истцом на расчетный счет ООО «Ваш Дом» №, открытый в 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № частично удовлетворены исковые требования ФИО1, действующего в интересах несовершеннолетней 

<

данные изъяты> к ООО «Ваш Дом» о понуждении к исполнению договора, возложении обязанности совершить определенные действия.

Указанным решением постановлено: возложить обязанность на ООО «Ваш Дом» предоставить для согласования 

<

данные изъяты> в лице законного представителя ФИО1 проект и смету на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с пунктами 1.1, 3.1.1 договора от 20.04.2023 № в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу; за счет собственных средств обязать ответчика устранить последствия проникновения воды в установленные сваи на земельном участке с кадастровым номером №, в рамках договора от 20.04.2023 №, в течение 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу; завершить работы по обустройству свайно-винтового фундамента в части монтажа оголовков и обвязке свай металлическим уголком в течение 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части требований отказано. 

Решение в апелляционном порядке не обжаловалось, вступило в законную силу 13.04.2024.

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

20.05.2024 ООО «Ваш Дом» передана истцу проектная документация.

24.05.2024 истцу по электронной почте ответчиком направлен акт № от 24.05.2024 на выполнение работ-услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В связи с нарушением сроков предоставления документации, 27.05.2024 истец обратился к ответчику с претензией о выплате неустойки. Данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Согласно преамбуле к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

Как указано в пункте 1 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В силу пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Согласно расчету, представленному истцом, неустойка за период с 01.06.2023 по 20.05.2024 (355 дней) составляет 1395150 рублей.

Согласно пункту 2 статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В силу пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (пункт 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги) (абзац 4 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было (абзац 5 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей).

Согласно пункту 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» неустойка (пеня) в размере, предусмотренном пунктом 5 статьи 28 Закона, за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) и промежуточных сроков выполнения работы (оказания услуги), а также назначенных потребителем на основании пункта 1 статьи 28 Закона новых сроков, в течение которых исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги), ее этапа и (или) выполнить работу (оказать услугу), ее этап, взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала исполнения работы (оказания услуги), ее этапа либо окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или до предъявления потребителем иных требований, перечисленных в пункте 1 статьи 28 Закона.

Таким образом, размер неустойки составляет 131000 рублей. 

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Применение статьи 333 Гражданского кодекса РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Оценив соразмерность предъявленной к взысканию суммы неустойки последствиям неисполнения обязательств, учитывая, в том числе, отсутствие обоснованных возражений стороны ответчика, отсутствие доказательств, подтверждающих наличие оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ, суд не усматривает оснований для снижения неустойки и определяет к взысканию 131000 рублей.

В соответствии со статей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам защите прав потребителей» при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Принимая во внимание, что в судебном заседании установлен факт нарушения прав истца как потребителя, с учетом степени и характера, причиненных истцу нравственных страданий, степени вины ответчика, требований разумности и справедливости, суд определяет размер указанного вреда в размере 10000 рублей. Данная сумма также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф, предусмотренный Законом РФ «О защите прав потребителей» в размере 70500 рублей. Оснований для снижения размера взыскиваемого штрафа суд также не усматривает.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика в доход соответствующего бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, по требованиям имущественного и неимущественного характера в размере 4120 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 56, 67, 194–198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1, действующего в интересах несовершеннолетней 

<

данные изъяты>, к ООО «Ваш Дом» о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Ваш Дом» в пользу 

<

данные изъяты> в лице законного представителя ФИО1 неустойку в размере 131000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 70500 рублей.

Взыскать с ООО «Ваш Дом» государственную пошлину в доход соответствующего бюджета в размере 4120 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий О.Н. Матвеева