Дело № 2-1935/2024

УИД № 69RS0037-02-2024-003358-94

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 октября 2024 года г. Тверь 

Калининский районный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Полестеровой О.А.,

при помощнике судьи Яцко А.С.,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, снижении размера оплаты по договору, взыскании неустойки и штрафа, компенсации морального вреда, судебной неустойки

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки и штрафа, компенсации морального вреда, указав, что между истцом и ответчиком заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которого ответчик обязан был осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (истца) - электроснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, максимальная мощность энергопринимающих устройств 7 кВт, трехфазный ввод. 

Указанный договор был заключен истцом для собственных нужд, в связи с чем подлежат применению нормы Закона РФ «О защите прав потребителей». Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с момента заключения договора.

В соответствии с п. 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Истцом добросовестно и своевременно внесены платежи, предусмотренные п. 11 Договора:

- 10599 рублей оплачено 22.01.2024;

- 21198 рублей оплачено 04.02.2024;

- 24731 рублей оплачено 24.02.2024. 

После оплаты установленных платежей истец ожидал надлежащего исполнения Договора со стороны ответчика в течение 6-месячного срока, начиная с 24.01.2024. Ответчик не информировал истца о нарушении сроков исполнения Договора.

В установленный 6-месячный срок ответчик к исполнению Договора не приступил. 

18.07.2024, надеясь на добровольное урегулирование, истец обратился с письменной претензией к ответчику с требованием незамедлительно приступить к выполнению работ, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в 10-дневный срок, сообщить о принятом решении письмом и на адрес электронной почты.

24.07.2024 истцом был получен ответ, в котором директор филиала ПАО «Россели Центр» - «Тверьэнерго» сообщил о том, что Филиал лишен возможности выполнить в установленный договором срок мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

Однако, ответчик принял все платежи от истца и никак не информировал о невозможности исполнения Договора до момента истечения срока исполнения обязательств по Договору и направления претензии, что свидетельствует о недобросовестном поведении со стороны ответчика.

Поскольку истцу стало очевидно, что ответчик не выполнит договор в срок, 18.07.2024 он установил ответчику новый срок исполнения договора (10-дневный срок с момента получения претензии). Ответчик не предпринял мер для выполнения Договора.

Таким образом истец полагает, что ответчиком были нарушены его права на технологическое присоединение к электрическим сетям и он вправе требовать надлежащего исполнения договора, уменьшения платы за технологическое присоединение в 2 раза, взыскания неустойки в размере 0,25 процента (п. 17 типового договора) за каждый день просрочки от общего размера платы за технологическое присоединение, взыскания морального вреда, который он оценивает в 30000 рублей. Моральный вред выражается в том, что истец не имеет возможности приступить к строительству нового жилого дома, что увеличивает сроки и стоимость работ, следствием чего являются переживания.

Расчет взыскиваемых сумм:

- 70659 рублей 04 коп /2 = 35329 рублей 52 копеек (сумма на которую истец просит уменьшить плату за технологическое присоединение.

- 70659 рублей 04 коп / 100 х 0,25 процента = 176 рублей 65 копеек (размер неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства.

- 30000 рублей (размер морального вреда).

В связи с тем, что ответчик действует недобросовестно и не предпринимает никаких мер для устранения нарушения прав истца, истец считает необходимым просить суд применить ч. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ и наложить судебную неустойку на случай неисполнения решения суда ответчиком в срок в размере 2000 рублей в день. Меньший размер неустойки не приведет к своевременному исполнению решения суда. 

На основании изложенного, истец просит возложить обязанность на ответчика осуществить в 10-дневный срок мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца - электроснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым №, в соответствии с типовым договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, уменьшить размер платы за технологическое присоединение по типовому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № в 2 раза, снизив его до 35329 рублей 52 копеек, в связи с чем взыскать с ответчика в пользу истца 21198 рублей 48 копеек и освободить истца от оплаты оставшейся части платы в сумме 14131 рублей 04 копейки за технологическое присоединение по типовому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, взыкать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 176 рублей 65 копеек (0,25 процента общего размера платы) за каждый день просрочки исполнения ответчиком типовому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, начиная с 24.07.2024 по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в сумме 30000 рублей, штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы к взысканию, судебную неустойку в размере 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Истец ФИО1 в судебном заседании полностью поддержал исковые требования просил их удовлетворить в полном объеме. Также пояснил, что он неоднократно обращался к ответчику в том числе с претензией, однако ответчик ссылался только на отсутствие финансирования.

Ответчик ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго», надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, о причинах неявки суду не сообщил. 

Выслушав истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Следовательно, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед ФИО1, а также наличие обстоятельств, безусловно свидетельствующих о невозможности исполнения договора, отсутствия технической возможности для этого, лежит на самом ответчике ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго».

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ и пп. 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, 22.01.2024 года ФИО1 и ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго» был заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, с предусмотренной максимальной мощностью энергопринимающих устройств 7 кВт, трехфазный ввод по условиям которого ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго» взяло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 7 кВт, категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с пунктами 3, 4 договора, точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Пунктом 6 Договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 8 Договора заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить, сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ т подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно п. 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. 

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Тверской области №546-нп от 19.12.2023г. и составляет 70659 рублей 04 копейки.

Пунктом 11 Договора установлено, что внесение платы за технологической присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке (кроме случаев, когда заявитель воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение):

- 15 % платы вносится в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции на оплату технологического присоединения;

- 30 % платы вносится в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции;

- 35% платы вносится в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции;

- 20% платы вносится в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организации возможности присоединении к электрическим сетям.

В соответствии с условиями Договора технологического присоединения № ФИО1 были выполнены технические условия к договору, произведена оплата по договору 22.01.2024 г. в размере 10599 рублей; 04.02.2024г. в размере 21198 рублей, 24.02.2024г. в размере 24731 рублей, что подтверждается чеками об оплате.

Однако в установленный договором срок и по настоящее время ответчиком не исполнены обязательства по договору № от 22.01.2024 года.

На обращение истца к ответчику об исполнении договора 18.07.2024, последний ответил в письме от 24.07.2024г., что им предпринимаются все возможности для подключения, однако в связи с отсутствием финансирования в установленный срок мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств отсутствует. При этом, в письме не содержалось информации о неисполнении заявителем ФИО1 своих обязательств по договору технологического присоединения.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины в ненадлежащем исполнении обязательств по заключенному договору.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил, входит, в том числе, указание на перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Анализируя представленные доказательства и руководствуясь назваными требованиями закона, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о возложении обязанности на ответчика в месячный срок, с даты вступления решения суда в законную силу, произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору № от 22.01.2024г. 

В соответствии с п. 16 (6) Правил N 861 неисполнение заявителем условий технологического присоединения может является основанием для расторжения договора, однако, как следует из материалов дела, ответчик с требованием о расторгнуть договор в связи с его неисполнением.

В силу п. 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Согласно подпункта «в» пункта 16 Правил N 861 обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Поскольку договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго» в установленный срок не исполнен, размер неустойки за невыполнение обязательств по договору о технологическом присоединении составит 176 рублей 65 копеек в день, начиная с 24.07.2024 и по день фактического исполнения обязательства.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Поскольку права потребителя были нарушены действиями ответчика, связанными с ненадлежащим исполнением условий договора от 22.01.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истцу причинены нравственные страдания, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в сумме 10000 рублей.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Доказательств добровольного удовлетворения требований истца, как с момента получения претензии, так и с момента получения искового заявления, материалы дела не содержат, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы в размере 5000 рублей (10000 руб./50%).

При этом, суд не находит оснований для уменьшения размеры платы за технологическое присоединение по типовому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 22.01.2024г. по основаниям абз. 4 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», поскольку в материалы дела не представлено обоснованного расчёта уменьшения стоимости и его основания. 

Рассматривая требования истца о взыскании судебной неустойки, суд учитывает следующее.

В соответствии с п.1 ст.308.3 ГК РФ (введенной в действие с 1 июня 2015 г. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ), в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Суд полагает возможным удовлетворить требования истца о взыскании судебной неустойки частично, определив к взысканию с ПАО «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» в пользу истца сумму за неисполнение решения суда, вынесенного по данному делу, в размере 1000 рублей, за каждый календарный день неисполнения решения суда в части возложения обязанности на ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, принадлежащего истцу, расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с условиями договора № от 22.01.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, начисляемые со дня начала просрочки по день фактического исполнения решения суда.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в частности относятся, расходы на оплату услуг представителей.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку оснований для освобождения ответчика ПАО «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» от уплаты государственной пошлины судом не установлено, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета Калининского района Тверской области государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Возложить обязанность на Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес> к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 22.01.2024 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт: серия №, выдан 

<

данные изъяты>) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 176 рублей 65 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № начиная с 24.07.2024г. по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, судебную неустойку в размере 1000 руб., за каждый календарный день неисполнения решения суда в части возложения обязанности на Публичного акционерного общества «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с условиями договора N42463952 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, начисляемую со дня начала просрочки по день фактического исполнения решения суда, штраф в размере 5000 рублей, всего 15000 рублей, в удовлетворении остальной части требований отказать в полном объеме.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в бюджет Калининского муниципального округа Тверской области государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Калининский районный суд Тверской области.

Судья О.А. Полестерова

Решение в окончательной форме составлено 22 октября 2024 года.