Дело № 2-4623/2023

УИД № 35RS0010-01-2023-003672-12

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Вологда 20 июня 2023 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Папушиной Г.А.,

при секретаре Бабушкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 овича к ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО2 обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств.

Требования мотивировал тем, что между ФИО2 (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) заключен договор проектирования индивидуального жилого дома, по условиям которого исполнитель обязался выполнить разработку проекта индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с заданием на проектирование и передать заказчику разработанный проект. Стоимость работ по договору составила 200 000 рублей, из них 100 000 рублей заказчик обязался выплатить исполнителю авансом не позднее трех дней с момента подписания договора, а оставшиеся 100 000 рублей после подписания без замечаний акта приема-передачи проектной документации, согласованной в установленном порядке уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия Вологодской области и при получении разрешения на строительство. Истцом был внесен аванс в размере 100 000 рублей. В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору 04 апреля 2022 года в адрес ФИО1 было направлено уведомление с требованием о возврате неотработанного аванса и расторжении договора проектирования индивидуального жилого дома. В настоящее время денежные средства не возращены, работы исполнителем не выполнены.

Просит взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 денежные средства в размере 100 000 рублей, почтовые расходы в размере 506 рублей 20 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 210 рублей.

Истец ФИО2 о дате и времени заседании извещен, в судебное заседание не явился. Его представитель по ордеру адвокат Пантин Е.В. заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. 

Ответчик ФИО1 о дате и времени рассмотрения дела извещен, своего представителя в судебное заседание не направил.

Суд, заслушав мнение представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исходя из пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

Установлено и следует из материалов дела, что между ФИО2 (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) заключен договор проектирования индивидуального жилого дома, по условиям которого исполнитель принимает на себя обязательство разработать проект индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с заданием на проектирование, предоставленным заказчиком и передать заказчику разработанный проект в объеме, указанном в Перечне проектных работ (Приложение № к Договору).

Общая стоимость работ по вышеуказанному договору составляет 200 000 рублей (п.2.1 договора).

В соответствии с пунктом 2.2 договора не позднее трех дней с момента подписания договора, заказчик выплачивает исполнителю аванс в размере: 50% (пятьдесят процентов) от стоимости договора, что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Не позднее трех дней с момента подписания заказчиком без замечаний акта приема-передачи проектной документации, согласованной в установленном порядке уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия Вологодской области при получении разрешения на строительство заказчик оплачивает исполнителю остаток цены договора в размере 50% от стоимости договора, что составляет: 100 000 рублей (п.2.3).

Работы начинаются с момента его подписания, передачи заказчиком задания на проектирование и получения исполнителем аванса (п.3.1 договора).

В соответствии с п.3.2 договора исполнитель обязуется предоставить заказчику для согласования следующие этапы работ:

- эскизный проект (планировки этажей, фасады здания, разрезы по характерным местам, схему генплана)- 14 календарных дней с даты получения градостроительного плана земельного участка;

- раздел АС (конструктивные решения ниже 0.000/выше 0.000)- 45 календарных дней с даты согласования заказчиком эскизного проекта;

- внутренние сети-20 рабочих дней с даты разработки раздела АС.

При передаче исполнителем заказчику готового проекта сторонами подписывается акт выполненных работ (п.3.2 договора).

Согласно расписке, имеющейся в договоре проектирования индивидуального жилого дома 05 февраля 2017 года, ФИО1 получил 100 000 рублей. 

Поскольку в указанный срок ответчиком работы по договору выполнены не были, 04 апреля 2022 года истец обратилась к ответчику с претензией, в которой уведомил ответчика о расторжении договора и возврате внесенного в качестве аванса денежных средств в размере 100 000 рублей.

В связи с отсутствием ответа на претензию, 11 августа 2022 года ФИО2 в адрес ФИО1 было направлено повторное уведомление, которое ответчиком получено не было.

Учитывая, что доводы стороны истца ответчиком не опровергнуты, доказательств, подтверждающих факт выполнения работ полностью либо в части, не представлено, равно, как и не представлено доказательств передачи результата выполненных работ, либо возврата денежных средств, суд полагает возможным взыскать с ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, уплаченные в качестве аванса по указанному договору подряда.

В силу положений статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины в размере 3 210 рублей, почтовые расходы в размере 506 рублей 20 копеек. 

Руководствуясь статьями 194-197, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия №, 

<

данные изъяты> в городе Вологде, в пользу ФИО2 овича, ИНН №, аванс в размере 100 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 210 рублей, почтовые расходы в размере 506 рублей 20 копеек.

Ответчик вправе подать в Вологодский городской суд Вологодской области заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии данного решения.

Ответчиком заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд Вологодской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд Вологодской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Г.А.Папушина

Мотивированное заочное решение изготовлено 27.06.2023.