62RS0001-01-2023-001434-29

2-464/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 июня 2024 года г. Рязань

Железнодорожный районный суд г.Рязани в составе судьи Шереметьевой Н.Ю.,

при секретаре ФИО3,

с участием истца ФИО1,

представителя истца ФИО1 – ФИО4,

представителя ответчика филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 

«Рязаньэнерго» – ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» о понуждении к совершению действий, 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» о понуждении к совершению действий.

В обоснование заявленных требований указано, что истцом осуществляется деятельность по строительству (реконструкции) жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № в границы которого попадают объекты электросетевого хозяйства 

<

данные изъяты> (далее - объекты электросетевого хозяйства).

Вышеуказанные объекты электросетевого хозяйства принадлежат ПАО «Россети Центр-Приволжье» на праве собственности.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях освобождения указанного земельного участка от объектов электросетевого хозяйства, между сторонами заключено соглашение о компенсации № (далее - Соглашение), которое определяет условия осуществления истцом денежной компенсации собственнику объектов электросетевого хозяйства, подлежащих переустройству для освобождения земельного участка.

Согласно п. 3.1. Соглашения мероприятия по переустройству объектов электросетевого хозяйства выполняются в два этапа.

Первым этапом осуществляется комплекс изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы).

Срок: в течение 90 календарных дней с момента поступления от истца авансового платежа в размере 372 654 руб. 39 коп., в том числе НДС 20%, предусмотренного п. 3.3 Соглашения, на расчетный счет ответчика.

Вторым этапом осуществляется комплекс строительно-монтажных работ по переустройству объектов электросетевого хозяйства, включая (при необходимости) изготовление технических планов и проведение кадастрового учета переустроенного объекта Ответчика, внесение изменений в ЕГРН после переустройства, оформление необходимых документов и регистрация прав на землю под переустроенным объектом электросетевого хозяйства (включая внесение изменений в кадастровый учет земельных участков под объектами до осуществления переустройства при необходимости освобождения неиспользуемой территории), а также внесение изменений в существующие документы по установлению границ охранной зоны переустроенного объекта электросетевого хозяйства

Срок: в течение 180 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения, фиксирующего окончательный размер денежной компенсации в соответствии с п. 3.2. Соглашения и окончательного расчета Истца с Ответчиком в соответствии с п.3.3. Соглашения.

В соответствии с п. 3.2. Соглашения размер предварительной денежной компенсации стоимости проводимых Ответчиком работ по переустройству объектов электросетевого хозяйства составляет 621 090 руб. 65 коп., в том числе НДС 20%.

Согласно п. 3.3. Соглашения Истец обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения сторонами Соглашения и предоставления счета на оплату, выставленного Ответчиком, осуществить выплату денежной компенсации Ответчику в размере не менее 60% от суммы, установленной в соответствии с п. 3.2. Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ответчика, что составляет 372654 руб. 39 коп., в том числе НДС 20%.

Окончательный расчет осуществляется по итогам заключения дополнительного соглашения, определяющего размер денежной компенсации.

Подпунктом 4.2.4. Соглашения предусмотрена обязанность Ответчика незамедлительно информировать Истца в случае возникновения непредвиденных и/или не предусмотренных Соглашением платежей и/или дополнительных видов работ, расходов затрат, убытков, связанных с реализацией Соглашения и подлежащих компенсации со стороны Истца

ДД.ММ.ГГГГ истец перечислил денежные средства в размере 372 654 руб. 39 коп. на счет Ответчика, то есть исполнил свои обязательства по внесению авансового платежа, предусмотренные п. 3.3 Соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ исх. № №, т.е. спустя более чем 8 месяцев после внесения истцом авансового платежа, ответчиком в адрес истца был направлен проект дополнительного соглашения № к Соглашению, в котором указан итоговый размер денежной компенсации за выполнение работ – 966 113 руб. 43 коп., в том числе НДС 20%, что значительно, более чем на 50%, увеличивает стоимость выполнения работ относительно предварительной цены Соглашения, предусмотренной п. 3.2. 

Дополнительное соглашение истцом не согласовано.

По своей правовой природе заключенное между сторонами Соглашение является договором подряда.

В соответствии с п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

В соответствии с п. 5 ст. 709 Гражданского кодекса РФ, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. 

Таким образом, ответчик не исполняет свои обязательства по вышеназванному соглашению надлежащим образом, в нарушение п. 4.2.4. Соглашения не информировал истца о непредвиденных и/или не предусмотренных Соглашением платежах и/или дополнительных видах работ, расходов затрат, убытков, связанных с реализацией Соглашения и подлежащих компенсации со стороны истца.

Какие либо документы, обосновывающие увеличение стоимости работ, истцу не представлялись.

К тому же, корректировка размера денежной компенсации возможна только по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы (при необходимости) проектной документации (п. 3.2. Соглашения), которая до настоящего времени Истцу не представлена.

В связи с вышеизложенным истец полагает, что ответчик обязан исполнить Соглашение с сохранением размера денежной компенсации в размере 621 090 руб. 65 коп., в том числе НДС 20%, предусмотренного абзацем 1 п. 3.2 Соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ истец, в связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком обязательств по Соглашению, направил в его адрес претензию, однако до настоящего времени его требования Ответчиком не исполнены.

Просит обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» ОГРН № в лице филиала «Рязаньэнерго» исполнить Соглашение о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ на условиях абзаца 1 п. 3.2 Соглашения с размером денежной компенсации ФИО1 стоимости проводимых работ по переустройству объектов электросетевого хозяйства в размере 621 090 (шестьсот двадцать одна тысяча девяносто) руб. 65 коп., в том числе НДС 20%; взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ОГРН № в лице филиала «Рязаньэнерго» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Определением Железнодорожного районного суда г. Рязани от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО5

В судебном заседании истец ФИО1, его представитель по доверенности ФИО4, заявленные исковые требования поддержали в полном объеме по указанным основаниям.

Представитель ответчика филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» –«Рязаньэнерго» – ФИО6, действующая на основании доверенности, исковые требования не признала, указав, что на основании заявки истца на реконструкцию (переустройство) объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего ответчику и расположенного на земельном участке Истца кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, было проведено обследование и рассчитана ориентировочная стоимость услуги.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес истца было направлено коммерческое предложение, в котором ответчиком была установлена ориентировочная стоимость услуги размере 621090,65 рублей, и предложено заключение договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, в рамках которого будут выполнены мероприятия по реконструкции линии электропередачи, включая разработку проектно-сметной документации, урегулирование земельно-правовых отношений.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено заявление о заключении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка и приняты условия коммерческого предложения.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение о компенсации № (далее - Соглашение), которое определяет условия осуществления истцом денежной компенсации ответчику, который является собственником объектов, подлежащих переустройству для освобождения земельного участка с кадастровым номером №, принадлежащего истцу. 

Услуга по освобождению земельного участка не является обязательной к оказанию для ответчика в силу норм и требований законодательства, и регламентируется исключительно внутренними нормативными документами ответчика.

Соглашение заключено с соблюдением требований, предъявляемых к сделкам нормами Гражданского кодекса РФ, содержит все необходимые существенные условия.

Пунктом 1.5. Соглашения определено, что в Приложении № к Соглашению приведена ориентировочная схема переустройства и что, по итогам выполненных проектных работ схема переустройства может быть изменена.

Согласно пункту 3.2. Соглашения размер предварительной денежной компенсации составляет 621 090,65 руб. Размер денежной компенсации является предварительным и подлежит корректировке по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы (при необходимости) проектной документации путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению.

В случае отказа истца от подписания дополнительного соглашения или неподписания дополнительного соглашения в течение 30 календарных дней с момента получения проекта дополнительного соглашения, действие Соглашения прекращается, при этом Истец обязуется возместить Ответчику понесенные расходы.

В соответствии с п. 4.1.4. истец обязан подписать дополнительное соглашение к Соглашению, предусмотренное п. 3.2.

Как указано в п. 4.2.2. и 3.1.2. ответчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в течение 180 календарных дней после заключения дополнительного соглашения, фиксирующего окончательный размер денежной компенсации и выплаты Истцом окончательной денежной компенсации, согласно абз. 2 п. 3.3. Соглашения.

Таким образом, выполнение ответчиком мероприятий, предусмотренных Соглашением, должно производиться только после установления окончательной цены и подписания дополнительного соглашения.

При заключении Соглашения истцом не предъявлялись разногласия к его содержанию. С ценой, условиями ее определения, порядком выполнения строительно-монтажных работ и иными условиями истец был ознакомлен и согласен, о чем свидетельствует его собственноручная подпись на Соглашении.

В процессе исполнения Соглашения возникли независящие от Истца обстоятельства, препятствующие его реализации.

Объект переустройства, которым является 

<

данные изъяты>, и который расположен на земельном участке истца, является питающей линией ТП-№, от которой запитан потребитель – СШОР 

<

данные изъяты> Так же СШОР 

<

данные изъяты> является собственником земельного участка, задействованного в переустройстве 

<

данные изъяты> в рамках Соглашения. При согласовании трассы прохождения линии в рамках первоначального проекта от СШОР «

<

данные изъяты> поступило предложение выноса ТП-№ с территории гребной базы либо ее реконструкция. В результате невозможности осуществления данных работ в рамках Соглашения, ответчиком было принято решение изменить технические решения по переустройству 

<

данные изъяты>, не затрагивая интересы СШОР 

<

данные изъяты>

По результатам разработки новой проектной документации Ответчиком была определена окончательная сумма компенсации в размере 966 113,47 руб. и оформлено дополнительное соглашение.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес истца для подписания было направлено дополнительное соглашение.

До настоящего момента подписанное истцом дополнительное соглашение в адрес ответчика не поступало.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик, руководствуясь пунктом 3.2. Соглашения, в отсутствии подписанного со стороны истца дополнительного соглашения и по истечении 30 календарных дней с момента его получения истцом, направил в адрес истца соглашение о расторжении с условием компенсации стоимости выполненных ответчиком работ. 

Просит суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.

Выслушав истца ФИО1, представителя истца ФИО4, представителя ответчика филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» – ФИО6, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1). Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п.1).

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору (п.2).

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (п.3).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422) (п.4).

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между заявителем ФИО1 и собственником Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго»), в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства – жилого дома, осуществляемого за счет средств заявителя, заключено Соглашение о компенсации № (далее – Соглашение), которое определяет условия осуществления Заявителем денежной компенсации Собственнику объекта электросетевого хозяйства 

<

данные изъяты>, инвентарный №, объектов, подлежащего переустройству, для освобождения земельного участка с кадастровым №, принадлежащего Заявителю (п.2.1).

В силу п. 2.2. Соглашения заявитель компенсирует расходы Собственника, связанные с переустройством Объектов, путем оплаты денежной компенсации, состоящей из:

- стоимости выполнения работ по переустройству Объектов (включая проектно-изыскательские работы, комплекс строительно-монтажных работ и пуско-наладочные работы); расходов на содержание службы заказчика и службы строительного контроля; 

- затрат и иных выплат Собственника, связанных с осуществлением технической инвентаризации и государственного кадастрового учета Объектов;

- государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), установление границ охранной зоны (при необходимости);

- затраты, связанные с иными расходами Собственника по уплате обязательных платежей, определенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 3.1.Согласшения мероприятия по переустройству Объектов Собственника выполняются в следующие сроки:

3.1.1. комплекс изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы);

Срок: в течение 90 календарных дней с момента поступления авансового платежа, указанного в п. 3.3. на расчётный счёт Собственника.

3.1.2. комплекс строительно-монтажных работ по переустройству Объекта Собственника, включая (при необходимости) изготовление технических планов и проведение кадастрового учета переустроенного объекта Собственника, внесение изменений в ЕГРН после переустройства, оформление необходимых документов и регистрация прав на землю под переустроенным Объектом Собственника (включая внесение изменений в кадастровый учет земельных участков под Объектами до осуществления переустройства при необходимости освобождения неиспользуемой территории), а также внесение изменений в существующие документы по установлению границ охранной зоны переустроенного Объекта.

Срок: в течение 180 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения, фиксирующего окончательный размер денежной компенсации, в соответствии с п.3.2. Соглашения и окончательного расчета Заявителя с Собственником в соответствии с п. 3.3. Соглашения.

В соответствии с п. 3.2. Соглашения размер предварительной денежной компенсации стоимости проводимых Собственником работ по переустройству Объектов Собственника составляет 621 090 руб. 65 коп., в том числе НДС (20%) 103 515 руб. 11 коп.

Размер денежной компенсации, определенный в настоящем пункте, является предварительным и подлежит корректировке по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы (при необходимости) проектной документации (ПД) путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Собственник вправе приостановить выполнение мероприятий по переустройству до момента подписания Заявителем дополнительного соглашения. В случае отказа Заявителя от подписания дополнительного соглашения или неподписания дополнительного соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения проекта дополнительного соглашения от Собственника, действие настоящего Соглашения прекращается, при этом заявитель обязуется возместить Собственнику понесенные расходы.

Пунктом 3.3. Соглашения предусмотрено, что заявитель в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения сторонами настоящего Соглашения и предоставления счета на оплату, выставленного собственником, осуществляет выплату денежной компенсации Собственнику Объекта в размере не менее 60 % (шестидесяти процентов) от суммы, установленной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника, что составляет 372 654 руб. 39 копеек, в том числе НДС (20%) 62 109 руб. 07 коп.

Окончательный расчет осуществляется по итогам заключения дополнительного соглашения, определяющего окончательный размер денежной компенсации, согласно п.3.2. настоящего Соглашения. Сторона, получившая переплату или недоплатившая размер компенсации, обязуется перечислить разницу в размере 100% (ста процентов) от разницы между окончательным размером компенсации и произведенным авансовым платежом в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения об утверждении окончательной стоимости.

В силу п. 4.1. Соглашения Заявитель обязуется: 

- исполнить обязательства в соответствии с настоящим Соглашением в установленные сроки (п. 4.1.1).

- выплатить авансовый платеж в объеме и в сроки, установленные абзацем 1 пункта 3.3 настоящего Соглашения (п.4.1.2).

- компенсировать Собственнику расходы, возникающие у Собственника при переустройстве Объектов Собственника, в том числе в связи с установлением (изменением) санитарно-защитных зон, зон с особыми условиями использования территории переустроенных Объектов Собственника и вызванной этим необходимостью компенсации убытков третьим лицам (правообладателям земельных участков и/или собственникам размещенных на них объектов недвижимости) (п.4.1.3).

- подписать дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, предусмотренное п. 3.2 настоящего Соглашения (п.4.1.4).

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Сторонами дополнительного соглашения оплатить Собственнику в счет компенсации сумму, предусмотренную дополнительным соглашением (п.4.1.5).

Согласно п. 4.2. Соглашения Собственник обязуется:

- исполнить обязательства в соответствии с настоящим Соглашением в установленные сроки (п.4.2.1).

- приступить к выполнению комплекса изыскательских работ по разработке проектной документации с момента получения от Заявителя авансового платежа, предусмотренного абзацем 1 пункта 3.3 настоящего Соглашения, а к выполнению строительно-монтажных работ после заключения дополнительного соглашения и выплаты Заявителем окончательной денежной компенсации согласно абзаца 2 пункта 3.3 настоящего Соглашения (п.4.2.2).

- выполнить в установленный срок работы по переустройству Объектов в соответствии с утвержденной проектной документацией. При этом Собственник имеет право приостановить выполнение работ по переустройству в случае несоблюдения Заявителем сроков выплаты компенсации в соответствии с настоящим Соглашением (п.4.2.3).

- в случае возникновения непредвиденных и/или не предусмотренных платежей и/или дополнительных видов работ, расходов, затрат, убытков, связанных с реализацией настоящего соглашения и подлежащих компенсации со стороны Заявителя, незамедлительно информировать об этом Заявителя (п.4.2.4).

Факт заключения соглашения на вышеуказанных условиях подтверждается копией представленного Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение п.3.3 Соглашения истец произвел оплату по договору в размере 372 654 рублей 39 копеек, что подтверждается чек-ордером ПАО СБЕРБАНК № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд, проанализировав условия заключенного Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ, приходит к выводу, что в соответствии с соглашением ответчик принял на себя обязательства произвести мероприятия по переустройству объекта электросетевого хозяйства 

<

данные изъяты>, инвентарный №, для освобождения земельного участка с кадастровым №, принадлежащего истцу, а истец, в силу п.1 ст.328 ГК РФ, принял на себя встречное обязательство подписать дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, предусмотренное п. 3.2 настоящего Соглашения, и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Сторонами дополнительного соглашения оплатить Собственнику в счет компенсации сумму, предусмотренную дополнительным соглашением (п. 4.1 Соглашения).

При заключении соглашения истец добровольно принял на себя данные обязательства, при этом неисполнение истцом данных условий, установленных в п. 4.1 Соглашения, приводит к последствиям, установленным п. 3.2 Соглашения, согласно которому Собственник вправе приостановить выполнение мероприятий по переустройству до момента подписания Заявителем дополнительного соглашения. В случае отказа Заявителя от подписания дополнительного соглашения или неподписания дополнительного соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения проекта дополнительного соглашения от Собственника, действие настоящего Соглашения прекращается, при этом заявитель обязуется возместить Собственнику понесенные расходы.

При подписании соглашения о компенсации заявитель располагал полной информацией о его предмете, условиях, объеме принятых на себя обязательств и последствиях их неисполнения. При несогласии с данными условиями соглашения заявитель имел возможность отказаться от его заключения, доказательств принуждения к заключению соглашения истцом не представлено. 

Доводы истца о том, что ответчик, обязан исполнить его с сохранением размера денежной компенсации в размере 621 090 руб. 65 коп., в том числе НДС 20%., предусмотренного абзацем 1 п. 3.2 Соглашения, судом отклоняются.

Возможность отказа подрядчиком от исполнения договора подряда прямо предусмотрена действующим законодательством.

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В п. 2 данной нормы установлено, что если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 328 ГПК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (п.1).

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п.2).

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (п.3).

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное (п.4).

Одновременно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» направил в адрес истца, подписанный со стороны филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго», проект дополнительного соглашения № к Соглашению о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № на оплату в размере 593 459 рублей 08 копеек. 

Согласно дополнительного соглашения № к Соглашению о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 3.2 Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ стороны пришли к соглашению о следующем: 

1. Окончательный размер денежной компенсации составляет 966 113 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто тринадцать) руб. 47 коп., в том числе НДС (20 %) 161 018 (сто шестьдесят одна тысяча восемнадцать) руб. 91 коп.

2. Приступить к выполнению мероприятий, указанных в п. 3.1.2. Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончательного расчета Заявителя с Собственником.

3. На основании п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, с учетом ранее произведенной оплаты, Заявитель обязан оплатить Собственнику 593 459 (пятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят девять) руб. 08 коп., в том числе ДС (20%) 98909 (девяносто восемь тысяч девятьсот девять) руб. 84 коп. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения.

4. Выполнить мероприятия, указанные в п. 3.1.2. Соглашения в течение 180 календарных дней с даты окончательного расчета Заявителя с Собственником в соответствии с п. 3 настоящего Дополнительного соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до окончания срока действия Соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение может быть изменено, дополнено, расторгнуто по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Дополнительным оглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и действующим законодательством РФ.

До настоящего времени дополнительное соглашение № к Соглашению о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ истцом не подписано.

ДД.ММ.ГГГГ филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» направил в адрес истца, подписанное со стороны филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» Соглашение о расторжении Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ, которое до настоящего времени истцом не подписано.

В ходе судебного рассмотрения стороной ответчика в обоснование размера денежной компенсации за выполнение работ – 966 113 руб. 43 коп. представлены итоговый расчет стоимости соглашения, укрупненный расчет стоимости строительства, составленный в текущих ценах на 3 квартал 2022 года, проектная документация, которые судом в силу ст. 67 ГПК РФ принимаются судом в качестве доказательств размера денежной компенсации.

Представленная стороной истца локальная смета переустройства 

<

данные изъяты> (инвентарный №), составленная в ценах ДД.ММ.ГГГГ, судом не принимается во внимание, так как не опровергает обоснованность размера денежной компенсации за выполнение работ – 966113 руб. 43 коп., определенного по ценам на работы и материалы ДД.ММ.ГГГГ, а также с учетом положений ст. 67 ГПК РФ не соответствует принципу относимости, допустимости и достоверности доказательства, поскольку не подписана составителем и проверяющим, не согласована с подрядчиком и не утверждена заказчиком.

Таким образом, исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что не подписание истцом дополнительного соглашения № к Соглашению о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ является нарушением п. 4.1.4 Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии с п. 3.2 Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ лишает истца права требовать от ответчика исполнить Соглашение о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ на условиях абзаца 1 п. 3.2 Соглашения с размером денежной компенсации стоимости проводимых работ по переустройству объектов электросетевой хозяйства 621 090 рублей 65 копеек, и действие данного Соглашения о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ прекращается без направления дополнительных уведомлений.

Доводы стороны истца о том, что ответчик, своевременно не предупредивший его о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре, судом отклоняются как несостоятельные, поскольку истец заключил указанное соглашение, в том числе и на условиях пункта 3.2 Соглашения, предусматривающего, что размер денежной компенсации – 621 090 рублей 65 копеек, является предварительным и подлежит корректировке по результатам разработки и прохождения государственной экспертизы (при необходимости) проектной документации (ПД) путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

При таких обстоятельствах, отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявленных требований об обязании ответчика исполнить Соглашение о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ на условиях абзаца 1 п. 3.2 Соглашения с размером денежной компенсации стоимости проводимых работ по переустройству объектов электросетевой хозяйства 621 090 (Шестьсот двадцать одна тысяча девяносто) рублей 65 копеек, в том числе НДС 20 %, в иске следует отказать.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований, не подлежат возмещению понесенные истцом по делу судебные расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей (ст. 98 ГПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 (паспорт №) к Публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» в лице филиала «Рязаньэнерго» (ОГРН: №; ИНН: №) об обязании исполнить Соглашение о компенсации № от ДД.ММ.ГГГГ на условиях абзаца 1 п. 3.2 Соглашения с размером денежной компенсации стоимости проводимых работ по переустройству объектов электросетевой хозяйства 621 090 (Шестьсот двадцать одна тысяча девяносто) рублей 65 копеек, в том числе НДС 20 % – отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его изготовления в окончательной форме в судебную коллегию по гражданским делам Рязанского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Рязани. 

Судья