Судья Туранова Н.В. дело № 33-13825/2025

24RS0017-01-2025-003169-02

2.179

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

08 декабря 2025 года г. Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего Елисеевой А.Л.,

судей Гинтера А.А., Левицкой Ю.В.,

при ведении протокола помощником судьи Голомазовой А.А.,

заслушала в открытом судебном заседании по докладу судьи Левицкой Ю.В. гражданское дело по иску ФИО1, действующей в интересах несовершеннолетнего ФИО2, к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, об осуществлении технологического присоединения,

по апелляционной жалобе ПАО «Россети Сибирь»

на решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14 августа 2025 года, которым постановлено:

«Исковые требования ФИО1, действующей в интересах несовершеннолетнего ФИО2, к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить частично.

Возложить ПАО «Россети Сибирь» ИНН 

<

***> обязанность в срок не позднее двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащего ФИО2, 

<

данные изъяты>, объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом /Садовый/Дачный-дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка №, Красноярский край, Емельяновский район, садовое товарищество «Банк», земельный участок №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 28.11.2023 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН 

<

***> в пользу ФИО2, 

<

данные изъяты>, в лице законного представителя ФИО1, 

<

данные изъяты>, компенсацию морального вреда 8 000 рублей, штраф в размере 4 000 рублей, судебные расходы по оплате удостоверения доверенности 3 100 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН 

<

***> в пользу в пользу ФИО2, 

<

данные изъяты>, в лице законного представителя ФИО1, 

<

данные изъяты> судебную неустойку за неисполнение решения Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14.08.2025 в части понуждения к осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору № от 28.11.2023 года к электрическим сетям по истечении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 50 рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН 

<

***> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 000 рублей».

Заслушав докладчика, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ФИО1, действующая в интересах несовершеннолетнего ФИО2, обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивировала тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и несовершеннолетним ФИО2 в лице законного представителя ФИО1 заключен договор № от 28.11.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом /Садовый/Дачный-дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка №, Красноярский край, Емельяновский район, садовое товарищество «Банк», земельный участок № 18. ПАО «Россети Сибирь» свои обязательства по договору не исполнило, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям до настоящего времени не осуществило.

Просила возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 28.11.2023 в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф, судебные расходы на изготовление доверенности на представителя в размере 3 100 рублей.

Судом постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе ПАО «Россети Сибирь» просит решение изменить в части срока исполнения решения, установить срок для выполнения мероприятий по технологическому присоединению не менее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Ссылается на то, что в силу сложного финансового состояния ответчика осуществить технологическое присоединение в установленный решением срок не представляется возможным.

Представителем истца ФИО3 поданы возражения на апелляционную жалобу, в которых просит решение суда оставить без изменений.

Признав возможным рассматривать дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения дела, заслушав объяснение представителя ФИО1 – ФИО4, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на жалобу, проверив материалы дела и решение суда первой инстанции в пределах, установленных ч.1 ст.327.1 ГПК РФ, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения принятого судом решения.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения).

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Как установлено судом и следует из материалов дела, распоряжением администрации Советского района в городе Красноярске от 29.10.2019 № 1700 несовершеннолетний ФИО2, 

<

данные изъяты>, признан оставшимся без попечения родителей, ФИО1 назначена опекуном ФИО2

Несовершеннолетний ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Емельяновский район, садовое товарищество «Банк», земельный участок №.

28.11.2023 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1, в интересах несовершеннолетнего ФИО2, (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта заявителя - «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка №, Красноярский край, Емельяновский район, садоводческое товарищество «Банк», земельный участок №, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Приложением и неотъемлемой частью заключенного сторонами договора являются технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Техническими условиями предусмотрены мероприятия, которые должна осуществить сетевая организация и заявитель.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10-ти рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Размер платы за технологическое присоединение составил 15 960 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 2 660 рублей (п. 10 договора).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).

Истец полностью исполнил обязанность по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, оплатив 15 960 рублей, что подтверждается справкой по операции ПАО Сбербанк, и стороной ответчика не оспаривается.

ФИО1 обратилась к ответчику с претензией, в которой просила осуществить мероприятия по осуществлению технологического присоединения.

Согласно сведениям ПАО «Красноярскэнергосбыт», договор между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ФИО1 или иным лицом в отношении спорного объекта не заключался, финансово-лицевой счет не открывался.

Разрешая спор, дав надлежащую правовую оценку представленным в материалы дела доказательствам, установив факт неисполнения ответчиком обязательств по заключенному с истцом договору на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь», суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований и возложения на ответчика обязанности в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение.

Установив нарушение прав истца как потребителя, руководствуясь положениями п. 6 ст. 13, ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 8 000 руб., штраф в размере 4 000 руб.

В целях побуждения ответчика ПАО «Россети Сибирь» к своевременному исполнению обязательства, суд взыскал с него в пользу истца судебную неустойку в размере 50 рублей за каждый календарный день неисполнения решения в части возложения обязанности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по истечении двух месяцев со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

На основании ст.98 ГПК РФ суд взыскал с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца судебные расходы по оформлению нотариальной доверенности 3 100 рублей.

Кроме того, в соответствии со ст.103 ГПК РФ суд взыскал с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину, от уплаты которой освобождён истец при обращении с иском в суд.

Выводы суда в решении подробно мотивированы, полностью соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает возможным согласиться с решением суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы об установлении ответчику неисполнимого срока для технологического присоединения со ссылкой на тяжелое материальное положение ответчика судебная коллегия полагает несостоятельными.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

По смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

Определенный судом двухмесячный срок исполнения решения с момента его вступления в законную силу судебная коллегия находит разумным и достаточным, учитывая, что срок исполнения ответчиком обязательств наступил 28.05.2024, то есть свыше года назад, однако до настоящего времени условия договора ответчиком не выполнены.

При таких обстоятельствах, оснований для установления ответчику большего срока, чем было установлено судом первой инстанции, для осуществления технологического присоединения, судебная коллегия не усматривает, поскольку иное будет существенно ущемлять права потребителя.

Довод жалобы о наличии объективных, не зависящих от ответчика причин невозможности осуществления технологического присоединения в установленный договором срок, судебной коллегией отклоняется, поскольку ответчик в тексте договора сам предусмотрел срок исполнения обязанности по технологическому присоединению и должен был учитывать все технические особенности присоединения конкретного объекта к сетям, а потребитель никак не мог при подписании договора повлиять на установленный этим договором срок.

С учетом изложенного решение суда следует признать законным и обоснованным, оснований для его изменения по доводам апелляционной жалобы судебная коллегия не находит.

Процессуальных нарушений, являющихся основаниями для отмены решения, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14 августа 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО «Россети Сибирь» – без удовлетворения.

Председательствующий: А.Л. Елисеева

Судьи: А.А. Гинтер

Ю.В. Левицкая

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 11.12.2025