К делу 

№2-381/2017

г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 мая 2017 года

город Тихорецк

Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе:

судьи Шевченко Р.А., 

с участием секретаря судебного заседания Кравченко А.В., 

с участием истцов ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

представителей ответчика ООО «Пищепродсоюз» - ФИО5, действующей на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО6, действующего на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя третьего лица – администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района – ФИО7, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Пищепродсоюз» о запрещении строительной деятельности, создающей опасность причинения вреда имуществу, 

УСТАНОВИЛ:

В производстве Тихорецкого городского суда находится гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Пищепродсоюз» о запрещении строительной деятельности, создающей опасность причинения вреда имуществу.

В судебном заседании стороны заявили об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

С целью соблюдения прав всех лиц, участвующих в деле, а также обеспечения безопасности и защиты прав третьих лиц стороны пришли к соглашению о необходимости выполнения строительно-монтажных работ в отношении общей стены ответчика и истцов:

Ответчик обязуется провести следующие работы:

1.1. По гаражу, принадлежащему ФИО2:

- в процессе строительных работ выполняются мероприятия по обеспечению целостности и сохранности стены;

- производятся работы по организации примыкания кровли гаража к стене путем устройства отлива, которое выполняется наклеиванием рубероида к стене и кровле гаража шириной 500 мм.;

- проведение бетонирования угла стены.

1.2. При реконструкции здания ответчика по 

<

адрес> ответчик осуществляет:

- замену общей стены реконструируемого здания и гаражей, принадлежащих ФИО1, ФИО3, ФИО4;

- в целях недопущения порчи конструкций кровли указанных гаражей, на период замены стены, производится устройство временных опорных конструкций (силами и из средств ответчика) с последующим переопиранием кровли (перекрытий) гаражей на вновь возведенную стену;

- для защиты стены от атмосферных осадков выполняется устройство отлива из оцинкованного металла шириной 500 мм.

2. Истцы обязуются:

2.1. В течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу настоящего мирового соглашения, освободить все гаражи (кроме гаража ФИО2) от имеющегося в них имущества и предоставить ответчику свободный доступ в гаражи с целью устройства временных опорных конструкций, демонтажа старой стены и возведению новой стены;

2.2. В период строительных работ по замене стены обеспечивать своими силами и за свой счет сохранность своего имущества;

2.3. До завершения строительства новой стены не осуществлять действий, препятствующих доступу ответчика к заменяемой стене, а также выносу временных опорных конструкций; не препятствовать осмотру стены ответчиком, органами государственной власти и местного самоуправления, не

препятствовать сдаче в эксплуатацию реконструируемого здания и его части (заменяемой стены);

2.4. Не осуществлять действий по повреждению вновь устроенной стены, в том числе пробивка проемов, отверстий и/или крепление конструкций, не предусмотренных проектом; не изменять конструкцию кровли (перекрытий) гаражей, влекущих увеличение нагрузки на стену; не совершать иных действий, которые могут повлечь за собой повреждение реконструированного здания или причинение ему вреда.

3. Ответчик обязан выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего соглашения в течение 20 рабочих дней со дня вступления его в законную силу, по п. 1.2. настоящего мирового соглашения в течение 60 рабочих дней с момента получения доступа в гаражи, согласно п. 2.1. настоящего мирового соглашения, а также отмены принятых по настоящему делу обеспечительных мер и получения разрешения на строительство.

4. Истцы не возражают против снятия обеспечительных мер (ареста) на демонтаж остатков стены здания на земельном участке с кадастровым номером № по адресу 

<

адрес>, с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

По завершению строительных работ стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ.

В случае разногласий по качеству выполненных работ споры подлежат разрешению в соответствии с Законом.

Стороны ходатайствуют о прекращении производства по делу в связи с заключением настоящего мирового соглашения.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц и подлежит утверждению судом.

На основании статей 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 220-221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем ответчика ООО «Пищепродсоюз» - ФИО5 и ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 на следующих условиях:

С целью соблюдения прав всех лиц, участвующих в деле, а также обеспечения безопасности и защиты прав третьих лиц стороны пришли к соглашению о необходимости выполнения строительно-монтажных работ в отношении общей стены ответчика и истцов:

Ответчик обязуется провести следующие работы:

1.1. По гаражу, принадлежащему ФИО2:

- в процессе строительных работ выполняются мероприятия по обеспечению целостности и сохранности стены;

- производятся работы по организации примыкания кровли гаража к стене путем устройства отлива, которое выполняется наклеиванием рубероида к стене и кровле гаража шириной 500 мм.;

- проведение бетонирования угла стены.

1.2. При реконструкции здания ответчика по 

<

адрес> ответчик осуществляет:

- замену общей стены реконструируемого здания и гаражей, принадлежащих ФИО1, ФИО3, ФИО4;

- в целях недопущения порчи конструкций кровли указанных гаражей, на период замены стены, производится устройство временных опорных конструкций (силами и из средств ответчика) с последующим переопиранием кровли (перекрытий) гаражей на вновь возведенную стену;

- для защиты стены от атмосферных осадков выполняется устройство отлива из оцинкованного металла шириной 500 мм.

2. Истцы обязуются:

2.1. В течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу настоящего мирового соглашения, освободить все гаражи (кроме гаража ФИО2) от имеющегося в них имущества и предоставить ответчику свободный доступ в гаражи с целью устройства временных опорных конструкций, демонтажа старой стены и возведению новой стены;

2.2. В период строительных работ по замене стены обеспечивать своими силами и за свой счет сохранность своего имущества;

2.3. До завершения строительства новой стены не осуществлять действий, препятствующих доступу ответчика к заменяемой стене, а также выносу временных опорных конструкций; не препятствовать осмотру стены ответчиком, органами государственной власти и местного самоуправления, не

препятствовать сдаче в эксплуатацию реконструируемого здания и его части (заменяемой стены);

2.4. Не осуществлять действий по повреждению вновь устроенной стены, в том числе пробивка проемов, отверстий и/или крепление конструкций, не предусмотренных проектом; не изменять конструкцию кровли (перекрытий) гаражей, влекущих увеличение нагрузки на стену; не совершать иных действий, которые могут повлечь за собой повреждение реконструированного здания или причинение ему вреда.

3. Ответчик обязан выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего соглашения в течение 20 рабочих дней со дня вступления его в законную силу, по п. 1.2. настоящего мирового соглашения в течение 60 рабочих дней с момента получения доступа в гаражи, согласно п. 2.1. настоящего мирового соглашения, а также отмены принятых по настоящему делу обеспечительных мер и получения разрешения на строительство.

4. Истцы не возражают против снятия обеспечительных мер (ареста) на демонтаж остатков стены здания на земельном участке с кадастровым номером № по адресу 

<

адрес>, с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

По завершению строительных работ стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ.

В случае разногласий по качеству выполненных работ споры подлежат разрешению в соответствии с Законом.

Стороны подтверждают, что им разъяснены последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Стороны также подтверждают, что им понятен смысл указанных положений статьи 221 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.

Прекратить производство по делу по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Пищепродсоюз» о запрещении строительной деятельности, создающей опасность причинения вреда имуществу. 

На определение может быть подана частная жалоба в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение пятнадцати дней.

Судья