УИД: 58RS0027-01-2020-003913-93

Дело №2-1744/2020

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 октября 2020 года г.Пенза 

Октябрьский районный суд г.Пензы в составе

председательствующего судьи Сидорова Т.В.,

при секретаре Хайровой К.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе гражданское дело по иску ООО «Строй-Партнер» к ФИО1, ФИО2, ООО «Хол-Динк-СВА» о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Строй-Партнер» обратилось в суд с вышеназванным иском, указав, что между истцом (заказчик) и ООО «Хол-Динк-СВА» (подрядчик), поручителями которого по договорам от 06.02.2020 г. являются ФИО2 и ФИО1, заключен договор подряда №Ж-3 от 06.02.2020 г., по условиям которого ООО «Хол-Динк-СВА» обязано было выполнить ремонтные работы, срок окончания работ - 25.03.2020 г. Пунктом 8.3 договора предусмотрено, что в случае нарушения по вине подрядчика сроков окончания работ более чем на 10 календарных дней заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 5000 руб. за каждый день просрочки. К установленному сроку работы не были выполнены и сданы заказчику, в связи с чем 29.05.2020 г. истцом в адрес ответчиков была направлена претензия с требованием оплатить сумму неустойки за период с 26.03.2020 г. по 29.05.2020 г., ООО «Хол-Динк-СВА» предлагалось передать результат работ, однако требования истца оставлены без удовлетворения. 07.07.2020 г. в адрес ООО «Хол-Динк-СВА» было направлено уведомление об одностороннем отказе от договора, уплате неустойки которое было получено 08.07.2020 г. На основании изложенного истец просил взыскать солидарно с ответчиков неустойку в размере 605000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 9250 руб.

Представитель истца - ООО «Строй-Партнер» - в судебное заседание не явился, о времени и месте его рассмотрения извещен, в представленном заявлении просил рассмотреть дело в их отсутствие, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного судопроизводства.

Ответчики - ООО «Хол-Динк-СВА», ФИО1, ФИО2 - в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены (возврат корреспонденции с мест жительства и адреса организации свидетельствует о надлежащем извещении), уважительные причины неявки суду не сообщили, о рассмотрении дела в их отсутствие не просили.

Исследовав материалы дела, суд посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков в порядке заочного судопроизводства и считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу ст.314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

На основании ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. … Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п.2 ст.405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии со ст.717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлено, подтверждается представленным в материалы дела в копии соответствующим договором, что ООО «Строй-Партнер» (заказчик-истец по делу) 06.02.2020 г. заключил с ООО «Хол-Динк-СВА» (подрядчик-ответчик по делу) договор подряда №Ж-3, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами ремонт первого этажа в АБК помещениях №№7,8,9,9.1,10�������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????¶���?j�?????????J?J???

В соответствии с п.4.1 договора от 30.01.2020 г. началом выполнения работ является 06.01.2020 г., окончанием - 25.03.2020 г. 

П.8.3 договора установлено, что в случае нарушения подрядчиком сроков окончания работ и иных сроков, предусмотренных договором более чем на 10 календарных дней заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком штрафной неустойки в размере 5000 руб. за каждый день просрочки подрядчиком исполнения соответствующего обязательства.

В судебном заседании установлено, не оспорено ответчиками, что в нарушение указанных условий договора ООО «Хол-Динк-СВА» работы в установленный срок не выполнил, в связи с чем адрес подрядчика, а также ФИО1 и ФИО2, являющихся поручителями ООО «Хол-Динк-СВА» в силу договоров от 06.02.2020 г., были направлены претензии с требованием об оплаты суммы неустойки за период с 26.03.2020 г. по 29.05.2020 г. и передаче ООО «Хол-Динк-СВА» работ по договору подряда. 

07.07.2020 г. истцом в адрес ООО «Хол-Динк-СВА» было направлено уведомление об одностороннем отказе от договора (что предусмотрено п.5.2.9, п.9.5 договора подряда) с требованием об уплате неустойки за просрочку сдачи работ, которое согласно отчету от отслеживании почтовых отправлений было получено адресатом 08.07.2020 г., на основании чего договор подряда №Ж-3 считается расторгнутым с 25.07.2020 г. (в силу ст.450.1 ГК РФ и п.9.7 договора подряда, где указано на уведомление об одностороннем расторжении договора не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения), а сумма неустойки составляет 605000 руб. за период с 26.03.2020 г. по 24.07.2020 г. (121 день*5000 руб.); расчет неустойки судом проверен и признается правильным, ответчиками он не оспорен.

В соответствии со ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части.

Согласно ст.363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником, если иное не предусмотрен договором пор

Как установлено в судебном заседании и следует из представленных в материалы дела договоров поручительства от 06.02.2020 г., ФИО1 и ФИО2 обязались отвечать перед ООО «Строй-Партнер» (кредитором) солидарно с должником (ООО «Хол-Динк-СВА») за исполнение последним всех обязательств в рамках договора подряда №Ж-3 от 06.02.2020 г. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 несут солидарную с ООО «Хол-Динк-СВА» ответственность за неисполнение последним своих обязательств по договору подряда № Ж-3 от 06.02.2020 г., в том числе по оплате неустойки, в связи с чем исковые требования о взыскании с ответчиков солидарно неустойки за указанный в иске период основаны на законе и подлежат удовлетворению, т.к. данных о выплате ответчиками этой суммы истцу не представлено. 

Оснований для снижения размера неустойки суд не усматривает.

Так, на основании ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку; если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении; уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В данном случае суд не считает сумму неустойки явно не соответствующей последствиям нарушения обязательства (исходя из суммы договора и указанной суммы пени, при том, что работы по договору не выполнены даже частично), ее размер согласован сторонами добровольно в договоре, о снижении размера неустойки ответчики не заявляли. 

На основании ст.98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию в равных долях в возврат расходов по оплате государственной пошлины 9250 руб. (т.е. по 3083,33 руб. с каждого).

Руководствуясь статьями 194-199,235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Строй-Партнер» к ФИО1, ФИО2, ООО «Хол-Динк-СВА» о взыскании денежных средств удовлетворить. 

Взыскать солидарно с ООО «Хол-Динк-СВА», ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО «Строй-Партнер» неустойку по договору подряда №Ж-3 от 06.02.2020 года в размере 605 000 рублей.

Взыскать с ООО «Хол-Динк-СВА», ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО «Строй-Партнер» в возврат расходов по уплате государственной пошлины по 3083 рубля 33 копейки с каждого.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения им копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд г.Пензы в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме принято 16.10.2020 года. 

Председательствующий