УИД 04RS0020-01-2025-001060-74 №2-902/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Северобайкальск 21 августа 2025 года

Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в составе судьи Григорьевой В.В., при секретаре-помощнике судьи Андросовой И.Г., 

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязательства, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд, указывая, что является владельцем земельного участка по адресу: 

<

адрес> 18.07.2022 года с ответчиком заключен типовой договор № 20.0300.3801.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с п.11 договора ею уплачены денежные средства в размере 550 рублей, которая уплачена ею 14.07.2022 года, однако ответчик работы по техническому присоединению не выполнил. Т.е. работы по договору ответчиком должны были быть выполнены 19.01.2023 года. Однако до настоящего времени этого не сделано. Ответчик не вправе отказаться от исполнения принятых обязательств. Со ссылкой на нормы ст.309,310 ГК РФ, положения закона Об электроэнергетике, Правила технологического присоединения, просит суд обязать ответчика исполнить обязательство по осуществлению технологического к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес>, в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании истец ФИО2 иск поддержала, пояснив суд, что до настоящего времени ничего не изменилось. При этом полагала возможным с учетом того, что «дачный» сезон 2025 года закончен, установить срок исполнения решения суда в течении 6 месяцев со дня его вступления в законную силу.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

В представленном отзыве на иск ответчик указывает на его необоснованность, не подлежащим удовлетворению, поскольку истец относится к льготной категории по присоединению к сетям, в связи с чем основной объем затрат несет общество. Причина задержки исполнения договора это отсутствие источника финансирования и тяжелое финансовое состояние. В виду чего указывает об отсутствии вины общества. Срок исполнения решения суда просит установить в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Третье лицо по делу АМО «Северо-Байкальский район», надлежаще уведомленное, своего представителя в суд не направило.

Судом определено рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Частью 1 статьи 432 ГК РФ определено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В пункте 3 статьи 401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В силу п.1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В статье 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Как указано в пункте 1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 (далее - Правила присоединения), они определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

Под сетевой организацией согласно пункту 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, понимаются организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно пункту 14 указанных приложений договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Общий порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства предусмотрен пунктами 8, 14 - 15 Правил технологического присоединения.

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).

В соответствии с абз. 13 п. 15 Правил сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

Согласно пункту 16 Правил присоединения договор технологического присоединения содержит следующие существенные условия, в том числе: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению (подпункт «а»); срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подпункт «б»); положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств (подпункт «в»).

Как установлено судом истец является арендатором земельного участка с кадастровым номером №, площадью 766 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, право аренды зарегистрировано 24.12.2021 года.

18.07.2022 года между ФИО2 и ПАО «Россети Сибири» заключен договор № 20.0300.3801.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Сибири» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/ садовый/ дачный дом) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 6 договора составляет 6 месяцев со дня его заключения. Выданы технические условия №8000513230 на имя ФИО2

В силу положений пункта 24 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, оплата за технологическое присоединение истцом произведена 14.07.2022 года.

Факт заключения указанного договора стороной ответчика не отрицается и следует из представленного в суд отзыва на иск.

Следовательно, датой заключения договора является 14.07.2022, датой выполнения сетевой организацией обязательств по договору – 14.01.2023 года.

Действия сторон по заключению соглашения является свободным волеизъявлением истца и ответчика, в том числе и в части установления сроков его выполнения, носит гражданско-правовой характер. 

Таким образом, заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия.

Вместе с тем, ответчиком обязательства по договору не исполнены, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта истца не осуществлено.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ПАО «Россети Сибири» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора, поскольку в предусмотренный договором срок и до настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены.

Порядок изменения и расторжения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям изложены в пунктах 14-17 Договора. 

Исходя из требований иска, истица настаивает на исполнении именно заключенного договора. При этом технические условия выданы сетевой организацией в день заключения договора, следовательно, ответчик полагал условия договора на дату его заключения исполнимыми.

Доводы представителя ответчика об отсутствии источника финансирования и тяжелое финансовое состояние общества препятствующих исполнению условий договора, и как следствие отсутствие вины общества в неисполнении условий договора, суд считает не состоятельными, поскольку нормами действующего законодательства и условиями договора установлены конкретные сроки его исполнения, и заключая договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ответчик полагал необходимым несение расходов по выполнению принятых на себя обязательств.

Сам по себе факт отнесения граждан к льготной категории, как и наличие финансовых трудностей у ответчика, также не свидетельствует об исключительном характере невозможности исполнения условий договора либо наличия иных серьезных препятствий для такового, равно как и об отсутствии вины должника.

Доказательств обратного суду не представлено.

В силу положений ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. №7 указано, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (ч.2 ст.206 ГПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Разрешая вопрос о предоставлении срока для исполнения решения суда, принимая во внимание позицию истца, суд в соответствии с положениями указанной нормы закона полагает возможным установить срок - в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, указанный срок суд полагает разумным, позволяющим исполнить условия договора. 

По указанным основаниям, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Поскольку при подаче иска истцом уплачена госпошлина в размере 3000 рублей, следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию указанная сумма госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязательства – удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора № 20.0300.3801.22 от 18.07.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1, СНИЛС №

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в пользу ФИО1, СНИЛС №, расходы по уплате госпошлины в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Верховный суд Республики Бурятия через Северобайкальский городской суд Республики Бурятия.

Судья В.В. Григорьева 

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме 04.09.2025 года.