РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 ноября 2025 года г.Минусинск Красноярского края,

ул.Гоголя, 66а

Минусинский городской суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Полянской Е.В.,

при секретаре Пилипенко А.К.,

с участием: 

представителя истца ФИО3 – ФИО4, действующего на основании нотариальной доверенности от 21 августа 2021 г., сроком действия три года (л.д. 5),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратилась в Минусинский городской суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, мотивировав свои требования тем, что 13 декабря 2023г. между ФИО1 который приходился ей супругом, и ПАО «Россети Сибирь» был заключен договор №№ об оказании услуг по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: 

<

адрес> – к электросетям, согласно условиям которого заказчик обязуется оплатить услуги в размере 15960,00 руб., а ответчик обязуется оказать услуги в 6-ти месячный срок со дня заключения договора. Договором предусмотрена неустойка за нарушение ответчиком своего обязательства в размере 0,25% от 15960,00 руб. за каждый день просрочки обязательства. Заказчик оплатил услуги по договору 12 декабря 2023г., что подтверждается квитанцией, оформил технические условия №№. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1. умер. Она вступила в наследство после смерти супруга, став правопреемником прав и обязанностей, в том числе, вытекающих из указанного договора. До настоящего времени ответчик свои обязательства по договору не исполнил. Неправомерными действиями ответчика, в виде неисполнения своего обязательства, длительной просрочкой его неисполнения, перед ней как перед потребителем, и нарушения её законных прав, ей причинен моральный вред, выразившийся в моральных страданиях от осознания собственной незащищенности, невозможностью длительное время, больше года, пользоваться электроснабжением, который она оценивает в 50000,00 руб. На основании изложенного, просит суд возложить на ответчика обязательства произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по адресу земельного участка: 

<

адрес>, кадастровый номер №, в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика неустойку на день принятия судом решения, из расчета 0,25% от суммы 15960,00 руб. за каждый день просрочки, начиная с 14 июня 2024г. по день принятия решения суда, компенсацию морального вреда в размере 50000,00 руб., штраф в размере 50% от взысканной суммы (л.д.3-4). 

Истец ФИО3, извещенная о дате месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляла, со слов представителя ФИО4 не возражала о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель истца ФИО4 в судебном заседании поддержал требования своего доверителя по аналогичным основаниям, изложенным в исковом заявлении, дополнительно пояснил, что договор технологического присоединения на имя истца ФИО3, как на правопреемника, не перезаключался. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», извещенный о дате, месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается почтовым уведомлением (л.д.43), в судебное заседание в том числе организованное посредством видео-конференц-связи в Октябрьском районном суде г. Красноярска не явился, об уважительности причины своей неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрении дела и отзыва по иску не представил.

Выслушав представителя истца ФИО4, исследовав письменные доказательства, суд считает требования ФИО3 подлежащими частичному удовлетворению, в следующем объеме и по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено по делу, ФИО1 на основании договора купли-продажи от 12 апреля 2021 г. являлся собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес> (л.д.55). 

13 декабря 2023г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение (л.д.7-9).

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться), по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п. 6 договора, ответчик в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий обязуется осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с его участием осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения такого осмотра, обязуется осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

Пунктом 8 договора на заявителя возложена обязанность: исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после чего, уведомить об этом сетевую организацию; надлежащим образом исполнить обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

ФИО1 исполнил свои обязательства по договору в полном объеме, оплатил услуги сетевой организации в размере 15960,00 руб., что подтверждается чеком по операции от 12 декабря 2023г. (л.д. 13).

В связи с чем, датой заключения договора о технологическом присоединении является – 13 декабря 2023 года и в соответствии с п. 13 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению должен быть осуществлен не позднее 13 июня 2024 года.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 умер, что подтверждается свидетельством о смерти от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 16). 

Как следует из материалов наследственного дела №№, открытого к наследственному имуществу ФИО1., с заявлением о вступлении в наследство обратилась супруга наследователя – ФИО3, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына ФИО2 (л.д.56-102).

1 августа 2025г. ФИО3 и несовершеннолетнему ФИО2 выданы свидетельства о праве на наследство по закону на земельный участок и жилой дом по адресу: 

<

адрес>; согласно которым ФИО3 является собственником 

<

данные изъяты> долей указанного недвижимого имущества, а ФИО2 собственником № доли (л.д.82-87).

Право собственности истца и несовершеннолетнего ФИО2 зарегистрировано в установленном законом порядке, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости 

В соответствии со ст.1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства имущественные права и обязанности. 

Таким образом, к ФИО3, как к супруге наследодателя и наследнику по закону, перешли в том числе права и обязанности по договору технологического присоединения №№ от 13 декабря 2023г., заключенному между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1

В силу пункта 4 статьи 13, пункта 5 статьи 14, пункта 6 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на исполнителе. 

Ответчиком, применительно к требованиям ст. 56 ГПК РФ не представлено суду доказательств того, что обязанности по указанному договору им исполнены в полном объеме согласно условиям договора. 

Каких-либо мер, позволяющих исполнить свои обязательства перед потребителем (истцом), ответчиком предпринято не было, доказательств обратного суду не представлено, длительное бездействие свидетельствует о выходе сетевой организацией за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав и обязанностей и о наложении на заявителя необоснованных ограничений, в том числе связанных с невозможностью получить услугу технологического присоединения в установленные законом и договором сроки. 

Оценивая указанные выше доказательства, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлен факт неисполнения ответчиком перед истцом обязательств по указанному выше договору, тем самым нарушив права последнего. 

Таким образом, поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по договору сетевой организацией в установленный договором срок не исполнены, суд находит требование истца о возложении обязанности осуществить мероприятия по технологическому присоединению обоснованным и подлежащим удовлетворению. В связи с этим, учитывая требования ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить разумный срок для выполнения условий договора – 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

Поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по договору сетевой организацией в установленный договором срок, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлен факт неисполнения в срок, установленный договором, ответчиком перед истцом обязательств по указанному выше договору, тем самым нарушив права последнего, в связи с чем требования о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение условий договора, суд считает обоснованными по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Истцом заявлено о взыскании неустойки за период с 14 июня 2024 года по день рассмотрения дела судом (13 ноября 2025 года), в связи с чем с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца подлежит взысканию неустойка за указанный период (518 дней), что составляет – 20668,2 руб. (15960,00 руб. (плата за технологическое присоединение) х 0,25% (неустойка по договору) х 518 дней (количество дней просрочки)).

Положениями ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

По смыслу пункта 17 договора, период взыскания неустойки ограничен годом только при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Предельный срок взыскания неустойки за нарушение сетевой организацией условий договора о технологическом присоединении законом не ограничен.

На основании ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая, что судом установлено нарушение ответчиком прав потребителя, а также то, что компенсация морального вреда является средством возмещения причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, и не может служить средством его обогащения за счет ответчика, суд исходя из фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, характера нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца ФИО3 5000,00 руб. в счет компенсации морального вреда.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

На основании указанной нормы закона с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере: (20668,2 руб. + 5000,00 руб.) х 50% = 12834,10 руб.

Кроме того, в соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты, которой освобожден истец, в размере: 4000,00 руб. (исходя из цены иска 20668,2 руб.) + 3000,00 руб. за рассмотрение спора, в части морального вреда, всего 7000,00 руб.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН №) исполнить обязательства по технологическому присоединению для электроснабжения жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по адресу земельного участка с кадастровым номером №: Россия, 

<

адрес> в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ г. 

<

данные изъяты>) неустойку в размере 20668,2 руб., компенсацию морального вреда – 5000,00 руб., штраф в сумме 12834,10 руб., всего 38502 (тридцать восемь тысяч пятьсот два рубля) 30 копеек. 

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО3 отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН №) в доход бюджета муниципального образования город Минусинск Красноярского края государственную пошлину в размере 7000 (семь тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы через Минусинский городской суд.

Судья Е.В.Полянская

Мотивированное решение изготовлено 27 ноября 2025 г.